АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-16902/2019

г. Уфа

31 июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 июля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 31 июля 2019 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Перемышлева И. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 3 603 339 руб. 19 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 252 822 руб. 36 коп. с продолжением начисления по ключевой ставке Банка России до погашения задолженности, в случае частичного погашения задолженности, начисляемые на оставшуюся сумму долга 

и по встречному иску

Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца (по первоначальному иску): ФИО2, доверенность № 8 от 25.04.2019г., паспорт;

от ответчика: ФИО3, доверенность № 9 от 01.01.2019г., паспорт.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.  

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

29.05.2019г. на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" к Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" о взыскании задолженности в размере 3 603 339 руб. 19 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 252 822 руб. 36 коп. с продолжением начисления по ключевой ставке Банка России до погашения задолженности, в случае частичного погашения задолженности, начисляемые на оставшуюся сумму долга.

Определением суда 06.06.2019 г. назначено предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 24.07.2019 г.

16 июля 2019 года в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 186 774 руб. 15 коп.

Определением суда 19.07.2019 г. встречное исковое заявление принято, назначено судебное заседание по рассмотрению встречного искового заявления совместно с основным иском на 24.07.2019 г.

19 июля 2019 года от истца (по первоначальному иску) в материалы дела поступило уточненные требования, согласно которого истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 3 303 339 руб. 19 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 272 901 руб. 15 коп. с продолжением начисления по ключевой ставке Банка России до погашения задолженности, в случае частичного погашения задолженности, начисляемые на оставшуюся сумму долга. Уточнение приобщено к материалам дела.

19 июля 2019 года от истца (по первоначальному иску) в материалы дела поступило отзыв на встречное исковое заявление. Отзыв приобщен к материалам дела.   

Судом уточнение от 19.07.2019г. принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчик (по первоначальному иску) исковые требования не оспаривает, долг признает, представил акт № 163 от 30.10.2017г., календарный план. Документы приобщены к материалам дела.

Ответчик (по встречному иску) встречные требования признает в части взыскания неустойки по договорам № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г., № 18-18/161-1-18/СП от 04.2018г.; неустойку, начисленную по договору № 138-1-17/СП от 02.05.2017г. не признает.

Учитывая отсутствие возражений участвующих в деле лиц, суд завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев заявленные требования, изучив материалы дела, заслушав сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как указывает истец по первоначальному иску, между ООО «НПО «Северная археология - 1» (истец, Исполнитель) и ООО НИПИ ОНГМ (ответчик, Заказчик), заключен договор № 154-1-16/СП от 10 июня 2016 года, согласно которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя (передает) выполнение работ по историко-культурной экспертизе земельного участка по объектам:

- «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Первая очередь», ш. 4184;

- «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Вторая очередь», ш. 4185;

- «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Третья очередь», ш. 4186;

- «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Четвертая очередь», ш. 4187.

Согласно 1.2. договора, по окончании Работ Исполнитель предоставляет Заказчику материалы (результаты работ), перечень которых указан в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 4).

За выполненные  работы,  согласно  настоящего  договора,  Заказчик  перечисляет Исполнителю в соответствии со сметой (приложение № 1) сумму, определенную протоколом согласования договорной цены (приложение № 3) в размере – 1 680 531, 01 руб. (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот тридцать один рубль 01 копейка), в т.ч. НДС (18%) 256352, 19 руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два рубля 19 копеек). Сроки выполнения работ отражены в Календарном плане, являющимся приложением к настоящему Договору (Приложение № 2) (п.п. 3.1., 3.2. договора). 

В соответствии с п. 3.3. договора, оплата работы производится в течение 60 календарных дней  с момента подписания акта сдачи-приемки работ и даты получения Заказчиком счета-фактуры.

Согласно Календарных планов (Приложения 2.1 – 2.4 к договору) сторонами согласованы Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения: Историко-культурная экспертиза земельного участка, сроки выполнения: с даты подписания договора до 10.08.2016г., результат: Акт государственной историко-культурной экспертизы, расчетная цена этапа.

В соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 3 к договору) стороны достигли соглашения о величине договорной цены на выполнение работ по историко-культурной экспертизе земельного участка по объектам: Договорная цена устанавливается в размере: 1 680 531,01 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот тридцать один рубль 01 копейка) рублей, в т.ч. НДС (18%) 256 352,19 руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два рубля 19 копеек) рублей. Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2017г. к договору № 154-1-16/СП от 10.06.2016г., Стороны договорились уменьшить стоимость выполнения работ по объектам: «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения   строительства   2016-2017   гг.   Первая очередь», ш. 4184; «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Вторая очередь», ш. 4185 и изложить п.3.1 в следующей редакции: «3.1. За выполненные работы, согласно настоящего договора, Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии со сметой (приложение № 1) сумму, определенную протоколом согласования договорной цены (приложение № 3) в размере - 1 592 067,02 рублей (один миллион пятьсот девяносто две тысячи шестьдесят семь рублей две копейки), в т.ч. НДС (18%) 242 857,68 рублей (двести сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей шестьдесят восемь копеек).

В соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 3 в редакции Дополнительного соглашения № 1) стороны достигли соглашения о величине договорной цены на выполнение работ по историко-культурной экспертизе земельного участка по объектам: Договорная цена устанавливается в размере: - 1 592 067,02 рублей (один миллион пятьсот девяносто две тысячи шестьдесят семь рублей две копейки), в т.ч. НДС (18%) 242 857,68 рублей (двести сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей шестьдесят восемь копеек).

Исполнитель выполнил взятые на себя обязательства на общую сумму 1 592 067,02  руб., что подтверждается подписанными: 

- актом сдачи-приемки выполненных работ (услуг) от 16 марта 2017 года № 34 по выполнению историко-культурной экспертизы земельных участков по объекту «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Первая очередь» ш. 4184, на сумму 505 500,82 руб., просрочка оплаты с 16 мая 2017 года;

- актом сдачи-приемки выполненных работ (услуг) от 16 марта 2017 года № 35 по выполнению историко-культурной экспертизы земельных участков по объекту «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Вторая очередь» ш. 4185, на сумму 350 649,81 руб., просрочка оплаты с 16 мая 2017 года;

- актом сдачи-приемки выполненных работ (услуг) от 13 июля 2017 года № 111 по выполнению историко-культурной экспертизы земельных участков по объекту «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Третья очередь» ш. 4186, на сумму 455 265,94 руб., просрочка оплаты с 12 сентября 2017 года;

- актом сдачи-приемки выполненных работ (услуг) от 13 июля 2017 года № 112 по выполнению историко-культурной экспертизы земельных участков по объекту «Трубопроводы Южно-Сургутского месторождения строительства 2016-2017 гг. Четвертая очередь» ш. 4187, на сумму 280 650,45 руб., просрочка оплаты с 12 сентября 2017 года.

ООО «НПО «Северная археология - 1» выполнило свои обязательства по договору № 154-1-16/СП от 10.06.2016г. на сумму 1 592 067,02 руб.

ООО НИПИ ОНГМ произвело оплату выполненных работ на сумму 1 067 575,26 руб., по платежным поручениям от 30 января 2018 года № 165 на сумму 280 650,45 руб., от 16 февраля 2018 года № 354 на сумму 100 000 руб., от 21 февраля 2018 года № 428 на сумму 250 649,81 руб.,  от 16 августа 2018 года № 995 на сумму 276 275 руб., от 16 августа 2018 года № 1020 на сумму 160 000 руб. 

Задолженность ООО НИПИ ОНГМ по договору № 154-1-16/СП от 10.06.2016г. составляет 524 491,76 руб.

Согласно расчету истца, сумма процентов по договору № 154-1-16/СП от 10.06.2016г. за период с 16.05.2017г. по 24.07.2019г. составляет 152 886 руб. 47 коп.

02 мая 2017 года между ООО «НПО «Северная археология - 1» (истец, Исполнитель) и ООО НИПИ ОНГМ (ответчик, Заказчик), заключен договор № 138-1-17/СП, согласно которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы историко-культурным изысканиям и государственной историко-культурной экспертизе земельных участков по проекту: «Обустройство Восточно-Мессояхского месторождения. Кусты скважин №№ 22, 23, 40, 44, 53, 61, 62,63, 64, 78, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91,92, 111,112, 113 с коммуникациями» для нужд АО «Мессояханефтегаз» в соответствии с условиями Договора. Техническим заданием (Приложение №1) и календарным планом (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и в размере определенном настоящим Договором.

Результатом указанных в п.2.1 работ по настоящему Договору является акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию строительных работ в ходе строительства объекта и заключение службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - Югры в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).   

Согласно пункту 4.1 договора, стоимость выполняемых работ по Договору (договорная цена) составляет 1 420 510,98 (Один миллион четыреста двадцать тысяч пятьсот десять рублей 98 копеек) рублей. В том числе НДС 18% - 216 688,11 (Двести шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 11 копеек) рублей, определенная на основании сводной сметы (Приложение №3).

Согласно Календарному плану (Приложение 2 к договору) сторонами согласованы Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения: Историко-культурные изыскания и государственная историко-культурная экспертиза земельных участков по объекту: Обустройство Восточно-Мессояхского месторождения. Кусты скважин №№ 22, 23, 40, 44, 53, 61, 62, 63, 64, 78, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91,92, 111, 112, 113с коммуникациями» для нужд АО «Мессояханефтегаз», сроки выполнения: 02.05.2017 – 20.09.2017, результат: Акт государственной историко-культурной экспертизы, расчетная цена этапа с учетом НДС (руб.) и затратами на вертолетный транспорт: 1 420 510,98 руб.

ООО «НПО «Северная археология - 1» выполнило взятые на себя обязательства, что подтверждается подписанным актом сдачи-приемки выполненных работ за период с 02.05.2017 по 20.09.2017 по договору № 138-1-17/СП от 02 мая 2017 года на выполнение работ по историко-культурным изысканиям и государственной историко-культурной экспертизе земельных участков по проекту: «Обустройство Восточно-Мессояхского месторождения. Кусты скважин №№ 22, 23, 40, 44, 53, 61, 62, 63, 64, 78, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 111, 112, 113 с коммуникациями» для нужд АО «Мессояханефтегаз» от 30 октября 2017 года № 163 на сумму 1 420 510,98 руб., просрочка оплаты с 27 декабря 2017 года.

 ООО «НПО «Северная археология - 1» выполнило свои обязательства по договору № 138-1-17/СП от 02.05.2017г. на сумму 1 420 510,98 руб.

ООО НИПИ ОНГМ оплату выполненных работ не произвел. Задолженность по договору № 138-1-17/СП от 02.05.2017г. составляет 1 420 510,98 руб.

Согласно расчету истца, сумма процентов по договору № 138-1-17/СП от 02.05.2017г. за период с 27.12.2017г. по 25.01.2018г. составляет 9 048 руб. 46 коп.

Также, между ООО «НПО «Северная археология - 1» (истец, Подрядчик) и ООО НИПИ ОНГМ (ответчик, Заказчик) заключен договор на выполнение историко-культурной экспертизы № 17-33/282-1-17/СП от 11 сентября 2017 года, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по государственной историко-культурной экспертизе по объектам: «Трубопроводы Мамонтовского место-рождения, целевой программы строительства 2019 года, первая очередь», «Трубопроводы Мамонтовского месторождения, целевой программы строительства, вторая очередь» в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложения № 2.1, 2.2) и Расчетом-обоснованием (Приложения № 3.1, 3.2), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и размере, определенном Договором.

Согласно пункту 3.1 договора, общая стоимость работ по договору составляет 407 570,14 руб. (четыреста семь тысяч пятьсот семьдесят рублей четырнадцать копеек), в т.ч. НДС (18%) 62 171,72 руб. (шестьдесят две тысячи сто семьдесят один рубль семьдесят две копейки). 

В соответствии с п. 3.2 договора, оплата производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно Календарным планам (Приложения 2.1 – 2.2 к договору) сторонами согласованы Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения: Государственная историко-культурная экспертиза земельных участков по объектам, сроки выполнения: 11.09.2017 – 11.12.2017, результат: Акт государственной историко-культурной экспертизы, расчетная цена этапа с учетом НДС (руб.).

ООО «НПО «Северная археология - 1» выполнило взятые на себя обязательства: Государственную историко-культурную экспертизу по объекту «Трубопроводы Мамонтовского месторождения, целевой программы строительства, вторая очередь», что подтверждается подписанным актом от 26 декабря 2018 года № 239 на сумму 236 000 руб., просрочка оплаты с 26 января 2019 года.

 ООО НИПИ ОНГМ оплату выполненных работ не произвел. Задолженность по договору № 17-33/282-1-17/СП от 11.09.2017г. составляет 236 000,00 руб.

Согласно расчету истца, сумма процентов по договору № 17-33/282-1-17/СП от 11.09.2017г. за период с 26.01.2019г. по 24.07.2019г. составляет 8 958 руб. 30 коп.

02 октября 2017 года ООО «НПО «Северная археология - 1» (истец, Подрядчик) и ООО НИПИ ОНГМ (ответчик, Заказчик) заключен договор на выполнение историко-культурной экспертизы № 312-1-17/СП/17-41, согласно которого  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по государственной историко-культурной экспертизе по объектам: «Причалы Юганского региона». «Причал в районе куста № 38 Угутского месторождения» в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2.1, 2.2) и Расчетом-обоснованием (Приложение № 3.1, 3.2), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и размере, определенном Договором.

Согласно пункту 3.1 договора, общая стоимость работ по договору составляет – 748 818,23 руб. (семьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемнадцать рублей двадцать три копейки в т.ч. НДС (18%) 114 226,51 руб. (сто четырнадцать тысяч двести двадцать рублей пятьдесят одна копейка).

Согласно пункту 3.2 договора оплата производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно Календарным планам (Приложения 2.1 – 2.2 к договору) сторонами согласованы Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения: Государственная историко-культурная экспертиза земельных участков по объектам, сроки выполнения: 02.10.2017 – 30.11.2017; результат: Акт государственной историко-культурной экспертизы, расчетная цена этапа с учетом НДС (руб.); Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения: Получение заключения Службы госохраны ОКН ХМАО-Югры, сроки выполнения: 30.11.2017 – 29.12.2017; , результат: Заключение Службы госохраны ОКН ХМАО-Югры, расчетная цена этапа с учетом НДС (руб.).

ООО «НПО «Северная археология - 1» выполнило взятые на себя обязательства: Государственная историко-культурной экспертизе по объектам: «Причалы Юганского региона». «Причал в районе куста № 38 Угутского месторождения», что подтверждается подписанным актом от 03 мая 2018 года № 35 на сумму 748 818,23 руб., просрочка оплаты с 5 июня 2018 года.

 ООО НИПИ ОНГМ оплату выполненных работ не произвел. Задолженность по договору № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г. составляет 748 818,23 руб.

Согласно расчету истца, сумма процентов по договору № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г. за период с 05.06.2018г. по 24.07.2019г. составляет 64 254 руб. 76 коп.

Кроме того, ООО «НПО «Северная археология - 1» (истец, Подрядчик) и ООО НИПИ ОНГМ (ответчик, Заказчик) заключен договор на выполнение историко-культурной экспертизы № 18-18/161-1-18/СП от 04 июля 2018 года, согласно которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по государственной историко-культурной экспертизе по объекту: «Красноленинское НГКМ. ФИО4. Мост в районе ДНС-16. Реконструкция» в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2) и Расчетом-обоснованием (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и размере, определенном Договор.

Согласно пункту 3.1 договора, общая стоимость работ по договору составляет – 276 275,00 руб. (двести семьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) 42 143,64 руб. (сорок две тысячи сто сорок три рубля 64 копейки).

Согласно пункту 3.2 договора, оплата производится со 100% предоплатой в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно Календарному плану (Приложения 2 к договору) сторонами согласованы Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения: Государственная историко-культурная экспертиза земельных участков по объектам, сроки выполнения: 04.07.2018 – 10.10.2018, результат: Акт государственной историко-культурной экспертизы.

ООО «НПО «Северная археология - 1» выполнило взятые на себя обязательства: Государственную историко-культурную экспертизу по объекту «Красноленинское НГКМ. ФИО4. Мост в районе ДНС-16. Реконструкция», что подтверждается подписанным актом от 15 октября 2018 года № 167 на сумму 276 275 руб., просрочка оплаты с 10 июля 2018 года.

 ООО НИПИ ОНГМ оплату выполненных работ не произвел. Задолженность по договору № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г. составляет 276 275,00 руб.

Согласно расчету истца, сумма процентов по договору № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г. за период с 10.07.2018г. по 24.07.2019г. составляет 21 785 руб. 99 коп.

24 сентября 2018 года ООО «НПО «Северная археология - 1» (истец, Подрядчик) и ООО НИПИ ОНГМ (ответчик, Заказчик) заключен договор на выполнение историко-культурной экспертизы № 18-34/245-1-18/СП, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по государственной историко-культурной экспертизе по объекту: «Красноленинское НГКМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 77» в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2) и Расчетом-обоснованием (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и размере, определенном Договором.

Согласно пункту 3.1 договора, общая стоимость работ по договору составляет  - 397 243,22 руб. (триста девяносто семь тысяч двести сорок три рубля двадцать две копейки), в т.ч. НДС (18%) 60 596,42 руб. (шестьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть рублей сорок две копейки).

 Согласно пункту 3.2 договора, оплата производится со 100% предоплатой в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно Календарному плану (Приложения 2 к договору) сторонами согласованы Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения: Государственная историко-культурная экспертиза земельных участков по объектам, сроки выполнения: 24.09.2018 – 31.12.2018, результат: Акт государственной историко-культурной экспертизы.

ООО «НПО «Северная археология - 1» выполнило взятые на себя обязательства: Государственная историко-культурную экспертизу по объекту «Красноленинское НГКМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Куст скважин № 77», что подтверждается подписанным актом от 26 декабря 2018 года № 232 на сумму 397 243,22 руб., просрочка оплаты с 28 сентября 2018 года.

 ООО НИПИ ОНГМ оплату выполненных работ произвел частично на сумму 300 000,00 руб. по платежному поручению № 210 от 27.02.2019г. Задолженность по договору № 18-34/245-1-18/СП от 24.09.2018г. составляет 97 243,22  руб.

Согласно расчету истца, сумма процентов по договору № 18-34/245-1-18/СП от 24.09.2018г. за период с 28.09.2018г. по 24.07.2019г. составляет 15 967 руб. 17 коп.

Истец указал, что задолженность ответчика по договорам составляет 3 603 339,19 руб., проценты – 272 901 руб. 15 коп.

В целях соблюдения претензионного порядка разрешения споров истцом в адрес ответчика была направлена претензия (исх. 95 от 11.04.2019г.) об оплате основного долга, а также процентов. Ответчиком претензия оставлена без удовлетворения.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правоотношения по возмездному оказанию услуг регулируются положениями главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно ст. 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные им работы после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы.

Исходя из положений ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащим доказательством выполнения работ, их стоимости по договору подряда являются акты приемки выполненных работ.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации)

В качестве обоснования заявленных требований истцом представлены акты сдачи-приемки работ от 16 марта 2017 года № 34, от 16 марта 2017 года № 35, от 13 июля 2017 года № 111, от 13 июля 2017 года № 112, от 30 октября 2017 года № 163, от 26 декабря 2018 года № 239, от 03 мая 2018 года № 35, от 15 октября 2018 года № 167, от 26 декабря 2018 года № 232.

Суд признает факт выполнения работ истцом установленным. Акты сдачи-приемки работ содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости. Данные документы подписаны представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика, что свидетельствуют о выполнении работ подрядчиком (истцом), принятии их результата заказчиком (ответчиком).

Ответчик сумму долга не оспаривает, признает, контррасчет не представил.

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании суммы долга в размере 3 303 339 руб. 19 коп. суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 24.07.2019г. в размере 272 901 руб. 15 коп.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Поскольку представленными доказательствами установлена вина ответчика в нарушении денежного обязательства,  требования истца о применении гражданско-правовой ответственности в форме уплаты ответчиком процентов за пользование чужими денежными средствами, являются обоснованными.

Произведенный истцом расчет процентов судом проверен и признан верным.

Ответчик расчет истца признает, не оспаривает, контррасчет процентов не представил.

Рассмотрев исковые требования в части процентов, суд также признает обоснованной и подлежащей взысканию с ответчика сумму процентов в размере 272 901 руб. 15 коп.

Также истец просит взыскать проценты по ст. 395 ГК РФ с 25.07.2019г. на сумму долга по день фактической оплаты долга.

В силу пункта 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

На основании изложенного, суд также присуждает истцу проценты за пользование чужими денежными средствами с 25.07.2019г. на сумму долга по день фактической оплаты долга.

При таких обстоятельствах первоначальные требования истца о взыскании долга и процентов подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В свою очередь ответчик заявил встречное исковое заявление, в котором просит взыскать неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 186 774 руб. 15 коп.

В обоснование заявленных встречных требований истец (по встречному иску) пояснил, что между ООО «НПО «Северная археология - 1» (Подрядчик) и ООО НИПИ ОНГМ (Заказчик) заключены договоры на выполнение историко-культурной экспертизы № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г., № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г., № 138-1-17/СП от 02.05.2017 г.

02 октября 2017 года между ООО «НПО «Северная археология - 1» (Подрядчик) и ООО НИПИ ОНГМ (Заказчик) заключен договор на выполнение историко-культурной экспертизы № 312-1-17/СП/17-41, согласно которого  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по государственной историко-культурной экспертизе по объектам: «Причалы Юганского региона». «Причал в районе куста № 38 Угутского месторождения» в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2.1, 2.2) и Расчетом-обоснованием (Приложение № 3.1, 3.2), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и размере, определенном Договором.

В соответствии с календарным планом (Приложение № 2.1 к договору № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г.), объект: «Причалы Юганского региона (ш. 4845)»), сроки выполнения работ: 11.09.2017г. – 29.12.2017г., стоимость работ – 282 550,88 руб., в т.ч. НДС 18% 43 100,98руб.

В соответствии с календарным планом (Приложение № 2.2 к договору № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г.), объект: «Причал в районе куста № 38 Угутского месторождения (ш. 4844)»), сроки выполнения работ: 11.09.2017г. – 29.12.2017г., стоимость работ – 466 267,35 руб., в т.ч. НДС 18% 71 125,53 руб.

Согласно акту № 35 от 03.05.2018г. на сумму 748 818,23 руб., в т.ч. НДС 18 % 114 226,51 руб., по объектам: «Причалы Юганского региона (ш. 4845)» и «Причал в районе куста № 38 Угутского месторождения (ш. 4844)», количество дней просрочки составляет 26 дней с 30.12.2017г. по 24.01.2018г.

Согласно п. 8.2 договора № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г. в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ (этапа работ), установленного в календарном плане, заказчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате штрафа в размере 0,1% от стоимости невыполненного этапа работ за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца (по встречному иску), сумма неустойки по договору № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г. за период с 30.12.2017г. по 24.01.2018г. составляет 19 469,27 руб. (748 818,23 х 26 х 0,1%).

Между ООО «НПО «Северная археология - 1» (истец, Подрядчик) и ООО НИПИ ОНГМ (ответчик, Заказчик) заключен договор на выполнение историко-культурной экспертизы № 18-18/161-1-18/СП от 04 июля 2018 года, согласно которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по государственной историко-культурной экспертизе по объекту: «Красноленинское НГКМ. ФИО4. Мост в районе ДНС-16. Реконструкция» в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2) и Расчетом-обоснованием (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и размере, определенном Договор.

В соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к договору № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г.), объект: «Красноленинское НГКМ. ФИО4. Мост в районе ДНС-16. Реконструкция») сроки выполнения работ: с 04.07.2018г. по 10.10.2018г., стоимость работ – 276 275,00 руб., в т.ч. НДС 18% 42 143,64 руб.

Согласно акту № 167 от 15.10.2018г. на сумму 276 275,00 руб., в т.ч. НДС 18% 42 143,64 руб., количество дней просрочки составляет 4 дня с 11.10.2018г. по 14.10.2018г.

Согласно п. 8.2 договора № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г. в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ (этапа работ), установленного в календарном плане, заказчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате штрафа в размере 0,1% от стоимости невыполненного этапа работ за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца (по встречному иску), сумма неустойки по договору № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г. за период с 11.10.2018г. по 14.10.2018г. составляет 1 105,10 руб. (276 275,00 х 4 х 0,1%).

02 мая 2017 года между ООО «НПО «Северная археология - 1» (истец, Исполнитель) и ООО НИПИ ОНГМ (ответчик, Заказчик), заключен договор № 138-1-17/СП, согласно которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы историко-культурным изысканиям и государственной историко-культурной экспертизе земельных участков по проекту: «Обустройство Восточно-Мессояхского месторождения. Кусты скважин №№ 22, 23, 40, 44, 53, 61, 62,63, 64, 78, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91,92, 111,112, 113 с коммуникациями» для нужд АО «Мессояханефтегаз» в соответствии с условиями Договора. Техническим заданием (Приложение №1) и календарным планом (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и в размере определенном настоящим Договором.

В соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к договору № 138-1-17/СП от 02.05.2017г.), объект: «Обустройство Восточно-Мессояхского месторождения. Кусты скважин №№ 22, 23, 40, 44, 53, 61, 62,63, 64, 78, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91,92, 111,112, 113 с коммуникациями» для нужд АО «Мессояханефтегаз», сроки выполнения работ: с 02.05.2017г. по 20.09.2017г., стоимость работ – 1 420 510,98 руб., в т.ч. НДС 18% 216 688,12 руб.

Согласно акту № 163 от 30.10.2017г. на сумму 1 420 510,98 руб., в т.ч. НДС 18% 216 688,12 руб., количество дней просрочки составляет 39 дней с 21.09.2017г. по 29.10.2017г.

Согласно п. 11.13.1 договора № 138-1-17/СП от 02.05.2017 г. в случае если подрядчик допустил нарушение предусмотренных сроков выполнения этапов работ, включая срок начала и окончания выполнения этапа работ, заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,3 % за каждый день просрочки от стоимости нарушенного этапа работ по договору.

Согласно расчету истца (по встречному иску), сумма неустойки по договору № 138-1-17/СП от 02.05.2017г. за период с 21.09.2017г. по 29.10.2017г. составляет 166 199,78 руб. (1 420 510,98 х 39 х 0,3%). 

Согласно подписанным сторонами актам сдачи-приемки работ ООО «НПО «Северная археология-1» допустило просрочку в сроках выполнения этапов работ по вышеуказанным договорам.

Истец (по встречному иску) указал, что общая сумма неустойки за нарушение срока выполнения работ составляет 186 774 руб. 15 коп.

ООО НИПИ ОНГМ направило в адрес ООО «НПО «Северная археология-1» претензию об оплате договорной неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статьям 432, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации существенными условиями договора подряда являются предмет договора и сроки выполнения работ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статей 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны выполняться надлежащим образом и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве способов обеспечения исполнения обязательств предусмотрены неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор обязан доказать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 8.2 договоров № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г. и № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г. в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ (этапа работ), установленного в календарном плане, заказчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате штрафа в размере 0,1% от стоимости невыполненного этапа работ за каждый день просрочки. 

Согласно п. 11.13.1 договора № 138-1-17/СП от 02.05.2017 г. в случае если подрядчик допустил нарушение предусмотренных сроков выполнения этапов работ, включая срок начала и окончания выполнения этапа работ, заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,3 % за каждый день просрочки от стоимости нарушенного этапа работ по договору. 

Поскольку несвоевременное исполнение ответчиком обязательства по выполнению работ подтверждено материалами дела, требование истца о взыскании неустойки, основания, порядок начисления и размер которой согласованы сторонами в п. 8.2 договоров № 312-1-17/СП/17-41 от 02.10.2017г. и № 18-18/161-1-18/СП от 04.07.2018г., п. 11.13.1 договора № 138-1-17/СП от 02.05.2017 г., является обоснованным.

Произведенный истцом (по встречному иску) расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Ответчик (по встречному иску) расчет неустойки не оспорил, контррасчет не представил.

Довод ответчика о том, что нарушения сроков выполнения работ по договору № 138-1-17/СП от 02.05.2017 г. не было, отклоняется судом, как необоснованный и противоречащий материалам дела.

На основании изложенного, суд встречные исковые требования о взыскании неустойку за нарушение срока выполнения работ признает обоснованными подлежащими удовлетворению в размере 186 774 руб. 15 коп.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку первоначальные и встречные исковые требования подлежат удовлетворению, суд в порядке части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производит зачет встречных требований.

В результате зачета по первоначальному и встречному искам с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) подлежит взысканию сумма в размере 3 423 744 руб. 19 коп.

В связи с уменьшением размера исковых требований по встречному иску, ООО "НПО "Северная археология-1" из федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина в размере 1 400 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 303 339 руб. 19 коп. долга, 272 901 руб. 15 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с продолжением их начисления с 25 июля 2019 года по ключевой ставке Банка России до фактического погашения задолженности на сумму долга и 40 881 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 400 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению № 573 от 13.05.2019 г.

2. Встречные исковые требования – удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 186 774 руб. 15 коп. неустойки и 6 603 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

3. В результате зачета первоначального и встречного иска:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму в размере 3 423 744 руб. 19 коп.

3. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья       И. В. Перемышлев