АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-20413/2022 

Р Е Ш Е Н И Е  

именем Российской Федерации 

резолютивная часть 

26 декабря 2024 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе  

судьи Беляевой Л.В.,  

при ведении протокола заседания помощником судьи Букреевой О.В. рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей  

истца по доверенности от 10.10.2024 ФИО1, ответчика по доверенности № 3305-юр от 12.07.2023 ФИО2,  

по доверенности № 2490-юр от 30.05.2023 ФИО3,  

по доверенности № 2485-юр от 30.05.2023 ФИО4, дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СДС -  

Строй», г. Кемерово (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к государственному казенному учреждению «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», г. Кемерово (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании внести изменения в государственный контракт № 4с от 29.11.2021 г.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить. 

1. Обязать Государственное казенное учреждение «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» внести изменения в государственный контракт № 4с от 29.11.2021 г.:  

1) изложив пункт абзацы первый - четвертый пункта 2.1. Договора в следующей редакции:  

«2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта составляет: 52 082 311 510 (пятьдесят два миллиарда восемьдесят два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот десять) руб. 00 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) 8 680 385 250 руб. 00 коп.  

Цена контракта также включает в себя: 

- стоимость работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий в размере 1 331 466 599 (один миллиард триста тридцать один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто девять) руб. 00 коп.;  

- стоимость работ по строительству Объекта в размере 50 750 844 911 (пятьдесят миллиардов семьсот пятьдесят миллионов восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот одиннадцать) руб. 00 коп»;  

2) изложив Расчет цены контракта, являющийся приложением № 4 к Контракту, в новой редакции:  

Приложение № 4 

к государственному контракту № 4с от 29.11.2021 г. 

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

по выполнению работ по проектированию, строительству платной автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области-Кузбасса Северо-Западный обход города Кемерово  

N 

Наименование работ и затрат  

Стоимость в руб.  

п/п 

1 

2 

3 

1 

Стоимость проектных и изыскательских работ  

1 109 555 500,00

2 

41 614 617 250,00

Стоимость строительно-монтажных работ (без оборудования) 

3 

Стоимость оборудования 

677 753 510,00

4 

НДС 20% 

8 680 385 250,00

Цена контракта, с НДС 

52 082 311 510,00

Взыскать с государственного казенного учреждения «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», г. Кемерово (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СДС - Строй», г. Кемерово (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 12000 руб., расходы на проведение экспертизы в размере 129 760 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья Л.В. Беляева