30/2021-27277(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-4352/2020

г. Оренбург

04 марта 2021 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Вернигоровой О.А., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  открытом судебном разбирательстве дело по исковому заявлению  

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации  Сорочинского городского округа Оренбургской области, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Оренбургская область, г. Сорочинск,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Еврострой", ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Оренбургская область, г. Сорочинск,  

об обязании исполнить гарантийные обязательства по  муниципальному контракту от 20.07.2018 № Ф.2018.347486;  

о взыскании неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение  обязательств по муниципальному контракту от 20.07.2018г.   № Ф.2018.347486 в сумме 549 557 рублей 70 копеек;  

о взыскании судебной неустойки в размере 3 000 рублей за  каждый день просрочки исполнения ответчиком вступившего в  законную силу решения суда (с учетом уточнений).  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

удовлетворить исковые требования Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского  округа Оренбургской области.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  "Еврострой" в течение 30 календарных дней со дня вступления в  законную силу решения арбитражного суда по делу № А47-4352/2020,  

но не ранее 01.05.2021 и не позднее 30.09.2021, безвозмездно  устранить дефекты асфальтобетонного покрытия на общей площади  305,96 кв.м в "Парке имени 70 лет Великой Победы", расположенном  по адресу: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Ворошилова, 15  "П", а именно:  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия дорожек и  тротуаров в спортивной зоне (ориентир - футбольное поле и площадка  для волейбола): трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия пешеходных дорожек и тротуара проходящего вокруг  футбольного поля; трещины, выкрашивание, просадки по краям (на  примыкании с бордюрным камням) асфальтобетонного покрытия  пешеходной дорожки проходящей мимо площадки для волейбола, на  общей площади 130,34 кв.м на участках №№ 1, 2, 3, 4, 5 (согласно  номеров, указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 1 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  3,8м×0,3м, площадью 1,14 кв.м;  

- на участке № 2 устранить выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 8м×1,5м, площадью 12 кв.м;  

- на участке № 3 устранить трещины, выкрашивание,  выщербление асфальтобетонного покрытия тротуара на участке  размером 5м×3м, площадью 15 кв.м;  

- на участке № 3 устранить разрушение асфальтобетонного  покрытия тротуара (трещины, выкрашивание) на участке размером  19м×0,2м, площадью 3,8 кв.м;  

- на участке № 5 устранить трещины, просадки, неровности,  выкрашивание асфальтобетонного покрытия тротуара на участке  размером 32,8м×3м, площадью 98,4 кв.м.  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия дорожек и  тротуаров в зоне активного отдыха (ориентир - конструкция "Мяч" и  спортивная площадка): выкрашивание асфальтобетонного покрытия  дорожки, проходящей мимо конструкции "Мяч"; трещины,  выкрашивание, просадки по краям (на примыкании с бордюрным  камнем) асфальтобетонного покрытия дорожки разделяющей  спортивную зону и зону активного отдыха; трещины, выкрашивание,  просадки по краям асфальтобетонного покрытия тротуаров,  соединяющих спортивную площадку с пешеходными дорожками, на  общей площади 134,29 кв.м. на участках №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  (согласно номеров, указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 6 устранить выкрашивание асфальтобетонного  покрытия посередине пешеходной дорожки на участке размером 24  м×3,7 м, площадью 88,8 кв.м;  

- на участке № 7 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки с правой стороны  на участке размером 38м×0,4м, площадью 15,2 кв.м;  

- на участке № 8 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки с левой стороны  на участке размером 14м×0,4м, площадью 5,6 кв.м;  

- на участке № 9 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  6,7м×1,5м, площадью 10,05 кв.м;  

- на участке № 10 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  5,6м×1,5м, площадью 8,4 кв.м;  

- на участке № 11 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  6,7м×0,3м, площадью 2,01 кв.м;  

- на участке № 12 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  6,6м×0,3м, площадью 1,98 кв.м;  

- на участке № 13 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара под скамейкой на участке  размером 7,5м×0,3м, площадью 2,25 кв.м;  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия тротуаров в  прогулочной зоне (ориентир - конструкция "Звезда"): трещины,  просадка по краям (на примыкании с бордюрным камнем),  выкрашивание асфальтобетонного покрытия тротуара, проходящего  мимо конструкции "Звезда", на общей площади 41,33 кв.м на участках   №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (согласно номеров, указанных в карте  дефектов), в том числе:  

- на участке № 14 устранить провал (проседание  асфальтобетонного покрытия) тротуара на участке размером 1м×2м,  площадью 2 кв.м;  

- на участке № 15 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия по правому краю тротуара на участке  размером 9,2м×0,25м., площадью 2,3 кв.м;  

- на участке № 16 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером 3,7м×2м,  площадью 7,4 кв.м;  

- на участке № 17 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером 26м×0,3м,  площадью 7,8 кв.м;  

- на участке № 18 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером 6,7м×2м,  площадью 13,4 кв.м;  

- на участке № 19 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  2,7м×0,3м, площадью 0,81 кв.м;  

- на участке № 20 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  9,6м×0,3м, площадью 2,88 кв.м;  

- на участке № 21 устранить трещины, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  23,7м×0,2м, площадью 4,74 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Еврострой" в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Сорочинского городского округа неустойку (штраф) за  ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному  контракту от 20.07.2018г. № Ф.2018.347486 в сумме 549 557 руб. 70  коп.  

В случае несвоевременного исполнения судебного акта по делу   № А47-4352/2020 в части устранения обществом с ограниченной  ответственностью "Еврострой" дефектов работ, взыскать с общества с  ограниченной ответственностью "Еврострой" в пользу Управления  жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского  городского округа Оренбургской области компенсацию за ожидание  соответствующего исполнения в виде твердой денежной суммы в  размере 3000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 01.10.2021 до  его фактического исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Еврострой" в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 19 991 руб.  

Исполнительные листы выдать взыскателю, по его заявлению, и  налоговой инспекции в порядке, установленном статьями 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд  (город Челябинск) в срок, не превышающий месяц со дня его  принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его  размещения на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме  ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном  носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня  

поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья О.А. Вернигорова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.10.2020 7:35:56

 Кому выдана Вернигорова Ольга Алексеевна