1020/2021-6797(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-9049/2018

г. Чебоксары

26 января 2021 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Владимировой О.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Спецкомплекс" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 428020, г. Чебоксары, Чувашская  Республика, проезд Базовый, д. 22, оф. 202)  

к некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта  многоквартирных домов" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 428003,  г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Энгельса, д. 42 а)  

о взыскании 5520334 руб. 

и по встречному иску об обязании устранить недостатки,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора:  

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, общество с ограниченной ответственностью "Калита", 

общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Наш дом",  

общество с ограниченной ответственностью "ГорИСС" (Городские инженерные  сети и системы),  

Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики, 

Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной организации  "Всероссийское добровольное пожарное общество",  

Федеральное государственное бюджетное учреждение судебно-экспертное  учреждение федеральной противопожарной службы испытательная пожарная  лаборатория по Чувашской Республике — Чувашии,  

ФИО5, г. Чебоксары, при участии 

от истца: Степановой А.А. по доверенности от 11.01.2021 (сроком до 31.12.2021),  Сапожникова С.П. по доверенности от 11.01.2021 (сроком до 31.12.2021),  

от ответчика: ФИО8 по доверенности от 31.12.2019 (сроком по  31.12.2021), ФИО9 по доверенности от 20.01.2021 № 3 (сроком по  31.12.2021),  

от третьего лица ООО "ГорИСС": ФИО10 по доверенности от 26.01.2021  (сроком по 26.02.2021),  

от третьего лица ООО УК "Наш дом": ФИО11 по доверенности от  11.01.2021 (сроком до 31.12.2021),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с некоммерческой организации "Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов" в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Спецкомплекс" 4`694`321 (Четыре миллиона шестьсот  девяносто четыре тысячи триста двадцать один) рубль долга, 484`806 (Четыреста  восемьдесят четыре тысячи восемьсот шесть) рублей неустойки за период с  29.01.2019 по 26.01.2021, 93`820 (Девяносто три тысячи восемьсот двадцать)  рублей расходов на представителя, 84`505 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот  пять) рублей 37 копеек расходов по экспертизе; с 27.01.2021 начисление неустойки  производить по день фактической оплаты долга в размере 1/300 (одной трехсотой)  ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты,  от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с некоммерческой организации "Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов" в доход федерального бюджета  47`474 (Сорок семь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля государственной  пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спецкомплекс" в  доход федерального бюджета 3`128 (Три тысячи сто двадцать восемь) рублей  государственной пошлины.  

Взыскать с некоммерческой организации "Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов" в пользу общества с ограниченной  ответственностью Управляющая компания "Наш дом" 96`269 (Девяносто шесть  тысяч двести шестьдесят девять) рублей 50 копеек расходов по экспертизе.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Спецкомплекс"  устранить недостатки, допущенные при проведении капитального ремонта кровли  многоквартирного дома № 24 по пр. Ленина г. Чебоксары, в срок не позднее двух  месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, и выполнить  следующие работы:  

-заменить 132 шайбы в болтовом соединении вновь установленных  стропильных ног, выполненных из двух сплоченных досок сечением 50 мм х 200  мм;  

-заменить существующий крепеж конькового элемента на самонарезающие  винты диаметром 4,8 мм длиной 70 мм в количестве 265 шт.;  

-обработать преобразователем ржавчины поврежденные коррозией места  металлического ограждения кровли на площади 19,5 кв.м и выполнить защитное  окрасочное покрытие на площади 39 кв.м;  

-восстановить при помощи клеящей ленты нарушенные соединения  пароизоляционной пленки в местах нахлеста полотнищ;  

-доработать стропильную систему возле слуховых окон, дымовых и  вентиляционных каналов доской 100 мм * 32 мм;  

- примыкание вентиляционных каналов и дымовых шахт к кровле выполнить  в соответствии с проектно-сметной документацией № 66/17Д-АС, обеспечив  герметизацию соединений;  

- установить сплошную обрешетку в местах расположения дымовых и  вентиляционных труб, слуховых окон и снегозадержателей согласно проекту   № 66/17-Г-АС.  

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спецкомплекс" в  пользу некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального  ремонта многоквартирных домов" 6`000 (Шесть тысяч) рублей расходов по  государственной пошлине по встречному иску.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.Е. Владимирова