2/2023-271362(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Резолютивная часть решения объявлена 15.08.23г. Полный текст решения изготовлен 18.08.23г. 18 августа 2023 года Дело № А55-7754/2023 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Рысаевой С.Г. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Орешкиной Н.А. рассмотрев в судебном заседании 10.08.23г.- 15.08.23г. дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью Производственная Компания "Альфа Групп"  к Обществу с ограниченной ответственностью "Ситимакс"  

о взыскании 2 456 377 руб. 73 коп. 

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Ситимакс"  

к Обществу с ограниченной ответственностью Производственная Компания "Альфа  Групп"  

о взыскании 2 669 227 руб. 44 коп. при участии в заседании от истца – ФИО1 по дов. от 27.09.2021 

от ответчика – ФИО2 по дов. от 11.01.23г. (после перерыва не явился)  установил:  

 В судебном заседании 10.08.23г. в соответствии со ст. 163 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 15.08.23 года до  09 часов 10 мин. Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на  официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по адресу:  WWW.samara.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда. После перерыва заседание  продолжено.  

Общество с ограниченной" ответственностью Производственная Компания «Альфа  Групп» обратилось в арбитражный" суд с иском к Обществу с ограниченной"  ответственностью «Ситимакс» о взыскании (с учетом уточнения иска) 2 302 046 руб. 04  коп. неосновательного обогащения по договору № 02/04АГ от 08.04.2021, 95 077 руб. 65  коп. проценты за период с 02.10.2022 по 20.04.2023, с последующим начислением с  21.04.2023 по день исполнения обязательств, а также расходов по госпошлине в сумме 35  282 руб.  

Общество с ограниченной" ответственностью «Ситимакс» обратилось в  арбитражный" суд со встречным исковым заявлением к Обществу с ограниченной"  ответственностью Производственная Компания «Альфа Групп» 2 669 227 руб. 44 коп.  задолженности по договору на выполнение строительно-монтажных работ № 02/04АГ от  08.04.2021. Определением от 25.04.2023 встречный иск принят к производству.  

Также ООО «Ситимакс» было заявлено ходатайство о передаче дела по  подсудности в Арбитражный суд города Москвы по месту нахождения ответчика.  Определением от 21.07.2023 года судом в удовлетворении ходатайства было отказано.  

Истец по встречному иску представил уточнения, в котором просит взыскать с  ответчика задолженность по договору на выполнение строительно-монтажных работ   № 02/04АГ от 08.04.2021в размере 734 688 руб., расходы по оплате госпошлины в размере  

17 694 рублей, возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в  размере 18 652 рублей. В соответствии с ст.49 АПК РФ суд принимает уточнения исковых  требований по встречному иску. Сумма встречных исковых требований равна 734 680 руб.  

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов,  изложенных в исковом заявлении, заслушав объяснения и доводы присутствовавшего в  заседании представителей сторон, суд считает исковые требования не подлежащими  удовлетворению по следующим основаниям:  

08 апреля 2021 года между ООО «Ситимакс» и ООО ПК «Альфа Групп» был  заключен Договор на выполнение строительно-монтажных работ № 02/04АГ от 08.04.2021  года, согласно условиям которого ООО «Ситимакс» обязалось по заданию ООО ПК  «Альфа Групп» выполнить работы на объекте по адресу: МО, Машковский пр-д, д. 4.  

В соответствии со сметой (Приложение № 1 к Договору) стоимость работ составила  4 194 021,88 рублей.  

Впоследствии между сторонами было заключено еще несколько дополнительных  соглашений к Договору на выполнение строительно-монтажных работ № 02/04АГ от  08.04.2021 года, согласно которым ООО «Ситимакс» обязалось выполнить  дополнительные работы в рамках заключенного Договора:  

- Дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2021 года на выполнение работ на сумму 2  344 176 руб.,  

- Дополнительное соглашение № 2 от 03.06.2021 года на выполнение работ на сумму 10 194 619,44 руб., - Дополнительное соглашение № 3 от 26.08.2021 года на выполнение работ на сумму 2 015 920,20 руб., 

- Дополнительное соглашение № 4 от 30.08.2021 года на выполнение работ на сумму  2 730 103,16 руб.,  

- Дополнительное соглашение № 6 от 01.09.2021 года на выполнение работ на сумму  145 356 руб.,  

- Дополнительное соглашение № 7 от 20.09.2021 года на выполнение работ на сумму  349 000 руб.,  

- Дополнительное соглашение № 9 от 17.12.2021 года на выполнение работ на сумму  214 505 руб.  

В подтверждение факта выполнения работ и принятия их ООО ПК «Альфа Групп»  в материалы дела представлены подписанные сторонами акты о приемке выполненных  работ по форме КС-2.  

В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных приложением № 1 к  договору № 02/04АГ от 08.04.2021, представлен подписанный сторонами акт о приемке  выполненных работ № 1/1 от 25.05.2021 года на сумму 1 372 320 руб., акт о приемке  выполненных работ № 2/1 от 04.08.2021 года на сумму 2 821 701,88 руб., всего работ  выполнено и принято на сумму 4 194 021,88 руб.  

В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных дополнительным  соглашением № 1 от 04.05.2021 к договору № 02/04АГ от 08.04.2021, представлен  подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ № 1/2 от 25.05.2021 года на  сумму 456 000 руб., акт о приемке выполненных работ № 2/2 от 04.08.2021 года на сумму 1  888 176 руб., всего работ выполнено и принято на сумму 2 344 176 руб.  

В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных дополнительным  соглашением № 2 от 03.06.2021 к договору № 02/04АГ от 08.04.2021, представлен  подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ № 2/3 от 04.08.2021 года на  сумму 3 980 659,44 руб., акт о приемке выполненных работ № 3 от 31.08.2021 года на  сумму 4 569 360 руб., акт о приемке выполненных работ № 3 от 10.09.2021 года на сумму 1  231 800 руб., всего работ выполнено и принято на сумму 9 781 819,44 руб.  

В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных дополнительным  соглашением № 3 от 28.08.2021 к договору № 02/04АГ от 08.04.2021, представлен  подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ № 4 от 13.09.2021 года на  сумму 1 477 120,20 руб., акт о приемке выполненных работ № 15 от 08.11.2021 года на  

сумму 352 680 руб., всего работ выполнено и принято на сумму 1 829 800,20 руб.  

В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных дополнительным  соглашением № 4 от 30.08.2021 к договору № 02/04АГ от 08.04.2021, представлен  подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ № 14 от 08.11.2021 года на  сумму 2 436 615 руб.  

В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных дополнительным  соглашением № 6 от 01.09.2021 к договору № 02/04АГ от 08.04.2021, представлен  подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ № 18 от 12.11.2021 года на  сумму 145 356 руб.  

В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных дополнительным  соглашением № 7 от 20.09.2021 к договору № 02/04АГ от 08.04.2021, представлен  подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ № 18 от 13.12.2021 года на  сумму 349 000 руб.  

В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных дополнительным  соглашением № 9 от 17.12.2021 к договору № 02/04АГ от 08.04.2021, представлен  подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.02.2022 года на  сумму 167 479 руб., акт о приемке выполненных работ № 2 от 05.05.2022 года на сумму 15  015 руб., всего работ выполнено и принято на сумму 182 494 руб.  

Результат работ по Договору и дополнительным соглашениям к нему в виде  демонтажа, ремонта несущих конструкций, усилению несущих конструкция, устройства  покрытия кровли из кровельных сэндвич панелей был сдан Истцу по Актам о приемке  выполненных работ: № 1/1 от 25.05.2021 г., № 2/1 от 04.08.2021 г., № 2/2 от 04.08.2021 г.,   № 2/3 от 04.08.2021 г., № 3 оот 31.08.21г. № 3 от 10.09.2021 г., № 4 от 13.09.2021 г., № 4 от  13.09.2021 г., № 14 от 08.11.2021 г., № 15 от 08.11.2021 г., № 18 от 12.11.2021 г., № 18 от  13.12.2021 г., № 1 от 24.02.2022 г., № 2 от 05.05.21г.  

Оплата работ производилась Истцом на основании счетов, выставленных  Ответчиком, в последствии подтверждаемые Актами о приемки выполненных работ  (форма КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

За время проведения работ, Истцом в адрес Ответчика были перечислены денежные  средства в размере 20 002 123,66 рублей, что подтверждается актом сверки за период с  01.01.2021 г. по 02.09.2022 г.  

В связи с предоставленными Ответчиком корректировочными счет-фактурами, у  Истца образовалась переплата в размере 2 302 046,04 рубля.  

29 декабря 2022 г. Ответчику была отправлена претензия с требованием вернуть  неправомерно удерживаемые излишне уплаченные денежные средства. Претензия была  получена Ответчиком 09.01.2023 г., однако, по настоящее время денежные средства не  возвращены, ответа на претензию не последовало, что послужило основанием для  обращения в суд с настоящим иском.  

 Ответчик исковые требования истца не признает, при этом обратился со встречным  исковым заявлением с учетом уточнения исковых требований и просит взыскать  задолженность по договору на выполнение строительно-монтажных работ № 02/04АГ от  08.04.2021в размере 734 688 руб.  

 В обоснование встречных исковых требований истец указывает на то, что из  представленных в материалы дела доказательств следует, что по договору № 02/04АГ от  08.04.2021 ООО «Ситимакс» были выполнены и приняты ООО ПК «Альфа Групп» работы  на общую сумму 21 263 282,52 рублей.  

Из представленных в материалы дела платежных поручений следует, что ООО ПК  «Альфа Групп» в пользу ООО «Ситимакс» была произведена оплата работ по договору   № 02/04АГ от 08.04.2021 на общую сумму 20 528 602,52 рублей, с учетом возврата ООО  «Ситимакс» в пользу ООО ПК «Альфа Групп» платежа на сумму 850 099,44 рублей по  платежному поручению № 971994 от 01.12.2021 года.  

Истец по встречному иску считает, что у ООО ПК «Альфа Групп» имеется  задолженность перед ООО «Ситимакс» по оплате выполненных работ на сумму 734 680  

рублей.  

20 января 2022 года между сторонами была достигнута договоренность о снижении  стоимости выполненных ООО «Ситимакс» работ при условии того, что ООО ПК «Альфа  Групп» заключит с ООО «Ситимакс» новый договор на выполнение иных работ на  определенных участках объекта и/или других видов ремонтных работ на территории ООО  ПК «Альфа Групп».  

Снижение стоимости работ было оформлено корректировочными счетами-фактурами и подписанием сторонами актов по форме КС-2 и КС-3 с учетом уменьшения  стоимости выполненных работ, указанного в корректировочных счетах-фактурах.  

Так, корректировочным счетом-фактурой № 6 от 31.01.2022 года стороны снизили  стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 2/3 от 04.08.2021 года на 806 640  рублей.  

Корректировочным счетом-фактурой № 4 от 31.01.2022 года стороны снизили  стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 3 от 10.09.2021 года на 67 200  рублей.  

Корректировочным счетом-фактурой № 3 от 31.01.2022 года стороны снизили  стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 4 от 13.09.2021 года на 474  890,04 рублей.  

Корректировочным счетом-фактурой № 5 от 31.01.2022 года стороны снизили  стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 3 от 31.08.2021 года на 1 193 640  рублей.  

Общая величина снижения стоимости работ по договору № 02/04АГ от 08.04.2021  на основании корректировочных счетов-фактур составила 2 542 370,04 рублей.  

Из содержания дополнительного соглашения № 12 от 20.01.2022 года в  совокупности с актом сверки взаимных расчетов за период январь 2022 года следует, что  задолженность, образовавшаяся у ООО «Ситимакс» перед ООО ПК «Альфа Групп» как  переплата с учетом корректировочных счетов-фактур будет учтена в виде вычета при  последующих работах по ремонту кровельного покрытия на объекте Альфа Групп и/или  при выполнении других видов ремонтных работ на территории ООО ПК «Альфа Групп».  В любых остальных случаях и ситуациях задолженность ООО «Ситимакс» перед ООО ПК  «Альфа Групп» в сумме 2 484 538 рублей не принимается и считается недействительной.  Копии дополнительного соглашения № 12 от 20.01.2022 года были представлены в дело  как ООО «Ситимакс», так и ООО ПК «Альфа Групп».  

Подписи и печати сторон, проставленные в дополнительном соглашении № 12 от  20.01.2022 года ни одной из сторон не оспорены, однако в экземпляре дополнительного  соглашения № 12 от 20.01.2022 года, представленного ООО «Ситимакс» имеются  рукописные исправления суммы и даты, выполненные в неустановленное время  неустановленным лицом, в связи с чем при вынесении судебного акта суд основывался на  содержании дополнительного соглашения № 12 от 20.01.2022 года, представленного ООО  ПК «Альфа Групп», которое не содержит рукописных исправлений.  

 Все акты приемки выполненных работ, представленные в материалы дела как ООО  ПК «Альфа Групп», так и ООО «Ситимакс», подписаны сторонами без замечаний, что  сторонами не оспаривается.  

Наличие взаимосвязи между осуществлением корректировки актов выполненных  работ и выявленными недостатками результатов работ материалами дела не  подтверждается. Довод ООО ПК «Альфа Групп» о том, что стоимость работ была снижена  корректировочными счетами-фактурами по причине наличия в результатах работ  недостатков также опровергается содержанием дополнительного соглашения № 12 от  20.01.2022 года.  

При указанных выше обстоятельствах при установлении истинного сальдо расчетов  по договору № 02/04АГ от 08.04.2021 года суд учитывает подписанные сторонами акты  выполненных работ без учета корректировочных счетов-фактур. При этом материалами  дела подтверждается и ответчиком по встречному иску не отрицается, что работы были  

оплачены 21 378 701 руб. 04 коп.  

Пунктом 14.3 договора № 02/04АГ от 08.04.2021 года стороны установили, что  изменения и дополнения, касающиеся существенных условий, в том числе стоимости и  сроков работ, считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в  виде дополнительных соглашений и подписаны обеими сторонами.  

В материалы не представлены дополнительные соглашения, подписанные  сторонами, условиями которых предусматривалось бы снижение стоимости работ, ранее  установленных дополнительными соглашениями № 1, 2, 3 к договору № 02/04АГ от  08.04.2021 года.  

 Взыскиваемая первоначальным истцом сумма в размере 2 302 046 руб. 04 коп.  фактически является задолженностью указанной в дополнительном соглашении № 12 от  30.01.22г. уменьшенную на сумму принятых в феврале 2022 г. работ.  

 Из текста указанного дополнительного соглашения следует, что задолженность,  образовавшаяся у ООО «Ситимакс» перед ООО ПК «Альфа Групп» как переплата с  учетом корректировочных счетов-фактур будет учтена в виде вычета при последующих  работах по ремонту кровельного покрытия на объекте Альфа Групп и/или при выполнении  других видов ремонтных работ на территории ООО ПК «Альфа Групп». В любых  остальных случаях и ситуациях задолженность ООО «Ситимакс» перед ООО ПК «Альфа  Групп» в сумме 2 484 538 рублей не принимается и считается недействительной.  

 Заключение соглашения о прощении долга под отменительным условием не  противоречит существу обязательства, положениям ст. 421 ГК РФ, ст. 575 ГК РФ при этом  сторонами не отрицается, что кредитор получил имущественную выгоду ввиде  предоставленных работ на ином объекте. (Акт КС-2 № 18 от 12.11.21г. на сумму 145 356  руб., акт КС-2 № 18 на сумму 13.12.21г. на сумму 349 000 руб.)  

 Учитывая вышеизложенное и в соответствии с ст.ст. 309,310,702,421 ГК РФ суд  считает, что встречный и первоначальный иски удовлетворению не подлежат.  

 Расходы по госпошлине по первоначальному иску подлежат отнесению в соответствии  с ст.110 АПК РФ истца по первоначальному иску. В соответствии с ст.104 АПК РФ истцу  по первоначальному иску следует возвратить госпошлину в сумме 296 руб.  

 Расходы по госпошлине по встречному иску подлежат отнесению в соответствии с  ст.110 АПК РФ на истца по встречному иску. В соответствии с ст.104 АПК РФ истцу по  встречному иску следует возвратить госпошлину в сумме 18 652 руб.  

Руководствуясь ст.ст.110,163,167-171,176,259 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

 В первоначальном иске отказать. 

 Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Производственная Компания  "Альфа Групп" из федерального бюджета госпошлину в сумме 296 руб. и выдать справку  на ее возврат.  

 Уточнения исковых требований по встречному иску принять. Сумму иска считать  равной 734 680 руб.  

 Во встречном иске отказать. 

 Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Ситимакс" из федерального  бюджета госпошлину в сумме 18 652 руб. и выдать справку на ее возврат.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  области.  

Судья / С.Г. Рысаева  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 22.02.2023 1:16:00

Кому выдана Рысаева Светлана Геннадиевна