АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-1874/2025

г. Петропавловск-Камчатский

17 июля 2025 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Т.А. Арзамазовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  

исковому заявлению Управления архитектуры и городского хозяйства  

администрации Вилючинского городского 

округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью  

специализированному застройщику «Трест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

третье лицо: муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

об обязании устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному  

контракту от 11.09.2020 № 0138600001220000011, при участии в заседании: от истца: не явились, 

от ответчика: представитель ФИО2 (паспорт, доверенность от 25.12.2024, со специальными полномочиями, сроком до 31.12.2025, диплом),  

от третьего лица: заведующий ФИО3 (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ), 

руководствуясь статьями 49, 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

решил:

Принять частичное признание иска обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Трест».  

Обязать общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Трест» исполнить гарантийные обязательства и устранить следующие дефекты (недостатки) работ:  

- выполнить очистку фасада здания после строительных работ, уборку остатков бетона и упаковочной ленты на окнах;  

- завершить работы по лифту, который расположен на улице; 

- обеспечить откачку воды из колодца сетей связи, проходимость кабельной канализации сети ПАО «Ростелеком» и осуществить прокладку сетей связи ПАО «Ростелеком» в порядке, предусмотренном проектной документацией;  

- выполнить устройство тактильной плитки на территории; 

- выполнить очистку загрязненных в ходе ремонтных работ участков, в том числе пола, плитки;  

- выполнить покрытие лаком всех экранов на радиаторах;  

- восстановить тактильную плитку в 4 и 5 блоках, удалить остатки плиточного клея внутри здания после ремонтных работ;  

- восстановить бетонные бордюры на территории детского сада, на стоянке и прилегающей территории;  

- восстановить целостность стены в 3 блоке (вход в тамбур); 

- выполнить косметический ремонт в галерее, в девяти группах и в раздевалке бассейна в связи с образованием трещин, в группе «Якорек» в связи с растрескиванием кафеля в буфете.  

Установить тридцатидневный срок для устранения дефектов (недостатков) работ с даты вступления настоящего решения в законную силу.  

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Трест» в доход федерального бюджета 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей государственной пошлины.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.А. Арзамазова