АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Орел                                                                                                        Дело № А48–1697/2018

21 июня 2018 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Родиной Г.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж сервис»: 

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Евро Строй»: 

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>) о взыскании 6 378 684 руб. задолженности

в заседании участвуют:

от истца

-

представитель ФИО2  (доверенность от 01.12.2017 года), 

от ответчика

-

 представитель не явился, извещен надлежаще.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж сервис» (далее: истец, субподрядчик, ООО «Электромонтаж сервис») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Евро Строй» (далее: ответчик, подрядчик, ООО «Евро Строй») о взыскании задолженности в размере 6 378 684,00 руб.

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в уточнил исковые требования и просил суд взыскать с ответчика  задолженность в размере 4 837 691 руб. Уточнения исковых требований приняты арбитражным судом.

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом по правилам статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации о движении дела в картотеке арбитражных дел в сети «Интернет».

  В силу ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации спор рассмотрен в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Из материалов дела следует, что 01 декабря 2016 года между сторонами были заключены следующие договоры субподряда на выполнение работ:

1. Договор субподряда № 1, в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> в срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 1 620 206 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора)

2. Договор субподряда № 3, в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,  в срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 60 451 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора)

3. Договор субподряда № 4, в соответствии с которым подрядчик поручает, а

субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> в срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 75 857 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора)

4. Договор субподряда № 5, в соответствии с которым подрядчик поручает, а

субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,  с срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 786 686 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора)

5. Договор субподряда № 6, в соответствии с которым подрядчик поручает,

субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,  в срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 60 877 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора)

6. Договор субподряда № 7, в соответствии с которым подрядчик поручает, а

субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,  в срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 540 747 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора)

7. Договор субподряда № 8, в соответствии с которым подрядчик поручает, а

субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,   в срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 91 565 руб. 00 коп.(п. 2.1 договора)

8. Договор субподряда № 9, в соответствии с которым подрядчик поручает, а

субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,  в срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 113 590 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора)

9. Договор субподряда № 10, в соответствии с которым подрядчик поручает, а

субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, в срок до 29.06.2017 в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 369 014 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора)

10. Договор субподряда №11, в соответствии с которым подрядчик поручает, а

субподрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,  в соответствии с технической и сметной  документацией, являющимися неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Общая сумма договора составляет 327 685 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора). 

Так же истец выполнил для ответчика по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Ц.О.)), расположенного по адресу: 

<

...>. 

Стоимость выполненных работ составила 2 332 006 руб. 00 коп.

В силу п. 12.7 договоров субподряда подрядчик, указанную в п.2.1 договора сумму уплачивает субподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после сдачи работ по акту выполненных работ по форме КС-2  подрядчиком заказчику и поступления денежных средств по договору № 372-05/КР от 31.12.2016 г. от заказчика на расчетный счет подрядчика, при условии выполнения субподрядчиком работ качественно, без замечаний и отклонений.

В подтверждение надлежащего исполнения своих обязанностей истцом в материалы дела представлены акты выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3   2 636 000 руб. (том 1 л. 

<

...> том 2 л.д. 1-11, 22—27,38-44,55-78, 89-96, 107-124,135-148, том 3 л.д. 1-7,79-101).

Ссылаясь на то, что ответчик не в полном объеме оплатил выполненные работы, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные  работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. 

В соответствии с ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. При этом, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот же день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (п. 1 ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненных работ или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончания сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики рассмотрения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки выполненных работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из материалов дела акты выполненных работ по форме КС- 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 ответчиком подписаны без претензий и замечаний как по качеству выполненных работ, так и по сроку их выполнения.

Частично акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, направленные ответчику, что подтверждается сопроводительными письмами и кассовыми чеками, последним не подписаны и в адрес подрядчика не возвращены.

Вместе с тем, возражений по объему и качеству выполненных работ ни после направления актов и справок о стоимости выполненных работ, ни в ходе судебного разбирательства ответчиком не заявлено.  

 Направленная в адрес ответчика претензия об оплате выполненных работ от 18.01.2018 оставлена ответчиком без ответа. 

В процессе рассмотрения спор арбитражный суд обязывал стороны провести сверку взаимных расчетов, направленный истцом в адрес ответчика акт сверки получен им, но не подписан и в суд не представлен. Возражений относительно акта сверки взаимных расчетов ответчиком так же не заявлено.

По ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По п. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с таким обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

С учётом изложенного, оценив представленные по делу документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к выводу о доказанности истцом факта выполнения работ на заявленную сумму, передачи результата работ ответчику и ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом на день вынесения решения составляет  4 837 691 руб. 00 коп.

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евро Строй»: 

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж сервис»: 

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>)  4 837 691 руб. 00 коп. – основной долг и расходы по государственной пошлине в размере  47 188 руб. 46 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж сервис»: 

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 7 704 руб. 54 коп., перечисленную по платежному поручению № 58 от 01.03.2018 года.

Выдать справку.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Воронежа в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Орловской области.                   

Судья  Г.Н. Родина