4701/2020-237810(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-19482/2020

06 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2020 года. Полный текст решения изготовлен 06 августа 2020 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Сергеева О.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

жилищно-строительного кооператива № 389 (198262, 

<

...>, 223, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2002,  ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Евролайн" (188360, Ленинградская  область, Гатчинский район, поселок Войсковицы, площадь Манина, 7, 48,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2012, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 189 350 руб. 00 коп. 

при участии 

- от истца: ФИО2 по доверенности от 02.09.16, ФИО3 (председатель  правления)  

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,  

установил:

жилищно-строительный кооператив № 389 обратился в Арбитражный суд города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной  ответственностью "Евролайн" о взыскании 189 350 руб. 00 коп. неосновательного  обогащения.  

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте  судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его  участия на основании ст.156 АПК РФ.  

Судом установлено: 

Между ЖСК № 39 (далее – заказчик, истец) и ООО "Евролайн" (далее –  исполнитель, ответчик) был заключен договор подряда № 02/04/2018 от 02.04.2018 на  выполнение работ по предпроектному обследованию на объекте по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Лени ФИО4, д. 27, корп.3 «ЖСК № 389» (далее – договор).  

Согласно п.4.1. договора цена работ согласована сторонами в сумме 189 350 руб.  00 коп.  

В соответствии с условиями договора истец платежным поручением  № 102 от  04.04.18 перечислил ответчику стоимость работ в размере 189 350 руб. 00 коп.  

Согласно пункту 7.2 договора работы должны быть выполнены в следующие  сроки: с 02.04.18 по 02.07.18.  

До настоящего времени ответчик не приступил к выполнению работ. 

Претензией от 18.09.2019 исх. № 290 истец отказался от договора и потребовал  возврата авансового платежа.  

Ответчик денежные средства не возвратил. 

Учитывая изложенное, на стороне ответчика образовалось неосновательное  обогащение в размере 189 350 руб. 00 коп., которое подлежит взысканию в пользу  истца. Расходы по уплате государственной пошлины в размере 6681 руб. 00 коп.  относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Евролайн" в пользу  жилищно-строительного кооператива № 389 189 350 руб. 00 коп. неосновательного  обогащения и 6681 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Сергеева О.Н.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.06.2019 10:59:38

 Кому выдана Сергеева Ольга Николаевна