Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-17465/2024

г. Хабаровск

20 марта 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено 20 марта 2025 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Г.А. Паликовым, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества «Центр инновационных технологий города Хабаровска» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680013, 

<

...>)

к Акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680000; адрес: 

<

...>)

об обязании выполнить мероприятия в соответствии с условиями договора о подключении объекта капитального строительства к системам теплоснабжения АО «ДГК» № 5/ХТС-23 от 10.01.2023, 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 представитель по доверенности от 25.12.2024 № 3258/02-02; ФИО2 представитель по доверенности от 25.12.2024 № 3255/02-02,

от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности от 30.11.2023 № 51/328,

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Центр инновационных технологий города Хабаровска» (далее – истец, АО «ЦИТ») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к Акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – ответчик, АО «ДГК») об обязании выполнить мероприятия в соответствии с условиями договора о подключении объекта капитального строительства к системам теплоснабжения АО «ДГК» № 5/ХТС-23 от 10.01.2023.

Определением суда от 28.10.2024 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-17465/2024, назначено предварительное судебное заседание на 28.11.2024 в 11 часов 20 минут.

Определением от 28.11.2024 дело назначено к судебному разбирательству на 25.12.2024 в 12 часов 00 минут. 

Определением от 25.12.2024 судебное разбирательство по делу было отложено на 28.01.2025 в 16 часов 40 минут.

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования в полном объеме, в обоснование привела доводы, изложенные в исковом заявлении и дополнительных письменных пояснениях.

Представитель ответчика иск не признала, привела возражения, изложенные в отзыве на иск и дополнениях к отзыву, ссылалась на то, что АО «ДГК» выполнен весь комплекс мероприятий согласно условиям договора от 10.01.2023 №5/ХТС-23. Требования истца об обязании ответчика выполнить мероприятия по реконструкции ТМ-18 и созданию тепловой сети до точки подключения на границе земельного участка основаны на неверном толковании раздела III Технических условий №Х01ИА 000083. В случае удовлетворения исковых требований, полагала, что срок выполнения мероприятий, заявленный истцом, является неразумным, ссылалась на то, что для выполнения всех мероприятий по подключению объекта истца к системе теплоснабжения потребуется 1 (один) год.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между АО «ЦИТ» (Заявитель) и АО «ДГК» (Исполнитель) заключен договор № 5/ХТС-23 от 10.01.2023 о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения АО «ДГК» (далее – Договор).

Пунктом 1.2 Договора определено, что предметом договора является выполнение Исполнителем самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий по созданию тепловой сети до точки подключения и развитию (реконструкции) тепломагистрали ТМ-18 для подключения объекта капитального строительства «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе» с тепловой нагрузкой 0,3096 Гкал/час в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от тепломагистрали ТМ-18, ТЭЦ-1.

Срок подключения объекта – не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении (пункт 5.2 Договора).

Согласно пункту 2.2 Договора Исполнитель обязан:

- осуществить действия по созданию тепловой сети до точки подключения и развитию (реконструкции) тепломагистрали ТМ 18 сетей для подключения объекта и подачи тепловой энергии не позднее установленного п. 5.2 договора срока подключения (п. 2.2.1);

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения заявки от заявителя о необходимости проверки технических условий подключения осуществить проверку готовности внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии, опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах. В течение 5 рабочих дней после проведенной проверки предоставить акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в адрес заявителя по форме, установленной Правилами подключения (п.2.2.2);

- осуществить подключение объекта к сетям в срок не позднее указанного в п. 5.2 договора при условии готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей теплоснабжения объекта (с учетом временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования) и при выполнении технических условий подключения в части обязанностей заявителя (п.2.2.3);

- принять либо отказаться в принятии предложения о внесении изменений в договор в течение 30 дней с даты получения предложений заявителя, в случае внесения изменений в проектную документацию (п.2.2.4);

- составить и подписать со своей стороны и представить заявителю для подписания акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №2 к договору (п.2.2.5);

- предоставить заявителю счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п.2.2.6).

Согласно пункту 2.4 Договора Заявитель обязан:

- предоставить и согласовать с исполнителем график производства работ по подключению (п. 2.4.1);

- предоставить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно- технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения (п.2.4.2);

- предоставить исполнителю заключение экспертизы обязательно в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации (п.2.4.3);

- выполнить установленные в договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению не позднее установленного п.5.2 договора срока подключения (п.2.4.4);

- направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре нагрузки, с приложением документации, подтверждающей такие изменения (п.2.4.5);

- направить исполнителю уведомление о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий подключения с приложением утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно- технических мероприятий и содержание технологических решений (п.2.4.6);

- обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий договора о подключении и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах (п.2.4.7);

- внести оплату за подключение в порядке, предусмотренном разделом 3 договора (п.2.4.8);

- получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ, разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в отношении подключаемых теплопотребляющих установок и (или) объектов теплоснабжения(п.2.4.9);

- уведомить в письменной форме исполнителя об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации (п.2.4.10);

- подписать акт сдачи-приемки работ в течение 5 рабочих дней с момента его получения, либо предоставить мотивированный отказ в тот же срок (п.2.4.11).

Размер платы за подключение установлен постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края № 53/4 от 28.12.2022 и составляет 4 272 408 руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) 712 068 руб. 00 коп. согласно Приложению 34 к договору (пункт 3.1 Договора).

Договор ступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 30.08.2024, а в части не исполненных обязательств – до полного их исполнения сторонами (пункт 5.1 договора).

В приложении № 1 к Договору указаны технические условия подключения № Х01ИА000083 с точкой присоединения - узел 184.21 тепломагистрали ТМ-18; от точки подключения на границе земельного участка с кадастровым № 27:23:0050417:42/1 посредством независимой схемы присоединения через автоматизированный тепловой пункт (АИТП).

Истец ссылается на то, что, на настоящий момент работы по созданию тепловой сети до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым № 27:23:0050417:42/1 Исполнителем выполнены частично - выполнена врезка отвода теплотрассы в точке присоединения (узел 184.21). Однако тепловая сеть до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым № 27:23:0050417:42/1 не доведена.

От Исполнителя не поступали уведомления о наличии препятствий для выполнения работ и о связанной с ними приостановкой выполнения работ по договору.

Технические условия в части устройства автоматизированного теплового пункта (АИТП) Заказчиком выполнены.

Поскольку отвод тепловой сети не доведен до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым № 27:23:0050417:42/1, конкретное местоположение данной точки на границе участка определить невозможно, вследствие указанного Заказчик не имеет возможности завершить работы но устройству внутриплощадочных тепловых сетей до точки подключения, мероприятия по пунктам 2.2.2, 2.2.3 Договора не могут быть выполнены до выполнения ответчиком обязанности по пункту 2.2.1 Договора.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения АО «ЦИТ» в Арбитражный суд Хабаровского края с рассматриваемым иском. 

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Спорные правоотношения сторон основаны на обязательствах возмездного оказания услуг и помимо условий договора регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об обязательствах и о договоре.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 по делу № А62-434/2016, договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг. К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются, помимо специальных норм, положения главы 39 Гражданского кодекса РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статья 307 ГК РФ).Из положений статей 309, 310 ГК РФ следует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в исключительных случаях прямо указанных в законе.Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.В статье 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» ГК РФ, однако содержатся в специальных нормативных актах, устанавливающих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.Согласно пункту 2 указанной статьи подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

 Согласно пункту 3 статьи 14 Закона № 190-ФЗ при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.В соответствии с частью 8 статьи 14 Закона о теплоснабжении плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, устанавливаемая в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика (часть 10 статьи 14 Закона о теплоснабжении).В соответствии с пунктом 4 Основ ценообразования плата за подключение к системе теплоснабжения относится к регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения.Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 утверждены Правила, определяющие порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, включая порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения с учетом особенностей подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей к объектам теплоснабжения в целях потребления тепловой энергии в виде пара (далее - Правила № 2115).

В пункте 23 Правил №2115 установлена процедура технологического присоединения, начиная от подачи заявки заявителем и заключения договора до фактического присоединения сетевой организацией объекта заявителя и составления акта о подключении. 

Подача заявки на заключение договора о подключении с предоставлением документов к ней производится правообладателем земельного участка и (или) объекта капитального строительства в соответствии с п. п. 35, 36 Правил №2115. 

В соответствии с пунктом 47 Правил №2115 заявитель по договору о подключении выполняет мероприятия (в том технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения в пределах границ земельного участка.

Согласно пункту 48 Правил №2115 исполнитель по договору о подключении должен выполнить мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект.

Согласно пункту 63 Правил №2115 осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о реализованных мероприятиях, стоимости подключения и о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении.

Точка подключения, то есть место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя должна находиться именно на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении (пункт 2 Правил № 2115).

Как следует из материалов дела, по условиям договора №5/ХТС-23 от 10.01.2023 АО «ДГК» (исполнитель) обязано выполнить действия по созданию тепловой сети до точки подключения и развитию (реконструкции) тепломагистрали ТМ-18 для подключения объекта капитального строительства «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе» с тепловой нагрузкой 0,3096 Гкал/час в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от тепломагистрали ТМ-18, ТЭЦ-1.  

Срок подключения объекта установлен не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении.

Истец, обращаясь с настоящим иском, указал о невыполнении ответчиком мероприятий по реконструкции тепломагистрали ТМ-18 и созданию тепловой сети до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым № 27:23:0050417:42/1 для подключения объекта в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от тепломагистрали ТМ-18, ТЭЦ-1 в соответствии с условиями договора №5/ХТС-23 от 10.01.2023.

Ответчик в возражениях на иск ссылается на то, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие какие-либо права на земельный участок, на котором расположен подключаемый объект, а также ссылается на выполнение исполнителем мероприятий по подключению объекта от узла 184.21 до границ земельного участка с кадастровым № № 27:23:0050417:42, в пределах которого расположен поключаемый объект.

Как следует из материалов дела, в адрес ответчика от истца поступила заявка от 01.07.2022 о подключении к системе централизованного теплоснабжения г. Хабаровска объекта капитального строительства «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе», место положение: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 27:23:00504417:42/1.

Однако данная заявка не соответствовала требования пунктов 35, 36 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115, о чем истец был уведомлен. К заявке был приложен договор №533 от 01.12.2014 аренды земельного участка с кадастровым номером 27:23:00504417:42/1, заключенный между Департаментом муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска и АО «ЦИТ». Согласно условиям договора срок аренды для строительства объекта установлен по 16.11.2017. Документов, подтверждающих возобновление данного договора на неопределенный срок и отсутствие возражений со стороны арендодателя (п. 5.4 договора) в пакете документов не имелось.

Истцом была представлена выписка ЕГРН от 10.01.2022 на объект «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе» с кадастровым номером 27:23:0050417:208, с датой выдачи более 30 дней, от 10.01.2022.

Согласно сведениям раздела 1 лист 1 представленной выписки из ЕГРН, объект расположен в пределах иного объекта недвижимости с кадастровым номером 27:23:0050417:42.

Истец был уведомлен, что на публичной кадастровой карте невозможно определить местоположение земельного участка 27:23:00504417:42/1.

В соответствии с требованиями пункта 41 Правил №2115, недостающие сведения и документы истцом должны быть представлены в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от ответчика.

Письмом от 28.08.2022 истцом были направлены дополнительные документы:

- договор №20 от 23.03.2022 аренды земельного участка с кадастровым номером 27:23:00504417:42/1, заключенный между Департаментом муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска и АО «ЦИТ», со сроком действия с 23.03.2022 по 22.02.2023;

- выписка ЕГРН от 26.07.2022 на земельный участок с кадастровым номером 27:23:0050417:42. Согласно раздела 1 лист 1 данной выписки, в пределах данного земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым номером 27:23:0050417: 208, правообладателем участка является «Город Хабаровск»;

- выписка ЕГРН от 22.072022 на нежилое помещение с кадастровым номером 27:23:0050417: 208, расположенное в пределах иного объекта недвижимости с кадастровым номером 27:23:0050417:42.

Истцом, как указал ответчик, какие-либо пояснения по участку с кадастровым номером 27:23:00504417:42/1 представлены не были, как и документы, подтверждающие права АО «ЦИТ» на земельный участок 27:23:0050417:42.

Точка подключения, то есть место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя должна находиться именно на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении (пункт 2 Правил № 2115).

Как указано выше, согласно договору аренды №20 от 23.03.2022, заключенному между Департаментом муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска и АО «ЦИТ», в аренду последнему передан земельный участок с кадастровым номером 27:23:00504417:42/1.

В Технических условиях, являющихся приложением к Договору №5/ХТС-23 от 10.01.2023, указано требование о технологическом присоединении объекта от точки подключения, находящейся на границе земельного участка с кадастровым номером 27:23:00504417:42/1.

В связи с чем, исходя из представленных доказательств, не усматривается неясности в указании точки подключения – данная точка должна находиться на границе земельного участка с кадастровым номером 27:23:00504417:42/1.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что ответчиком частично выполнено устройство тепловой сети от ТМ-18 (точка присоединения 184.21). Возражения ответчика в этой части суд считает обоснованными.

Однако тепловая сеть не доведена до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым № 27:23:0050417:42/1, как это предусмотрено в технических условиях № Х01ИА000083, являющихся приложением к договору №5/ХТС-23 от 10.01.2023.

Из акта проверки исполнения договора № 5/ХТС-23 от 10.01.2023 о подключении объекта капитального строительства к системам теплоснабжения АО «ДГК», в части создания АО «ДГК» теплотрассы до точки подключения от 16.11.2024, представленного истцом, следует, что от узла 184.21 тепломагистрали ТМ-18 (точка № 1 на схеме) имеется два отвода труб, уходящих в землю в непосредственной близости от тепломагистрали. На всей территории от узла 184.21 до земельного участка следы раскопа земли отсутствуют, до границы земельного участка с кадастровым № 27:23:0050417:42/1 и близлежащей территории трубы отопления не доведены.

Доказательств, свидетельствующих об обратном, ответчиком не представлено.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд признает обоснованными требования истца об обязании ответчика выполнить мероприятия по созданию тепловой сети до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым номером 27:23:0050417:42/1 для подключения объекта капитального строительства «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе города Хабаровска» с тепловой нагрузкой 0,3096 Гкал/час, в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от тепломагистрали ТМ-18, ТЭЦ-1 в соответствии с условиями договора о подключении объекта капитального строительства к системам теплоснабжения АО «ДГК» № 5/ХТС-23 от 10.01.2023 и техническими условиями подключения № Х01ИА000083 (Приложение № 1 к договору № 5/ХТС-23 от 10.01.2023), в связи с чем, указанное требование подлежит удовлетворению.

В удовлетворении остальной части требования следует отказать. 

Согласно части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Истец в исковом заявлении просил обязать ответчика выполнить мероприятия в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения. 

Учитывая виды и объем подлежащих выполнению работ, суд считает необходимым установить срок для выполнения ответчиком указанных мероприятий – 90 (девяносто) календарных дней со дня вступления в законную силу настоящего решения. 

На случай неисполнения решения суда в установленный срок, АО «ЦИТ» просит взыскать с АО «ДГК» судебную неустойку в размере 10 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда.

В соответствии с частью 1 статьи 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на все территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами (часть 2 статьи 16 АПК РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 174 АПК РФ арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ).

По смыслу статьи 308.3 ГК РФ и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Согласно пункту 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 33 названного постановления Пленума Верховного Суда РФ, на основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении судебной неустойки выдаются отдельные исполнительные листы в отношении каждого из этих требований. Судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем. Такой факт не может быть установлен банком или иной кредитной организацией.

Таким образом, неустойка за неисполнение судебного акта подлежит начислению с момента вынесения соответствующего судебного акта и после истечения срока для добровольного исполнения обязательства в натуре и до фактического исполнения обязательства.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

АО «ЦИТ» просит установить судебную неустойку в размере 10 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда.

Заявленный АО «ЦИТ» размер неустойки за неисполнение решения суда суд считает не соответствующим требованиям разумности и справедливости.

Такой размер неустойки на случай неисполнения решения суда, по мнению суда, является несоразмерной мерой стимулирования ответчика к исполнению решения.

На основании изложенного, суд считает возможным снизить размер неустойки в два раза и определить размер неустойки в сумме 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, которая подлежит начислению начиная с 91 дня со дня вступления настоящего решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда.

Судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 50 000 руб. 00 коп. в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ подлежат возмещению путем взыскания с ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок 90 (девяносто) календарных дней со дня вступления настоящего решения в законную силу выполнить мероприятия по созданию тепловой сети до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым номером 27:23:0050417:42/1 для подключения объекта капитального строительства «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе города Хабаровска» с тепловой нагрузкой 0,3096 Гкал/час, в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от тепломагистрали ТМ-18, ТЭЦ-1 в соответствии с условиями договора о подключении объекта капитального строительства к системам теплоснабжения АО «ДГК» № 5/ХТС-23 от 10.01.2023 и техническими условиями подключения № Х01ИА000083 (Приложение № 1 к договору № 5/ХТС-23 от 10.01.2023).  

Взыскать с Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Центр инновационных технологий города Хабаровска» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 91 (девяносто первого) дня со дня вступления настоящего решения в законную силу и до фактического исполнения решения.

Взыскать с Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Центр инновационных технологий города Хабаровска» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 000 руб. 00 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Д.Л. Малашкин