АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-17655/2019

19 февраля 2020 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2020 года

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Кузьмина А.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению 

Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов,

к муниципальному унитарному предприятию «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов, 

третьи лица: 

администрация муниципального образования «Город Саратов», город Саратов, 

Комитет по управлению имуществом города Саратова, город Саратов, 

Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов», город Саратов,

о взыскании неустойки за просрочку ввода объектов в эксплуатацию и за просрочку передачи жилых помещений в размере 72 980 561 руб. 70 коп., 

по встречному исковому заявлению 

муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов, 

к Комитету по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов

третьи лица: 

администрация муниципального образования «Город Саратов», город Саратов, 

Комитет по управлению имуществом города Саратова, город Саратов, 

Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов», город Саратов,

о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам в размере 1 732 222 руб. 35 коп., 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 20.01.2020, сроком действия полномочий на один год, полномочия проверены,

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 31.12.2019 сроком действия полномочий до 31.12.2020, полномочия проверены,

от третьего лица – администрации муниципального образования «Город Саратов» – ФИО4, представитель по доверенности от 21.03.2019, полномочия проверены,

от третьего лица – Комитет по управлению имуществом города Саратова – ФИО5, представитель по доверенности от 03.12.2018, сроком действия полномочий на три года, полномочия проверены,

от третьего лица – Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» – не явился, извещен надлежащим образом,  

 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратился Комитет по градостроительству и архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (переименовано в Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов») с исковым заявлением к муниципальному унитарному предприятию «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» о взыскании неустойки за просрочку ввода объектов в эксплуатацию и за просрочку передачи жилых помещений в размере 72 980 561 руб. 70 коп.

Исковые требования основаны на ненадлежащем исполнении муниципальным унитарным предприятием «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» взятых на себя по муниципальным контрактам обязательств по своевременному вводу объекта в эксплуатацию, а также передаче  жилых помещений в порядке и в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось муниципальное унитарное предприятие «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» со встречным исковым заявлением к Комитету по градостроительству и архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (переименовано в Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов») о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам в размере 1 732 222 руб. 35 коп.

В ходе рассмотрения спора представитель муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно уточняла исковые требования, согласно последнему заявлению об уточнении исковых требований просит взыскать с Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» неустойку за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам в размере 1 117 447 руб. 43 коп.

В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Соответствующие уточнения исковых требований приняты арбитражным судом, поскольку они не противоречат закону и не нарушают права других лиц.

Встречные исковые требования основаны на ненадлежащем исполнении Комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» взятых на себя по муниципальным контрактам обязательств по оплате объектов долевого строительства, в порядке и в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2010г. №228-ФЗ) информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.

В судебном заседании 10 февраля 2020 года в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 13 февраля 2020 года до 10 часов 00 минут. После перерыва судебное заседание было продолжено.

В судебном заседании 13 февраля 2020 года в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 15 часов 00 минут того же дня. После перерыва судебное заседание было продолжено.

Представитель Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» поддерживает заявленные требования в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении, возражает против удовлетворения встречных исковых требований по основаниям, указанным в отзыве на встречный иск.

Представитель муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» возражает против удовлетворения первоначальных исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на иск, поддерживает встречные исковые требования с учетом уточнений, ссылается на то, что условие муниципальных контрактов о неустойке является ничтожным, поскольку содержит два противоположных метода расчета суммы пени, что противоречит ст. 34 ФЗ №44-ФЗ и Правилам № 1063, а также на то, что вина ответчика в нарушении сроков ввода дома в эксплуатацию и передачи жилых помещений истцу отсутствует, поскольку имело место нарушение обязательств по строительству подрядными организациями, что привело к тому, что ответчик не имел возможности получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки, а также просил применить нормы постановления Правительства РФ от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)». Кроме того, ответчик заявил ходатайство о снижении подлежащей взысканию неустойки на основании положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с её явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Третьи лица поддержали в полном объеме заявленные исковые требования Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на иск, возражениях, суд считает, что первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению частично, встречные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между Комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (Участник долевого строительства) и МУП «Саргоркапстройкомплект» (Застройщик) на основании результатов аукциона в электронной форме в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и  муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) заключено 1 342 муниципальных контракта на участие в долевом строительстве жилых помещений 

по адресу: 1-й проезд Энергетиков, д. 14/16: 0160300057316001720-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001721-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001722-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001723-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001724-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001725-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001726-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001727-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001728-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001729-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001730-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001731-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001732-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001733-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001734-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001735-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001736-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001737-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001738-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001739-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001740-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001741-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001742-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001743-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001744-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001745-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001746-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001747-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001748-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001749-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001750-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001751-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001752-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001753-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001754-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001755-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001756-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001757-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001758-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001759-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001760-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001761-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001762-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001763-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001764-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001765-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001766-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001767-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001768-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001769-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001770-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001771-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001772-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001773-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001774-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001775-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001776-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001777-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001778-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001779-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001780-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001781-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001782-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001783-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001784-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001785-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001786-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001787-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001788-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001789-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001790-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001791-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001792-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001793-0431160-02 от 09.09.2016, 0160300057316001798-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001799-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001800-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001801-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001802-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001803-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001804-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001805-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001806-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001807-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001808-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001809-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001810-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001811-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001812-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001813-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001814-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001815-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001816-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001817-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001818-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001819-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001820-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001821-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001822-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001823-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001824-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001825-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001826-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001827-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001828-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001829-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001830-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001831-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001832-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001833-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001834-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001835-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001836-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001837-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001838-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001839-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001840-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001841-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001842-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001843-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001844-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001845-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001846-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001847-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001848-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001849-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001850-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001851-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001852-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001853-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001854-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001855-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001856-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001857-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001858-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001859-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001860-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001861-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001862-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001863-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001864-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001865-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001866-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001867-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001868-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001869-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001870-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001871-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001872-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001873-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001875-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001876-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001877-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001878-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001879-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001880-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001881-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001882-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001883-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001884-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001885-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001886-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001887-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001888-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001889-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001890-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001891-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001892-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001893-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001894-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001895-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001896-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001897-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001898-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001899-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001900-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001901-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001902-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001903-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001904-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001905-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001906-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001907-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001908-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001909-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001910-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001911-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001912-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001913-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001914-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001915-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001916-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001917-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001918-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001919-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001920-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001921-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001922-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001923-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001924-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001925-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001926-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001927-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001928-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001929-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001930-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001932-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001933-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001934-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001935-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001936-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001937-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001938-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001939-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001940-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001941-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001942-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001943-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001944-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001945-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001946-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001947-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001948-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001949-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001950-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001951-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001952-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001953-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001954-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001955-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001956-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001957-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001958-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001959-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001960-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001961-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001962-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001963-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001964-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001965-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001966-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001967-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001968-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001969-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001970-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001971-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001972-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001973-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001974-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001975-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001976-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001978-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001979-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001980-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001981-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001982-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001983-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001984-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001985-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001986-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001987-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001988-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001989-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001990-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001991-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001992-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001993-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001994-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001995-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001996-0431160-02 от 12.09.2016, 0160300057316001997-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001998-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316001999-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002000-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002001-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002002-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002003-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002004-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002005-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002117-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002118-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002119-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002120-0431160-02 от 13.09.2016, 0160300057316002183-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002311-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002312-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002313-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002314-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002315-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002316-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002317-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002318-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002319-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002320-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002321-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002322-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002323-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002324-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002325-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002326-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002327-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002328-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002329-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002330-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002331-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002332-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002333-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002334-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002335-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002336-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002337-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002338-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002339-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002340-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002341-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002342-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002343-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002344-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002345-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002346-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002347-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002348-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002349-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002350-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002351-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002352-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002353-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002354-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002355-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002356-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002357-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002358-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002359-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002360-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002361-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002362-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002363-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002364-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002365-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002366-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002367-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002368-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002369-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002370-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002371-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002372-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002373-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002374-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002375-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002376-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002377-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002378-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002379-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002380-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002381-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002382-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002383-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002384-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002385-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002386-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002387-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002388-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002389-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002400-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002448-0431160-02 от 03.10.2016, 0160300057316002449-0431160-02 от 03.10.2016, 0160300057316002538-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002539-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002540-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002541-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002542-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002543-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002544-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002545-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002546-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002547-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002548-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002549-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002550-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002551-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002552-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002553-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002607-0431160-02 от 03.10.2016, 0160300057316002608-0431160-02 от 03.10.2016, 0160300057316002609-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002610-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002611-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002612-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002613-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002614-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002615-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002616-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002617-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002618-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002619-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002620-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002621-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002622-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002623-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002685-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002686-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002687-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002688-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002689-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002690-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002691-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002692-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002693-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002694-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002695-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002696-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002697-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002698-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002699-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002700-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002701-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002702-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002703-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002704-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002705-0431160-02 от 05.10.2016;

по адресу 3-й Артезианский проезд, 10: 0160300057316000003-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000004-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000005-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000006-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000007-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000008-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000009-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000010-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000011-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000012-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000013-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000014-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000028-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000029-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000030-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000031-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000032-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000034-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000035-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000036-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000037-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000038-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000039-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000040-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000041-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000042-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000043-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000044-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000045-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000046-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000047-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000048-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000049-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000050-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000052-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000053-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000054-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000055-0431160-02 от 25.03.2016, 0160300057316000084-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000085-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000086-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000087-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000088-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000089-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000090-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000091-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000092-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000093-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000094-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000095-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000096-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000097-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000098-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000099-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000100-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000101-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000535-0431160-02 от 18.04.2016, 0160300057316000536-0431160-02 от 18.04.2016, 0160300057316001198-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001199-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001200-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001204-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001206-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001207-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001294-0431160-02 от 01.09.2016, 0160300057316001295-0431160-02 от 01.09.2016, 0160300057316001309-0431160-02 от 01.09.2016, 0160300057316001310-0431160-02 от 01.09.2016, 0160300057316002164-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002165-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002166-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002167-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002168-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002169-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002170-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002171-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002172-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002173-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002174-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002175-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002176-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002177-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002178-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002179-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002180-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002181-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002182-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002184-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002185-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002186-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002187-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002188-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002189-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002190-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002191-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002192-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002193-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002194-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002195-0431160-02 от 21.09.2016, 0160300057316002813-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002814-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002815-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002816-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002817-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002818-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002819-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002820-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002821-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002822-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002823-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002824-0431160-02 от 04.10.2016, 0160300057316002825-0431160-02 от 04.10.2016;

2-й проезд им. Блинова Ф.А., д. 8: 0160300057316002674-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002675-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002718-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002719-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002720-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002721-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002722-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002723-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002724-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002725-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002726-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002727-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316003005-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003006-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003007-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003008-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003009-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003010-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003011-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003012-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003013-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316003014-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316003015-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316003016-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316003017-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316003018-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316003019-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316003020-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316003021-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003022-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003023-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003024-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003025-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003026-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003027-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003028-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003029-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003030-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003031-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003032-0431160-03 от 10.10.2016, 0160300057316003033-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003036-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003037-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003038-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003039-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003040-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003041-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003042-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003043-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003044-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003045-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003046-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003047-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003048-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003049-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003050-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003051-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003052-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003053-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003054-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003097-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003098-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003099-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003100-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003101-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003102-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003103-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003104-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003105-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003106-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003107-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003108-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003109-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003110-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003111-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003112-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003113-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003114-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003115-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003116-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003117-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003118-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003119-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003120-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003121-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003122-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003123-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003124-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003125-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003126-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003127-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003128-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003129-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003130-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003131-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003132-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003133-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003134-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003135-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003136-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003137-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003138-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003139-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003601-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003602-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003603-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003604-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003605-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003606-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003607-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003608-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003609-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003610-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003611-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003612-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003613-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003614-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003615-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003616-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003617-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003618-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003619-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003620-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003621-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003622-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003623-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003624-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003625-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003626-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003627-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003687-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003688-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003689-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003690-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003691-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003692-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003693-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003694-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003695-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003696-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003697-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003698-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003699-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003700-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003701-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003702-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003703-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003704-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003705-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003706-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003707-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003708-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003709-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003710-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003711-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003712-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003713-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003714-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003715-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003716-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003717-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003718-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003719-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003720-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003721-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003722-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003723-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003724-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003725-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003726-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003727-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003728-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003729-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003730-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003731-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003732-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003733-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003734-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003735-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003736-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003737-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003738-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003739-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003740-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003741-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003742-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003743-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003744-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003745-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003746-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003955-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003958-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316004058-0431160-02 от 01.11.2016; 

2-й проезд им. Блинова Ф.А.,8а: 0160300057316003140-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003141-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003142-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003143-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003144-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003145-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003146-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003147-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003148-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003149-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003150-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003151-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003152-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003153-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003154-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003155-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003156-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003157-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003158-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003159-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003749-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003750-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003751-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003752-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003753-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003754-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003755-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003756-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003757-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003758-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003759-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003760-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003761-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003762-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003763-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003764-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003765-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003766-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003767-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003768-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003769-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003770-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003771-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003772-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003773-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003774-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003775-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003776-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003777-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003778-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003779-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003780-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003781-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003782-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003783-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003784-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003785-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003786-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003787-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003788-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003789-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003790-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003791-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003792-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003793-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003794-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003795-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003796-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003797-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003798-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003799-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003800-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003801-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003802-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003803-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003804-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003805-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003806-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003807-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003808-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003809-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003810-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003811-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003812-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003813-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003814-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003815-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003816-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003817-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003818-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003819-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003820-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003822-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003822-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003824-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003825-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003826-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316004063-0431160-02 от 09.11.2016;

по адресу: ул. Ладожская, д. 5: 0160300057316003424-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003425-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003426-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003427-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003428-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003429-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003430-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003431-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003432-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003433-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003434-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003435-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003436-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003437-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003438-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003439-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003440-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003441-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003442-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003443-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003444-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003445-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003446-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003447-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003448-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003449-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003450-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003451-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003452-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003453-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003454-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003455-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003456-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003457-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003458-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003459-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003460-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003461-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003462-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003463-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003464-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003465-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003466-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003467-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003468-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003469-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003470-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003471-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003472-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003473-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003474-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003475-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003476-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003477-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003478-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003479-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003480-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003481-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003482-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003483-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003484-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003485-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003486-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003487-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003488-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003489-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003490-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003491-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003492-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003493-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003494-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003495-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003496-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003497-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003498-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003499-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003500-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003501-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003502-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003503-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003504-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003505-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003506-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003507-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003508-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003509-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003510-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003511-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003512-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003513-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003514-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003515-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003516-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003517-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003518-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003519-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003520-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003521-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003522-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003523-0431160-02 от 17.10.2016, 0160300057316003524-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003525-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003526-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003527-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003528-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003529-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003530-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003531-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003532-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003533-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003534-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003535-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003536-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003537-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003538-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003539-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003540-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003541-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003542-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003543-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003544-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003545-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003546-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003547-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003548-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003549-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003550-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003551-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003552-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003553-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003554-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003555-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003556-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003557-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003558-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003559-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003560-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003561-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003562-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003563-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003564-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003565-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003566-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003567-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003568-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003569-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003570-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003571-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003592-0431160-03 от 18.10.2016, 0160300057316003747-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316003748-0431160-02 от 20.10.2016, 0160300057316004061-0431160-02 от 09.11.2016, 0160300057316004064-0431160-02 от 09.11.2016, 0160300057316004067-0431160-02 от 09.11.2016;

ул. Романтиков, д. 44 и 46а: 0160300057316002525-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002554-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002555-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002556-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002557-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002558-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002559-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002560-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002561-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002562-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002563-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002564-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002565-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002566-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002567-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002568-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002569-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002570-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002571-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002572-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002573-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002574-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002575-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002576-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002577-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002578-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002579-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002580-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002581-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002582-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002583-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002584-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002585-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002586-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002587-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002588-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002589-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002590-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002591-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002592-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002593-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002594-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002595-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002596-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002597-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002598-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002599-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002601-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002603-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002604-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002605-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002606-0431160-02 от 27.09.2016, 0160300057316002638-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002639-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002640-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002641-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002642-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002643-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002644-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002645-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002646-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002648-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002649-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002650-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002651-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002652-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002653-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002654-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002655-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002656-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002657-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002658-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002659-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002660-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002661-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002662-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002663-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002664-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002666-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002667-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002668-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002669-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002670-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002671-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002672-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002673-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002684-0431160-02 от 28.09.2016, 0160300057316002706-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002708-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002709-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002710-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002711-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002715-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002717-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002765-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002766-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002767-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002768-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002769-0431160-02 от 05.10.2016, 0160300057316002844-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316002845-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316002846-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316002847-0431160-02 от 06.10.2016, 0160300057316002848-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316002849-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316002850-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316002852-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316002853-0431160-02 от 07.10.2016, 0160300057316003034-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003055-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003056-0431160-02 от 10.10.2016, 0160300057316003057-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003058-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003059-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003060-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003061-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003062-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003063-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003064-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003065-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003066-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003067-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003068-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003069-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003070-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003071-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003072-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003073-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003074-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003075-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003076-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003077-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003078-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003079-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003080-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003081-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003082-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003083-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003084-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003085-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003086-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003087-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003088-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003089-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003090-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003091-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003092-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003093-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003094-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003095-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003096-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003160-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003161-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003163-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003164-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003166-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003167-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003168-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003169-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003170-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003171-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003172-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003173-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003174-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003175-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003176-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003177-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003178-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003179-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003180-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003181-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003182-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003183-0431160-02 от11.10.2016, 0160300057316003184-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003185-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003186-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003187-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003188-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003189-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003190-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003191-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003192-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003193-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003194-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003195-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003196-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003197-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003198-0431160-02 от 11.10.2016, 0160300057316003410-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003411-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003412-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003413-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003414-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003420-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003421-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003422-0431160-02 от 14.10.2016, 0160300057316003576-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003577-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003578-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003579-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003580-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003581-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003582-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003583-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003584-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003585-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003586-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003587-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003588-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003589-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003590-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003591-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003593-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003594-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003595-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003596-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003597-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003598-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003600-0431160-02 от 18.10.2016, 0160300057316003630-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003631-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003632-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003633-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003634-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003635-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003636-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003637-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003638-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003639-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003640-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003641-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003643-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003644-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003645-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003646-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003647-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003648-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003649-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003650-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003651-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003652-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003653-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003654-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003655-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003656-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003657-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003658-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003659-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003660-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003661-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003662-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003663-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003664-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003665-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003666-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003667-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003668-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003669-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003670-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003671-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003672-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003673-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003674-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003675-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003676-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003677-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003678-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003679-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003680-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003681-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003682-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003683-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003684-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003685-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003686-0431160-02 от 19.10.2016, 0160300057316003829-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003830-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003831-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003832-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003833-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003834-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003835-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003836-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003837-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003838-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003840-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003842-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003845-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003846-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003847-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003848-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003849-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003850-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003851-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003852-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003853-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003855-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003856-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003857-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003858-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003859-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003860-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003861-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003862-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003863-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003864-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003865-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003866-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003867-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003868-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003869-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003870-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003871-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003872-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003873-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003874-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003875-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003876-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003877-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003878-0431160-02 от 21.10.2016, 0160300057316003879-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003880-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003881-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003882-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003884-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003885-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003886-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003887-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003888-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003889-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003890-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003891-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003892-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003893-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003894-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003895-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003896-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003897-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003898-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003899-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003900-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003901-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003902-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316003903-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316004030-0431160-02 от 24.10.2016, 0160300057316004054-0431160-02 от 01.11.2016, 0160300057316004057-0431160-02 от 01.11.2016.

В соответствии с пунктом 1.1. контрактов Участник долевого строительства по указанным контрактам является муниципальным заказчиком на осуществление закупки жилого помещения у Застройщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), решением Саратовской городской Думы от 17.12.2015 № 54-587 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год» в целях реализации мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 08 июля 2013 года № 1347 (с изменениями).

Предметом контрактов является приобретение у застройщика жилых помещений  в многоквартирном доме, строительство которого не завершено, в собственность муниципального образования «Город Саратов» в рамках реализации ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (пункт 2.1. контрактов).

В соответствии с пунктом 2.2. Контрактов, заключенных между Комитетом и Предприятием, последним принято на себя обязательство в предусмотренный контрактами срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) объект капитального строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом (от 9 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Саратовская область муниципальное образование «

<

...> (далее – Многоквартирный дом), и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленный Контрактом срок передать Участнику долевого строительства в собственность муниципального образования «Город Саратов» жилое помещение, отвечающее установленным Контрактом требованиям, а Участник долевого строительства обязуется в установленный Контрактом срок уплатить Застройщику, обусловленную Контрактом цену, и по окончании строительства, при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, принять жилое помещение, отвечающее установленном Контрактом требованиям.

Согласно подпункту 6.1.8. Контрактов Застройщиком принято на себя обязательство завершить строительство Многоквартирного дома и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 25 июля 2017 года.

13 сентября 2017 года в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 64-RU 6430400-69-2017 многоквартирный дом, расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «

<

...> введен в эксплуатацию, т.е. с нарушением установленного Контрактом срока, при этом просрочка составила 49 дней.

Согласно подпункту 6.1.9. Контрактов Застройщиком принято на себя обязательство передать Участнику долевого строительства жилые помещения по актам приема-передачи не позднее 15 августа 2017 года.

Жилые помещения №№ 1-140 переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 30 сентября 2017 года. Просрочка исполнения обязательств составила 45 дней.

Жилые помещения №№ 141-280 переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 20 сентября 2017 года. Просрочка исполнения обязательств составила 35 дней.

Жилые помещения №№ 280-420 переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 19 сентября 2017 года. Просрочка исполнения обязательств составила 34 дня.

Пунктом 8.2.1. контрактов установлено, что неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательств по контракту, в том числе предусмотренных пунктами 6.1.8., 6.1.9. контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом». Также указанным пунктом предусмотрена возможность начисления заказчиком пени по формуле, предусмотренной постановлением № 1063 с полной расшифровкой порядка расчета такой пени.

Таким образом, стороны в контрактах согласовали как минимальный размер ответственности застройщика, так и иной порядок определения размера пени в соответствии с требованиями постановления №1063 и Закона №44-ФЗ.

В этой связи, истцом в соответствии с пунктом 8.2.1. контрактов была начислена договорная неустойка по спорным муниципальным контрактам за нарушение ввода объекта в эксплуатацию размере 16 518 385 руб. 14 коп.; за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта строительства  в размере 12 807 197 руб. 36 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. Контрактов, заключенных между Комитетом и Предприятием, последним принято на себя обязательство в предусмотренный контрактами срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) объект капитального строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом (от 9 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, ж/д № 6, расположенный по адресу: Саратовская область муниципальное образование «

<

...> (строительный адрес), 

<

...> (почтовый адрес) (далее –  Многоквартирный дом), и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленный Контрактом срок передать Участнику долевого строительства в собственность муниципального образования «Город Саратов» жилое помещение, отвечающее установленным Контрактом требованиям, а Участник долевого строительства обязуется в установленный Контрактом срок уплатить Застройщику, обусловленную Контрактом цену, и по окончании строительства, при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, принять жилое помещение, отвечающее установленном Контрактом требованиям.

Согласно подпункту 6.1.8. Контрактов Застройщиком принято на себя обязательство завершить строительство Многоквартирного дома и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 25 июля 2017 года.

29 сентября 2017 года в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 64-RU 6430400-77-2017 многоквартирный дом, расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», 

<

...> (почтовый адрес) введен в эксплуатацию, т.е. с нарушением установленного Контрактом срока, при этом просрочка составила 65 дней.

Согласно подпункту 6.1.9. Контрактов Застройщиком принято на обязательство передать Участнику долевого строительства жилые помещения по актам приема-передачи не позднее 15 августа 2017 года.

Жилые помещения переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 13 октября 2017 года. Просрочка исполнения обязательств составила 59 дней.

Пунктом 8.2.1. Контрактов установлено, что неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательств по контракту, в том числе предусмотренных пунктами 6.1.8, 6.1.9 контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом». Также указанным пунктом предусмотрена возможность начисления заказчиком пени по формуле, предусмотренной постановлением № 1063 с полной расшифровкой порядка расчета такой пени.

Таким образом, стороны в договоре согласовали как минимальный размер ответственности застройщика, так и иной порядок определения размер пени в соответствии с требованиями постановления №1063 и Закона №44-ФЗ.

В этой связи, истцом в соответствии с пунктом 8.2.1 контрактов была начислена договорная неустойка по спорным муниципальным контрактам за нарушение ввода объекта в эксплуатацию размере 10 449 598 руб. 82 коп.; за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта строительства в размере 9 485 892 руб. 60 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. Контрактов, заключенных между Комитетом и Предприятием, последним принято на себя обязательство в предусмотренный контрактами срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) объект капитального строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом (от 9 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, ж/дома №№ 4, 7, расположенные по адресу: 

<

...>, Этап 1, б/секции «А», «Б», «В», «Г» (строительный адрес);Саратовская область муниципальное образование «Город Саратов» 

<

...> и 

<

...> (почтовые адреса) (далее –  Многоквартирный дом), и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленный Контрактом срок передать Участнику долевого строительства в собственность муниципального образования «Город Саратов» жилое помещение, отвечающее установленным Контрактом требованиям, а Участник долевого строительства обязуется в установленный Контрактом срок уплатить Застройщику, обусловленную Контрактом цену, и по окончании строительства, при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, принять жилое помещение, отвечающее установленном Контрактом требованиям.

Согласно подпункту 6.1.8. Контрактов Застройщиком принято на себя обязательство завершить строительство Многоквартирного дома и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 25 июля 2017 года.

18 августа 2017 года в соответствии с разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию № 64-RU 6430400-53-2017 и № 64-RU 6430400-54-2017 многоквартирные дома, расположенные по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», 

<

...> и Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», 

<

...> (почтовые адреса) введены в эксплуатацию, т.е. с нарушением установленного Контрактом срока, при этом просрочка составила 18 дней.

Согласно подпункту 6.1.9. Контрактов Застройщиком принято на обязательство передать Участнику долевого строительства жилые помещения по актам приема-передачи не позднее 15 августа 2017 года.

Жилые помещения переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 29 августа 2017 года. Просрочка исполнения обязательств составила 13 дней.

Пунктом 8.2.1. Контрактов установлено, что неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательств по контракту, в том числе предусмотренных пунктами 6.1.8., 6.1.9. контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом». Также указанным пунктом предусмотрена возможность начисления заказчиком пени по формуле, предусмотренной постановлением № 1063 с полной расшифровкой порядка расчета такой пени.

Таким образом, стороны в договоре согласовали как минимальный размер ответственности застройщика, так и иной порядок определения размер пени в соответствии с требованиями постановления №1063 и Закона №44-ФЗ.

В этой связи, истцом в соответствии с пунктом 8.2.1. контрактов была начислена договорная неустойка по спорным муниципальным контрактам за нарушение ввода объекта в эксплуатацию размере 8 428 391 руб. 29 коп.; за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта строительства в размере 4 980 413 руб. 04 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. Контрактов, заключенных между Комитетом и Предприятием, последним принято на себя обязательство в предусмотренный контрактами срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) объект капитального строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом (от 9 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, ж/д № 5, расположенный по адресу: Саратовская область муниципальное образование «

<

...> (строительный адрес), 

<

...> (почтовый адрес) (далее –  Многоквартирный дом), и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленный Контрактом срок передать Участнику долевого строительства в собственность муниципального образования «Город Саратов» жилое помещение, отвечающее установленным Контрактом требованиям, а Участник долевого строительства обязуется в установленный Контрактом срок уплатить Застройщику, обусловленную Контрактом цену, и по окончании строительства, при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, принять жилое помещение, отвечающее установленном Контрактом требованиям.

Согласно подпункту 6.1.8. Контрактов Застройщиком принято на себя обязательство завершить строительство Многоквартирного дома и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 25 июля 2017 года.

13 сентября 2017 года в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 64-RU 6430400-70-2017 многоквартирный дом, расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», 

<

...> (почтовый адрес) введен в эксплуатацию, т.е. с нарушением установленного Контрактом срока, при этом просрочка составила 49 дней.

Согласно подпункту 6.1.9. Контрактов Застройщиком принято на обязательство передать Участнику долевого строительства жилые помещения по актам приема-передачи не позднее 15 августа 2017 года.

Часть жилых помещений переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 18 сентября 2017 года. Просрочка исполнения обязательств составила 33 дня.

Часть жилых помещений переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 20 сентября 2017 года. Просрочка исполнения обязательств составила 35 дней.

Пунктом 8.2.1. Контрактов установлено, что неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательств по контракту, в том числе предусмотренных пунктами 6.1.8, 6.1.9 контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом». Также указанным пунктом предусмотрена возможность начисления заказчиком пени по формуле, предусмотренной постановлением № 1063 с полной расшифровкой порядка расчета такой пени.

Таким образом, стороны в договоре согласовали как минимальный размер ответственности застройщика, так и иной порядок определения размер пени в соответствии с требованиями постановления №1063 и Закона №44-ФЗ.

В этой связи, истцом в соответствии с пунктом 8.2.1. контрактов была начислена договорная неустойка по спорным муниципальным контрактам за нарушение ввода объекта в эксплуатацию размере 5 131 891 руб. 57 коп.; за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта строительства в размере 3 982 319 руб. 38 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. Контрактов, заключенных между Комитетом и Предприятием, последним принято на себя обязательство в предусмотренный контрактами срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) объект капитального строительства: многоэтажная жилая застройка: многоквартирный дом по адресу: ул. Ладожская, 

<

...> в Заводском районе г. Саратова (от 9 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «

<

...>, д. 5 (строительный адрес) (далее –  Многоквартирный дом), и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленный Контрактом срок передать Участнику долевого строительства в собственность муниципального образования «Город Саратов» жилое помещение, отвечающее установленным Контрактом требованиям, а Участник долевого строительства обязуется в установленный Контрактом срок уплатить Застройщику, обусловленную Контрактом цену, и по окончании строительства, при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, принять жилое помещение, отвечающее установленном Контрактом требованиям.

Согласно подпункту 6.1.8. Контрактов Застройщиком принято на себя обязательство завершить строительство Многоквартирного дома и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 25 июля 2017 года.

25 августа 2017 года в соответствии с разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию № 64-RU 6430400-62-2017 многоквартирный дом, расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «

<

...>, д. 5 (строительный адрес) введен в эксплуатацию, т.е. с нарушением установленного Контрактом срока, при этом просрочка составила 30 дней.

Согласно подпункту 6.1.9. Контрактов Застройщиком принято на обязательство передать Участнику долевого строительства жилые помещения по актам приема-передачи не позднее 15 августа 2017 года.

Жилые помещения переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 05 сентября 2017 года. Просрочка исполнения обязательств составила 20 дней.

Пунктом 8.2.1. контрактов установлено, что неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательств по контракту, в том числе предусмотренных пунктами 6.1.8, 6.1.9 контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом». Также указанным пунктом предусмотрена возможность начисления заказчиком пени по формуле, предусмотренной постановлением № 1063 с полной расшифровкой порядка расчета такой пени.

Таким образом, стороны в договоре согласовали как минимальный размер ответственности застройщика, так и иной порядок определения размер пени в соответствии с требованиями постановления №1063 и Закона №44-ФЗ.

В этой связи, истцом в соответствии с пунктом 8.2.1. контрактов была начислена договорная неустойка по спорным муниципальным контрактам за нарушение ввода объекта в эксплуатацию размере 3 602 936 руб. 11 коп.; за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта строительства в размере 2 401 957 руб. 40 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. Контрактов, заключенных между Комитетом и Предприятием, последним принято на себя обязательство в предусмотренный контрактами срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) объект капитального строительства: многоквартирный дом по адресу (от 9 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями: «Многоэтажный многоквартирный дом № 3 (по генплану)», расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «

<

...> строительный адрес); 

<

...> (почтовый адрес), (далее –  Многоквартирный дом), и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленный Контрактом срок передать Участнику долевого строительства в собственность муниципального образования «Город Саратов» жилое помещение, отвечающее установленным Контрактом требованиям, а Участник долевого строительства обязуется в установленный Контрактом срок уплатить Застройщику, обусловленную Контрактом цену, и по окончании строительства, при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, принять жилое помещение, отвечающее установленном Контрактом требованиям.

Согласно подпункту 6.1.8. Контрактов Застройщиком принято на себя обязательство завершить строительство Многоквартирного дома и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 20 ноября 2016 года.

12 декабря 2016 года в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 64-RU 6430400-147-2016 многоквартирный дом, расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «

<

...> строительный адрес); 

<

...> (почтовый адрес) введен в эксплуатацию, т.е. с нарушением установленного Контрактом срока, при этом просрочка составила 21 день.

Согласно подпункту 6.1.9. Контрактов Застройщиком принято на обязательство передать Участнику долевого строительства жилые помещения по актам приема-передачи не позднее 10 декабря 2016 года.

Часть жилых помещений переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 15 декабря 2016 года. Просрочка исполнения обязательств составила 4 дня.

Часть жилых помещений переданы Участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 27 декабря 2016 года. Просрочка исполнения обязательств составила 16 дней.

Пунктом 8.2.1. Контрактов установлено, что неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательств по контракту, в том числе предусмотренных пунктами 6.1.8., 6.1.9. контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом». Также указанным пунктом предусмотрена возможность начисления заказчиком пени по формуле, предусмотренной постановлением № 1063 с полной расшифровкой порядка расчета такой пени.

Таким образом, стороны в договоре согласовали как минимальный размер ответственности застройщика, так и иной порядок определения размер пени в соответствии с требованиями постановления №1063 и Закона №44-ФЗ.

В этой связи, истцом в соответствии с пунктом 8.2.1. контрактов была начислена договорная неустойка по спорным муниципальным контрактам за нарушение ввода объекта в эксплуатацию размере 6 575 720 руб. 66 коп.; за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта строительства в размере 2 499 517 руб. 70 коп.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается участвующими в деле лицами факт просрочки исполнения предприятием обязательств по контрактам.

Заключенные сторонами муниципальные контракты являются договорами долевого участия в строительстве, положения которых регулируются, как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ).

Муниципальные контракты не признаны недействительными или не заключенными в установленном законом порядке.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Договор участия в долевом строительстве по своей правовой природе является смешанным договором, содержащим элементы договора купли-продажи, строительного подряда, долевого строительства, следовательно, стороны такого договора должны сотрудничать в силу норм статьи 750 Гражданского кодекса Российской Федерации и принимать все зависящие от них меры по устранению препятствий к надлежащему исполнению заключенного договора.

Пунктом 1 статьи 1 Закона № 214-ФЗ предусмотрено, что настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Пунктом 1 статьи 4 Закона № 214-ФЗ предусмотрено, что по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или)иного объекта недвижимости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 № 214-ФЗ договор должен содержать: определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; гарантийный срок на объект долевого строительства.

По смыслу положений градостроительного законодательства и Закона об участии в долевом строительстве застройщик передает объект долевого строительства после ввода в эксплуатацию созданного объекта недвижимости. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства является существенным условием договора об участии в долевом строительстве.

Статьей 6 Закона № 214-ФЗ в строительстве предусмотрена обязанность застройщика передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором. Частью 2 указанной статьи установлено, что в случае нарушения определенного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки.

Пунктом 8.2.1. контрактов установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательств по контракту, в том числе предусмотренных пунктами 6.1.8., 6.1.9. контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком в соответствии с постановлением № 1063. Также указанным пунктом предусмотрена возможность начисления заказчиком пени по формуле, предусмотренной постановлением №1063 с полной расшифровкой порядка расчета такой пени.

Таким образом, стороны в договоре согласовали как минимальный размер ответственности застройщика, так и иной порядок определения размера пени в соответствии с требованиями постановления №1063 и Закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Довод ответчика о ничтожности условия пункта 8.2.1. контрактов об установлении двух противоположных методов расчета суммы пени противоречит положениям статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правил № 1063, судом отклоняется по следующим основаниям.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Согласно пункту 6 названных Правил пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливаются в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяются по формуле: 

П = (Ц-В) х С.

В пункте 8.2.1. контрактов, предусмотрен порядок определения ответственности подрядчика установленный законодателем.

Определение размера пени по формуле, установленной постановлением №1063, которая также воспроизведена в тексте указанного пункта, не противоречит ни требованиям Закона №44-ФЗ, ни требованиям постановления№1063.

Судом проверен расчет пени заказчика и установлено, что расчет произведен в соответствии с формулой, установленной Постановлением №1063, а, не исходя из 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. Кроме того, истцом при расчете применена ключевая ставка Банка России с 18.09.2017 в размере 8,5 процентов годовых. Данные обстоятельства не оспаривались представителем истца. Ответчиком представлялся расчет пени исходя из 1/300 ставки рефинансирования (6,00%), согласно которому сумма неустойки (пени) составляла за просрочку ввода дома в эксплуатацию 10 219 992 руб. 11 коп., за просрочку передачи квартир 7 816 192 руб. 37 коп., а всего 18 036 192 руб. 37 коп.

Согласно пункту 69 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского Кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заранее установленные условия договора о неприменении или ограничении применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации являются ничтожными (пункты 1 и 4 статьи 1, пункт 1 статьи 15 и пункт 2 статьи 168 Кодекса).

В соответствии с пунктом 77 указанного Постановления снижение размера договорной неустойки допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

По смыслу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно Определению Конституционного Суда от 21.12.2000 N 263-О, применяя статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд должен установить реальное соотношение предъявленной неустойки и последствий невыполнения должником обязательства по договору, чтобы соблюсти правовой принцип возмещения имущественного ущерба, согласно которому не допускается применение мер карательного характера за нарушение договорных обязательств. Являясь мерой гражданско-правовой ответственности, неустойка носит компенсационный характер и не может служить источником обогащения лица, требующего ее уплаты.

Поскольку многоквартирные дома введены в эксплуатацию, хотя и с незначительным нарушением срока, квартиры в надлежащем состоянии переданы заказчику, что подтверждается материалами дела, суд приходит к выводу о несоразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства.

Определяя размер неустойки, суд считает возможным определить размер ответственности застройщика равным размеру ответственности заказчика, предусмотренной пунктом 8.3.1 контрактов, что также не противоречит условиям пункта 8.2.1. об ответственности застройщика равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

При рассмотрении искового заявления стороны не возражали при  расчете размера пени исходить из ключевой ставки, утвержденной Банком России, действующей на момент рассмотрения искового заявления, и принятия настоящего решения, которая составляет 6,00 %.

Кроме того, судом установлено, что по муниципальным контрактам, предметом которых являлось приобретение у застройщика жилых помещений в многоквартирном доме (от 9 надземных этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями: «Многоэтажный многоквартирный дом № 3 (по генплану)», расположенный по строительному адресу: Саратовская область, муниципальное образование «

<

...> 

В соответствии с условиями указанных муниципальных контрактов, срок ввода объекта в эксплуатацию установлен не позднее 20 ноября 2016 года, срок передачи жилых помещений – не позднее 10 декабря 2016 года.

Разрешением от 12.12.2016 № 64-RU 64304000-147-2016 жилой дом, расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «

<

...> строительный адрес) введен в эксплуатацию. Жилые помещения (квартиры) фактически переданы участнику долевого строительства по актам приема-передачи от 15.12.2016, от 27.12.2016.

При рассмотрении обоснованности начисления неустойки за несвоевременную сдачу объекта в эксплуатацию товара по указанным муниципальным контрактам, судом было установлено следующее.

Согласно части 6.1. статьи 34 Закона №44-ФЗ в 2016 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ Правительством Российской Федерации было принято постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 года №190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пени) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пени)», которым установлено, что заказчики предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2016 году исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств.

Согласно пункту 3 данного постановления предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком в следующем порядке: 

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней); 

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик: - предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; - осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.03.2016 г. № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 или 2016 годах исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определениях Верховного Суда РФ №307-ЭС17-9159, №303-ЭС17-1652.

Из пункта 40 «Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) следует, что списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с частью 6.1. статьи 34 Закона о контрактной системе является обязанностью заказчика, в связи с чем суд обязан проверить соблюдение им требований указанной нормы. Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки.

В рассматриваемом деле судом установлено, что начисленная истцом неустойка не превышает 5% цены контракта, исполнение каждого контракта в полном объеме было завершено в 2016 году.

Муниципальное унитарное предприятие «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» исполнило в полном объеме все свои обязательства по вышеуказанным муниципальным контрактам (за исключением гарантийных обязательств) в 2016 году.

На основании изложенного, суд полагает, что списание такой неустойки является обязанностью Комитета, предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек является одной из мер поддержки Застройщиков. Истец, обратившись в суд с иском о взыскании с Застройщика неустойки, злоупотребляет своим правом, так как в силу действующего законодательства истец был обязан произвести списание начисленной ответчику неустойки.

Следовательно, в соответствии с пунктом 1, подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190  начисленная неустойка подлежала списанию истцом. Указанным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 №196 императивно установлена обязанность заказчика списать неустойку, если общая ее сумма не превышает 5% цены контракта.

Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Комитета о взыскании неустойки за просрочку ввода объектов в эксплуатацию в размере 6 575 720 руб. 66 коп., неустойки за нарушение сроков передачи жилых помещений участнику долевого строительства объекта строительства в размере 2 499 517 руб. 70 коп. и отказывает Комитету в указанной части 

11 декабря 2017 года Комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» на основании уведомления №10-01-11-19/5370 в одностороннем порядке был произведен зачет взаимных однородных требований.

Согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.12.2017 задолженность Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в пользу муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» составляет 13 886 017 руб. 01 коп., акт подписан сторонами без замечаний и возражений, скреплен печатями организаций.

На основании изложенного, суд, применяя положения статьей 410, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяет к взысканию неустойку за просрочку вода объектов в эксплуатацию и за просрочку передачи жилых помещений в размере 4 150 175 руб. 36 коп. (18 036 192 руб. 37 коп. – 13 886 017 руб. 01 коп.). В остальной части заявленных требований суд отказывает.

В отношении встречных исковых требований, судом установлено следующее.

Между Комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» и муниципальным унитарным предприятием «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» были заключены следующие муниципальные контракты: №№ 0160300057316000102-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000103-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000104-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000105-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000106-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000107-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000108-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000109-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000110-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000111-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000112-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000113-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000114-0431160-02, 0160300057316000115-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000116-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000117-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000118-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000119-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000120-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000121-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000122-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000123-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000124-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000125-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000126-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000127-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000128-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000129-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000130-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000131-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000132-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000133-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000134-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000135-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000136-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000137-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000138-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000139-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000140-0431160-02 от 29.03.2016, № 0160300057316000141-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000142-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000143-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000144-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000145-0431160-02 от 29.03.2016, № 0160300057316000146-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000147-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000148-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000149-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000150-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000151-0431160-02 от 29.03.2016, 0160300057316000172-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000173-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000174-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000175-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000178-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000180-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000181-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000182-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000189-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000190-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000191-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000193-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000194-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000195-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000197-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316000198-0431160-02 от 04.04.2016, 0160300057316001038-0431160-02 от 07.06.2016, 0160300057316001047-0431160-02 от 31.05.2016, 0160300057316001052-0431160-02 от 31.05.2016, 0160300057316001053-0431160-02 от 31.05.2016, 0160300057316001137-0431160-02 от 31.05.2016, 0160300057316001201-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001202-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001203-0431160-02 от 04.07.2016, 0160300057316001205-0431160-02 от 04.07.2016.

Предметом указанных контрактов, является приобретение у застройщика жилых помещений в многоквартирном доме (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями: «Многоэтажный многоквартирный дом по адресу: ул. Ленинская слободка, д. 1 в Ленинском районе г. Саратова», расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов, сл. Ленинская, ул. Ленинская Слободка, 1, 2, 3, 4 (строительный адрес).

Согласно пункту 3.6.4. муниципальных контрактов окончательный расчет по контракту производится в течение 20 календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи жилого помещения. 

09.12.2016 между муниципальным унитарным предприятием «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» и Комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» были подписаны акты приема-передачи жилых помещений в указанном многоквартирном доме. Однако по состоянию на 13 декабря 2017 года Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» не произвел оплату по указанным муниципальным контрактам в размере                         4 226 645 руб. 25 коп.  

Кроме того, между муниципальным унитарным предприятием «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» и Комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» были заключены ранее перечисленные муниципальные контракты, предметом которых являлось приобретение у застройщика жилых помещений в многоквартирном доме (от 9 надземных этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями: «Многоэтажный многоквартирный дом № 3 (по генплану)», расположенный по строительному адресу: Саратовская область, муниципальное образование «

<

...> 

Согласно условиям муниципальных контрактов определён порядок и сроки оплаты, а именно: оплата за жилое помещение осуществляется участником долевого строительства путем внесения денежных средств на расчетный счет застройщика в следующем порядке:

- аванс 30% от цены контракта в течение 60 календарных дней со дня регистрации контракта в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- долевой взнос 25% от цены контракта в случае предоставление застройщиком справки от 60%-89% степени строительной готовности многоквартирного дома, в котором расположено приобретаемое жилое помещение в течение 60 календарных дней со дня получения участником долевого строительства от застройщика указанной справки;

- долевой взнос 25% от цены контракта в случае предоставления застройщиком справки о 90%-100% степени строительной готовности многоквартирного дома, в котором расположено приобретаемое жилое помещение (при наличии справки о 60%-89 степени строительной готовности многоквартирного дома) в течение 60 календарных дней со дня получения участником долевого строительства от застройщика указанной справки;

- окончательный расчет по контракту производится в течение 20 календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи жилого помещения.

Однако, Комитетом по градостроительству и архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» были нарушены сроки оплаты по муниципальным контрактам.

15.12.2016 и 27.12.2016 между муниципальным унитарным предприятием «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» и Комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» были подписаны акты приема-передачи жилых помещений в указанном многоквартирном доме. Однако, по состоянию на 13 декабря 2017 года Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» не произвел оплату по указанным муниципальным контрактам в размере 9 659 371,76 руб. 

Согласно представленному муниципальным унитарным предприятием «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» расчету размер неустойки за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам, с учетом уточнений, составляет 1 117 447 руб. 43 коп.

Претензии муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» от 01.08.2019 исх. № 1187 и исх. № 1188 об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» не удовлетворил, сославшись на отсутствие каких-либо законных оснований для начисления и взыскания неустойки (вх. № 990 и № 991 от 07.08.2019).

Рассмотрев довод Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» о том, что оплата по муниципальным контрактам произведена в полном объеме, суд не находит его обоснованным. Данный довод также противоречит имеющимся в деле доказательствам.

Возможность применения гражданско-правовой договорной ответственности в виде неустойки предусмотрена Федеральным законом №44-ФЗ и главой 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами.

Согласно статье 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Статья 190 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

В силу пункта 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Одно из основных начал гражданского законодательства - свобода договора (пункт 1статьи 1, статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации), а одним из частных его проявлений, в свою очередь, является закрепленная параграфом 2 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность сторон договора предусмотреть на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства неустойку, которой данный Кодекс называет определенную законом или договором денежную сумму, подлежащую уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (пункт 1статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона №214-ФЗ, в  случае нарушения установленного договором срока внесения платежа участник долевого строительства уплачивает застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

В соответствии с условиями муниципальных контрактов в случае просрочки исполнения участником долевого строительства обязательств по контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, застройщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения участником долевого строительства обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Таким образом, в муниципальных контрактах, заключенных между истцом и ответчиком, обоснованно установлена неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

На основании пунктов 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Основанием для освобождения от уплаты неустойки в соответствии с положениями пункта 9 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе является вина другой стороны обязательства. Данное положение соответствует требованиям пункта 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Суд считает несостоятельными доводы Комитета о том, что в его действиях по ненадлежащему исполнению обязательств отсутствует его вина, поскольку Комитет финансируется за счет средств муниципального бюджета, и действует в пределах выделенных ему лимитов.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательств одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенные действия.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

С учетом данных обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что в ходе рассмотрения дела подтверждается факт несвоевременного выполнения Комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» своих обязательств по оплате объектов долевого строительства, в соответствии с чем, муниципальным унитарным предприятием «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» была начислена неустойка. Суд, проверив представленный расчет неустойки, считает его верным.

На основании изложенного, суд считает, что встречные исковые требования муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» о взыскании с Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» неустойки за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам в размере 1 117 447 руб. 43 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, производится судом в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины. Аналогично, подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых требований.

В соответствии с пунктом 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81, если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком, исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения. В случаях, когда истец освобожден от уплаты государственной пошлины, соответствующая сумма государственной пошлины взыскивается с ответчика пропорционально размеру сниженной судом неустойки (часть 3 статьи 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковое заявление Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» город Саратов удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов в пользу Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов неустойку за просрочку вода объектов в эксплуатацию и за просрочку передачи жилых помещений в размере 4 150 175 руб. 36 коп.

Встречное исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация город Саратов удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов в пользу муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов неустойку за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам в размере 1 117 447 руб. 43 коп. 

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов в пользу Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов денежные средства в размере 3 032 727  руб. 93 коп.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) город Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 373 руб.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

            Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.

           Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации.

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области

 

А.В. Кузьмин