АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-12458/2022

18 мая 2023 года

город Симферополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 18 мая 2023 года.  Решение в полном объеме изготовлено 18 мая 2023 года.  

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев дело по исковому заявлению  

Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Республики Крым» (295021, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  31.12.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (344019,  Ростовская область, Ростов-на-Дону город, Краснофлотский переулок, 22, 132, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2008, ИНН: 

<

***>, КПП: 616701001)  

о взыскании, 

при участии уполномоченных представителей сторон:  от истца - ФИО2 по доверенности от 09.12.2022  

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Республики Крым» обратилось в Арбитражный суд Республики  Крым с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС  ПОРТАЛ», согласно котором просит суд взыскать неустойку по факту нарушения  условий договора № ПСД/2020/8 от 21 сентября 2020 года в размере 2 028 986,12 руб.  

С учётом предоставленного судом срока для устранения недостатков, исковое  заявление принято к производству суда Определением Арбитражного суда Республики  Крым от 08 августа 2022 года с рассмотрением дела по общим правилам искового  судопроизводства с назначением предварительного судебного заседания на 15 сентября  2022 года, в ходе которого признав дело подготовленным суд, в порядке части 4 статьи  137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)  перешёл на стадию судебного разбирательства и отложил судебное заседание по причине  необходимости предоставления сторонами дополнительных документов.  

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых  требований, представил дополнительные пояснения по иску.  

Ответчик явку уполномоченных представителей не обеспечил, о дате, времени и  месте судебного заседания уведомлен своевременно, ходатайствовал об отложении  судебного заселения.  

Перечень оснований для отложения судебного разбирательства предусмотрен  статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Так, согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если  признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе  вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников  арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при  использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем  видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении  судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных  доказательств, при совершении иных процессуальных действий.  

По смыслу названной нормы отложение судебного разбирательства является  правом, а не обязанностью суда, обусловленным объективной невозможностью  рассмотрения дела в настоящем судебном заседании.  

Поскольку сведения о наличии обстоятельств, объективно препятствующих  рассмотрению дела N А83-12458/2022 в настоящем судебном заседании, у суда  отсутствуют, т.к. заявителем не представлены доказательства наличия уважительных  причин неявки представителя в судебное заседание, остальные участники процесса  возражают против отложения рассмотрения дела, ссылаясь на нарушение своих прав, суд  отказывает заявителю в удовлетворении заявленного ходатайства.  

Более того, институт представительства в гражданском праве, предполагает  возможность заявителя по настоящему делу делегировать право представления его  интересов в суде неограниченному количеству лиц, и безосновательное предпочтение  представителем заявителя участие в ином процессе настоящему, инициированному по его  заявлению, влечет за собою правовые последствия, предусмотренные ст. 9 АПК РФ.  

Так, неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле,  влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим кодексом последствия (ч. 3 ст.  41 ПК РФ).  

Таким образом, юридическое лицо, используя предусмотренный гражданским  законодательством институт представительства, вправе было назначить другого  правомочного представителя для защиты своих прав и законных интересов в арбитражном  суде.  

В соответствии с положениями статей 121, 123 и 156 АПК РФ судебное заседание  проведено в отсутствие ответчика.  

Согласно отзыва на исковое заявление, ответчик просил в удовлетворении  исковых требований в полном объеме отказать, просил снизить размер неустойки по  правилам статьи 333 ГК РФ до 440 148,57 руб..  

С учетом надлежащего извещения сторон о времени и месте судебного  разбирательства, суд определил возможным рассмотреть исковое заявление по существу.  

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в  совокупности, считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по  следующим основаниям.  

Судом установлено, что между некоммерческой организацией "Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" (заказчик) и  обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес портал" (подрядчик) по итогам  проведения электронного аукциона заключен договор № ПСД/2020/8 от 21 сентября 2020  года(далее – договор) на выполнение работ по разработке проектно-сметной  документации на проведение капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах.  

В соответствии с п. 1.1. договора Подрядчик обязуется своими силами (с правом  привлечения третьих лиц – субподрядчиков), в соответствии с условиями договора,  выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на проведение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – объекты),  расположенных по адресам согласно приложению № 1 к договору. Результатом  выполнения работ по договору является разработанная, согласованная в установленном  порядке и утверждённая Заказчиком проектно-сметная документация.  

Согласно п. 2.1.договора цена договора определена по итогам электронного  аукциона и составляет 658 450, 00 руб. (НДС не облагается), в том числе по объектам  согласно приложению № 1.  

Пунктом 4.1.4. договора предусмотрено, что Подрядчик обязуется представить  Заказчику разработанную ПСД в сроки, предусмотренные договором.  

В соответствии с п. 3.1. договора срок выполнения работ по договору: не более 180  (ста восьмидесяти) дней со дня подписания договора. В частности: дата начала работ – с  21.09.2020, дата окончания работ – по 22.03.2021.  

Согласно п. 5.1. договора приёмка работ по каждому многоквартирному дому  осуществляется комиссией.  

Пунктом 5.8. договора предусмотрено, что работы по договору считаются  принятыми и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими  при приёмке работ членами комиссии комиссионного акта.  

В соответствии с актами приемки выполненных работ по разработке проектной  документации работы по объектам, указанным в адресном перечне (приложение № 1 к  договору), фактически сданы Подрядчиком:  

1. г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, д. 4 (ПСД ВДИС) - 17.03.2022  (просрочка 360 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных  домов - 303 430, 00 руб.  

2. г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, д. 21 (ПСД ВДИС) - 17.03.2022  (просрочка 360 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных  домов - 342 870,00 руб.  

3. г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, д. 22 (ПСД ВДИС) - 17.03.2022  (просрочка 360 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных  домов - 304 620,00 руб.  

4. г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, д. 28 (ПСД ВДИС) - 21.01.2022  (просрочка 305 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных  домов - 307 170, 00 руб.  

5. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 21.01.2022 (просрочка 305 дней)  стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 298 000,00 руб.  

6. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 17.03.2022 (просрочка  360 дней) стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 363  240, 00 руб.  

7. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 17.12.2021 (просрочка 270  дней) стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 228 520, 00  руб.  

8. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 17.12.2021 (просрочка  270 дней) стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 106  370, 00 руб.  

9. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 17.12.2021 (просрочка 270  дней) стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 320 560, 00  руб.  

10. г. Краснонерекопск, мкр. 2, д. 11 (ПСД ВДИС) - 21.01.2022 (просрочка 305  дней) стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 336 590,00  руб.  

11. г. Красноперекопск, мкр. 2, д. 20 (ПСД ВДИС) - 21.01.2022 (просрочка 305  дней) стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 304 420,00  руб.  

12. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 20.01.2022 (просрочка 304  дня) стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 334 940, 00  руб.  

13. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 20.01.2022 (просрочка  304 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 334  560, 00 руб.  

14. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 20.01.2022 (просрочка  304 дня), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 314  580,00 руб.  

15. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 17.12.2021 (просрочка 270 дней),  стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 404 120, 00 руб.  

16. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 17.12.2021 (просрочка 270  дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных домов - 398 500,00  руб.  

17. 

<

...> (ПСД ВДИС) -  21.01.2022 (просрочка 305 дней), стоимость работ согласно адресному перечню  многоквартирных домов - 156 940, 00 руб.  

18. 

<

...> (ПСД ВДИС) -  21.01.2022 (просрочка 305 дней), - стоимость работ согласно адресному перечню  многоквартирных домов - 151 120, 00 руб.  

19. Первомайский район, пгт. Первомайское, ул. Эдуарда Корлана, д. 11 (ПСД  ВДИС) -21.01.2022 (просрочка 305 дней) стоимость работ согласно адресному перечню  многоквартирных домов - 290 620, 00 руб.  

20. 

<

...> СССР, д. 2 (ПСД ВДИС) - 21.01.2022  (просрочка 305 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных  домов - 124 100, 00 руб.  

21. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 21.01.2022  (просрочка 305 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных  домов - 123 960, 00 руб.  

22. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 21.01.2022  (просрочка 305 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных  домов - 364 320, 00 руб.  

23. 

<

...> (ПСД ВДИС) - 21.01.2022  (просрочка 305 дней), стоимость работ согласно адресному перечню многоквартирных  домов - 184 860, 00 руб.  

24. 

<

...> (ПСД ВДИС) -  28.10.2021 (просрочка 202 дня), стоимость работ согласно адресному перечню  многоквартирных домов - 162 740, 00 руб.  

25. Черноморский район, пгт. Черноморское, проезд Промышленный, д. 8 (ПСД  ВДИС) -28.10.2021 (просрочка 202 дня), стоимость работ согласно адресному перечню  многоквартирных домов - 97 300, 00 руб.  

Согласно 3.3. договора, установленный в п. 3.2. договора срок выполнения работ по  договору и (или) установленный в графике выполнения работ срок исполнения этапов  работ, являются исходными для определения имущественных санкций и расторжения  договора в случаях нарушения сроков выполнения работ по договору, этапу(-ам)  выполнения работ.  

В соответствии с п. 6.2.1. договора за просрочку исполнения обязательств,  предусмотренных договором, в том числе сроков выполнения работ, установленных в п.  3.2. договора, графике выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки  

в размере 0,1% от стоимости этапа работ, указанной в п. 2.1. договора, за каждый день  просрочки до фактического исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после  дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до даты  фактического исполнения обязательства (даты подписания членами комиссии  комиссионного акта о приёмке работ).  

В связи с тем, что работы сданы подрядчиком с просрочкой, истец в соответствии с  пунктом договора произвел расчет неустойки в размере 1 994 233,62 руб. и претензией   № 1538 от 06 апреля 2022 года, направленной ответчику, потребовал оплатить сумму  неустойки.  

Ответчик в свою очередь требования претензии не исполнил, что и явилось  основанием для обращения в суд с настоящим иском.  

Рассмотрев исковых требования суд пришел к следующим выводам. 

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК  РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных  законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц,  участвующих в деле, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в  силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские  права и обязанности.  

Договор, заключенный сторонами, является по своей правовой природе договором  подряда.  

В соответствии с положениями статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна  сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Как установлено статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение  проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по  заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить  изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.  

В соответствии с положениями статьи 762 ГК РФ по договору подряда на  выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не  предусмотрено договором, в том числе уплатить подрядчику установленную цену  полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения  отдельных этапов работ.  

В силу положений ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки).  

Как указано в статье 759 ГК РФ, по договору подряда на выполнение проектных и  изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а  также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.  Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика  подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с  момента его утверждения заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования,  содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и  изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.  

Согласно статье 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и  изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и  иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую  техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с  компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;  передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских  работ.  

Статьей 762 ГК РФ предусмотрена обязанность заказчика оказывать содействию  подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ.  

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии со статьей 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением  случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства,  связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и  одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях,  предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа  обязательства.  

Материалами дела подтверждается, что ответчиком допущено нарушение сроков,  установленных договором.  

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты  нарушенного гражданского права.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться в том числе неустойкой.  

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что  на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при  просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность  должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер  которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически  начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

В соответствии с положениями статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в  деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Истцом, в обоснование доводов о просрочке исполнения обязательств ответчиком  представлены акты приемки выполненных работ, которыми подтверждены обстоятельства  нарушение ответчиком сроков выполнения работ.  

Принимая решение о заключении договора, в пунктах которого стороны  определили размер неустойки, ответчик соглашался с размером неустойки.  

В соответствии с п. 6.2.1. договора за просрочку исполнения обязательств,  предусмотренных договором, в том числе сроков выполнения работ, установленных в п.  3.2. договора, графике выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки  в размере 0,1% от стоимости этапа работ, указанной в п. 2.1. договора, за каждый день  просрочки до фактического исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после  дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до даты  фактического исполнения обязательства (даты подписания членами комиссии  комиссионного акта о приёмке работ).  

Действующее гражданско-правовое регулирование института ответственности по  общему правилу исходит из того, что лицо, не исполнившее обязательства либо  

исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (п. 1  ст. 401 ГК РФ).  

В то же время п. 3 ст. 401 ГК РФ из данного правила установлено исключение в  отношении лиц, действующих в рамках осуществления предпринимательской  деятельности.  

Указанные лица несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства  при любых обстоятельствах, за исключением случаев, когда надлежащее исполнение  оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и  непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

При этом в силу взаимосвязанных положений п. 2 ст. 401 ГК РФ и ст. 65 АПК РФ  бремя доказывания наличия непреодолимой силы (отсутствия вины) возложено на лицо,  которое подлежит привлечению к гражданско-правовой ответственности.  

Так, ответчиком в материалы дела представлены сопроводительные письма от 29  апреля 2021 года (вх. № 54Н от 17 мая 2021 года) и исх. № 40/21К (вх. № 7489 от 23 июля  2021 года) в качестве доказательства передачи исполнительной документации заказчику.  

В тоже время, сторонами согласовано, что работы по настоящему договору  считаются принятыми и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми  присутствующими при приемке работ членами комиссии комиссионного акта (пункт 5.8  Договора).  

Истец при расчете пени принимал во внимание даты подписания комиссией Актов  приемки выполненных работ по разработке проектной документации.  

Указанные сведения также нашли свое отражения в контррасчете неустойки. 

Таким образом, ответчик не отрицает факт подписания Актов приемки  выполненных работ по разработке проектной документации именно в указанные даты.  

Поскольку ответчиком не приведено доказательств, подтверждающих наличие  действия непреодолимой силы, а также виновных действий заказчика в нарушении сроков  подрядчиком, то требование истца, основанное на пункте 6.2.1 договора является  законным и обоснованным.  

Проверив расчет истца по неустойке, суд признает его верным:  

Стоимость 

Период просрочки 

 

Сумма 

 

Формула 

 

работ 

с 

ПО 

дней  

(руб.) 

 

1) г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, д. 4: 

 

303 430,00 

23.03.2021  

17.03.2022  

360 

303 430,00x360x0.1%  

109 234, 80 

 

2) г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, д. 21: 

 

342 870,00 

23.03.2021  

17.03.2022  

360 

342 870,00 х 360 х 0.1%  

123 433, 20 

 

3) г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, д. 22: 

 

304 620, 00 

23.03.2021  

17.03.2022  

360 

304 620,00 х 360 х 0.1%  

109 663,20 

 

4.) г. Армянск, мкр. им. Генерала Васильева, д. 28: 

 

307 170,00 

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

307 170, 00 x 305 x0.1%  

93 686, 85 

5.) 

<

...>: 

 

298000,00 

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

298 000,00 x 305 x0.1%  

90 890, 00 

6.) 

<

...>: 

 

363 240, 00 

23.03.2021  

17.03.2022  

360 

363 240, 00 х 360 X 0.1%  

130 766,40 

7.) 

<

...>: 

 

228 520, 00 

23.03.2021  

17.12.2021  

270 

228 520, 00 х 270 х 0.1%  

61 700,40 

8.) 

<

...>: 

 

106370,00 

23.03.2021  

17.12.2021  

270 

106 370,00x270x0.1%  

28 719,90 

9.) 

<

...>: 

 

320 560, 00 

23.03.2021  

17.12.2021  

270 

320 560,00 х 270 х 0.1%  

86 551,20 

10.) г. Красноперекоиск, мкр. 2, д. 11: 

 

336 590,00 

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

336 590,00x305 x0.1%  

102 659, 95 

 

11.) г. Краснопсрскопск, мкр. 2, д. 20: 

 

304 420, 00  

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

304 420, 00 x305 x0.1%  

92 848, 10 

 

12.) 

<

...>: 

 

334 940,00  

23.03.2021  

20.01.2022  

304 

334 940,00 х 304 х 0.1%  

101 821,76 

 

13.) 

<

...>: 

 

334 560, 00  

23.03.2021  

20.01.2022  

304 

334 560,00 x 304x 0.1%  

101 706,24 

 

14.) 

<

...>: 

 

314 580,00  

23.03.2021  

20.01.2022  

304 

314 580,00 x304 x0.1%  

95 632,32 

 

15.) 

<

...> д 8  

 

404 120,00  

 

23.03.2021  

17.12.2021  

270 

404 120,00x270x0.1%  

109 112,40 

 

16.) 

<

...>: 

 

398 500, 00  

23.03.2021  

17.12.2021  

270 

398 500,00 x270 x0.1%  

107 595,00 

 

17.) 

<

...>:  

 

156 940,00  

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

156 940,00x305 x0.1%  

47 866,70 

 

18.) 

<

...>:  

 

151 120,00  

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

151 120,00x305x0.1%  

46 091,60 

 

19.) Первомайский район, 

пгт. Первомайское, ул. Эдуарда Корпана, д. 11:  

 

290 620,00  

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

290 620, 00 х 305 х 0.1%  

88 639, 10 

 

. 20.) 

<

...> СССР, д. 2: 

 

124 100, 00  

 

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

124 100,00 х 305 х 0.1%  

37 850,50 

 

21) 

<

...>: 

 

123 960, 00  

 

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

123 960,00 х 305 х 0.1%  

37 807, 80 

 

22) 

<

...>: 

 

364 320, 00  

 

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

364 320, 00 х 305 х 0.1%  

111 117,60 

 

23) 

<

...>: 

 

184 860,00  

 

184 860,00 x 305 x0.1% 1 56 382,30  

 

23.03.2021  

21.01.2022  

305 

 

24) 

<

...>:  

 

162 740, 00  

 

23.03.2021  

28.10.2021  

220 

162 740, 00 х 220 х 0.1%  

35 802, 80 

 

25) Черноморский район, пгт. Черноморское, проезд Промышленный, д. 8:  

 

97 300,00 

 

23.03.2021  

28.10.2021  

220 

97 300,00x220x0.1% 

21 406, 00 

 

Итого: 

 

2 028 986,12 

 

Итого, сумма неустойки составляет 2 028 986,12 руб. 

При этом ответчик не отрицая факт нарушения, заявил о применении положения  ст. 333 ГК РФ.  

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  суд вправе уменьшить неустойку.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над  размером возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность  неисполнения обязательств и другие.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 г. N  263-О, излагая свою позицию по поводу применения статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации, указал на то, что данная норма является одним из правовых  способов, направленных против злоупотребления правом свободного определения  размера неустойки.  

Снижение размера неустойки в каждом конкретном случае является одним из  предусмотренных законом правовых способов, которыми законодатель наделил суд в  целях недопущения явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера  ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Таким образом, применяя статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации,  суд обязан установить реальное соотношение предъявленной неустойки и последствий  невыполнения должником обязательства по договору, дабы соблюсти правовой принцип  возмещения имущественного ущерба, согласно которому не допускается применение мер  карательного характера за нарушение договорных обязательств.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 Постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 г. N 81 "О некоторых вопросах  применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разрешая вопрос о  соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой  целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут  исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период  такого нарушения.  

В соответствии с разъяснениями пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от  22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации", при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки  по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того,  что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства  позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку  никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия  такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия  пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно  (например, по кредитным договорам). Разрешая вопрос о соразмерности неустойки  последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину,  достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной  учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения.  

Исследовав в совокупности представленные доказательства, учитывая  компенсационную природу неустойки, суд приходит к выводу о том, что предъявленная  ко взысканию истцом неустойка за просрочку оплаты платежей несоразмерна  последствиям нарушения обязательства и уменьшает размер ответственности ответчика  до двукратной ставки рефинансирования, в результате чего взысканию подлежит  неустойка в размере 718 371,11 руб., исходя из следующего расчета:  

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

303 430,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 303 430,00 руб. 

 

303 430,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

303 430,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 543,82 р.  

 

303 430,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

303 430,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 156,58 р.  

 

303 430,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

303 430,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

3 749,23 р.  

 

303 430,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

303 430,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 295,48 р.  

 

303 430,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

303 430,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

4 713,56 р.  

 

303 430,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

303 430,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

6 983,05 р.  

 

303 430,00 

20.12.2021  

13.02.2022  

56 

8.5 

303 430,00 × 2×8.5% × 56 / 365  

7 914,12 р.  

 

303 430,00 

14.02.2022  

27.02.2022  

14 

9.5 

303 430,00 × 2×9.5% × 14 / 365  

2 211,30 р.  

 

Сумма основного долга: 303 430,00 руб. 

Сумма неустойки: 43 552,61 руб. 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

342 870,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 342 870,00 руб. 

 

342 870,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

342 870,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 874,47 р.  

 

342 870,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

342 870,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 696,85 р.  

 

342 870,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

342 870,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

4 236,56 р.  

 

342 870,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

342 870,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 983,79 р.  

 

342 870,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

342 870,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

5 326,23 р.  

 

342 870,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

342 870,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

7 890,71 р.  

 

342 870,00 

20.12.2021  

13.02.2022  

56 

8.5 

342 870,00 × 2×8.5% × 56 / 365  

8 942,80 р.  

 

342 870,00 

14.02.2022  

27.02.2022  

14 

9.5 

342 870,00 × 2×9.5% × 14 / 365  

2 498,72 р.  

 

342 870,00 

28.02.2022  

17.03.2022  

18 

20 

342 870,00 × 2×20% × 18 / 365  

6 763,46 р.  

 

Сумма основного долга: 342 870,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 49 213,59 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

304 620,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 304 620,00 руб. 

 

304 620,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

304 620,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 553,80 р.  

 

304 620,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

304 620,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 172,88 р.  

 

304 620,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

304 620,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

3 763,93 р.  

 

304 620,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

304 620,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 316,24 р.  

 

304 620,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

304 620,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

4 732,04 р.  

 

304 620,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

304 620,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

7 010,43 р.  

 

304 620,00 

20.12.2021  

13.02.2022  

56 

8.5 

304 620,00 × 2×8.5% × 56 / 365  

7 945,16 р.  

 

304 620,00 

14.02.2022  

27.02.2022  

14 

9.5 

304 620,00 × 2×9.5% × 14 / 365  

2 219,97 р.  

 

304 620,00 

28.02.2022  

17.03.2022  

18 

20 

304 620,00 × 2×20% × 18 / 365  

6 008,94 р.  

 

Сумма основного долга: 304 620,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 43 723,39 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

307 170,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 307 170,00 руб. 

 

307 170,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

307 170,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 575,18 р.  

 

307 170,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

307 170,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 207,81 р.  

 

307 170,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

307 170,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

3 795,44 р.  

 

307 170,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

307 170,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 360,75 р.  

 

307 170,00 25.10.2021 19.12.2021 56 7.5 307 170,00 × 2×7.5% × 56 / 365 7 069,12 р.  

307 170,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

307 170,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

4 721,16 р.  

 

Сумма основного долга: 307 170,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 32 501,11 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

298 000,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 298 000,00 руб. 

 

298 000,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

298 000,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 498,30 р.  

 

298 000,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

298 000,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 082,19 р.  

 

298 000,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

298 000,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

3 682,14 р.  

 

298 000,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

298 000,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 200,71 р.  

 

298 000,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

298 000,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

4 629,21 р.  

 

298 000,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

298 000,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

6 858,08 р.  

 

298 000,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

298 000,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

4 580,22 р.  

 

Сумма основного долга: 298 000,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 31 530,85 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

363 240,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 363 240,00 руб. 

 

363 240,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

363 240,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

3 045,24 р.  

 

363 240,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

363 240,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 975,89 р.  

 

363 240,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

363 240,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

4 488,25 р.  

 

363 240,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

363 240,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

6 339,28 р.  

 

363 240,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

363 240,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

5 642,66 р.  

 

363 240,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

363 240,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

8 359,50 р.  

 

363 240,00 

20.12.2021  

13.02.2022  

56 

8.5 

363 240,00 × 2×8.5% × 56 / 365  

9 474,10 р.  

 

363 240,00 

14.02.2022  

27.02.2022  

14 

9.5 

363 240,00 × 2×9.5% × 14 / 365  

2 647,17 р.  

 

363 240,00 

28.02.2022  

17.03.2022  

18 

20 

363 240,00 × 2×20% × 18 / 365  

7 165,28 р.  

 

Сумма основного долга: 363 240,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 52 137,37 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

228 520,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 228 520,00 руб. 

 

228 520,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

228 520,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

1 915,81 р.  

 

228 520,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

228 520,00 × 2×5% × 50 / 365  

3 130,41 р.  

 

228 520,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

228 520,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

2 823,63 р.  

 

228 520,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

228 520,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

3 988,14 р.  

 

228 520,00 25.10.2021 17.12.2021 54 7.5 228 520,00 × 2×7.5% × 54 / 365 5 071,27 р.  

Сумма основного долга: 228 520,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 20 479,15 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

106 370,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 106 370,00 руб. 

 

106 370,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

106 370,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

891,76 р.  

 

106 370,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

106 370,00 × 2×5% × 50 / 365  

1 457,12 р.  

 

106 370,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

106 370,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

1 314,33 р.  

 

106 370,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

106 370,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

1 856,38 р.  

 

106 370,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

106 370,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

1 652,38 р.  

 

106 370,00 

25.10.2021  

17.12.2021  

54 

7.5 

106 370,00 × 2×7.5% × 54 / 365  

2 360,54 р.  

 

Сумма основного долга: 106 370,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 9 532,51 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

320 560,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 320 560,00 руб. 

 

320 560,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

320 560,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 687,43 р.  

 

320 560,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

320 560,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 391,23 р.  

 

320 560,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

320 560,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

3 960,89 р.  

 

320 560,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

320 560,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 594,43 р.  

 

320 560,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

320 560,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

4 979,66 р.  

 

320 560,00 

25.10.2021  

17.12.2021  

54 

7.5 

320 560,00 × 2×7.5% × 54 / 365  

7 113,80 р.  

 

Сумма основного долга: 320 560,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 28 727,44 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

336 590,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 336 590,00 руб. 

 

336 590,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

336 590,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 821,82 р.  

 

336 590,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

336 590,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 610,82 р.  

 

336 590,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

336 590,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

4 158,96 р.  

 

336 590,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

336 590,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 874,19 р.  

 

336 590,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

336 590,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

5 228,67 р.  

 

336 590,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

336 590,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

7 746,18 р.  

 

336 590,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

336 590,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

5 173,34 р.  

 

Сумма основного долга: 336 590,00 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

304 420,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 304 420,00 руб. 

 

304 420,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

304 420,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 552,12 р.  

 

304 420,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

304 420,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 170,14 р.  

 

304 420,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

304 420,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

3 761,46 р.  

 

304 420,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

304 420,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 312,75 р.  

 

304 420,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

304 420,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

4 728,94 р.  

 

304 420,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

304 420,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

7 005,83 р.  

 

304 420,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

304 420,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

4 678,89 р.  

 

Сумма основного долга: 304 420,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 32 210,13 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

334 940,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 334 940,00 руб. 

 

334 940,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

334 940,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 807,99 р.  

 

334 940,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

334 940,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 588,22 р.  

 

334 940,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

334 940,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

4 138,57 р.  

 

334 940,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

334 940,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 845,39 р.  

 

334 940,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

334 940,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

5 203,04 р.  

 

334 940,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

334 940,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

7 708,21 р.  

 

334 940,00 

20.12.2021  

20.01.2022  

32 

8.5 

334 940,00 × 2×8.5% × 32 / 365  

4 991,98 р.  

 

Сумма основного долга: 334 940,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 35 283,40 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

334 560,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 334 560,00 руб. 

 

334 560,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

334 560,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 804,80 р.  

 

334 560,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

334 560,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 583,01 р.  

 

334 560,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

334 560,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

4 133,88 р.  

 

334 560,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

334 560,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 838,76 р.  

 

334 560,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

334 560,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

5 197,14 р.  

 

334 560,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

334 560,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

7 699,46 р.  

 

334 560,00 

20.12.2021  

20.01.2022  

32 

8.5 

334 560,00 × 2×8.5% × 32 / 365  

4 986,32 р.  

 

Сумма основного долга: 334 560,00 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

314 580,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 314 580,00 руб. 

 

314 580,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

314 580,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 637,30 р.  

 

314 580,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

314 580,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 309,32 р.  

 

314 580,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

314 580,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

3 887,00 р.  

 

314 580,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

314 580,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 490,07 р.  

 

314 580,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

314 580,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

4 886,76 р.  

 

314 580,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

314 580,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

7 239,65 р.  

 

314 580,00 

20.12.2021  

20.01.2022  

32 

8.5 

314 580,00 × 2×8.5% × 32 / 365  

4 688,53 р.  

 

Сумма основного долга: 314 580,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 33 138,63 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

404 120,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 404 120,00 руб. 

 

404 120,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

404 120,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

3 387,96 р.  

 

404 120,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

404 120,00 × 2×5% × 50 / 365  

5 535,89 р.  

 

404 120,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

404 120,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

4 993,37 р.  

 

404 120,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

404 120,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

7 052,72 р.  

 

404 120,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

404 120,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

6 277,70 р.  

 

404 120,00 

25.10.2021  

17.12.2021  

54 

7.5 

404 120,00 × 2×7.5% × 54 / 365  

8 968,14 р.  

 

Сумма основного долга: 404 120,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 36 215,78 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

398 500,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 398 500,00 руб. 

 

398 500,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

398 500,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

3 340,85 р.  

 

398 500,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

398 500,00 × 2×5% × 50 / 365  

5 458,90 р.  

 

398 500,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

398 500,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

4 923,93 р.  

 

398 500,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

398 500,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

6 954,64 р.  

 

398 500,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

398 500,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

6 190,40 р.  

 

398 500,00 

25.10.2021  

17.12.2021  

54 

7.5 

398 500,00 × 2×7.5% × 54 / 365  

8 843,42 р.  

 

Сумма основного долга: 398 500,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 35 712,14 руб. 

 

с по дней 

156 940,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 156 940,00 руб. 

 

156 940,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

156 940,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

1 315,72 р.  

 

156 940,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

156 940,00 × 2×5% × 50 / 365  

2 149,86 р.  

 

156 940,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

156 940,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

1 939,18 р.  

 

156 940,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

156 940,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

2 738,93 р.  

 

156 940,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

156 940,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

2 437,94 р.  

 

156 940,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

156 940,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

3 611,77 р.  

 

156 940,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

156 940,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

2 412,15 р.  

 

Сумма основного долга: 156 940,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 16 605,55 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка 

151 120,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 151 120,00 руб. 

 

151 120,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

151 120,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

1 266,92 р. 

 

151 120,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

151 120,00 × 2×5% × 50 / 365  

2 070,14 р. 

 

151 120,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

151 120,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

1 867,26 р. 

 

151 120,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

151 120,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

2 637,35 р. 

 

151 120,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

151 120,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

2 347,54 р. 

 

151 120,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

151 120,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

3 477,83 р. 

 

151 120,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

151 120,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

2 322,69 р. 

 

Сумма основного долга: 151 120,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 15 989,73 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка 

290 620,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 290 620,00 руб. 

 

290 620,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

290 620,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

2 436,43 р.  

 

290 620,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

290 620,00 × 2×5% × 50 / 365  

3 981,10 р.  

 

290 620,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

290 620,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

3 590,95 р.  

 

290 620,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

290 620,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

5 071,92 р.  

 

290 620,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

290 620,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

4 514,56 р.  

 

290 620,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

290 620,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

6 688,24 р.  

 

290 620,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

290 620,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

4 466,79 р.  

 

Сумма основного долга: 290 620,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 30 749,99 руб. 

 

с по дней 

124 100,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 124 100,00 руб. 

 

124 100,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

124 100,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

1 040,40 р.  

 

124 100,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

124 100,00 × 2×5% × 50 / 365  

1 700,00 р.  

 

124 100,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

124 100,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

1 533,40 р.  

 

124 100,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

124 100,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

2 165,80 р.  

 

124 100,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

124 100,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

1 927,80 р.  

 

124 100,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

124 100,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

2 856,00 р.  

 

124 100,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

124 100,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

1 907,40 р.  

 

Сумма основного долга: 124 100,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 13 130,80 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

123 960,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 123 960,00 руб. 

 

123 960,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

123 960,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

1 039,23 р.  

 

123 960,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

123 960,00 × 2×5% × 50 / 365  

1 698,08 р.  

 

123 960,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

123 960,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

1 531,67 р.  

 

123 960,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

123 960,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

2 163,36 р.  

 

123 960,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

123 960,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

1 925,63 р.  

 

123 960,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

123 960,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

2 852,78 р.  

 

123 960,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

123 960,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

1 905,25 р.  

 

Сумма основного долга: 123 960,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 13 116,00 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

364 320,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 364 320,00 руб. 

 

364 320,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

364 320,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

3 054,30 р.  

 

364 320,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

364 320,00 × 2×5% × 50 / 365  

4 990,68 р.  

 

364 320,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

364 320,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

4 501,60 р.  

 

364 320,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

364 320,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

6 358,13 р.  

 

364 320,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

364 320,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

5 659,44 р.  

 

364 320,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

364 320,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

8 384,35 р.  

 

364 320,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

364 320,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

5 599,55 р.  

 

Сумма основного долга: 364 320,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 38 548,05 руб. 

 

с по дней 

184 860,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 184 860,00 руб. 

 

184 860,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

184 860,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

1 549,79 р.  

 

184 860,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

184 860,00 × 2×5% × 50 / 365  

2 532,33 р.  

 

184 860,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

184 860,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

2 284,16 р.  

 

184 860,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

184 860,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

3 226,19 р.  

 

184 860,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

184 860,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

2 871,66 р.  

 

184 860,00 

25.10.2021  

19.12.2021  

56 

7.5 

184 860,00 × 2×7.5% × 56 / 365  

4 254,31 р.  

 

184 860,00 

20.12.2021  

21.01.2022  

33 

8.5 

184 860,00 × 2×8.5% × 33 / 365  

2 841,27 р.  

 

Сумма основного долга: 184 860,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 19 559,71 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

162 740,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 162 740,00 руб. 

 

162 740,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

162 740,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

1 364,34 р.  

 

162 740,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

162 740,00 × 2×5% × 50 / 365  

2 229,32 р.  

 

162 740,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

162 740,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

2 010,84 р.  

 

162 740,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

162 740,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

2 840,15 р.  

 

162 740,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

162 740,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

2 528,04 р.  

 

162 740,00 

25.10.2021  

28.10.2021  

4 

7.5 

162 740,00 × 2×7.5% × 4 / 365  

267,52 р.  

 

Сумма основного долга: 162 740,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 11 240,21 руб. 

 

Период просрочки 

 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

97 300,00 

23.03.2021  

Новая задолженность на 97 300,00 руб. 

 

97 300,00 

23.03.2021  

25.04.2021  

34 

4.5 

97 300,00 × 2×4.5% × 34 / 365  

815,72 р.  

 

97 300,00 

26.04.2021  

14.06.2021  

50 

5 

97 300,00 × 2×5% × 50 / 365  

1 332,88 р.  

 

97 300,00 

15.06.2021  

25.07.2021  

41 

5.5 

97 300,00 × 2×5.5% × 41 / 365  

1 202,25 р.  

 

97 300,00 

26.07.2021  

12.09.2021  

49 

6.5 

97 300,00 × 2×6.5% × 49 / 365  

1 698,08 р.  

 

97 300,00 

13.09.2021  

24.10.2021  

42 

6.75 

97 300,00 × 2×6.75% × 42 / 365  

1 511,48 р.  

 

97 300,00 

25.10.2021  

28.10.2021  

4 

7.5 

97 300,00 × 2×7.5% × 4 / 365  

159,95 р.  

 

Сумма основного долга: 97 300,00 руб. 

 

Сумма неустойки: 6 720,36 руб. 

 

Таким образом, требования истца подлежат частичному удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого  принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

Так, в соответствии с п.22 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 21 января 2016 г. N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства  о возмещении судебных издержек, связанных с рассмотрением дела, в случае изменения  размера исковых требований после возбуждения производства по делу при  

пропорциональном распределении судебных издержек следует исходить из размера  требований, поддерживаемых истцом на момент принятия решения по делу.  

Истцом оплачена государственная пошлина в размере 33145,00 руб., что  подтверждается платежным поручением № 4136 от 07 июля 2022 года, что соответствует  сумме государственной пошлины по заявленным требования.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования истца удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бизнес портал"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Некоммерческой организации  «Региональный Фонд Капитального Ремонта Многоквартирных домов Республики Крым»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку по договору № ПСД/2020/8 от  21.09.2020 в размере 718 371,11 руб., а также сумму в размере 33145,00 руб. в счет  возмещения расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда  апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья А.Н. Гризодубова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 27.10.2022 3:17:00

Кому выдана Гризодубова Анастасия Николаевна