АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А13-12418/2022

г. Вологда

05 мая 2023 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 05 мая 2023 года

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Кутузовой И.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьиФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» к обществу с ограниченной ответственностью «Севергаз эксплуатация» об урегулировании разногласий по инвестиционному договору от 06.12.2021,

при участии от истца – ФИО2 по доверенности от 27.04.2022, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 09.01.2023, директора ФИО4, 

 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 194044, 

<

...>, литера А, помещение 2н, кабинет № 1301; далее – ООО «Газпром газификация», истец) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Севергаз эксплуатация» (ОГРН 

<

***>,ИНН 

<

***>, адрес: 160001, 

<

...> блок Б, офис 303; далее – ООО «Севергаз эксплуатация», ответчик) об урегулировании разногласий, возникших при заключении инвестиционного договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках газификации от 13.07.2022 № 1/2021/ФИ-05-174/2022, путём утверждения договора в следующей редакции:

1.                Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции:

В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 9 329 000 (Девять миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года.

Вышеуказанная сумма финансирования не должна превышать общую сумму денежных средств, определенную межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Вологодской области в части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации (далее – Программа газификации) на период 2021-2022 гг., исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации (далее – сумма денежных средств в Программе газификации) и  сумму затрат на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по договорам о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтённых в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации  (информация о данных договорах предоставляется оператору газификации по форме приложения № 5 к настоящему Договору).

В случае если сумма финансирования превысит (превышает) общую сумму денежных средств, определенную в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора в Программе газификации, оператор газификации осуществляет финансирование в пределах общей суммы денежных средств, определенной в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора, в программе газификации, а сумма финансирования подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения к Договору.  

2.     Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции:

Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем на территории Вологодской области, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации. 

3.     Пункт 3 Договора изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550.

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется оператором газификации не ранее утверждения в установленном порядке Программы газификации (изменений в Программу газификации), содержащей (содержащих) сводный и пообъектный планы-графики догазификации, а также информацию о финансировании мероприятий пообъектного плана-графика догазификации, исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации и/или заключения договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации, и(или) предоставления оператору газификации информации о заключенных газораспределительной организацией договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтены в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Договору.

4.     Пункт 4 Договора изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения):

- расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных Программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа);

- сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале;

- сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период.

Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте.

Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем.

Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не выше 50% от расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификациив рассматриваемый период, по которым в соответствии с Приложением № 2 в рассматриваемом периоде запланировано начало работ и предусмотрен источник финансирования от оператора газификации.

Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложением №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550, начисление процентов не предусмотрено).

В обеспечение обязательств по возврату суммы финансирования, предусмотренной пунктом 1 настоящего Договора, газораспределительная организация предоставляет оператору газификации обеспечение выполнения указанных обязательств в виде независимой безусловной и безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим Договора. Сумма обеспечения должна быть равна сумме обеспечиваемого транша, текст банковской гарантии и банк-гарант должны быть – согласованы оператором газификации.

Газораспределительная организация обязана представить оператору газификации оригинал банковской гарантии не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим пунктом Договора. Оператор газификации обязан в вышеуказанный срок рассмотреть банковскую гарантию и принять данную банковскую гарантию, либо направить в адрес газораспределительной организации мотивированный отказ в ее принятии. После устранения газораспределительной организацией замечаний оператор газификации осуществляет рассмотрение банковской гарантии в порядке и сроки, установленные для первоначальной приемки банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать на 60 календарных дней срок полного исполнения газораспределительной организацией своих обязательств по возврату суммы финансирования в соответствии с условиями настоящего Договора. 

По соглашению Сторон может быть избран иной альтернативный способ обеспечения исполнения обязательства газораспределительной организацией по возврату суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего Договора. По согласованию с оператором газификации, после ввода в эксплуатацию объектов, созданных в рамках мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, при условии государственной регистрации прав собственности на построенные объекты, банковская гарантия может быть заменена залогом таких объектов (или сумма банковской гарантии уменьшена на сумму стоимости переданных в залог оператору газификации объектов, созданных в рамках мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации). Изменение срока и суммы банковской гарантии возможно только после оформления залога в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.     Пункт 4 Договора изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения):

- расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных Программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа);

- сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале;

- сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период.

Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте.

Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем.

Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не выше 50% от расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, за вычетом объема полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства.

Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложением №1 к Правилам взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550, начисление процентов не предусмотрено).

В обеспечение обязательств по возврату суммы финансирования, предусмотренной пунктом 1 настоящего Договора, газораспределительная организация предоставляет оператору газификации обеспечение выполнения указанных обязательств в виде независимой безусловной и безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим Договора. Сумма обеспечения должна быть равна сумме обеспечиваемого транша, текст банковской гарантии и банк-гарант должны быть – согласованы оператором газификации.

Газораспределительная организация обязана представить оператору газификации оригинал банковской гарантии не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим пунктом Договора. Оператор газификации обязан в вышеуказанный срок рассмотреть банковскую гарантию и принять данную банковскую гарантию, либо направить в адрес газораспределительной организации мотивированный отказ в ее принятии. После устранения газораспределительной организацией замечаний оператор газификации осуществляет рассмотрение банковской гарантии в порядке и сроки, установленные для первоначальной приемки банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать на 60 календарных дней срок полного исполнения газораспределительной организацией своих обязательств по возврату суммы финансирования в соответствии с условиями настоящего Договора. 

По соглашению Сторон может быть избран иной альтернативный способ обеспечения исполнения обязательства газораспределительной организацией по возврату суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего Договора.

По согласованию с оператором газификации, после ввода в эксплуатацию объектов, созданных в рамках мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, и при условии государственной регистрации прав собственности на построенные объекты, банковская гарантия может быть заменена залогом таких объектов (или сумма банковской гарантии уменьшена на сумму стоимости переданных в залог оператору газификации объектов, созданных в рамках мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации). Изменение срока и суммы банковской гарантии возможно только после оформления залога в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.     Дополнить Договор пунктом 4.1 следующего содержания:

В течение 5 рабочих дней с даты получения решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации осуществляет финансирование в размере экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, утвержденном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за вычетом объема финансовых средств, полученных газораспределительной организацией в квартале, предшествующем отчетному, в результате совокупности следующих условий:

- введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

- установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

- полученных от иных источников финансирования, включая суммы финансовых средств, ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства.

В случае если размер недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, имеет отрицательное значение, оператор газификации уменьшает сумму последующих перечислений денежных средств газораспределительной организации на указанное значение.

7.     Пункт 5 Договора изложить в следующей редакции:

Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. В случае исчерпания суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела, газораспределительная организация при наличии и подтверждении установленных в пункте 2 настоящего раздела оснований вправе после досрочного полного или частичного исполнения своих обязательств по договору обратиться к оператору газификации за выдачей финансирования по настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть финансирования. Неполное исполнение газораспределительной организацией обязательства, предусмотренного в пункте 1 настоящего раздела, в течение установленного настоящим Договором срока финансирования не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела.

8.     Пункт 6 Договора изложить в следующей редакции.

Финансирование предоставляется сроком до «31» декабря 2072 года.

Газораспределительная организация ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором газораспределительная организация ввела в эксплуатацию первый объект капитального строительства, построенный (реконструированный) за счёт средств оператора газификации, осуществляет возврат денежных средств по настоящему договору. Сумма возврата газораспределительной организацией денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале определяется как сумма амортизационных отчислений по объектам капитального строительства, построенным или реконструированным (в доле, приходящейся на профинансированное за счет средств оператора газификации строительство (реконструкцию)) за счёт средств оператора газификации, начисленная в предыдущем квартале по данным бухгалтерского учета. Сумма возврата устанавливается в соответствии с направляемой в адрес оператора газификации в срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласованной с оператором газификации отчетной формы о произведенных амортизационных отчислениях по определенным настоящим пунктом договора объектам с даты начала амортизации и по дату ее окончания в соответствии с установленными сроками полезного использования. 

Срок уплаты денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале не позднее 45 дней после окончания предыдущего квартала.

Стороны ежеквартально, а также по требованию одной из Сторон, оформляют акт сверки взаиморасчетов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.

9.     Пункт 7 Договора изложить в следующей редакции.

Оператор газификации предоставляет транш в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с даты получения от газораспределительной организации заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого транша в пределах суммы финансирования, а также уведомляет газораспределительную организацию о произведенном перечислении транша в течение 3 (трех) календарных дней с даты перечисления.  

10.            Пункт 8 Договора изложить в следующей редакции.

Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет, открытый газораспределительной организацией в согласованном с оператором газификации банке (кредитной организации) (далее – Банк) на условиях, установленных Приложением № 4 к Договору (Условия банковского сопровождения) (далее – Отдельный счет).

Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на отдельный счет газораспределительной организации. 

11.            Пункт 9 Договора изложить в следующей редакции.

В качестве факта предоставления оператором газификации финансирования или транша газораспределительная организация предоставляет оператору газификации копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую зачисление денежных средств на отдельный счет газораспределительной организации, в течение 3 календарных дней с даты поступления денежных средств.

12.            Добавить пункт 9.1 Договора в следующей редакции.

Газораспределительная организация в порядке и сроки, установленные Условиями банковского сопровождения (Приложение № 4 к Договору), обязана открыть отдельный счет в Банке для целей расчетов по Договору и осуществлять все расчеты по Договору только с использованием отдельного счета. Неисполнение или несвоевременное исполнение газораспределительной организацией обязательств по открытию отдельного счета освобождает оператора газификации от обязательства по осуществлению платежей по Договору до даты получения уведомления от газораспределительной организации об открытии отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления перечисления траншей.

При заключении договоров во исполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации с третьими лицами, газораспределительная организация обязана уведомлять их о необходимости открытия отдельных счетов в банке для целей расчетов и банковского сопровождения по договорам,  с даты заключения Договора осуществлять все расчеты по договорам, заключенным с привлеченными им для исполнения обязательств по Договору подрядчиками исполнения/реализации Договора только с использованием отдельных счетов, открытых подрядчиками исполнения/реализации Договора в Банке.

13.            Пункт 10 Договора изложить в следующей редакции.

Газораспределительная организация обязана использовать сумму финансирования строго по целевому назначению (пункт 2 настоящего Договора).

14.            Пункт 11 Договора изложить в следующей редакции.

В течение срока действия настоящего Договора газораспределительная организация обязана ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартала, направлять оператору газификации отчет о целевом использовании денежных средств по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов.

Газораспределительная организация в рамках полученного финансирования одного транша, вправе самостоятельно распределять требуемый объем финансирования объектов, включенных в заявку на предоставление финансирования (транша).

15.            Пункт 12 Договора изложить в следующей редакции.

Газораспределительная организация имеет право досрочно частично или полностью возвратить сумму финансирования.

16.            Пункт 13 Договора изложить в следующей редакции.

Газораспределительная организация обязуется выполнить обязательства, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора, в срок, предусмотренный пунктом 6 настоящего Договора.

17.            Пункт 14 Договора изложить в следующей редакции.

Фактическим исполнением обязательств по настоящему Договору является исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора.

18.            Пункт 15 Договора изложить в следующей редакции.

Газораспределительная организация обязана извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее следующего за возникновением таких обстоятельств дня.

19.            Пункт 15.1 Договора изложить в следующей редакции.

В случае использования Суммы финансирования на оплату товаров, работ, услуг, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), газораспределительная организация обязана осуществить возврат из бюджета сумм НДС, уплаченных по расходам, источником для покрытия которых являлись суммы траншей, перечисленных оператором газификации по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и использовать возвращенные суммы НДС на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.       

20.            Пункт 15.2 Договора изложить в следующей редакции.

В случае размещения газораспределительной организацией средств, полученных от оператора газификации по настоящему Договору, на депозитных счетах, выдачи займов, полученные проценты используются газораспределительными организациями в качестве источника для финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.

21.            Пункт 15.3 Договора изложить в следующей редакции.

В случае изменения в цепочке собственников одной из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах одной из Сторон, такая Сторона обязана представить другой Стороне информацию об указанных изменениях в течение 3 (трех) календарных дней со дня таких изменений с подтверждением соответствующими документами по адресу электронной почты: 

ООО «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»: severgazvologda@mail.ru

ООО «Газпром газификация»: Dogaz_info@eoggazprom.ru

В случае неисполнения одной из Сторон обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора (отказе от исполнения настоящего Договора) или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

22.            Пункт 16 Договора изложить в следующей редакции. 

Стороны ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по требованию одной из Сторон, оформляют акт сверки взаиморасчетов.

23.            Пункт 17 Договора изложить в следующей редакции.

В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.            Пункт 18 Договора изложить в следующей редакции.

В случае нарушения газораспределительной организацией своих обязательств по настоящему Договору оператор газификации вправе требовать от газораспределительной организации уплаты неустойки в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, от суммы финансирования, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных газораспределительной организацией обязательств.

25.            Пункт 19 Договора изложить в следующей редакции.

Передача и использование Сторонами настоящего Договора информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

26.            Пункт 20 Договора изложить в следующей редакции.

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

27.            Пункт 21 Договора изложить в следующей редакции.

К настоящему Договору, а также к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, применяется право Российской Федерации.

28.            Пункт 22 Договора изложить в следующей редакции.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения.

29.            Пункт 23 Договора изложить в следующей редакции.

В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

30.            Пункт 24 Договора изложить в следующей редакции.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

31.            Пункт 25 Договора изложить в следующей редакции.

Настоящий Договор расторгается:

по соглашению Сторон;

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

32.            Пункт 26 Договора изложить в следующей редакции.

Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28 настоящего Договора.

33.            Пункт 27 Договора изложить в следующей редакции.

Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, направляются в письменной форме посредством доступных средств связи, в том числе телексной, факсимильной, электронной связи, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по реквизитам, указанным в разделе VIII настоящего Договора.   

34.            Пункт 28 Договора изложить в следующей редакции.

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименований, банковских и платежных реквизитов, КПП, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.

35.            Пункт 29 Договора изложить в следующей редакции.

Газораспределительная организация предоставляет оператору газификации документы, предусмотренные настоящим Договором, одновременно в следующем виде, гарантируя идентичность информации: 

         - в виде копий документов на бумажном носителе, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем газораспределительной организации или уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии), с приложением реестра представляемых документов или в электронном виде заверенные электронной цифровой подписью с использованием услуг федеральных операторов электронного документооборота;

- в виде электронных копий документов в формате pdf с разрешением не менее 200 точек на дюйм на электронном носителе (представляется при отсутствии электронного документооборота между сторонами), а также дополнительно Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Договору в редактируемом формате xls на адрес электронной почты Dogaz_info@eoggazprom.ru, систематизированных (каталогизированных) по правилам, определенным оператором газификации. 

36.            Пункт 30 Договора изложить в следующей редакции.

Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

37.            Пункт 31 Договора изложить в следующей редакции.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 (заявка на предоставление финансирования (транша);

приложение № 2 (сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации);

приложение № 3 (отчет о целевом использовании денежных средств по договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации);

приложение № 4 (условия Банковского сопровождения);

приложение № 5 (реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, мероприятия по которым не вошли в Программу газификации).

38.            Пункт 32 Договора изложить в следующей редакции.

При осуществлении расчетов по настоящему Договору в платежных поручениях на предоставление или возврат суммы финансирования (части финансирования) Стороны обязаны указывать номер и дату настоящего Договора.

39.            Пункт 33 Договора изложить в следующей редакции.

Газораспределительная организация в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантирует (заверяет о соблюдении порядка одобрения Договора органами управления газораспределительной организации, в том числе крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, учредительными документами газораспределительной организации. Указанное заверение распространяется в отношении всех заключенных в будущем дополнительных соглашений к настоящему Договору. В случае недостоверности вышеуказанных заверений газораспределительная организация обязуется возместить убытки, понесенные оператором газификации.

40.  Раздел VIII Договора изложить в следующей редакции.

 

Оператор газификации:

 

ООО «Газпром газификация» 

 

Место нахождения:

194044, г. Санкт-Петербург, 

вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А,

помещ. 2Н, кабинет №1301  

 

Почтовый адрес:

194044, г. Санкт-Петербург, 

вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А,

помещ. 2Н, кабинет №1301

 

ИНН 

<

***> 

КПП 780201001

ОГРН 

<

***>

ОКПО 55720617

Банковские реквизиты:

Р/с 

<

***> 

в АО «АБ «РОССИЯ»

БИК 044030861  

К/с 30101810800000000861

Газораспределительная организация:

 

ООО «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

 

Место нахождения:

160001, Вологодская область, 

<

...> 

д. 9, блок Б, офис 303

 

Почтовый адрес:

160001, Российская Федерация, Вологодская область, 

<

...> 

д. 9, блок Б, оф 303

 

ИНН 

<

***>

КПП 352501001

ОГРН 

<

***>

ОКПО 52033747

Банковские реквизиты:

Р/с 

<

***>

Вологодское отделение № 8638, ПАО СБЕРБАНК г. Вологда

БИК 041909644

К/с 30101810900000000644

41. Приложение № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

 

Приложение №1

к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации

от 13.07.2022 № 1/2021/ФИ-05-174/2022

 

(форма)

Дата: _________

 

Кому:________________________

 

ЗАЯВКА № _______

на предоставление финансирования (транша)

 

В соответствии с инвестиционным договором по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 13.07.2022 № 1/2021/ФИ-05-174/2022 _____________________________________________________________________________

(полное наименование газораспределительной организации)

в лице ___________________________________________________, действующего на основании _____________________________, в связи с недостаточностью финансовых  средств в ____ квартале 20__ года, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и  установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на  выполнение мероприятий по  технологическому  присоединению в рамках догазификации (подтверждающие документы прилагаются) просит Вас предоставить  финансирование (транш) в размере (____________________________) рублей.

В составе финансирования (транша) предусмотрен НДС на оплату товаров, работ, услуг исполнителям в размере ___________ (_____________) рублей (указывается, если в запрашиваемой сумме финансирования учтена потребность в оплате товаров, работ, услуг исполнителям с учетом НДС).

Перечень финансируемых объектов представлен в составе Сведений о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме Приложения №2 в настоящему Договору.

 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Оператор газификации:

ООО «Газпром газификация»

Газораспределительная организация:

ООО «Севергаз эксплуатация»

Генеральный директор

 

_________________/ФИО5/

М.П.

Генеральный директор 

 

________________ / ФИО4/

М.П.

42.Приложение № 2 к Договору изложить в следующей редакции:

 

Приложение №2

к инвестиционному договору по 

выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению в рамках догазификации

от 13.07.2022 № 1/2021/ФИ-05-174/2022

 

(форма)

СВЕДЕНИЯ

о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации

 

Кому:_______________________

"__" __________ 20__ г.

 

_________________________________________________ направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому                 (наименование газораспределительной организации)

присоединению в рамках догазификации.

 

№

Населенный пункт

Наименование объекта

Код объекта*

 

Плановые физические параметры объекта (протяженность),

метров

Плановый объем затрат  на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации,тыс. руб. без НДС 

Планируемый объём освоения капитальных вложений, тыс. руб.

Ввод в состав основных фондов, тыс. руб.

Объем НЗС, тыс. руб.

Планируемый объём освоения капитальных вложений, тыс. руб.

 

Ввод в состав основных фондов

Объем НЗС 

Источники компенсации капитальных затрат

 

Недостаток финансирования

Потребность в финансировании от Оператора газификации (размер траншей) в  __ квартале 202_г в соответствии с заявкой на предоставление финансирования (транша)****

Статус  включения в план-график догазификации

**

Полная стоимость объекта

Проектно-изыскательские работы

Строительно-монтажные работы

Иные (текущие затраты)

без НДС

НДС

без НДС

НДС

без НДС

НДС

без НДС

кроме того НДС

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2022

Вид источника***

Сумма

тыс. руб. с  НДС

тыс. руб. с  НДС*****

 

4 кв. 2021

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2021

1 кв. 2022

2 кв. 2022

3 кв. 2022

4 кв. 2022

Итого

тыс. руб. 

НДС

тыс. руб. 

НДС

тыс. руб. 

НДС

4 кв. 2021

1 кв. 2022

2 кв. 2022

3 кв. 2022

4 кв. 2022

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------

* Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где:

АА - код субъекта Российской Федерации;

ББ  -  год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации);

ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН);

X - уникальный код проекта, присваивается по порядку.

** Указывается «ПГД» по объектам/мероприятиям, предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации;

     Указывается «ТП» по объектам/мероприятиям, не предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации, но содержащимся в договорах о технологическом присоединении;     

*** Вид источника выбирается из справочника:

- Прибыль прошлых лет;

- Амортизация текущего года;

- Амортизация прошлых лет;

- Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года;

- Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет;

- Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям;

- Займ организаций;

- Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; 

- Возмещенный из бюджета НДС;

- Другие (расшифровать).

**** - соответствует размеру транша, указанному в заявке на предоставление финансирования (транша)

***** - если допустимо.

 

 Приложение:

Реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации на ___ листах в 1 экземпляре (прилагается при необходимости).

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Оператор газификации:

ООО «Газпром газификация»

Газораспределительная организация:

ООО «Севергаз эксплуатация»

Генеральный директор

 

_________________/ФИО5/

М.П.

Генеральный директор 

 

________________ / ФИО4/

М.П.

 

43. Приложение № 3 к Договору изложить в следующей редакции:

 

Приложение № 3

к инвестиционному договору по выполнению мероприятий 

по технологическому присоединению в рамках догазификации

от 13.07.2022 № 1/2021/ФИ-05-174/2022

 

(форма)

 

ОТЧЕТ

о целевом использовании денежных средств

по договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации

"__" _________ 20__ г.

___________________________________________________________________

(наименование газораспределительной организации)

 

По договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от "__" ________ 20__ г. №  _________  (далее - Договор) газораспределительной организации поступило _________________________________________________________________________ рублей, необходимых для проведения                                                                                                                                                                        (сумма цифрами и прописью)

мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, в отношении ________________________________________ (далее соответственно - объект, объекты).

 

№

Населенный пункт

Наименование объекта

Код объекта*

 

 

 

Статус включения в план-график догазификации**

Факт обеспечения технической возможности подключения, шт.

Плановая стоимость  объекта, тыс. руб. без НДС

Плановые физические параметры объекта (протяженность), метров

Факт. стоимость объекта,  тыс. руб., без НДС

Фактические физические параметры объекта (протяженность), метров

Расчетная стоимость объекта по фактическим физическим параметрам согласно НЦС, тыс. руб. без НДС

Объем НЗС, тыс. руб.

Фактический объём освоения капитальных вложений, тыс. руб.

Ввод в состав основных фондов,тыс. руб.

Объем НЗС 

Факт финансирования (ГРО в адрес исполнителей, в т.ч. оплата расходов ГРО при хоз.способе), тыс. руб.

без НДС

НДС

без НДС

 

НДС

без НДС

НДС

без НДС

НДС

с  НДС

 

в т.ч. НДС

Всего, в т.ч.

по актам о подключении

на 31 декабря 2021

1 кв. 2022

2 кв. 2022

3 кв. 2022

4 кв. 2022

Итого, в. т.ч.

Иные (текущие затраты)

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2022

Источник***

4 кв. 2021

1 кв. 2022

2 кв. 2022

3 кв. 2022

4 кв. 2022

Итого

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

   * Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где:

    АА - код субъекта Российской Федерации;

    ББ -  год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации);

    ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН);

    X - уникальный код проекта, присваивается по порядку.

** Вид источника выбирается из справочника:

- Прибыль прошлых лет;

- Амортизация текущего года;

- Амортизация прошлых лет;

- Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года;

- Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет;

- Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям;

- Займ организаций;

- Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; 

- Возмещенный из бюджета НДС;

- Другие (расшифровать).

 

Приложения:

1.                Копии актов приемки объекта капитального строительства на ___ листах в 1 экземпляре.

2.                Реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования,  заключаемых в рамках догазификации на ___ листах в 1 экземпляре (прилагается при необходимости).

При необходимости дополнительно запрашиваются оператором газификации:

3. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 на __ листах в 1 экземпляре.

4.Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - на ___ листах в 1 экземпляре.

5. Копии счетов-фактур - на ___ листах в 1 экземпляре.

6. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на ___ листах в 1 экземпляре.

7. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение Договора, - на___ листах в 1 экземпляре.

 

"__" ________________ 20 __ г.

Руководитель

                            М.П.

______________________. (подпись)

 

_____________________________(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________________________(подпись)

 

_____________________________(расшифровка подписи)

 

Отчет проверен, замечаний нет

 

________________________________________

(должность проверяющего от организации – 

 оператора газификации)

 

________________________________________

(сокращенное наименование организации – оператора газификации)

 

________________/_____________/

 

"__" ___________ 20__ г.

 

СОГЛАСОВАНО

 

________________________________________

(руководитель оператора газификации) 

 

________________________________________

(сокращенное наименование организации – 

оператора газификации)

 

________________/_____________/

 

"__" ___________ 20__ г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Оператор газификации:

ООО «Газпром газификация»

Газораспределительная организация:

ООО «Севергаз эксплуатация»

Генеральный директор

 

_________________/ФИО5/

М.П.

Генеральный директор 

 

________________ / ФИО4/

М.П.

 

44. Приложение № 4 к Договору изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 4

к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации

от 13.07.2022 № 1/2021/ФИ-05-174/2022

 

Условия Банковского сопровождения

1.                Исполнение Договора от 13.07.2022 № 1/2021/ФИ-05-174/2022 (далее – Договор) осуществляется с применением банковского сопровождения.

В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

1.1.   Банковское сопровождение – осуществление Банком в соответствии с Параметрами банковского сопровождения мониторинга и контроля за обоснованностью расчетов Газораспределительной организацией и иных лиц, привлекаемых Газораспределительной организацией в ходе исполнения Договора (Подрядчики исполнения/реализации Договора, в том числе не включенные в Реестр контрагентов), осуществляемых в рамках исполнения Договора, на Отдельном счете, открытом в Банке. 

1.2.   Банк – наименование кредитной организации, предоставляющей услуги по Банковскому сопровождению договора.

1.3.   Лимит существенности –  предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из подрядчиков, соисполнителей, поставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.

1.4.   Отдельный счет – расчетный счет, открытый в Банке Газораспределительной организации и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Газораспределительной организацией для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.

1.5.   Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/ оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора.

1.6.   Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов, перечень Подрядчиков исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит существенности, размещенные на Электронной площадке.

1.7.   Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету, а также порядок и условия его использования.

1.8    Предмет контроля 

- соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

- соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

- соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом, условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

1.9.   Разрешенные уровни кооперации - предельное количество лиц в цепочке субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков, привлекаемых для целей исполнения Договора. Количество разрешенных уровней кооперации: 3

1.10. Распоряжение на перевод – платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденных Банком России от 19.06.2012 № 383-П.

1.11. Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке.

1.12. Участники исполнения/реализации Договора – подрядчики, исполнители, поставщики, а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов. 

1.13. Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов – лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов.

1.14. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: http://etpgpb.ru/.

2. Газораспределительная организация обязана:

2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка.

2.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка.

2.3. С даты заключения Договора обеспечить осуществление всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договору исключительно с использованием Отдельного счета. 

2.4. Перечислять денежные средства в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке.

2.5. Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора (дата, номер, предмет) в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Субподрядчиками исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов, 

2.6. Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не включенных в Реестр контрагентов кроме случаев, когда такие лица являются подрядчиками исполнения/реализации Договора, не включенными в Реестр контрагентов. 

2.7. Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с подрядчиками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности подрядчиков исполнения/реализации Договора:

осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Газораспределительной организацией обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;

перечисления денежных средств в адрес подрядчиков исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке;

в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Газораспределительной организацией обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка;

в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка;

предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими подрядчиках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для исполнения Газораспределительной организацией обязательств по Договору;

включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые подрядчиками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (подрядчиками исполнения/реализации Договора);

2.8.    Соблюдать количество Разрешенных уровней кооперации. 

2.9.    Предоставлять по запросу Оператора газификации информацию о возможности исполнения распоряжений на перевод Участника исполнения/реализации Договора в случаях получения Оператором газификации соответствующего запроса Банка о недостаточности Обосновывающих документов при принятии решения об исполнении распоряжения на перевод в срок 1 день с момента получения запроса Оператора газификации.

2.10 Газораспределительная организация несет ответственность за целевое использование денежных средств Оператора газификации Участниками исполнения/реализации Договора, в том числе, не включенными в реестр контрагентов, на всех уровнях кооперации в размере ущерба, причиненного нецелевым использованием денежных средств.

3.    Оператор газификации обязуется уведомить Банк о полном исполнении Газораспределительной организацией своих обязательств по Договору посредством соответствующего письменного уведомления.

4.    Оператор газификации осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета Газораспределительной организации, открытого в Банке (реквизиты Отдельного счета Газораспределительная организация сообщает Оператору газификации).

5.    Неоткрытие (несвоевременное открытие) Газораспределительной организацией Отдельного счета в Банке освобождает Оператор газификации от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

6. Стороны согласовали, что Параметры банковского сопровождения, в том числе Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, а также Реестр контрагентов могут быть изменены по инициативе оператора газификации путем подачи Заявки на изменение параметров банковского сопровождения на Электронной площадке. Параметры банковского сопровождения считаются измененными с даты приема Банком соответствующей Заявки на изменение параметров банковского сопровождения.

Изменение Параметров банковского сопровождения, в том числе Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, а также Реестра контрагентов с использованием Электронной площадки не требуют заключения дополнительного соглашения к Договору.» 

 

45. Приложение № 5 к Договору изложить в следующей редакции:

 

Приложение №5

к инвестиционному договору по выполнению 

мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации

от 13.07.2022 № 1/2021/ФИ-05-174/2022

 

(форма)

РЕЕСТР

договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, мероприятия по которым не вошли в Программу газификации

 

Кому:_______________________

"__" __________ 20__ г.

_________________________________________________ направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому                 (наименование газораспределительной организации)

присоединению в рамках догазификации, осуществляемых в _____________________________________________.

                 (наименование региона выполнения работ)

Номер п/п

Дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Номер заключенного договора о технологическом присоединении

 

Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения* 

Код объекта строительства, необходимого для осуществления технологического присоединения**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

-------------------------------

*   Указывается наименования муниципального образования, населенного пункта, улицы и номер домовладения.

** Код объекта строительства должен корреспондироваться с кодом объекта, предусматриваемым  при финансировании ООО "Газпром газификация" мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых газораспределительными организациями согласно Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (утв.  Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1550);

Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где:

АА - код субъекта Российской Федерации;

ББ  -  год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации);

ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН);

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Оператор газификации:

ООО «Газпром газификация»

Газораспределительная организация:

ООО «Севергаз эксплуатация»

Генеральный директор

 

_________________/ФИО5/

М.П.

Генеральный директор 

 

________________ / ФИО4/

М.П.

 

В обоснование заявленных требований истец сослался на наличие разногласий между сторонами относительно условий договора, а также на пункты 10, 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (далее – Постановление № 1550). Полагает, что в рассматриваемом случае целесообразно заключить не договор инвестирования, а договор финансирования (договор купли-продажи будущей вещи).

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик в отзыве на исковое заявление и его представители в судебном заседании с требованиями  истца не согласились, считают, что право выбора модели договора принадлежит газораспределительной организации, полагают, что в рассматриваемой ситуации сторонами подлежит заключению договор инвестирования.

Исследовав доказательства по делу, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Как видно из материалов дела, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 № 3603-р «Об определении единого оператора газификации и утверждении перечня федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации» ООО «Газпром газификация» определено единым оператором газификации.

Реализация мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе порядок финансирования мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, урегулирована Постановлением № 1550.

В соответствии с пунктом 10 Постановления № 1550 финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых газораспределительными организациями, осуществляется единым оператором газификации или региональным оператором газификации путем заключения следующих видов договоров по выбору газораспределительной организации:

договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме согласно приложению № 1;

инвестиционного договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме согласно приложению № 2;

иного гражданско-правового договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.

ООО «Севергаз эксплуатация» направило ООО «Газпром газификация» инвестиционный договор по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 06.12.2021 № 1/2021 в следующей редакции:

«Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», именуемое в дальнейшем оператором газификации, в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ», именуемое в дальнейшем газораспределительной организацией, в лице директора ФИО4, действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор об инвестировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (далее - Договор) о нижеследующем:

 

I. Предмет Договора

 

1. В соответствии с настоящим Договором газораспределительная организация обязуется по поручению оператора газификации от своего имени, но за счет оператора газификации осуществить все необходимые юридические и фактические действия по обеспечению проведения мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части пообъектного плана-графика догазификации (далее - программа газификации), и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), а оператор газификации обязуется финансировать расходы газораспределительной организаций по проведению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства в размере указанном в заявках, направляемых газораспределительной организацией оператору по форме согласно Приложения № 1, а газораспределительная организация обязуется осуществить все необходимые действия по обеспечению проведения мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей, предусмотренных межрегиональной или региональной программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации.

3. Собственником вновь созданного (построенного) газораспределительной организацией имущества при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, инвестирование которых осуществлялось в соответствии с настоящим Договором, является оператор газификации.

4. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный квартал.

 

II. Инвестирование (финансирование) мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации

 

5. Инвестирование (финансирование) мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами инвестирования (финансирования) единым оператором газификации мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550 "Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемйёькданым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций".

6. Инвестирование (финансирование) мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка) с приложением сведений (с помесячной разбивкой при необходимости), подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения):

расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа);

сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения и расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемые на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале;

сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период.

Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте.

Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму инвестирования (финансирования) далее именуется траншем.

7. Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

8. Оператор газификации предоставляет транш в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от газораспределительной организации заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого транша в пределах суммы инвестирования (финансирования), а также уведомляет газораспределительную организацию о произведенном перечислении денежных средств в течение 3 (трех) календарных дней с даты перечисления.

Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на счет газораспределительной организации, указанный в разделе X настоящего Договора.

Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на счет газораспределительной организации.

Проценты за пользование суммой инвестирования (финансирования) по настоящему Договору не начисляются. 

9. День зачисления денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации является днем предоставления инвестирования (финансирования).

В качестве подтверждения факта предоставления оператором газификации инвестирования (финансирования) или транша газораспределительная организация предоставляет оператору газификации копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую зачисление денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации, в течение 5 календарных дней с даты поступления денежных средств.

10. Газораспределительная организация обязана использовать сумму инвестирования (финансирования) строго по целевому назначению (пункт 1 настоящего Договора).

Расходы газораспределительной организации по оформлению в собственность оператора газификации имущества, созданного (построенного) в рамках догазификации по настоящему Договору, подлежат оплате (компенсации) со стороны оператора газификации отдельно от инвестирования (финансирования) мероприятий по настоящему Договору. Газораспределительная организация ежеквартально направляет оператору газификации отчет о выполненных мероприятиях по оформлению права собственности и понесенных расходах (по форме газораспределительной организации), а оператор газификации обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть отчет и произвести оплату понесенных расходов.

Расходы газораспределительной организации по урегулированию вопросов присоединения к сетям «основного абонента», подлежат оплате (компенсации) со стороны оператора газификации отдельно от инвестирования (финансирования) мероприятий по настоящему Договору. Газораспределительная организация ежемесячно направляет оператору газификации отчет о понесенных расходах (по форме газораспределительной организации), а оператор газификации обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть отчет и произвести оплату понесенных расходов.

11. Инвестирование (финансирование) предоставляется сроком до 31 декабря 2025 года.

 

III. Права и обязанности Сторон

 

12. Газораспределительная организация обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора:

обеспечивать мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, в том числе в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также осуществлять эксплуатацию созданного (построенного) в рамках догазификации имущества в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением требований промышленной безопасности;

оформлять в собственность оператора газификации созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, инвестирование (финансирование) расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора, и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия по оформлению (регистрации) права собственности на указанное имущество от имени оператора газификации;

направлять заявки на предоставление инвестирования (финансирования) расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, выполнение которых осуществляется газораспределительной организацией;

расходовать предоставленное оператором газификации инвестирование (финансирование) исключительно в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;

ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартала, направлять оператору газификации отчет в 2 экземплярах о целевом использовании денежных средств по форме согласно приложению №3 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов;

извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее следующего за возникновением таких обстоятельств дня.

13. Оператор газификации обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора:

предоставлять газораспределительной организации инвестирование (финансирование) на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, а также компенсировать газораспределительной организации расходы, понесенные в связи с оформлением в собственность оператора газификации имущества и расходы газораспределительной организации по урегулированию вопросов присоединения к сетям «основного абонента»;

получать в собственность созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, инвестирование (финансирование) расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора;

принимать и рассматривать заявки на предоставление инвестирования (финансирования) расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;

рассматривать в течение 10 рабочих дней отчеты газораспределительной организации о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме, предусмотренной приложением №3 к настоящему Договору;

заключить с газораспределительной организацией договор аренды в отношении созданного (построенного) газораспределительной организацией имущества, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора на срок не менее 49 лет;

передать в пользование созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, инвестирование (финансирование) расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора до даты заключения договора аренды;

представлять газораспределительной организации необходимые для исполнения настоящего Договора сведения и документы;

оказывать газораспределительной организации необходимое для исполнения настоящего Договора содействие.

14. Газораспределительная организация имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора:

получать инвестирование (финансирование) на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, получать компенсацию понесенных расходов в связи с оформлением в собственность оператора газификации имущества и компенсацию понесенных расходов по урегулированию вопросов присоединения к сетям «основного абонента»;

расходовать предоставленное оператором газификации инвестирование (финансирование) на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;

приступить к выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации при условии получения инвестирования;

запрашивать у оператора газификации необходимые для исполнения настоящего Договора сведения и документы;

использовать созданное (построенное) в рамках догазификации имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая осуществление всех предусмотренных действующим законодательством мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

получить в пользование созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, инвестирование (финансирование) расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора до даты заключения договора аренды.

15. Оператор газификации имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора:

получать от газораспределительной организации отчеты о расходовании предоставленного инвестирования (финансирования) на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;

запрашивать у газораспределительной организации информацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и расходовании предоставленного газораспределительной организации инвестирования (финансирования) на выполнение указанных мероприятий;

давать газораспределительной организации поручения об оформлении и регистрации за счет и от имени оператора газификации права собственности на созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, инвестирование (финансирование) расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора.

 

IV. Оформление прав на газораспределительные сети

 

16. Имущество, созданное (построенное) газораспределительной организацией в процессе выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, переходит в собственность оператора газификации с даты окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекта, которая указывается в отчете о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в соответствии с приложением №3 к настоящему Договору.

Дата окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию определяется в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта.

17. После регистрации права собственности за оператором газификации на указанное в пункте 16 настоящего раздела имущество оператор газификации обязуется в течение 10 календарных дней заключить договор (договоры) аренды такого имущества с газораспределительной организацией, выполнявшей мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации. Существенными условиями такого договора (договоров) аренды являются следующие условия:

срок аренды газораспределительной организацией имущества, указанного в пункте 16 настоящего раздела и принадлежащего оператору газификации, должен составлять не менее 49 лет, с возможностью дальнейшего продления и с правом выкупа газораспределительной организацией такого имущества в полном объеме или в части;

арендная плата по договору аренды устанавливается на текущий период действия тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для газораспределительной организации, в размере 1р/1 км газопровода в год;

денежные средства, оплачиваемые по договору аренды учитываются в общей стоимости сетей газораспределения при выкупе газораспределительной организацией. Стримость выкупного имущества определяется в размере средств, потраченных на его создание в рамках настоящего договора с учетом амортизации и износа или на иных, согласованных сторонами условиях;

при заключении договора аренды оператор не вправе предъявлять к газораспределительной организации требований не предусмотренных нормативной документацией.

оператор газификации не вправе в одностороннем порядке отказаться или уклониться от заключения такого договора аренды;

18. До момента заключения договора аренды в отношении имущества, указанного в пункте 16 настоящего раздела, после окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов газораспределительная организация вправе использовать имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая подключение (технологическое присоединение), и обязана эксплуатировать имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением требований промышленной безопасности.

19. В случае отказа или уклонения оператора газификации от передачи в аренду имущества, указанного в пункте 16 настоящего раздела, газораспределительная организация вправе обратиться за понуждением оператора газификации к заключению договора аренды в судебном порядке.

 

V. Ответственность Сторон

 

20. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. В случае нарушения срока предоставления инвестирования (финансирования) оператор газификации обязан возместить газораспределительной организации все понесенные убытки, включая штрафные санкции, вызванные нарушением сроков догазификации, в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного финансирования за каждый день просрочки.

22. В случае нарушения газораспределительной организацией своих обязательств по настоящему Договору оператор газификации вправе требовать от газораспределительной организации уплаты неустойки в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, от суммы финансирования, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных газораспределительной организацией обязательств.

 

VI. Конфиденциальность

 

23. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных в ходе его исполнения сведений, включая мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, и заключению с ними соглашений о конфиденциальности.

24. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется без письменного разрешения другой Стороны не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о другой Стороне, о результате исполнения настоящего Договора, а также иные конфиденциальные сведения, полученные ею в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

25. Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

26. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим разделом, остаются в силе в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после его прекращения.

 

VII. Применимое право и разрешение споров

 

27. К настоящему Договору, а также к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, применяется право Российской Федерации.

28. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения.

29. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его' исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по месту нахождения ответчика.

 

VIII. Действие и условия расторжения Договора

 

30. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

31. Настоящий Договор расторгается:

по соглашению Сторон;

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

 

IX. Заключительные положения

 

32. Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящего раздела.

33. Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, направляются в письменной форме посредством доступных средств связи, в том числе телексной, факсимильной, электронной связи, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по реквизитам, указанным в разделе X настоящего Договора.

34. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименований, банковских и платежных реквизитов, КПП, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.

35. Предоставляемые в соответствии с настоящим Договором газораспределительной организацией копии документов должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем газораспределительной организации или уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии).

36. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

37. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложение №1 (заявка на предоставление финансирования (транша);

приложение №2 (сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации);

приложение №3 (отчет о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации).

38. При осуществлении расчетов по настоящему Договору в платежных поручениях на предоставление суммы финансирования (части финансирования) Стороны обязаны указывать номер и дату настоящего Договора.

X. Реквизиты и подписи Сторон».

Приложение № 1

к инвестиционному договору

по выполнению мероприятий

по технологическому присоединению

в рамках догазификации

от 06.12.2021 г. № 1/2021

 

(форма)

 

Дата: _________

 

Кому: ___________________

 

ЗАЯВКА № _______

на предоставление финансирования (транша)

 

    В  соответствии с инвестиционным договором по выполнению мероприятий по

технологическому присоединению в рамках догазификации N ___ от ____ 20__ г.

___________________________________________________________________________

          (полное наименование газораспределительной организации)

в лице _________________________________________, действующего на основании

_____________________,  в  связи  с  недостаточностью  финансовых  средств,

получаемых   в  результате  введения  специальных  надбавок  к  тарифам  на

транспортировку  газа  газораспределительной  организацией  и  установления

тарифа  на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а

также  получаемых  от иных источников финансирования, для покрытия расходов

на  технологическое  присоединение  (подтверждающие  документы прилагаются)

просит Вас предоставить "__" _____________ 20__ г. финансирование (транш) в

размере _______________ (_______________) _______________.

 

    Приложение: Перечень финансируемых объектов.

 

N

Муниципальное образование

Населенный пункт

Наименование объекта

Код объекта 

<

*>

Планируемое количество подключений домовладений

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

    --------------------------------

    

<

*> Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где:

    АА - код субъекта Российской Федерации;

    ББ  -  год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу

газификации);

    ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры);

    X - уникальный код проекта, присваивается по порядку.

 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись)

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

 

Оператор газификации:

ООО «Газпром газификация»

Газораспределительная организация:

ООО «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

 

 

 

__________________/ФИО5/

М.П.

_________________/ФИО4/

М.П.

 

Приложение № 2

к инвестиционному договору

по выполнению мероприятий

по технологическому присоединению

в рамках догазификации

от 06.12.2021 г. № 1/2021

 

(форма)

 

СВЕДЕНИЯ

о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации

 

Кому: _______________________________

"__" _____________ 20__ г.

 

______________________________________ направляет сведения о финансировании

 (наименование газораспределительной

             организации)

мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.

 

N

Код объекта 

<

**>

Планируемое количество подключений домовладений 

<

*>

Наличие проектно-сметной документации на объект строительства (нет/да - указывается дата, заказчик проектно-сметной документации, при наличии)

Плановые физические параметры объекта строительства

Плановый объем затрат на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость)

Плановый объем освоения на догазификацию, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально)

Ввод в состав основных фондов на 31 декабря 20__ г., тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость)

Источники компенсации затрат, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально)

Сведения о недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) (поквартально)

Линейная часть, метров

Электрохимическая защита, штук

Пункт редуцирования газа, штук

Итого

Проектно-изыскательские работы

Строительно-монтажные работы

Иные затраты (мониторинг, фактическое присоединение)

Итого

__ кв. 20__ г.

Итого

Источники 

<

***>

Итого

__ кв. 20__ г.

__ кв. 20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    --------------------------------

    

<

*>  Общее  количество  подключений  (технологических  присоединений) в

рамках  догазификации,  в  том числе без учета мероприятий по созданию сети

газораспределения до границ земельного участка заявителя.

    

<

**> Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где:

    АА - код субъекта Российской Федерации;

    ББ  -  год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу

газификации);

    ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры);

    X - уникальный код проекта, присваивается по порядку.

    

<

***> Информация представляется отдельно по каждому источнику (средства

в  результате  введения  специальных  надбавок к тарифам по транспортировке

газа  газораспределительной  организацией  по  газораспределительным сетям,

средства  тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным

сетям, иные источники).

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

 

Оператор газификации:

ООО «Газпром газификация»

Газораспределительная организация:

ООО «СЕВЕРГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

 

 

 

__________________/ФИО5/

М.П.

_________________/ФИО4/

М.П.

 

Приложение № 3

к инвестиционному договору

по выполнению мероприятий

по технологическому присоединению

в рамках догазификации

от 06.12.2021 г. № 1/2021

 

(форма)

 

ОТЧЕТ

о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от __.__.____ № _______________

за 20__ год

 

"__" ______________ 20 __ г.

 

 

 

(наименование газораспределительной организации)

 

    По    инвестиционному    договору    по   выполнению   мероприятий   по

технологическому присоединению в рамках догазификации от __.__.____________

N   ____________   (далее   -   Договор)  газораспределительной организации

поступило ______________________________ рублей, необходимых для проведения

            (сумма цифрами и прописью)

мероприятий  по  технологическому  присоединению  в  рамках догазификации в

отношении ____________ (далее соответственно - объект, объекты).

N

Код объекта/стройки 

<

**>

Подключено домовладений 

<

*>

Плановая стоимость объекта, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость)

Фактический объем освоения финансирования на догазификацию, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально)

Ввод в состав основных фондов на 31 декабря 20__ г., тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость)

Профинансировано оператором газификации, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально)

Фактические физические параметры объекта

Фактическая стоимость объекта, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость)

Способ прокладки газопровода 

<

***>

Электрохимическая защита, штук

Пункт редуцирования газа, штук

Итого

__ кв. 20__ г.

__ кв. 20__ г.

Протяженность, метров

Материал трубы

Диаметр (наружный), мм

Диаметр футляра, мм (при наличии)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

    --------------------------------

    

<

*>  Общее  количество  подключений  (технологических  присоединений) в

рамках  догазификации,  в  том числе без учета мероприятий по созданию сети

газораспределения до границ земельного участка заявителя.

    

<

**> Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где:

    АА - код субъекта Российской Федерации;

    ББ  -  год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу

газификации);

    ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры);

    X - уникальный код проекта, присваивается по порядку.

    

<

***>  Подземная прокладка газопровода открытым способом, или подземная

прокладка   газопровода   закрытым   способом,   или   надземная  прокладка

газопровода.

 

Приложения:

1. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 - на __ листах в 1 экземпляре.

2. Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - на __ листах в 1 экземпляре.

3. Копии счетов-фактур - на __ листах в 1 экземпляре.

4. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на __ листах в 1 экземпляре.

5. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение пункта 5 Договора, - на __ листах в 1 экземпляре.

6. Копии актов сдачи-приемки объектов - на __ листах в 1 экземпляре.

 

"__" ________________ 20 __ г.

 

Руководитель

 

 

М.П.

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Главный бухгалтер

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

Отчет проверен, замечаний нет

 

 

(должность проверяющего от организации - единого оператора газификации (регионального оператора газификации)

 

 

(сокращенное наименование организации - единого оператора газификации (регионального оператора газификации)

 

________________/_____________/

 

"__" ___________ 20__ г.

 

 

СОГЛАСОВАНО

 

 

(руководитель единого оператора газификации (регионального оператора газификации)

 

 

(сокращенное наименование организации - единого оператора газификации (регионального оператора газификации)

 

________________/_____________/

 

"__" ___________ 20__ г.

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

 

Оператор газификации:

_______________________________

Газораспределительная организация:

________________________________

 

 

 

__________________/____________/

М.П.

__________________/____________/

М.П.

 

В связи с тем, что полученный от ООО «Севергаз эксплуатация» договор не содержал, по мнению истца, существенные условия (условия о предмете и цене договора) и не мог быть заключён сторонами,                                           ООО «Газпром газификация» направило ООО «Севергаз эксплуатация» протокол разногласий в редакции, приведенной выше в просительной части исковых требований..

Письмом от 09.08.2022 ООО «Севергаз эксплуатация» отказало в подписании протокола разногласий.

В связи с невозможностью урегулировать разногласия мирным способом ООО «Газпром газификация» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случаях, когда в соответствии с названным Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты. Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта. 

Пунктом 2 статьи 445 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с названным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. Если сторона, для которой в соответствии с указанным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). 

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 названного Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (пункт 1 статьи 446 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 421, пунктом 1 статьи 422 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Между сторонами возник спор в отношении вида и условий подлежащего заключению договора.

Пунктом 10 Правил № 1550 право выбора вида договора предоставлено газораспределительной организации.

Направив в адрес истца проект договора инвестирования, ответчик действовал в соответствии с положениями законодательства.

В приложении 2 к Правилам № 1550 утверждена форма инвестиционного договора. 

Проект, направленный ответчиком в адрес истца, соответствует указанной форме, за исключением абзаца третьего пункта 10 договора, пункта 11 договора, абзаца четвертого пункта 14 договора, абзацев третьего, четвертого, пятого пункта 17 договора, пункта 30 договора.

Согласно абзацу третьему пункта 10 проекта договора в редакции ответчика расходы газораспределительной организации по урегулированию вопросов присоединения к сетям «основного абонента», подлежат оплате (компенсации) со стороны оператора газификации отдельно от инвестирования (финансирования) мероприятий по настоящему Договору. Газораспределительная организация ежемесячно направляет оператору газификации отчет о понесенных расходах (по форме газораспределительной организации), а оператор газификации обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть отчет и произвести оплату понесенных расходов.

Частью 3 статьи 27 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ               «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Закон о газоснабжении) определено, что юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями и их объектами и (или) сетями газопотребления и их объектами, не вправе препятствовать транспортировке и подаче газа по указанным сетям и их объектам потребителям, а также технологическому присоединению к указанным сетям и их объектам при наличии пропускной способности таких сетей. Аналогичное положение содержится в пункте 48 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 6 газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила № 1547). 

Законодательство Российской Федерации не предусматривает выдачу согласия основным абонентом на присоединение к его сетям на условиях компенсации его затрат по строительству и эксплуатации газопровода-источника, либо с применением иной платы.

Абзацем четвертым пункта 14 проекта договора в редакции ответчика предусмотрено право газораспределительной организации приступить к выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации при условии получения инвестирования

Между тем, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) установлены в пункте  53 Правил № 1547 вне зависимости от момента получения денежных средств от оператора газификации. 

Поэтому, включение абзаца четвертого пункта 14 в договор не соответствует нормам действующего законодательства.

Кроме того, положения, указанные в абзаце третьем пункта 10 договора, абзаце четвертом пункта 14 договора, абзаце четвертом, пятом пункта 17 договора,  не содержатся в форме договора, утвержденной Постановлением     № 1550, не являются существенными условиями договора, а соглашения сторон по поводу включения этих условий в договор не достигнуто.

При изложенных обстоятельствах, рассматриваемые положения не подлежат включению в договор.

Ответчик предложил пункт 11 оговора изложить в следующей редакции:

«11. Инвестирование (финансирование) предоставляется сроком до         31 декабря 2025 года.»

Пункт 30 договора газораспределительная организация предложила изложить в следующее редакции:

«30. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до 31 декабря 2025 года».

Между тем, программа догазификации в Вологодской области, утвержденная постановлением Губернатора Вологодской области от 27.12.2021 № 249 рассчитана на 2022-2031 годы. Соответственно, суд считает возможным указать в пунктах 11 и 30 проекта договора дату окончания предоставления финансирования и дату окончания срока действия договора - 31.12.2031.

Газораспределительная организация предложила абзац третий пункта 17 проекта договора изложить в следующей редакции:

«арендная плата по договору аренды устанавливается на текущий период действия тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для газораспределительной организации, в размере 1р/1 км газопровода в год».

Согласно правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации Решение Верховного Суда Российской Федерации        от 13.12.2019 № АКПИ19-823 при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям сумма расходов на аренду газопроводов должна учитываться в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. При этом экономически обоснованный уровень таких расходов определяется органом регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю затрат на амортизацию, уплату налогов и иных обязательных платежей, связанных с владением имуществом.

Поскольку на дату урегулирования разногласий по договору отсутствует исходная информация, необходимая для определения размера арендной платы, суд считает возможным закрепить в условиях договора порядок ее формирования, и изложить абзац третий пункта 17 проекта договора в следующей редакции:

«Арендная плата по договору аренды устанавливается на текущий период действия тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для газораспределительной организации, и включает в себя: амортизационные отчисления, рассчитанные исходя из балансовой стоимости недвижимого имущества, срока его полезного использования; суммы налога на недвижимое имущество в отношении переданного в аренду имущества; прямые расходы, возникающие у арендодателя в виде сумм платы за пользование земельными участками, на которых расположено арендуемое имущество (земельный налог, аренда, публичный сервитут).»

В ходе судебного разбирательства ООО «Газпром газификация» представило протокол разногласий к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № 1/2021 (на случай, если рассматривать договор как инвестиционный). 

При этом редакция истца не соответствует форме инвестиционного договора, утвержденной Постановлением № 1550, и содержит условия, не поименованные в Постановлении № 1550, не являющиеся существенными условиями договора, по которым к стороны не пришли к соглашению. При изложенных обстоятельствах редакции оператора газификации не может принята судом.

На основании изложенного  требования истца подлежат удовлетворению, однако договор подлежит изложению в редакции ответчика, за исключением абзаца третьего пункта 10 договора, пункта 11 договора, абзаца четвертого пункта 14 договора, абзацев третьего, четвертого, пятого пункта 17 договора, пункта 30 договора.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, и в соответствии со статьей 177 АПК РФ будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего для после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 110, 167–170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л:

урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» и обществом с ограниченной ответственностью «Севергаз эксплуатация» при заключении договора от 06.12.2021 № 1/2021.

Изложить договор от 06.12.2021 № 1/2021 в редакции общества с ограниченной ответственностью «Севергаз эксплуатация», за исключением абзаца третьего пункта 10 договора, пункта 11 договора, абзаца четвертого пункта 14 договора, абзацев третьего, четвертого, пятого пункта 17 договора, пункта 30 договора.

 Абзац третий пункта 10,  абзац четвертый пункта 14, абзацы четвертый и пятый пункта 17 из договора исключить.

Пункт 11 договора изложить в следующей редакции:

«11. Финансирование предоставляется сроком до 31.12.2031.»

Абзац третий пункта 17 изложить в следующей редакции:

«Арендная плата по договору аренды устанавливается на текущий период действия тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для газораспределительной организации, и включает в себя: амортизационные отчисления, рассчитанные исходя из балансовой стоимости недвижимого имущества, срока его полезного использования; суммы налога на недвижимое имущество в отношении переданного в аренду имущества; прямые расходы, возникающие у арендодателя в виде сумм платы за пользование земельными участками, на которых расположено арендуемое имущество (земельный налог, аренда, публичный сервитут).»

Пункт 30 договора изложить в следующей редакции:

«30. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонам  и действует до 31.12.2031».

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

 

Судья

И.В. Кутузова