АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, 

<

...>, тел. 

<

***>  

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

17 октября 2025 года Дело № А55-16669/2025  

Резолютивная часть решения объявлена 07 октября 2025 года В полном объёме решение изготовлено 17 октября 2025 года  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Венчаковой О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Манаевым Р.Ш рассмотрев 23.09.2025 – 07.10.2025 (в судебном заседании объявлен перерыв в порядке ст.  

163 АПК РФ), в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс»  

к акционерному обществу «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» о взыскании 54 474 307,51 руб. основного долга по договорам подряда, процентов за  

просрочку по договорам подряда в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ в размере 4 938 838,31 руб.  

при участии в заседании представителей (до перерыва): от истца – ФИО1 по доверенности от 18.03.2024. от ответчика - ФИО2 по доверенности от 01.01.2025.  

при участии в заседании представителей (после перерыва): 

от истца – ФИО1 по доверенности от 18.03.2024. от ответчика - ФИО2 по доверенности от 01.01.2025.  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс» (далее – ООО «Строй- Альянс», истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском, неоднократно уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к акционерному обществу «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ответчик) о взыскании 54 474 307,51 руб. основного долга по договорам подряда, процентов в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ в размере 4 938 838,31 руб., с последующим начислением, начиная с 16.09.2025 г., исходя из ключевой ставки Банка России, за каждый день просрочки по день фактической оплаты.  

Уточнение иска принято судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 23.09.2025 объявлялся перерыв до 07.10.2025. Информация о перерыве была размещена на сайте Арбитражного суда Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. После перерыва заседание продолжено 07.10.2025.  

Истец поддержал уточненные исковые требования, представил письменные пояснения.  

Ответчик возражал против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзывах на исковое заявление.  

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом, между ООО «Строй-Альянс» (далее по тексту - Истец, Подрядчик) и АО «НК НПЗ» (далее по тексту - Ответчик, Заказчик) заключены договоры подряда на выполнение работ на объектах АО «НК НПЗ». Работы ООО «Строй-Альянс» были выполнены своевременно, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее по тексту - Акт(ы)), Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее по тексту - Справка(и)), подписанными сторонами, счетами-фактурами (см. Таблицу № 1).  

Договор подряда № 3281024/021 ОД от 04.03.2024г. на выполнение работ но ремонту помещений на объектах АО «НК НПЗ».  

Согласно п.6 Дополнительного соглашения № 4 от 23.09.2024г. календарные сроки выполнения работ: С даты заключения договора по 30.01.2025г.  

Счет-фактура № 28 от 09.01.25г., Справка № 931-24(2) от 09.01.2025г., Акт № 931-24(2) от 09.01.2025г. на сумму в размере 1 379 998,19 (один миллион триста семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Счет-фактура № 29 от 09.01.25г., Справка № 2001-23(2) от 09.01.2025г., Акт № 2001-23(2) от 09.01.2025г. на сумму в размере 100 508,50 (сто тысяч пятьсот восемь) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Счет-фактура № 3 от 10.01.25г., Справка № 1910-23(1) от 10.01.2025г., Акт № 1910-23(1) от 10.01.2025г. на сумму в размере 4 929 650,64 (четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Счет-фактура № 8 от 15.01.25г., Справка № 1245-24(1) от 15.01.2025г., Акт № 1245-24(1) от 15.01.2025г. на сумму в размере 802 408,22 (восемьсот две тысячи четыреста восемь) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 9 от 15.01.25г., Справка № 1246-24(1) от 15.01.2025г., Акт № 1246-24(1) от 15.01.2025г. на сумму в размере 974 078,59 (девятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 10 от 15.01.25г., Справка № 1246-24(2) от 15.01.2025г., Акт № 1246-24(2) от 15.01.2025г. на сумму в размере 8 123,50 (восемь тысяч сто двадцать три) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

Счет-фактура № 11 от 15.01.25г., Справка № 1989-23(3) от 15.01.2025г., Акт № 1989-23(3) от 15.01.2025г. на сумму в размере 340 053,25 (триста сорок тысяч пятьдесят три) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

Счет-фактура № 12 от 15.01.25г., Справка № 1989-23(4) от 15.01.2025г., Акт № 1989-23(4) от 15.01.2025г. на сумму в размере 19 935,46 (девятнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей, в т.ч. НДС  

Счет-фактура № 13 от 15.01.25г., Справка № 2090-23(3) от 15.01.2025г., Акт № 2090-23(3) от 15.01.2025г. на сумму в размере 750 503,22 (семьсот пятьдесят тысяч пятьсот три) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

Счет-фактура № 14 от 15.01.25г., Справка № 914-24(1) от 15.01.2025г., Акт № 914-24(1) от 15.01.2025г. на сумму в размере 1 432 386,96 (один миллион четыреста тридцать две тысячи триста восемьдесят шесть) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Счет-фактура № 15 от 15.01.25г., Справка № 914-24(2) от 15.01.2025г., Акт № 914-24(2) от 15.01.2025г. на сумму в размере 19 814,34 (девятнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Счет-фактура № 16 от 15.01.25г., Справка № 918-24(1) от 15.01.2025г., Акт № 918-24(1) от 15.01.2025г. на сумму в размере 921 794,59 (девятьсот двадцать одна тысяча семьсот  

девяносто четыре) рубля, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 17 от 15.01.25г., Справка № 918-24(2) от 15.01.2025г., Акт № 918-24(2) от 15.01.2025г. на сумму в размере 29 090,92 (двадцать девять тысяч девяносто) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 50 от 12.02.2025г., Справка № 931-24(3) от 12.02.2025г., Акт 931-24(3) от 12.02.2025г. на сумму в размере 886 002,62 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч два) рубля, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 51 от 12.02.2025г., Справка № 2001-23(3) от 12.02.2025г., Акт № 2001-23(3) от 12.02.2025г. на сумму в размере 61 804,86 (шестьдесят одна тысяча восемьсот четыре) рубля, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 53 от 12.02.2025г., Справка № 910/24(3) от 12.02.2025г., Акт № 910/24(3) от 12.02.2025г. на сумму в размере 53 235,12 (пятьдесят три тысячи двести тридцать пять) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 52 от 12.02.2025г., Справка № 638-23(5) от 12.02.2025г., Акт № 638-23(5) от 12.02.2025г. на сумму в размере 46 621,20 (сорок шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 54 от 12.02.2025г., Справка № 639-24(5) от 12.02.2025г., Акт № 639-24(5) от 12.02.2025г. на сумму в размере 297 289,52 (двести девяносто семь тысяч двести восемьдесят девять) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 55 от 12.02.2025г., Справка № 2100/23(5) от 12.02.2025г., Акт № 2100/23(5) от 12.02.2025г. на сумму в размере 82 174,36 (восемьдесят две тысячи сто семьдесят четыре) рубля, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 39 от 03.02.2025г., Справка 910-24(2) от 03.02.2025г., Акт 910-24(2) от 03.02.2025г. на сумму в размере 1 376 185,22 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 40 от 03.02.2025г., Справка № 638-23(4) от 03.02.2025г., Акт № 638-23(4) от 03.02.2025г. на сумму в размере 97 877,53 (девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 46 от 09.02.2025г., Справка № 1288/24(1) от 09.02.2025г., Акт № 1288/24(1) от 09.02.2025г. на сумму в размере 322 193,24 (триста двадцать две тысячи сто девяносто три) рубля, в т.ч. НДС 20%;  

Счет-фактура № 47 от 09.02.2025г., Справка № 2029/23(1) от 09.02.2025г., Акт № 2029/23(1) от 09.02.2025г. на сумму в размере 151 233,97 (сто пятьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

Задолженность по данному договору подряда составляет 15 082 964,02 руб. (одиннадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста сорок шесть) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Договор подряда № 3281024/1208Д от 14.10.2024г. на выполнение ремонтно-строительных работ на Учебном полигоне цеха № 50 АО «НК НПЗ».  

Согласно п.3.1 Договора календарные сроки выполнения работ: с даты заключения договора -2,5 месяца.  

1.Счет-фактура № 27 от 10.01.25г., Справка № 26499-АС(1) от 10.01.2025г., Акт № 26499-АС(1) от 10.01.2025г. на 15 л. на сумму в размере 836 013,14 (восемьсот тридцать шесть тысяч тринадцать) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

2.Счет-фактура № 26 от 10.01.25г., Справка № 26499-АС изм. 1(1) от 10.01.2025г., Акт № 26499-АС изм. 1(1) от 10.01.2025г. на сумму в размере 162 819,23 (сто шестьдесят две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

3.Счет-фактура № 25 от 10.01.25г., Справка № 1027-24(1) от 10.01.2025г., Акт № 1027-24(1) от 10.01.2025г. на сумму в размере 58 320,00 (пятьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Задолженность по данному договору подряда составляет 1 057 152,37 (один миллион пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят два) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

Договор подряда № 3281023/1558Д от 04.12.2023г. на выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки КГФиСБ, блок УСБ, цех № 3 АО «НК НПЗ». Согласно п.3.1 Договора календарные сроки выполнения работ: С даты заключения договора -17 месяцев.  

1. Счет-фактура № 18 от 10.01.25г., Справка № 1227-23(3) от 10.01.2025г., Акт № 1227-23(3) от 10.01.2025г. на сумму в размере 546 463,81 (пятьсот сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

2. Счет-фактура № 1 от 09.01.25г., Справка № 1379-23(1) от 09.01.2025г., Акт № 1379-23(1) от 09.01.2025г. на сумму в размере 80 365,46 (восемьдесят тысяч триста шестьдесят пять) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

3. Счет-фактура № 7 от 15.01.25г., Справка № 1380-23(3) от 15.01.2025г., Акт № 1380-23(3) от 15.01.2025г. на сумму в размере 3 305 275,63 (три миллиона триста пять тысяч двести семьдесят пять) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

4. Счет-фактура № 5 от 10.01.25г., Справка № 1382-23(3) от 10.01.2025г., Акт № 1382-23(3) от 10.01.2025г. на сумму в размере 4 340 106,74 (четыре миллиона триста сорок тысяч сто шесть) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

5. Счет-фактура № 2 от 10.01.25г., Справка № 260-24(1) от 10.01.2025г., Акт № 260-24(1) от 10.01.2025г. на сумму в размере 1 103 173,94 (один миллион сто три тысячи сто семьдесят три) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

6. Счет-фактура № 48 от 03.02.2025г., Справка № 1380-23(4) от 03.02.2025г., Акт № 1380-23(4) от 03.02.2025г. на сумму в размере 926 402,87 (девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста два) рубля, в т.ч. НДС 20%;  

7. Счет-фактура № 49 от 03.02.2025г., Справка 1381-23(4) от 03.02.2025г., Акт № 1381-23(4) от 03.02.2025г. на сумму в размере 4 081 976,77 (четыре миллиона восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

8. Счет-фактура № 56 от 10.02.2025г., Справка № 25012-АС(1) от 10.02.2025г., Акт № 25012-АС(1) от 10.02.2025г. на сумму в размере 433 612,10 (четыреста тридцать три тысячи шестьсот двенадцать) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

9. Счет-фактура № 57 от 10.02.2025г., Справка № 25012-ТХ.ТИ(1) от 10.02.2025г., Акт 25012-ТХ.ТИ(1) от 10.02.2025г. на сумму в размере 103 923,29 (сто три тысячи девятьсот двадцать три) рубля, в т.ч. НДС 20%;  

10. Счет-фактура № 58 от 10.02.2025г., Справка № 25218-ВС.АЗО(1) от 10.02.2025г., Акт № 25218-ВС.АЗО(1) от 10.02.2025г. на сумму в размере 68 170,45 (шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

11. Счет-фактура № 65 от 10.02.2025г., Справка № 1260-24(1) от 10.02.2025г., Акт № 1260-24(1) от 10.02.2025г. на сумму в размере 10 099 018,85 (десять миллионов девяносто девять тысяч восемнадцать) рублей, в т.ч. НДС 20%;  

12. Счет-фактура № 66 от 10.02.2025г., Справка № 1593-24(1) от 10.02.2025г., Акт № 1593-24(1) от 10.02.2025г. на сумму в размере 3 378 221,09 (три миллиона триста семьдесят восемь тысяч двести двадцать один) рубль, в т.ч. НДС 20%;  

13. Счет-фактура № 67 от 10.02.2025г., Справка № 1760-24(1) от 10.02.2025г., Акт № 1760-24(1) от 10.02.2025г. на сумму в размере 9 867 543,12 (девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок три) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

Задолженность по данному договору подряда составляет 38 334 254,12 (тридцать восемь миллионов триста тридцать четыре тысячи двести пятьдесят четыре) рубля, в т.ч. НДС 20%.  

Согласно Раздела 9 Договоров подряда оплата осуществляется по факту выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании актов приема-сдачи выполненных работ в течение 60 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней (нижняя граница) с даты подписания актов приема-сдачи  

выполненных работ.  

По состоянию на 10.07.2025г. задолженность АО «НК НПЗ» перед ООО «Строй- Альянс» составляет 54 474 370,51 (пятьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи триста семьдесят) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Если договором подряда не установлен размер процентов за просрочку оплаты заказчиком выполненных работ, подрядчик вправе требовать уплаты процентов на сумму долга на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п.1 ст.395 ГК РФ).  

Претензии Истца исх. № 74 от 31.03.2025г., № 75 от 31.03.2025г., № 76 от 31.03.2025г., № 77 от 31.03.2025г. о погашении задолженности по договорам подряда ответчик оставил без ответа, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.  

Ответчик возражая против удовлетворения иска указал, что 21.03.2025 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 6 к о пересмотре величины индексов сметной стоимости и пересчете стоимости невыполненных работ.  

14.04.2025 сторонами заключено дополнительное соглашение № 7 к Договору. Согласно которому стороны пришли к соглашению применить индексы сметной стоимости, указанные в п. 2 Дополнительного соглашения № 6 по работам за период с 01.01.2025 по 20.03.2025, что явилось основанием для корректировки истцом первичной документации и уменьшения стоимости выполненных работ до суммы 4 961 479,51 руб., что подтверждается следующими корректировочными документами:  

1. Корректировочный счет-фактура № 147 от 05.05.2025 к счету-фактуре № 22 от 09.01.2025 на сумму в размере 3 478 179,80 руб., в т.ч. НДС 20%;  

2. Корректировочный счет-фактура № 148 от 05.05.2025 к счету-фактуре № 19 от 09.01.2025 на сумму в размере 288 099,77 руб., в т.ч. НДС 20%;  

3. Корректировочный счет-фактура № 146 от 05.05.2025 к счету-фактуре № 21 от 10.01.2025 на сумму в размере 190 501,42 руб., в т.ч. НДС 20%;  

4. Корректировочный счет-фактура № 145 от 05.05.2025 к счету-фактуре № 20 от 10.01.2025 на сумму в размере 805 179,37 руб., в т.ч. НДС 20%;  

5. Корректировочный счет-фактура № 144 от 05.05.2025 к счету-фактуре № 24 от 23.01.2025 на сумму в размере 199 789,15 руб., в т.ч. НДС 20%.  

Согласно раздела 9 Договора оплата выполнена работ осуществляется на основании актов приема-сдачи работ в течение 60 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с даты подписания актов приема-сдачи выполненных работ, но не ранее получения оригинала счета-фактуры.  

Поскольку корректирующие акты и корректирующие оригиналы счетов-фактур датированы 05.05.2025, а оплата осуществлена 29.05.2025 в полном объеме, основания для начисления пени за просрочку оплаты в соответствии со ст. 395 ГК РФ отсутствуют  

Кроме того, ответчик указывает, что истец в нарушение п.9.1.Договора не представил доказательства передачи оригиналов документов, что исключает наступление ответственности за просрочку оплаты.  

Данные доводы ответчика судом отклоняются ввиду следующего. 

Согласно п.9.4 договора подряда предусматривает право ответчика на задержку платежа ввиду просрочки предоставления первичных документов счетов - фактур, истцом не представлены доказательство направления документов на оплату ответчику, в связи с чем ответчик не предоставил исполнения принятых на себя встречных обязательств считаем необоснованным, поскольку, подписывая акты выполненных работ ответчик не мог не знать об объемах выполненных работ. Договоры подряда заключены и исполняется сторонами с декабря 2023 года, при этом ответчик не обращался к подрядчику за представлением счетов - фактур.  

При этом ответчиком подписан акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2025г.  

по 31.03.2025г. (далее - Акт сверки), в котором указаны:  

счета - фактуры по договору подряда № 3281024/0210Д от 04.03.2024г. № 28 от 09.01.2025г., № 29 от 09.01.2025г., № 3 от 10.01.2025г., № 10 от 15.01.2025г., № 11 от 15.01.2025г., № 12 от 15.01.2025г., № 13 от 15.01.2025г., № 14 от 15.01.2025г., № 15 от 15.01.2025г., № 16 от 15.01.2025г., № 17 от 15.01.2025г., № 8 от 15.01.2025г., № 9 от 15.01.2025г., № 39 от 03.02.2025г., № 40 от 03.02.2025г., № 46 от 09.02.2025г., № 47 от 09.02.2025г., № 50 от 12.02.2025г., № 51 от 12.02.2025г., № 52 от 12.02.2025г., № 53 от 12.02.2025г, № 54 от 12.02.2025г., № 55 от 12.02.2025г. (стр. 2-3 Акта сверки);  

счета - фактуры по договору подряда № 3281024/1208Д от 14.10.2024г. № 25 от 10.01.2025г., № 26 от 10.01.2025г., № 27 от 10.01.2025г. (стр. 4 Акта сверки);  

счета - фактуры по договору подряда № 3281023/1558Д от 04.12.2023г. № 1 от 09.01.2025г., № 18 от 10.01.2025г., № 2 от 10.01.2025г., № 5 от 10.01.2025г., № 7 от 15.01.2025г., № 48 от 03.02.2025г., № 49 от 03.02.2025г., № 56 от 10.02.2025г., № 57 от 10.02.2025г., № 58 от 10.02.2025г., № 65 от 10.02.2025г., № 66 от 10.02.2025г., № 67 от 10.02.2025г. (стр. 1-2 Акта сверки).  

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Как следует из п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», в соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами, иного основания для возникновения у заказчика обязанности по оплате выполненных работ, в том числе выставления счета на оплату, не предусмотрено.  

Ответчиком без замечаний и возражений по объему и качеству выполненных работ были подписаны акты по форме КС-2, КС-3 на сумму 54 474 370,51, в т.ч. НДС 20%.  

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий Заказчик обязан произвести ее оплату.  

Таким образом, основанием для возникновения обязательства по оплате является передача результата работ заказчику.  

Доводы Заказчика о фактическом неисполнении Подрядчиком обязательств по договору опровергаются представленными в рамках настоящего дела актами по форме КС-2, КС-3, актом сверки взаиморасчетов которые подписаны сторонами без замечаний.  

Как указал истец от ответчика ни разу не поступало требования либо претензии, связанные с непредставлением подрядчиком предусмотренной договорами документации.  

В нарушение ст. 65, 71 АПК РФ ответчик не представил документально подтверждения обращения к истцу с требованием о представлении документов, также как и не представил доказательств претензии, связанные с непредставлением подрядчиком предусмотренной договором документации.  

На основании изложенного, арбитражный суд приходит к выводу, что ответчик нарушил срок оплаты по договорам и должен нести ответственность.  

В соответствии с ст.ст. 309,310,702,720,711 ГК РФ суд полагает, что требования истца по договорам подряда № 3281024/0210Д от 04.03.2024, № 3281024/1208Д от 14.10.2024, № 3281023/1558Д от 04.12.2023 подлежат удовлетворению в размере 54 474 307,51 руб.  

В соответствии с п.11.1 договора истцом рассчитаны проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ на дату предъявления иска составляет 4 938 838 руб. 31 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.03.2025 по 15.09.2025.  

Факт просрочки оплаты принятых работ подтвержден материалами дела ответчиком  

не опровергнут.  

Ответчик представил контррасчет процентов, указав, что истцом в период расчета процентов неправомерно включен последний день исполнения обязательства по оплате.  

Истец, согласившись с доводом ответчика о неправомерном включении последнего дня исполнения обязательства по оплате в расчет процентов, представил уточненный расчет процентов, который принят арбитражным судом.  

Суд, проверив расчет процентов истца, признал его верным. 

Также истец просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.09.2025 г. исходя из ключевой ставки Банка России, за каждый день просрочки по день фактической уплаты.  

В соответствии с пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.  

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).  

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с ст.ст.309, 310, 395 ГК РФ суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в части взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.03.2025 по 15.09.2025в размере 4 938 838 руб. 31 коп., с последующим начислением, начиная с 16.09.2025 г., исходя из ключевой ставки Банка России, за каждый день просрочки по день фактической уплаты.  

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 503 764 руб. в соответствии с ст.110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.  

В соответствии с п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46, в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 настоящего Кодекса  

Суд считает необходимым взыскать с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 266 952 руб.  

Руководствуясь ст. ст., 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Принять уточнение исковых требований.  

Иск считать заявленным о взыскании 54 474 307,51 руб. основного долга по договорам  

подряда № 3281024/0210Д от 04.03.2024, № 3281024/1208Д от 14.10.2024, № 3281023/1558Д от  

04.12.2023, процентов в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ в  

размере 4 938 838,31 руб., с последующим начислением, начиная с 16.09.2025 г., исходя из  

ключевой ставки Банка России, за каждый день просрочки по день фактической оплаты. 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий  

завод» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй- Альянс» (ИНН: 

<

***>) основного долга по договорам подряда № 3281024/0210Д от 04.03.2024, № 3281024/1208Д от 14.10.2024, № 3281023/1558Д от 04.12.2023 в размере 54 474 307,51 руб., проценты в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ в размере 4 938 838,31 руб., с последующим начислением, начиная с 16.09.2025 г., исходя из ключевой ставки Банка России, за каждый день просрочки по день фактической уплаты, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 503 764 руб.  

Взыскать с акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 266 952 руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / О.В. Венчакова