ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017 http://1aas.arbitr.ru, тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Владимир «27» декабря 2022 года Дело № А79-6908/2022 

Резолютивная часть постановления объявлена 22.12.2022.  Полный текст постановления изготовлен 27.12.2022.  

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Назаровой Н.А.,  

судей Новиковой Л.П., Тарасовой Т.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества  с ограниченной ответственностью «Компания «Снег» на решение  Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 19.10.2022 по делу   № А79-6908/2022 по иску общества с ограниченной ответственностью «МВГ- плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Компания «Снег» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании 3 186 115 руб. 70 коп.,  

в отсутствие полномочных представителей участвующих в деле лиц,  извещенных надлежащем образом о времени и месте рассмотрения  апелляционной жалобы,  

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью «МВГ-плюс» (далее – ООО  «МВГ-плюс», истец, подрядчик, цедент) обратилось в Арбитражный суд  Чувашской Республики - Чувашии с иском к обществу с ограниченной  ответственностью «Компания «Снег» (далее – ООО «Компания «Снег»,  ответчик, заказчик) о взыскании 12 581 459 руб. 80 коп. долга (с учетом  уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

Исковые требования основаны на статьях 309, 310, 702, 711, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы  неисполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом  работ.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен  индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП  ФИО2, цессионарий).  

Решением от 19.10.2022 Арбитражный суд Чувашской Республики -  Чувашии удовлетворил исковые требования в полном объеме.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Компания «Снег»  обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой  просит решение суда первой инстанции отменить и вынести новое решение об  отказе в удовлетворении исковых требований.  

Оспаривая законность судебного акта, заявитель указывает, что  представленный акт сверки не может служить самостоятельным  доказательством наличия задолженности, поскольку он не отвечает признакам  сделки согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации; в  материалах дела отсутствуют акты о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на  сумму 12 581 459 руб. 80 коп., в связи с чем не представляется возможным  подтвердить выполнение работ и их стоимость, подлежащую оплате.  

Лица, участвующие в деле, явку полномочных представителей в  судебное заседание не обеспечили.  

ООО «МВГ-плюс» представило отзыв, в котором возразило против  доводов апелляционной жалобы.  

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд рассматривает жалобу в отсутствие  представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о  времени и месте судебного разбирательства, по имеющимся материалам дела.  

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены  Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела, 11.01.2018 между ООО «Компания  «Снег» (заказчик) и ООО «МВГ-плюс» (подрядчик) заключен договор  подряда № 014/18-СТР, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик  обязуется выполнить своими силами, средствами и с использованием  собственных материалов электромонтажные работы и работы по устройству  слаботочных систем в секциях В и Г в полном соответствии с выданным  проектом и перечнем работ, на объекте заказчика: 12-16 эт. жилой дом поз. 24  со встроенно-пристроенными помещениями в 1 мкр. Западного жилого района  

<

...> этап строительства и сдать результат выполненных работ  заказчику, который обязуется принять от подрядчика результат выполненных  надлежащим образом работ и оплатить его согласно условиям договора  (пункт 1.1 договора).  

Согласно пункту 2.1 договора ориентировочная общая стоимость работ  с материалами устанавливается в размере 8 957 364 руб. 97 коп., сумма  указана без НДС, в связи с применением подрядчиком упрощенной системы  

налогообложения, согласно сводному сметному расчету, являющемуся  неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1). Окончательная  цена договора определяется на основании фактически выполненного объема  работ.  

Пунктом 2.2 договора установлено, что приемка работ осуществляется  по фактическому выполнению объемов работ. Выполненные работы и  затраченные материалы подтверждаются подписанными сторонами актами  выполненных работ (формы КС-2, КС-3) .  

В соответствии с пунктом 3.2 договора заказчик производит оплату  стоимости работ, указанной в пункте 2.1 договора, денежными средствами  безналичным путем, путем зачета взаимных требований или иными не  запрещенными законодательством Российской Федерации способами.  

Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта (актов) о  приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат формы КС-3.  

Оплата стоимости работ производится заказчиком до 31.12.2021 при  условии подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (по  форме № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме   № КС -3).  

В разделе 4 договора установлены сроки выполнения работ. 

11.01.2018 дополнительным соглашением № 1 к договору стороны  установили, что во исполнение договора подряда от 11.01.2018 № 014/18-СТР  за подрядчиком резервируются нижеследующие помещения в строящемся  многоквартирном жилом доме 12-16 эт. поз.24, со встроенными жилыми  помещениями в 1мкр. Западного жилого района, г. Новочебоксарск,  Чувашской Республики: нежилое помещение № 46, находящееся по адресу: 

<

...>, общая площадь: 152,5 кв.м,  стоимостью 4 880 000 руб.; нежилое помещение № 11, находящееся по адресу:  

<

...>, общая площадь: 31,3 кв.м,  стоимостью 963 194 руб. 90 коп.; нежилое помещение № 17, находящееся по  адресу: 

<

...>, общая площадь: 31,1 кв.м,  стоимостью 957 009 руб. 20 коп. (л.д.31).  

Между ООО «Компания «Снег» (заказчик) и ООО «МВГ-плюс»  (подрядчик) 01.02.2018 заключен договор подряда № 019/18-СТР, по  условиям которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить  своими силами, средствами и с использованием собственных материалов  работы по устройству ливневой канализации в секциях В и Г в полном  соответствии с выданным проектом и перечнем работ на объекте заказчика: 12  -16 эт. жилой дом поз. 24 со встроенно-пристроенными помещениями в 1 мкр.  Западного жилого района 

<

...> этап строительства и сдать  результат выполненных работ заказчику, заказчик обязуется принять от  подрядчика результат выполненных надлежащим образом работ и оплатить  его согласно условиям договора (пункт 1.1 договора).  

Ориентировочная общая стоимость работ с материалами  устанавливается в размере 42 852 руб. 29 коп., сумма указана без НДС, в связи  с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения,  согласно сводному сметному расчету, являющемуся неотъемлемой частью  настоящего договора (приложение № 1). Окончательная цена договора  определяется на основании фактически выполненного объема работ (пункт 2.1  договора).  

Согласно пункту 3.2 договора заказчик производит оплату стоимости  работ, указанной в пункте 2.1 договора, денежными средствами безналичным  путем, путем зачета взаимных требований или иными не запрещенными  законодательством Российской Федерации способами.  

Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта (актов) о  приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат формы КС-3.  

Оплата стоимости работ производится заказчиком до 31.12.2021, при  условии подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (по  форме № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме   № КС-3).  

Разделом 4 договора установлены сроки выполнения работ: начало  работ - в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора; окончание  работ в полном объеме - не позднее 30.11.2020, со сроком устранения  недоделок до 31.12.2020.  

03.09.2018 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен  договор подряда № 360а/18-СТР, по условиям которого заказчик поручает, а  подрядчик обязуется выполнить своими силами, средствами и с  использованием собственных материалов внутренних работ по устройству  отопления, канализации, водоснабжения, водопровода в секциях В и Г в  полном соответствии с выданным проектом и перечнем работ на объекте  заказчика: 14-16 эт. жилой дом поз. 24 со встроенно-пристроенными  помещениями в 1 мкр. Западного жилого района 

<

...> этап  строительства, и сдать результат выполненных работ заказчику, заказчик  обязуется принять от подрядчика результат выполненных надлежащим  образом работ и оплатить его согласно условиям договора (пункт 1.1  договора).  

В соответствии с пунктом 2.1 договора ориентировочная общая  стоимость работ с материалами устанавливается в размере 6 381 086 руб. 89  коп., сумма указана без НДС, в связи с применением подрядчиком  упрощенной системы налогообложения, согласно сводному сметному расчету,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).  Окончательная цена договора определяется на основании фактически  выполненного объема работ.  

Согласно пункту 2 договора приемка работ осуществляется по  фактическому выполнению объемов работ. Выполненные работы и  

затраченные материалы подтверждаются подписанными сторонами актами  выполненных работ (формы КС-2, КС-3).  

Пунктом 3.2 договора установлено, что заказчик производит оплату  стоимости работ, указанной в пункте 2.1 договора, денежными средствами  безналичным путем, путем зачета взаимных требований или иными не  запрещенными законодательством Российской Федерации способами.  

Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта (актов) о  приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат формы КС-3.  

Оплата стоимости работ производится заказчиком до 31.12.2021, при  условии подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (по  форме № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме   № КС -3).  

В разделе 4 договора установлены сроки выполнения работ: начало  работ - в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора; окончание  работ в полном объеме - не позднее 30.11.2020, со сроком устранения  недоделок до 31.12.2020.  

Дополнительным соглашением от 03.09.2018 № 1 к договору стороны  установили, что во исполнение договора подряда от 03.08.2018 № 360а/18- СТР за подрядчиком резервируется помещение в строящемся  многоквартирном жилом доме 12-16 эт. поз.24 со встроенными жилыми  помещениями в 1 мкр. Западного жилого района, г. Новочебоксарск,  Чувашской Республики: квартира № 273 по адресу: 

<

...>, общая площадь: 67,58 кв.м, стоимостью 2 598 040 руб., в  том числе стоимость газового котла (30 000 руб.) (л.д.47).  

Стороны без замечаний и возражений подписали акты о приемке  выполненных работ по форме КС-2 от 31.10.2020 № 16, № 17, № 18, № 19, №  20, № 21, № 22 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 от 31.10.2020 № 1 на сумму 8 957 364 руб. 97 коп. по договору от  11.01.2018 № 014/18-СТР; справку о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 от 31.10.2020 № 1 на сумму 42 852 руб. 29 коп. по договору  01.02.2018 № 019/18-СТР; акты о приемке выполненных работ по форме КС-2  от 31.10.2020 № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 12, № 13, № 15 и справку  о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.10.2020 № 1 на  сумму 6 381 086 руб. 89 коп. по договору от 03.09.2018 № 360а/18-СТР  (л.д.15-30, 35-46, 51).  

Заказчик выполненные работы оплатил частично, подтвердив в акте  сверки взаимных расчетов наличие задолженности перед подрядчиком в  сумме 13 776 972 руб. 47 коп. (л.д.56).  

В досудебной претензии от 05.04.2022 ООО «МВГ-плюс» просило  ответчика погасить образовавшуюся задолженность не позднее 5 рабочих  дней с момента получения претензии (л.д.57-58).  

Претензия истца осталась без ответа и удовлетворения. 

02.06.2022 между ООО «МВГ-плюс» (цедент) и ИП ФИО2  (цессионарий) заключен договор уступки прав требования (цессии), по  условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает и оплачивает  на условиях договора принадлежащие цеденту права требования к ООО  «Компания «Снег» денежной суммы в размере 1 195 512 руб. 67 коп. (л.д.52- 53).  

Истец письмом от 02.06.202 уведомил ответчика об уступке прав  требования (л.д.54).  

Ссылаясь на наличие у ответчика задолженности за выполненные  работы в сумме 12 581 459 руб. 80 коп. с учетом частичной оплаты и  уступленного права требования долга, истец обратился в суд с иском.  

Суд первой инстанции, установив выполнение истцом работ и  ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по их оплате,  удовлетворил исковые требования, руководствуясь статьями 195, 196, 200,  309, 310, 711, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Повторно рассмотрев в открытом судебном заседании дело, проверив  доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не нашел оснований для  отмены судебного акта.  

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в  установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик  обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

В соответствии со статьей 746 Гражданского кодекса Российской  Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком  в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые  установлены законом или договором строительного подряда.  

На основании пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской  Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком  оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Факт выполнения истцом работ подтверждается актами выполненных  работ формы КС-2, подписанными подрядчиком, спора по объему и качеству  выполненных работ между сторонами не заявлено.  

Поскольку вопреки статье 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации ответчик доказательств оплаты суммы долга не  представил, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые  требования о взыскании задолженности в размере 12 581 459 руб. 80 коп.  

Апелляционная инстанция считает решение суда законным и  обоснованным и не находит оснований для его отмены.  

Выводы суда являются верными, сделаны на основании анализа  фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, установленных  судом при полном, всестороннем и объективном исследовании имеющихся в  деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле  лиц, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам права.  

Доводы апелляционной жалобы рассмотрены судом второй инстанции и  признаны несостоятельными.  

Вопреки утверждению заявителя, в материалы дела представлены акты  приемки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и  затрат, подписанные сторонами без замечаний и возражений.  

Ответчик документально наличие предъявленной ко взысканию  задолженности не опроверг, доказательств её погашения не представил.  

С учетом изложенного апелляционная жалоба ООО «Компания «Снег»  удовлетворению не подлежит.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4  статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела  апелляционным судом не установлено.  

Руководствуясь статьями 176, 258, 268-271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от  19.10.2022 по делу № А79-6908/2022 оставить без изменения, апелляционную  жалобу общества с ограниченной ответственностью «Компания «Снег» – без  удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.  

Председательствующий судья Н.А. Назарова  

Судьи Л.П. Новикова  

Т.И. Тарасова