АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А13-12641/2020

город Вологда

31 мая 2021 года

Резолютивная часть решения вынесена 24 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 31 мая 2021 года.

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Гуляевой Ю.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Вашкинский леспромхоз» к обществу с ограниченной ответственностью «Аквалайт» о взыскании 574 000 руб.,

при участии от истца – ФИО2 по доверенности от 01.02.2020,   от ответчика – ФИО3 по доверенности от 20.09.2020, 

у с т а н о в и л:

акционерное общество «Вашкинский леспромхоз» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Аквалайт» (

<

...> – ФИО4, д. 165, оф. 604А, ОГРН 

<

***>, далее – ответчик) о взыскании 574 000 руб.

В обоснование заявленных требований истец указывает на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств и статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Определением суда от 03.11.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением суда от 11.01.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового судопроизводства.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика исковые требования не признал по доводам, изложенным в иске и дополнительных пояснениях к нему.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, оценив собранные по делу доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению ввиду следующего.

  Как следует из материалов дела, 05.06.2020 между истцом и ответчиком был заключен договор на выполнение работ по подъему судна на берег № 1 (Договор).

  В соответствии с пунктом 1.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.06.2020) подрядчик обязался по заданию Заказчика:

  1.1.1 выполнить дефектацию корпуса, замер остаточных толщин конструкций корпуса, замер остаточных толщин всех приварных патрубков донно – бортовой арматуры, кингетонной трубы с составлением акта замера. Количество проверяемых точек – 1000,

  1.1.2 произвести шеф – надзор по подъему судна: пр. Д9050, «ПК-216», регистровый № 145421 с применением резинотканевых ролик – мешков с последующим перемещением его на место постановки на опорные клети (кильблоки) и спуск на воду, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его.

  Согласно пункту 2.2 Договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.06.2020) платеж в сумме 574 000 руб. оплачивается Заказчиком не позднее трех рабочих дней да начала работ.

  В соответствии с пунктом 1.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 08.07.2020) начало выполнения работ – 30 неделя 2020 года.

  Истец указывает на то, что обязательства по договору ответчиком не были исполнены в полном объеме.

  20.08.2020 истец направил в адрес ответчика письмо № 513 о расторжении Договора, в котором потребовал подписать соглашение о расторжении Договора и вернуть сумму уплаченного аванса.

  Поскольку ответчик требование истца в досудебном порядке не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

  В соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

   Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

          В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

  Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

  Статьями 711 и 746 ГК РФ предусмотрено, что основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке.

   В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

   Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при их отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

   Согласно пункту 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

   В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором. Согласно пункту 3 названной статьи в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

  Специальные основания и правила расторжения договора подряда установлены в статьях 715 и 717 ГК РФ.

  С момента реализации права требования на возврат суммы предварительной оплаты сторона, заявившая данное требование, считается утратившей интерес к дальнейшему исполнению условий договора, а договор - прекратившим свое действие.

  Исходя из содержания письма от 20.08.2020 № 513, требование о возврате предварительной оплаты по рассматриваемому договору является следствием его расторжения, учитывая право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора, предусмотренное законом.

  Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ и статьи 711 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

  Доказательства выполнения работ по договору подряда на полученную сумму оплаты ответчик не представил.

         С учетом отсутствия доказательств выполнения работ денежные средства в сумме  574 000 руб. являются неосновательным обогащением ответчика.

  Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылается на ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору в части подготовки земляного якоря. 

   В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

  Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

  На основании пункта 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

  На основании пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в том числе непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

   В силу абзаца второго пункта 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, если обнаружит непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

   В силу части 2 статьи 716 ГК РФ подрядчик, не предупредивший заказчика о таком обстоятельстве или продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

          При рассмотрении настоящего спора установлен факт нарушения ответчиком обязательств по Договору, при этом доказательства, подтверждающие вину Заказчика, в материалах дела отсутствуют. О приостановлении работ ответчик не заявлял, о невозможности их проведения Заказчика не уведомлял. Доказательства того, что Подрядчиком были предприняты все зависящие от него меры при выполнении работ, однако, по независящим от него обстоятельствам, работы не удалось завершить, в материалы дела не представлены.

          Обе стороны в судебном заседании подтвердили, что состоялось две попытки подъема судна, которые не увенчались успехом. При этом именно ответчик, как лицо, обладающее специальными познаниями и осуществляющее технический надзор за ходом работ, ответственен за достижение их надлежащего результата.

          В соответствии с пунктом 6.1 Договора результат работ должен быть пригодным для последующего осуществления Заказчиком (третьим лицом) судоремонтных работ вышеуказанного судна, пригодностью считается исполнение всех условий Технического задания.

           Доказательства того, что такой результат достигнут, в материалах дела отсутствует, работы к приемке не предъявлялись, на настоящий момент правоотношения между сторонами прекращены.

   В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное сбережение).

   В силу статьи 1103 ГК РФ правила о неосновательном обогащении применяются также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством, если иное не установлено Кодексом, другими законами и правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений.

           Факт перечисления ответчику взыскиваемых денежных средств материалами дела подтвержден. Доказательств наличия встречного предоставления со стороны ответчика на указанную сумму, равно как и доказательств возврата полученных денежных средств, в материалах дела не имеется, каких-либо ходатайств ответчик не заявил.

           Представленная ответчиком калькуляция понесенных при выполнении работ расходов и убытков не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований при изложенных выше обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие доказательств вины Заказчика в неисполнении спорных работ, а также отсутствие заявления ответчика о зачете. При этом истец не лишен права реализовать свое право на взыскание убытков (если таковые имелись по вине Заказчика) в ином порядке.

          На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу статьи 110 АПК РФ в связи с удовлетворением иска расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аквалайт» в пользу акционерного общества «Вашкинский леспромхоз» денежные средства в размере 574 000 руб., а также 14 480 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

          Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судья                                             Ю.В. Гуляева