Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-134422/2019

26 сентября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  08 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  26 сентября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи  Сергеевой О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ДОАР" (адрес:  Россия 188512, г.  Санкт-Петербург,  г.  Ломоносов, ул. Победы д. 20, корп. 2, ОГРН:  1027808914847);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АСД-ГРУПП" (адрес:  Россия 194223, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ТОРЕЗА 33/ЛИТ. А/ПОМ. 12-Н, ОГРН:  1127847538675); 

третье лицо: 

о взыскании 3 211 703 руб. 61 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 01.12.2018

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 10.12.2018

установил:

ООО "ДОАР" предъявил иск в суд и после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ООО "АСД-ГРУПП" 2 732 967 руб. 12 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 478 736 руб. 49 коп. пеней за просрочку платежа на основании договора №СП050718Тк1-6 от 16.07.18, а также 30 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

Ответчик просит уменьшить неустойку и расходы на представителя.

Судом установлено:

Между ООО «ДОАР» (Подрядчик) и ООО «АСД-Групп» (Заказчик) был заключен рамочный договор строительного подряда №СП050718Тк1-6 от 16 июля 2018 г., дополнительное соглашение № 1 (1 этап работ) от 16.07.2018 к данному договору, согласно которому ООО «ДОАР» принимало на себя обязательства произвести по заданию заказчика работы по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. 28-Г.

Согласно п. 3.1.1 договора заказчик производит оплату работ по договору в течение пяти банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

В рамках выполнения работ сторонами были согласованы и подписаны акты  формы КС-2 и КС-3 от 12.10.2018 года о выполнении работ в период с 16.07.2018 по 12.10.2018 на общую сумму 3 832 967 руб. 12 коп. На счет Подрядчика 25.09.2018 поступил аванс в размере 1 000 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18%. В счет оплаты выполненных работ на счет подрядчика 01.03.2019 поступила сумма 100 000 рублей 00 коп. В настоящее время задолженность составляет 2 832 967 руб. 12 коп.

В соответствии с п. 5.3 договора ответчику начислены пени за просрочку в размере 0,1% за каждый день просрочки с 22.10.18 по 08.04.19 в сумме 478 736 руб. 49 коп. 

Ответчик контррасчет неустойки не представил.

С учетом размера основного долга и длительной просрочки оплаты, оснований для уменьшения неустойки не усматривается.

Расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб. 00 коп. обоснованы представленными документами. С учетом трех судебных заседаний, заявленные расходы не являются чрезмерными и уменьшению не подлежат.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по оплате государственной пошлины на ответчика. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АСД-ГРУПП" в пользу общество с ограниченной ответственностью "ДОАР" 3 211 703 руб. 61 коп., из них: 2 732 967 руб. 12 коп. основного долга и 478 736 руб. 49 коп. пеней, а также 30 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя и 39 059 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.