ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 158397/23-67-1310

г. Москва

17 октября 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 04 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 17 октября 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК-ЦЕНТР" (173020, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ГОРОД, ЛЁНИ ГОЛИКОВА УЛИЦА, 7, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2013, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕКО-ГРУПП" (141506, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСК ГОРОД, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА, СТРОЕНИЕ 8, ОФИС 128, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.11.2015, ИНН: 

<

***>) о взыскании 5 300 758,01 руб.

при участии:

от истца: ФИО2, дов. от 12.05.2023г.

от ответчика: ФИО3, дов. от 24.07.2023г.

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК-ЦЕНТР" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕКО-ГРУПП" (далее – ответчик) о взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ неотработанного аванса по договору от 11.01.2023 № 2124187377122554164000000/Д-23НЦ-1 в размере 1 000 000 руб. 00 коп., неустойки за период с 01.04.2023 по 13.04.2023 в размере 300 758 руб. 01 коп., неотработанного аванса по договору от 25.02.2021 №Д-21НЦ-8 в размере 2 000 000 руб. 00 коп., неустойки за период с 11.04.2021 по 31.03.2022 в размере 2 000 000 руб. 00 коп.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, письменный отзыв не представил.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, ООО «Новек-Центр» (Подрядчик, Истец) и ООО «СВЕКО-ГРУПП» (Субподрядчик, Ответчик) 11.01.2023 заключили договор № 2124187377122554164000000/Д-23НЦ-1 (далее- Договор 1).

Пунктом 1.1 Договора предусмотрено, что Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы (далее - «Работы»), предусмотренные Расчетом цены договора по видам работ (Приложение № 1 к Договору) на объекте строительства: «На корректировку проектно-сметной документации и выполнение смр 1-го и 2-го этапов по объекту: «Гарнизонный госпиталь с оснащением медицинским оборудованием, г. Мирный Архангельской области» (шифр объекта 500/СГ, 500/СГ-2). Инфекционный корпус на 40 коек, ГП5» - далее «Объект», а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Цену.

Пунктом  1.2 Договора  предусмотрено, что Субподрядчик  выполняет работы  в соответствии с условиями Договора собственными силами и средствами.

Согласно п.2.1 Договора цена Договора составляет 4 627 046 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сорок шесть) руб. 25 коп, и включает в себя НДС.

Во исполнение условий договора Подрядчик перечислил в адрес Субподрядчика авансовые платежи в размере 1 ООО 000,00 руб. (п\п №110 от 19.01.2023)

В соответствии с п. 4.1 Договора стороны согласовали следующие сроки выполнения Работ:

начало Работ - с даты заключения Договора окончание Работ - не позднее 31.03.2023

Работы, предусмотренные Договором, не выполнены и Подрядчику для приемки не переданы, что является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке и уплаты Субподрядчиком Подрядчику неустойки.

Согласно п. 15.4 Договора, Подрядчик в одностороннем внесудебном порядке имеет право в порядке ст. 715 ГК РФ отказаться от исполнения Договора, направив Субподрядчику соответствующее уведомление, в случае существенного нарушения Субподрядчиком условий Договора. Существенным условием, в том числе является отставание от сроков, установленных Договором на срок более чем 5 (пять) рабочих дней, а также задержка устранения выявленных недостатков более чем на 5 (пять) рабочих дней.

В связи с существенным нарушением сроков выполнения работ Истцом направлено Уведомлениеободностороннемрасторжениидоговораза

исх. №МСК-107 от 13.04.2023 (далее - Уведомление). Факт направления данного уведомления подтверждается копией описи вложения в ценное письмо, а также копией почтовой квитанции от 14.04.2023 с номером почтового идентификатора 14100183002501. Уведомление получено 28.04.2023, соответственно Договор расторгнут с 28.04.2023.

ООО «Новек-Центр» (Подрядчик) и ООО «СВЕКО-ГРУПП» (Субподрядчик) 25.02.2021 заключили договор №Д-21НЦ-8 (далее- Договор 2).

Пунктом 1.1 Договора предусмотрено, что Субподрядчик обязуется в установленный Договором    срок    выполнить    строительно-монтажные    и    пусконаладочные    Работы, предусмотренные Расчетом цены договора по видам работ (Приложение №1 к Договору) на объекте: «На завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство (реконструкция) сооружений унифицированного технического комплекса второй очереди КРК «Ангара» (шифр объекта 500/645-УНТК-142/2) - далее «Объект», а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Цену.

Пунктом  1.2 Договора  предусмотрено,  что Субподрядчик  выполняет работы  в соответствии с условиями Договора собственными силами и средствами.

Согласно п.2.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения №1 от 04.03.2021) цена Договора составляет 2 000 000,00 руб., в т.ч. НДС (20%) - 333 333,33 руб.

Во исполнение условий договора Подрядчик перечислил в адрес Субподрядчика авансовые платежи в размере 2 000 000,00 руб. (п\п №1155 от 09.03.2021)

В соответствии с п. 4.1 Договора стороны согласовали следующие сроки выполнения Работ:

начало Работ - с даты заключения Договора окончание Работ - не позднее 10.04.2021

Работы, предусмотренные Договором, не выполнены и Подрядчику для приемки не переданы, что является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке и уплаты Субподрядчиком Подрядчику неустойки.

Согласно п. 15.4 Договора, Подрядчик в одностороннем внесудебном порядке имеет право в порядке ст. 715 ГК РФ отказаться от исполнения Договора, направив Субподрядчику соответствующее уведомление, в случае существенного нарушения Субподрядчиком условий Договора. Существенным условием, в том числе является отставание от сроков, установленных Договором на срок более чем 20 (двадцать) рабочих дней, а также задержка устранения выявленных недостатков более чем на 10 (десять) рабочих дней.

В связи с существенным нарушением сроков выполнения работ Истцом направлено Уведомление об одностороннем расторжении договора за исх. №МСК-137 от 30.08.2022 (далее - Уведомление). Факт направления данного уведомления подтверждается копией описи вложения в ценное письмо, а также копией почтовой квитанции от 30.08.2022 с номером почтового идентификатора 14100171023839. Уведомление получено 13.09.2022, соответственно Договор расторгнут с 13.09.2023.

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами строительного подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств, установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании неотработанного аванса по договору от 11.01.2023 № 2124187377122554164000000/Д-23НЦ-1 в размере 1 000 000 руб. 00 коп., неотработанного аванса по договору от 25.02.2021 №Д-21НЦ-8 в размере 2 000 000 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки по договору от 11.01.2023 № 2124187377122554164000000/Д-23НЦ-1 за период с 01.04.2023 по 13.04.2023 в размере 300 758 руб. 01 коп., неустойки по договору от 25.02.2021 №Д-21НЦ-8 за период с 11.04.2021 по 31.03.2022 в размере 2 000 000 руб. 00 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

В соответствии с 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения Работ (п. 12.2 Договора).

По состоянию с 01.04.2023 по 13.04.2023 неустойка за нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ по договору от 11.01.2023 № 2124187377122554164000000/Д-23НЦ-1 составляет 300 758,01 руб.

По состоянию с 11.04.2021 по 31.03.2022 неустойка за нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ по договору составляет 3 550 000 руб.

Вместе с тем, Истец по Договору от 25.02.2021 №Д-21НЦ-8 снизил размер неустойки в добровольно порядке до 2 000 000,00 руб.

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании неустойки по договору от 11.01.2023 № 2124187377122554164000000/Д-23НЦ-1 за период с 01.04.2023 по 13.04.2023 в размере 300 758 руб. 01 коп., неустойки по договору от 25.02.2021 №Д-21НЦ-8 за период с 11.04.2021 по 31.03.2022 в размере 2 000 000 руб. 00 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕКО-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК-ЦЕНТР" (ИНН: 

<

***>) сумму неотработанного аванса по договору от 11.01.2023 № 2124187377122554164000000/Д-23НЦ-1 в размере 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп., неустойку за период с 01.04.2023 по 13.04.2023 в размере 300 758 (триста тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 01 коп., сумму неотработанного аванса по договору от 25.02.2021 №Д-21НЦ-8 в размере 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп., неустойку за период с 11.04.2021 по 31.03.2022 в размере 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 49 504 (сорок девять тысяч пятьсот четыре) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев