Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-126058/2023

25 октября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2024 года. Полный текст решения изготовлен 25 октября 2024 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Сухаревской Т.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сусловой В.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Санкт-петербургского государственного  казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства» к обществу с ограниченной  ответственностью «Инжстрой»  

о взыскании при участии - от истца: ФИО1 по доверенности от 22.01.2024, 

установил:

Санкт-петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного  строительства» (далее – Учреждение, Дирекция) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Инжстрой» (далее – Общество, ООО «ИнжСтрой») о взыскании неустойки.  

Определением суда от 26.12.2023 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного  производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на  заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в  обоснование своих доводов.  

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о  том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства,  предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ.  

В связи с болезнью судьи Косенко Т.А. дело передано в производство судьи Сухаревской  Т.С.  

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал требования,  представил дополнительные доказательства (акты сдачи-приемки), подтверждающие доводы о  нарушении сроков.  

Представитель ответчика, извещенный судом по адресу, указанному в выписке из  ЕГРЮЛ, в судебное заседание не явился, что в силу статьи 156 АПК РФ не является  препятствием для рассмотрения дела в настоящем судебном заседании.  

Арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и  поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило возражений относительно продолжения  рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, с учетом  обстоятельств дела, суд, завершив предварительное судебное заседание в порядке статей 136- 

137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ),  рассмотрел исковое заявление по существу.  

Исследовав материалы дела, арбитражным судом установлены следующие  обстоятельства.  

Между Дирекцией (Заказчик) и ООО «ИнжСтрой» (Подрядчик) заключен  государственный контракт Санкт-Петербурга от 29.09.2020 № РП-77 (далее - Контракт),  предметом которого является выполнение инженерных изысканий, разработать и сдать  Заказчику проектную документацию на капитальный ремонт объекта «ФИО2 ул.» для нужд  Санкт-Петербурга (далее - Объект).  

В соответствии с пунктом 1.1. Контракта, Заказчик поручает, обязуется принять и  оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить инженерные изыскания,  разработать и сдать Заказчику проектную документацию на капитальный ремонт объекта  «ФИО2 ул.» для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с заданием на выполнение  инженерных изысканий, разработку проектной документации на капитальный ремонт Объекта  (далее - Задание) (приложение № 1), Календарным планом работ, предоставленным в  соответствии с формой, указанной в приложении № 2 к Контракту, строительными нормами и  правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и  проектирования.  

В силу пункта 5.1.1 Контракта, Подрядчик обязан разработать и сдать Заказчику в полном  объеме и в сроки, установленные Календарным планом работ, документацию в соответствии с  Заданием, строительными нормами и правилами, техническими условиями, определенными  заинтересованными организациями, другими нормативными документами, действующими в  сфере строительства, и настоящим Контрактом.  

В обоснование иска указано, что подрядчиком допущена просрочка исполнения  обязательств, а именно нарушены сроки предоставления документации, установленные  Календарным планом работ (приложение к дополнительному соглашению от 09.11.2021 № 4- РП-51) по следующим этапам:  

- этап № 7 «Наружное освещение. Согласования» - 30.09.2021; - этап № 15 «Сметная документация» - 12.04.2022; 

- этап № 16 «Получение положительного заключения, предоставление  откорректированной по замечаниям государственной экспертизы документации» - 16.07.2022.  

Документация по этапу № 7 в адрес Дирекции поступила 10.12.2021 с нарушением срока  по состоянию на 13.07.2023 в 71 день.  

Документация по этапу № 15 в адрес Дирекции поступила 24.08.2022 с нарушением  срока по состоянию на 13.07.2023 в 134 дня.  

Документация по этапу № 16 в адрес Дирекции не поступала. 

Таким образом, учитывая также дополнительное соглашение от 09.11.2021 № 4-РП-51 к  государственному контракту Санкт-Петербурга от 29.09.2020 № РП-77, Ответчик нарушил срок  предоставления документации, установленный Календарным планом работ.  

Истцом в адрес Ответчика направлена досудебная претензия с требованием в  добровольном порядке перечислить пени, полученная ответчиком и оставленная без внимания и  удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

Отзыв на иск не представлен. 

Рассмотрев требования, исследовав доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.  

В силу пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в  течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день  или соответственно в любой момент в пределах такого периода.  

В соответствии с частью 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, по  государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный  контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со  строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера  работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить  их оплату.  

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК  РФ), по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть  предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы.  

Частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд» установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального  банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом  (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных  поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством  Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

По смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или  договором.  

Согласно пункту 7.1 Контракта, Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за  свою деятельность по Контракту, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств, предусмотренных Контрактом.  

В соответствии с пунктом 7.3 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,  Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Согласно пункту 7.3.1 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  

Статьями 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства  представляются лицами, участвующими в деле. Арбитражный суд оценивает относимость,  допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и  взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).  

Факт нарушения ответчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подтвержден  документально и ответчиком в порядке статьи 65, 131 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации не оспорен.  

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или  возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или  несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

На основании изложенного, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Поскольку истец освобожден от уплаты госпошлины, сумма соответствующих расходов  подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжстрой» в пользу Санкт-петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного  строительства» 125 041,95 руб. неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжстрой» в доход федерального  бюджета 4 751 руб. госпошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Сухаревская Т.С.