АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

тел. (384-2) 45-10-16

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-23734/2021

город Кемерово

9 августа 2022 года.

Резолютивная часть решения объявлена 3 августа 2022 года.                                                                   

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Душинского А.В.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1, посредством проведения онлайн заседания с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел»,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ТФМ-Спецтехника», Кемеровская Область - Кузбасс, город Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 9 165 883 руб. 14 коп. (с учетом уточнения),

и по встречному иску ООО «ТФМ-Спецтехника» к ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» о взыскании 9 219 491 руб. 64 коп. (с учетом уточнения)

при участии представителя истца по первоначальному и ответчика по встречному искам  – ФИО2 по доверенности от 03.09.2021; представителя ответчика по первоначальному и истца по встречному искам – ФИО3 по доверенности от 01.01.2022,

у с т а н о в и л:

в арбитражный суд поступило исковое заявление (уточненное 28.06.2022 в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ) общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») к обществу с ограниченной ответственностью «ТФМ-Спецтехника» (ООО «ТФМ-Спецтехника») о взыскании 9 165 883,14 руб. неустойки за невыполнение объема работ, из которых:

- 837 153,16 руб. неустойки за период с марта по май 2020 года по договору подряда № 1104ЮК/18 от 20.07.2018, 

- 8 328 729,98 руб. неустойки за период с мая по октябрь 2020 года по договору подряда № 1110ЮК/19 от 26.07.2019.

От ООО «ТФМ-Спецтехника» поступило встречное исковое заявление (уточненное 25.07.2022 в порядке ст. ч. 1 ст. 49 АПК РФ) о взыскании с ПАО «Южный Кузбасс» 9 219 491,64 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2018 по 30.10.2021 за нарушение сроков оплаты по договору подряда № 1104ЮК/18 от 20.07.2018.

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось в связи с возражениями сторон на предъявленные друг к другу требования, в виду несогласия с расчетами сумм заявленных требований и для представления сторонами дополнительных пояснений, сверки расчетов и уточнения заявленных требований.

В настоящем судебном заседании стороны уточненные в последней редакции исковые требования противоположной стороны не оспорили, на заявленных требованиях настаивали. 

Согласно статьям 2, 8, 9, 64 части 1, 65 части 2, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

Исследовав представленные в материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

20.07.2018 между ПАО «Южный Кузбасс» (Заказчик) и ООО «ТМФ-Спецтехника» (Подрядчик) заключен договор подряда № 1104 ЮК/18 на выполнение комплекса горных работ (в редакции протокола разногласий от 20.07.2018 и протокола согласования разногласий от 26.07.2018), по условиям которого, Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить горно-выемочные работы по добыче каменного угля открытым способом в объемах, указанных в нарядах-заданиях Заказчика. Горно-выемочные работы включают в себя: подготовку вскрышных пород (бурение, взрывание), экскавацию вскрышных пород, навалов и угля, перевозку грузов карьерными самосвалами, отвалообразование, содержание автодорог на отведенном участке в пригодном для эксплуатации состоянии, электроснабжение участка согласно акту осуществления технологического присоединения (п. 1.1. договора).

Пунктами 2.6.1. и 2.6.2. Договора установлена обязанность Подрядчика выполнять работы на основании месячного наряда-задания надлежащим образом и в установленные сроки.

При невыполнении объема работ, предусмотренного нарядом-заданием в течение трех месяцев подряд, в пункте 5.11. договора стороны согласовали, ответственность Подрядчика в виде уплаты Заказчику неустойки в размере 10 % от стоимости всего невыполненного за указанный период объема работ.

По расчетам истца, за период с марта по май 2020 года ответчиком не выполнен объем работ по добыче на сумму 8 371 531,60 руб. В связи с чем, истцом в адрес ответчика была направлена претензия № ЮК/1970 от 14.07.2020 с требованием платы неустойки. 

Неудовлетворение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для подачи настоящего иска.

26.07.2019 между ПАО «Южный Кузбасс» (Заказчик) и ООО «ТМФ Спецтехника» (Подрядчик) заключен договор подряда № 1110 ЮК/19 на выполнение видов горных работ, по условиям которого Подрядчик обязался в соответствии с заявками Заказчика выполнять виды горных работ, указанные в настоящем пункте Договора.

Пунктами 2.6.1. и 2.6.2. Договора установлена обязанность Подрядчика выполнять работы, предусмотренные настоящим договором в установленные сроки, строго соблюдать выполнение объемов работ в соответствии с заявкой, выдерживать запланированные объемы месячного, суточного графика производства.

При невыполнении объема работ по вине Подрядчика, предусмотренного заявкой, полностью или частично (отдельного вида работ), стороны в пункте 5.10. Договора согласовали, что Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости невыполненного объема работ или отдельного вида работ по заявке.

По расчетам истца, за период с мая по октябрь 2020 года ответчиком не выполнен объем работ на сумму 83 287 299,80 руб. В связи с чем, истцом в адрес ответчика была направлена претензия № ЮК/0183 от 20.01.2021 с требованием платы неустойки.

Неудовлетворение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для подачи настоящего иска.

Неустойка, по расчетам истца, составила 9 165 883,14 руб., из которых:

- 837 153,16 руб. неустойки за период с марта по май 2020 года по договору подряда № 1104ЮК/18 от 20.07.2018, 

- 8 328 729,98 руб. неустойки за период с мая по октябрь 2020 года по договору подряда № 1110ЮК/19 от 26.07.2019.

По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из требований статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ответчик факт невыполнения заявленного истцом объем работ по договорам и произведенный истцом расчет неустойки не оспорил, доказательств выполнения спорного объема работ не представил. С учетом изложенного, требования ПАО «Южный Кузбасс» о взыскании с ООО «ТФМ-Спецтехника» 9 165 883,14 руб. неустойки за невыполнение объема работ по договорам подряда № 1104ЮК/18 от 20.07.2018 и № 1110ЮК/19 от 26.07.2019, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение первоначального иска подлежат взысканию с ответчика.

ООО «ТФМ-Спецтехника» заявлен встречный иск о взыскании с ПАО «Южный Кузбасс» 9 219 491,64 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2018 по 30.10.2021 за нарушение сроков оплаты по договору подряда № 1104ЮК/18 от 20.07.2018.

В соответствии с п. 1.2. Договора подряда № 1104ЮК/18 от 20.07.2018 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.08.2018) в случае отсутствия возможности выполнения согласованных Сторонами в техническом задании объемов работ, Заказчик на основании отдельной согласованной с Подрядчиком Заявки, предоставляет Подрядчику объемы работ на выполнение части горно-выемочных работ (подготовка вскрышных пород (бурение, взрывные работы), экскавация вскрышных пород, навалов и угля, перевозка грузов карьерными самосвалами, приемка вскрышных пород, навалов в местах разгрузки, отвод грунтовых, паводковых и дождевых вод из мест погрузки горной массы и мест разгрузки горной массы, поддержание автодорог на отведенном участке в пригодном для эксплуатации состоянии) на иных участках горного отвода разреза «Сибиргинский»: геологических полях «Сибиргинское», «Куреинское» (Западный блок), «Урегольское» (участки «Урегольский-Действующий», «Урегол-Новый». Работы, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат приемке и оплате в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. Стоимость указанных работ рассчитывается в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 настоящего договора. 

Стоимость комплекса работ по добыче угля в соответствии с п.1.1 Договора и техническим заданием определена Сторонами на основании расценок по видам работ в Приложении №7.1 договору подряда № 1104ЮК/18 от 20.07.2018 (п. 4.1. Договора). Все горные Работы, выполненные Подрядчиком в текущем месяце, принимаются Заказчиком ежемесячно на основании Акта выполненных работ, составленного по результатам Акта маркшейдерского замера из расчета на 1 тонну добычи (пп. 4.1.1 Договора). Стоимость по отдельным видам работ в соответствии с п.1.2 настоящего договора оплачивается Заказчиком исходя из расценок по видам работ, установленных в Приложениях № 7.2 и 7.3 Договора (п. 4.2. Договора).

Оплата за выполненные работы производится в течение 60 дней с даты выставления Подрядчиком акта выполненных работ (выставляется ежемесячно) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ и согласованными Сторонами дополнительно (п.п. 4.5., 4.6. Договора).

За несвоевременную оплату за выполненные работы по настоящему договору, в пункте 5.5. Договора стороны согласовали ответственность Заказчика в виде уплаты Подрядчику процентов согласно ст. 395 ГК РФ от суммы просроченной в оплате задолженности за каждый день просрочки.

В период с сентября 2018 года по октябрь 2021 года ПАО «Южный Кузбасс» неоднократно допускало нарушение своих обязательств по оплате выполненных работ, в связи с чем, ООО «ТФМ-Спецтехника» 19.10.2021 направило ответчику претензию № ПО1019-7 от 19.10.2021 с требованием уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами за нарушение сроков оплаты выполненных работ, неудовлетворение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для подачи настоящего встречного иска.  

В соответствии со статьями 711, 746 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Исходя из требований статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

ПАО «Южный Кузбасс» факт нарушения сроков оплаты и уточненный расчет процентов за пользование чужими денежными средствами не оспорило. С учетом изложенного, требования ООО «ТФМ-Спецтехника» о взыскании с ПАО «Южный Кузбасс» 9 219 491,64 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2018 по 30.10.2021 за нарушение сроков оплаты по договору подряда № 1104ЮК/18 от 20.07.2018, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение встречного иска подлежат взысканию с ответчика.

С учетом установленного судом встречного характера требований взысканные суммы подлежат зачету. 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  РФ, суд

р е ш и л:

первоначальные исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТФМ-Спецтехника», город Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 9 165 883 руб. 14 коп. неустойки, а также 2 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Встречное исковое требование удовлетворить полностью.

Взыскать с публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТФМ-Спецтехника», город Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 9 219 491 руб. 64 коп. неустойки, а также 69 097 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Произвести процессуальный зачет первоначального и встречного исковых требований. 

В результате процессуального зачета взыскать с публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТФМ-Спецтехника», город Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 53 608 руб. 50 коп. неустойки и 67 097 руб. 00 коп расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТФМ-Спецтехника», город Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в доход федерального бюджета 66 829 руб. 00 коп. государственной пошлины за рассмотрение первоначального иска.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ТФМ-Спецтехника», город Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 130 903 руб. 00 коп., излишне уплаченной по платежному поручению № 2558 от 23.03.2020. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Западно-Сибирского  округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу. 

Обжалование производится через арбитражный суд Кемеровской области.

На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного процессуального документа, принимаются в форме электронного документа и направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                  А.В. Душинский