АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-7826/2018

18 июля 2018 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена   18.07.2018 года.

Полный текст решения изготовлен   18.07.2018 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Потопальского С.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Федерального государственного казенного учреждения «Санаторий «Евпатория», г.Евпатория,

к Обществу с ограниченной ответственностью «Югспецстрой», Республика Адыгея, г.Майкоп,

о взыскании.

С участием представителей сторон:

от истца – не явился.

от ответчика – не явился.

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Крым обратилось Федеральное государственное казенное учреждение «Санаторий «Евпатория», г.Евпатория обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Югспецстрой», Республика Адыгея, г.Майкоп, о взыскании 223 476,75 руб. пени.

Представитель истца явку в судебное заседание обеспечил, дал пояснения по существу спора, просил иск удовлетворить.

Ответчик письменный отзыв суду не предоставил, явку уполномоченного представителя не обеспечил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен путем направления судом копии определения по месту регистрации.

Информация о движении дела и определения суда опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет http://www.crimea.arbitr.ru и сайте http://kad.arbitr.ru.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

18 сентября 2017 года между Федеральным государственным казенным учреждением «Санаторий «Евпатория» (далее - истец, заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Югспецстрой» (далее - ответчик, подрядчик) был заключен государственный контракт N0875100001317000102-0631910-01, согласно условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту внутренних электросетей и электрооборудования корпуса «Мир», но адресу: 

<

...> (далее - работы) в соответствии с ведомостью объемов работ, а заказчик обязался осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями контракта (т.1, л.д. 18-33).

Срок окончания выполнения работ по контракту 20 ноября 2017 года (пункты 3.1 и 12.1 контракта). Работы были выполнены 25 декабря 2017 года, что подтверждено Актом премки-экспертизы выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), (т. 1, л.д. 130-150, т. 2, л.д. 1-28).

Цена контракта определена сторонами в пункте 2.1 и составляет 4 119 387 (четыре миллиона сто девятнадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 08 копеек, является твердой и включает все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта.

Основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке счета, счета-фактуры, акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат, акта приемки-экспертизы (пункт 2.6 контракта).

Работы по контракту заказчиком оплачены, что подтверждается платежным поручением № 892253 от 27.12.2017 года (т. 2, л.д. 29).

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчиц обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой.

В пункте 6.3 контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

Просрочка исполнения обязательства составила 35 дней.

В соответствии с расчетом истца  размер пени составил 223 476 (Двести двадцать три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 75 копеек (т. 2, л.д.41, 42). 

Согласно пункту 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 года, при расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения. 

  Следовательно, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда ко всему периоду просрочки подлежит применению ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день его вынесения.

Согласно расчета суда неустойка составляет 209 058,89 р. :

Цена контракта (Ц)

4 119 387,08 руб.

Стоимость фактически исполненного (В)

0,00 руб.

Срок исполнения обязательства по контракту (ДК)

64 дн.

Количество дней просрочки (ДП)

35 дн.

Ставка ЦБ

7,25 %

Формула

Расчёт

Результат

К = ДП?ДК ? 100%

= 35?64 ? 100%

= 54,69% (К* = 0.02)

Cцб = К* ? Ставка ЦБ

= 0.02 ? 7.25%

= 0.145%

C = Cцб ? ДП

= 0.145% ? 35

= 0.05075

П = (Ц - В) ? C

= (4 119 387,08 - 0,00) ? 0.05075

= 209 058,89 р.

                                                                          Пени составляют 209 058,89 руб.

 

      Таким образом, иск подлежит удовлетворению в части взыскания пени в размере 209 058,89 руб.

      При подаче искового заявления истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, в связи с чем государственная пошлина в части удовлетворенных исковых требований подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в размере 7 181 руб.

     В части отказа в удовлетворении исковых требований государственная пошлина подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета в размере 289 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Удовлетворить иск частично.

         Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Югспецстрой», (Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Юннатов, д.9, офис15, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/010501001, дата регистрации 25.05.2009) в пользу Федерального государственного казенного учреждения «Санаторий «Евпатория», (

<

...>, ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 9110000401/911001001, дата регистрации 20.06.2014)  пеню в размере 209 058,89 руб.

        В удовлетворении остальной части иска отказать.

        Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Югспецстрой», (Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Юннатов, д.9, офис15, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/010501001, дата регистрации 25.05.2009)  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 7 181 руб.

       Взыскать с Федерального государственного казенного учреждения «Санаторий «Евпатория», (

<

...>, ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 9110000401/911001001, дата регистрации 20.06.2014)  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 289 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                     С.С. Потопальский