АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-13718/2023 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

(резолютивная часть) 

28 ноября 2023 г. г. Кемерово 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Шикина Г.М.  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), село Красное, Кемеровская область – Кузбасс,  

к Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город  Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс,  

об изменении условий концессионного соглашения от 12.05.2016 № 4,  

третьи лица: Региональная энергетическая комиссия Кузбасса (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), город Кемерово,  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Кемерово,  

при участии: от истца: ФИО1 представитель, доверенность от 02.05.2023, паспорт, диплом; 

от ответчика: ФИО2, председатель КУМИ, паспорт; 

от третьего лица УФАС: ФИО3, представитель, доверенность от 03.05.2023,  удостоверение, диплом, ФИО4, представитель, доверенность от 29.09.2023,  паспорт.  

Руководствуясь статьями 167 – 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс, привести текст  концессионного соглашения от 12.05.2016 № 4 в отношении объектов теплоснабжения  Ленинск-Кузнецкого муниципального района в соответствие с утвержденной  постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от  02.09.2016 № 125 инвестиционной программой ООО «Коммунальщик» в сфере  теплоснабжения на 2016 – 2025 годы, а именно:  

- пункт 4.14. соглашения изложить в следующей редакции:  

«4.14. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта  Соглашения в объемах и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Соглашения.  

Предельный размер расходов на реконструкцию и (или) модернизацию объекта  Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения  Концессионером, составляет 10667 тыс. рублей с НДС.»;  

- приложение № 2 к концессионному соглашению от 12.05.2016 № 4 в отношении  объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района изложить в  редакции в следующей редакции:  

«Приложение № 2 к концессионному соглашению в  отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого  муниципального района от 12.05.2016 № 4  

Инвестиционная программа ООО «Коммунальщик» в сфере теплоснабжения на 2016-2025 годы 

 №  п/п  

Наименование  мероприятий  

Обоснование  необходимости  (цель реализации)  

Описание и место расположения объекта 

Основные технические характеристики  

 и 

иц

а  зияи лт ая ери  алрпо ар че анм 

до Г 

 я 

и и наи чц на ози кл о а дер оГ 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)  

Наименование  

показателя  (мощность,  протяженнос ть, диаметр и  

т.п.) 

Ед.  изм.  

Значение показателя 

яи т я и о 

рп го еср В

е м 

 о н а в ор и 6 

с1н02ан ик

ф о р П 

в т.ч. по годам 

 я и н 

 коаво 

тр 

ати 

сс 

Она н и ф 

ы  таеи лн пе  тч ею чсл  акд зо  .п ч.т аз  в 

до  

реализации 

мероприятия  

после  

реализа ции  

меропри ятия  

 6 1 0 2 

 7 1 0 2 

 8 1 0 2 

 9 1 0 2 

 0 2 0 2 

 1 2 0 2 

 2 2 0 2 

 3 2 0 2 

 4 2 0 2 

 5 2 0 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  

24 

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

Всего по группе 1. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

Всего по группе 2. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

3.2.1 

Замена насоса Wilo IL 

50/210-11/2  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная школы, с. Красное, 

ул. 40 лет Октября, 3 

мощность 

кВт/ч 

5,5 

5,5 

2020 

2020 

140 

0 

0 

0 

0 

0 

140 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.2 

Реконструкция с заменой 

котлов КВр-0,6 3 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная школы, с. Красное,  

ул. 40 лет Октября, 3

Производительность 

м3/ч 

0,6 

0,6 

2022 

2025 

2060 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

200 

1000 

824 

36 

0 

0 

3.2.3 

Установка узлов учета 

тепловой энергии  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная школы, с. Красное,  

ул. 40 лет Октября, 3

Учет 

тепловой  энергии  

шт. 

0 

1 

2016 

2016 

200 

0 

200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.4 

Замена насоса 1К8/18  

1 шт 

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная д/сада, с. К расное, 

ул. Чапаева, 4

мощность 

кВт/ч 

1,2 

1,2 

2016 

2017 

64 

0 

20 

44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.5 

Реконструкция с заменой 

котлов КВр-0,6 3 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная д/сада, с. К расное, 

ул. Чапаева, 4

мощность 

м3/ч 

0,6 

0,6 

2021 

2022 

2060 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1260 

800 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.6 

Установка узлов учета 

тепловой энергии  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная д/сада, с. Красное,  

ул. Чапаева, 4

Учет 

тепловой  энергии  

шт. 

0 

1 

2017 

2017 

200 

0 

0 

200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.7  

Реконструкция с заменой 

котлов КВр-0,8 3 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Центральная котельная,  

<

...>  

10А 

мощность  

Гкал/ч 

0,8 

0,8 

2017  

2019  

1865 

0 

0 

9 

1388 

468 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.8  

Замена насосной группы 

(К65-50-160) 1 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Центральная котельная,  

<

...>  

10А

мощность  

кВт/ч 

3,6 

3,6 

2020  

2021  

66 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.9  

Замена насосной группы 

(К100-80-160) 1шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Центральная котельная,  

<

...>  

10А

мощность  

кВт/ч 

11,9 

11,9 

2021  

2021  

90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.10  

Установка  электрогенератора 1 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Центральная котельная,  

<

...>  

10А

мощность  

кВт/ч 

0 

50 

2017  

2017  

1000 

0 

0 

1000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.11  

Установка  электрогенератора 1 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная школы,  

<

...>  

мощность  

кВт/ч 

0 

3 

2016  

2016  

80 

0 

80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.12  

Установка ХВО  "Комплексон-6" 1 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная школы,  

<

...> 

Производите

льность  

м3/ч 

0 

10 

2025  

2025  

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

0 

3.2.13  

Замена насоса Wilo PH-

400e 2 шт 

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная школы,   

<

...> 

мощность  

кВт/ч 

0,8 

0,8 

2025  

2025  

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

0 

0 

3.2.14  

Реконструкция с заменой 

котлов КВр-0,25 3 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная школы,   

<

...> 

Производите

льность  

Гкал/ч 

0,25 

0,25 

2019  

2020  

1000 

0 

0 

0 

0 

756 

244 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.15  

Установка узлов учета 

тепловой энергии  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная школы,  

<

...> 

Учет 

тепловой  энергии  

шт 

0 

1 

2025  

2025  

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

3.2.16  

Замена насоса Grundfos 

TP32-38/2 2шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная коррекционной 

школы, с. Красное, ул. 

Санаторная, 98  

мощность  

кВт/ч 

3 

3 

2024  

2025  

352 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

176 

176 

0 

0 

3.2.17  

Реконструкция с заменой 

котлов КВр-0,4К 2 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная коррекционной 

школы, с. Красное,  ул. 

Санаторная, 98 

Производите

льность  

Гкал/ч 

0,4 

0,4 

2020  

2020  

1000 

0 

0 

0 

0 

0 

1000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2.18  

Установка  

электрогенератора (до 5  

кВт) 1 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная коррекционной 

школы, с. Красное,  ул. 

Санаторная, 98 

мощность  

кВт/ч 

0 

2 

2025  

2025  

80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

0 

0 

3.2.19  

Установка ХВО  "Комплексон-6" 1 шт  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная коррекционной 

школы, с. Красное, ул.  

Санаторная, 98 

Производите

льность  

м3/ч 

0 

10 

2025  

2025  

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

0 

3.2.20  

Установка узлов учета 

тепловой энергии  

Увеличение  эффективности  работы котельной  

Котельная коррекционной 

школы, с. Красное,  ул. 

Санаторная, 98 

Учет 

тепловой  энергии  

шт 

0 

1 

2025  

2025  

150 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

150 

0 

0 

Всего по группе 3. 

10667 

0 

300 

1253 

1388 

1224 

1400 

1400 

1000 

1000 

1000 

702 

0 

0 

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного  теплоснабжения  

Всего по группе 4. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей 

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

Всего по группе 5. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ИТОГО по программе 

10667 

0 

300 

1253 

1388 

1224 

1400 

1400 

1000 

1000 

1000 

702 

0 

0 

». 

Взыскать с Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  (ОГРН 1024201305776, ИНН 4236003151), город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Коммунальщик» (ОГРН 1064212014866, ИНН 4212012358), село Красное, Кемеровская область – Кузбасс, 6000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, через  Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья Г.М. Шикин