ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, 

<

...>, тел.: 

<

***>, факс 

<

***>

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула Дело № А54-11037/2022

20АП-311/2025

Резолютивная часть постановления объявлена 09.04.2025

Постановление изготовлено в полном объеме 18.04.2025

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Егураевой Н.В., судей Капустиной Л.А. и Устинова В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Фокиной О.С., при участии в судебном заседании от общества с ограниченной ответственностью «Вязники-Лес» – представителя ФИО1 (доверенность № ВЛ005/25 от 07.02.2025), от общества с ограниченной ответственностью «Стройвуд» – представителя ФИО2 (доверенность от 15.07.2024), в отсутствие третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Вязники-Лес» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.10.2024 по делу № А54-11037/2022,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Вязники-Лес» (далее – ООО «Вязники-Лес», Владимирская область, Вязниковский район, п. станции Сарыево, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Стройвуд» (далее – ООО «Стройвуд», г. Москва, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании ущерба в размере 1 625 792 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 263 394 руб. 37 коп., возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 226 800 руб.

ООО «Стройвуд», не соглашаясь с предъявленными требованиями, подало встречный иск к ООО «Вязники-Лес» о взыскании задолженности по договору подряда № 201022/СВД-П на проведение работ по лесозаготовке от 20.10.2022 в размере 947 948 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 14 799 руб. 32 коп., возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 80 000 руб. и расходов по оплате заключения специалиста в размере 85 000 руб.

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Валмол», УФНС России по Владимирской области, ООО «Синий камень», ООО «Ваш офис», ИП ФИО3

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 29.10.2024 в удовлетворении исковых требований ООО «Вязники-Лес» отказано. С ООО «Вязники-Лес» в пользу ООО «Стройвуд» взысканы денежные средства в размере 947 948 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 14 799 руб. 32 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 80 000 руб. и по оплате заключения специалиста в размере 85 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 255 руб. Дальнейшее начисление процентов за пользование чужими денежными средствами произведено, начиная с 03.02.2023 по день фактической оплаты долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. ООО «Стройвуд» из федерального бюджета Российской Федерации возвращена государственная пошлина в сумме 1 221 руб.

Не согласившись с принятым решением, ООО «Вязники-Лес» обратилось в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит решение суда отменить и направить дело на новое рассмотрение. Апеллянт полагает, что суд области необоснованно не принял во внимание акт от 21.11.2022, со ссылкой на то, что он составлен в одностороннем порядке, при этом, приняв во внимание акты, составленные ответчиком по первоначальному иску. По мнению апеллянта, то обстоятельства что ИП ФИО3 не вернул древесину, не свидетельствует о ее качестве. Заявитель полагает, что подтвердил факты несения затрат на штабелирование, проведение уборки, а судом области не дана оценка иным представленным доказательствам и отклонены ходатайства о фальсификации доказательств.

В судебном заседании представитель ООО «Стройвуд» передал суду для приобщения к материалам дела письменные пояснения, в которых ответчик просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, на основании статьи 262 АПК РФ пояснения приобщены к материалам дела.

Представитель истца по первоначальному иску поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представитель ответчика по первоначальному иску возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, представителей не направили, апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие на основании статей 156, 266 АПК РФ.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268 АПК РФ в пределах доводов апелляционной жалобы.

Оценив представленные доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав пояснения представителей сторон, Двадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 20.10.2022 между ООО «Стройвуд» (подрядчиком) и ООО «Вязники-Лес» (заказчиком) заключен договор подряда № 201022/СВД-П на проведение работ по лесозаготовке, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и средствами, с использованием своей техники, оборудования и рабочей силы, выполнить комплекс работ по заготовке древесины на лесных участках, а именно: заготовки, трелевки, раскряжевки, вывозки, сортировки и штабелирования древесины. 

Перечень лесосечных работ утверждается сторонами в техническом задании (приложение № 1) к договору. Содержание лесосечных работ, места выполнения работ, объемы работ, требования к результату работ определяются в соответствии с техническим заданием (приложение № 1).

Срок начала работ подрядчика (включая завоз техники) согласован сторонами 24.10.2022 при условии исполнения заказчиком пункта 2.4 договора (оплата аванса). Срок окончания работ - 31.01.2023 (пункты 1.4 и 1.5 договора).

В соответствии с техническим заданием № 1 (приложение № 1 к договору подряда) стороны согласовали:

Выполнение работ по проведению рубки в границах Александровского лесничества, Струнинского участкового лесничества, урочище Струнинское.

Цель проведения работ: сплошная рубка.

Место и объемы выполнения работ: Струнинское участковое лесничество, квартал 59, выдел – части лесотаксационных выделов 1, 3, 4, 6, 11, 12, 28, 29. Площадь рубки - 16,0476 га.

Основные лесосечные работы – комплекс работ по заготовке древесины на лесных участках:

– валка, обрезка сучьев и вершин, раскряжевка хлыстов на 6-ти метровые сортименты;

– трелевка хлыстов и сортиментов, штабелевка.

Завершающие лесосечные работы:

– очистка мест рубок Подрядчиком осуществляется сбором порубочных остатков в волока;

– поэтапная сдача лесного участка представителю Заказчика по Акту выполненных лесосечных работ.

Вид рубки – сплошная.

Объем рубки – 2 344,00 куб.м.

Технология рубки, применяемые машины и механизмы – с применением техники Харвестеры VOLVO EC210BF PRIME, Форвардере KOMATSU 865 8 WD.

Согласно пункту 2.4.2 договора оплата лесосечных работ производится заказчиком в следующем порядке:

– в течение 3-х рабочих дней после подписания сторонами акта лесосечных работ по выполненному подрядчиком этапу лесосечных работ заказчик осуществляет полный расчет за фактически заготовленную древесину согласно пункту 2.1 договора, за вычетом уже внесенного заказчиком авансового платежа согласно пунктам 2.4.1 и 2.4.3 договора по выставленному подрядчиком счету, высланному на адрес электронной почты, указанный в разделе 12 договора, день получения заказчиком счета не учитывается в счет в счет вышеуказанного срока. Обязательства заказчика по оплате исполняются в указанные сроки только при условии исполнения подрядчиком обязательств по предоставлению закрывающих документов согласно пункту 4.2.19.

Пунктами 3.1, 3.2 и 3.3 договора предусмотрено, что заказчик не чаще 1 раза в 7 дней осуществляет приемку выполненных подрядчиком этапов лесосечных работ. При этом подрядчик в течение 1 рабочего дня уведомляет заказчика по WhatsApp, на номер телефона, указанный в разделе 12 договора, либо посредством электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 12 договора, о готовности этапа лесосечных работ. Уполномоченный представитель заказчика прибывает для приемки выполненных работ не позднее 2 рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления о готовности этапа лесосечных работ. Приемка этапов лесосечных работ производится по месту их выполнения.

Результаты выполнения этапов лесосечных работ с указанием объема фактически заготовленной древесины передаются подрядчиком заказчику и принимаются последним по акту выполненных лесосечных работ, который является неотъемлемой частью договора, приложение № 3. При этом подрядчик одновременно с отправкой уведомления заказчику о готовности этапа лесосечных работ высылает скан копию нижеследующих документов посредством электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 12 договора: акт лесосечных работ, УПД на этап лесосечных работ согласно акту лесосечных работ. Подрядчик обеспечивает сохранность древесины до момента передачи ее заказчику по акту лесосечных работ.

Вызов представителя заказчика для приемки этапа лесосечных работ, отправка акта лесосечных работ согласно пункту 3.2 договора и подписания акта лесосечных работ обязательны.

В соответствии с пунктом 3.4 договора подряда заказчик в течение 2 рабочих дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить подрядчику посредством электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 12 договора, подписанный со своей стороны акт лесосечных работ или мотивированный отказ от подписания данного акта лесосечных работ.

20.10.2022 между сторонами подписан акт № 1 приема-передачи лесного участка.

На основании выставленного подрядчиком счета от 21.10.2022 № 56 заказчик произвел оплату авансового платежа в сумме 520 000 руб. (платежное поручение от 21.10.2022 № 110).

28.10.2022 подрядчик направил в адрес заказчика по электронной почте документы, подтверждающие окончание первого этапа работ, с объемом закрывающих документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 4.2.19 договора.

Приемка выполненных лесосечных работ по первому этапу произведена представителем заказчика 31.10.2022, о чем ООО «Вязники-Лес» в соответствии с условиями договора подряда направил по электронной почте подписанный акт выполненных лесосечных работ от 31.10.2022 № 1, согласно которому ООО «Стройвуд» передало без замечаний заказчику результаты работ по договору на сумму 1 195 456 руб., в том числе, ликвидной древесины в объеме 1494,32 м3.

Заказчик подписанный акт направил подрядчику 07.11.2022, фактическую оплату произвел 11.11.2022 (платежное поручение от 11.11.2022 № 146).

07.11.2022 подрядчик направил в адрес заказчика по электронной почте документы подтверждающие окончание второго этапа работ с объемом закрывающих документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 4.2.19 договора.

Приемка выполненных лесосечных работ по второму этапу произведена представителем ООО «Вязники-Лес» 07.11.2022, о чем ответчик в соответствии с условиями договора подряда направил в адрес истца по электронной почте подписанный акт № 2 выполненных лесосечных работ 07.11.2022, согласно которому ООО «Стройвуд» передало заказчику результаты работ по договору на сумму 577 272 руб., в том числе, ликвидной древесины в объеме 721,59 м3.

Подписанный акт от 07.11.2022 № 2 заказчик направил подрядчику по электронной почте, при этом ООО «Вязники-Лес» оплату выполненных работ в полном объеме не произвело.

По состоянию на 10.11.2022 стоимость работ, выполненных ООО «Стройвуд» и принятых ООО «Вязники-Лес», по подписанным актам №№ 1, 2 составила 1 772 728 руб.

С учетом оплаченного ранее аванса в размере 520 000 руб. и произведенной 11.11.2022 оплаты по акту от 31.10.2022 № 1 в сумме 1 195 456 руб. задолженность ООО «Вязники-Лес» перед ООО «Стройвуд» составляла 77 272 руб.

15.11.2022 ООО «Стройвуд» направило в адрес заказчика по электронной почте документы, подтверждающие окончание третьего этапа работ, с объемом закрывающих документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 4.2.19 договора.

17.11.2022 ООО «Стройвуд» направило в адрес ООО «Вязники-Лес» уведомление о приостановке выполнения работ по договору подряда в соответствии с пунктом 5.2.3 договора в связи с наличием со стороны заказчика нарушения условий оплаты, предусмотренных пунктом 2.4 договора.

17.11.2022 ООО «Стройвуд» от ООО «Вязники-Лес» по электронной почте поступило уведомление-требование от 16.11.2022 исх. № 045/22 о вызове представителя подрядчика для проверки объемов и качества выполненных работ.

Согласно данному уведомлению-требованию при приемке работ заказчиком выявлены недостатки работ подрядчика:

– не осуществлено штабелирование древесины и складирование лесоматериалов на отведенных погрузочных площадках в полном объеме;

– не проведена уборка, очистка мест рубок и сбор порубочных остатков в волока древесины в полном объеме;

– при осмотре ликвидной древесины выявлены дефекты, а именно: расколы, лопнувшие бревна, являющиеся результатом неправильной заготовки древесины: валки, трелевки, раскряжевки древесины;

– при осмотре ликвидной древесины выявлены несоответствия фактически заготовленной ликвидной древесины данным, предоставленным подрядчиком;

– подрядчик по состоянию на 16.11.2022 не представил ни одного чека ФИО4.

Указанным уведомлением-требованием представители ООО «Стройвуд» вызваны для проведения совместной приемки с представителями заказчика выполненных по этапу лесосечных работ на 18.11.2022, которая должна была состояться с 10.00 час. по 13.00 час. по московскому времени на месте производства работ: Владимирская область, Александровский район, Струнинское участковое лесничество, урочище Струнинское, лесной квартал 59, выдел – части лесотаксационных выделов 5, части лесотаксационных выделов 1, 3, 4, 6, 11, 12, 28, 29.

18.11.2022 представители подрядчика в составе комиссии ООО «Стройвуд» генерального директора ФИО5, гл. бухгалтера ФИО6, слесаря по ремонту лесозаготовительного оборудования ФИО7 и оператора Харвестера ФИО8 прибыли на совместную приемку выполненных работ, назначенную заказчиком к 10.00 час., на месте производства работ: Владимирская область, Александровский район, Струнинское участковое лесничество, урочище Струнинское, лесной квартал 59, выдел - части лесотаксационных выделов 5, части лесотаксационных выделов 1, 3, 4, 6, 11, 12, 28, 29.

В назначенное время представители ООО «Вязники-Лес» на приемку не явились, в связи с чем представителями ООО «Стройвуд» в составе указанной выше комиссии, без участия представителей заказчика произведены обмер штабелей и подсчет фактически заготовленной древесины с фиксацией объемов, с составлением акта обмеров фактически заготовленной древесины. Также, непосредственно произведенные замеры были зафиксированы на фото и видеосъемку на камеру телефона XIAOMI 11 Little 5G NE (включая срезы стволов заготовленной древесины).

Расчет древесины приведен исходя из устных договоренностей с ООО «Вязники-Лес», по которому: для избежания брака древесины при ее дальнейшей реализации покупателям, либо использования для собственных нужд установлен технический объем размера заготавливаемой древесины, позволяющий произвести дополнительную обрезку краев: бревна березовые для распиловки и строгания – 5,10 м; остальные виды древесного сырья – 6,10 м.

Расчет фактически заготовленной древесины осуществлялся ООО «Стройвуд» исходя из ликвидного объема: бревна березовые для распиловки и строгания – 5,00 м; для остальных видов древесного сырья – 6,00 м.

Как указывает представитель ООО «Стройвуд», на каждом бревне сделан соответствующий припуск в 0,1 м для избежания возможного брака в виде сколов древесины. Результаты произведенного обмера штабелей:

Формула расчета: длина штабеля * высота штабеля * длина бревна * коэффициент перевода складочного объема в плотный

Бревна березовые для распиловки и строгания:

Технический объем (длина 5,10 м): 23,30 м *4,50 м *5,10 м *0,62 = 331,536 куб.м

Ликвидный объем (длина 5,00 м): 23,30 м *4,50 м *5 м *0,62 = 325,035 куб.м

Дрова березовые:

Технический объем (длина 6,10 м): 25,00 м *4,50 м *6,10 м *0,57 = 391,163 куб.м

Ликвидный объем (длина 6,00 м): 25,00 м *4,50 м *6 м *0,57 = 384,750 куб.м

Бревна осиновые для распиловки и строгания:

Технический объем (длина 6,10 м): 11,00 м *2,70 м *6,10 м *0,57 = 103,267 куб.м

Ликвидный объем (длина 6,00 м): 11,00 м *2,70 м *6 м *0,57 = 101,574 куб.м

Бревна еловые для распиловки и строгания:

Технический объем (длина 6,10 м): 11,30 м *3,40 м *6,10 м *0,62 = 145,304 куб.м

Ликвидный объем (длина 6,00 м): 11,30 м *3,40 м *6 м *0,62 = 142,922 куб.м

Балансы еловые:

Технический объем (длина 6,10 м): 5,00 м *2,80 м *6,10 м *0,57 = 48,678 куб.м

Ликвидный объем (длина 6,00 м): 5,00 м *2,80 м *6 м *0,57 = 47,88 куб.м

Дрова еловые:

Технический объем (длина 6,10 м): 9,00 м *2,80 м *6,10 м *0,57 = 87,620 куб.м

Ликвидный объем (длина 6,00 м): 9,00 м *2,80 м *6 м *0,57 = 86,184 куб.м

Итого:

Технический объем: 1 107,568 куб.м

Ликвидный объем: 1 088,345 куб. м.

Акт от 18.11.2022 № 3 выполнения лесосечных работ по договору подряда на сумму 870 676 руб. подписан в одностороннем порядке стороной подрядчика и направлен вместе с актом замеров фактически заготовленной древесины и комплектом документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 4.2.19 договора, по электронной почте в адрес ООО «Вязники-Лес».

Дополнительно все указанные документы направлены заказчику ценным письмом (шифр почтового отправления 12159677008224), которое последним не получено и по истечении срока хранения возвращено отправителю - ООО «Стройвуд».

Оплату выполненных работ ООО «Вязники-Лес» в полном объеме не произвело.

ООО «Вязники-Лес» указывает, что 21.11.2022, по согласованию с ответчиком составлен акт № 1 о выявленных недостатках лесосечных работ, и предъявлена ответчику претензия на сумму 1 693 400 руб., в которую входят:

– испорченная ликвидная древесина в объеме 342,00 мЗ по цене 3 200 руб./мЗ с учетом НДС (20%) на общую сумму 1 094 400 руб. с учетом НДС (20%);

– фактическая недостача в объеме 98,00 м3 по цене 5 500 руб. /м3 с учетом НДС (20%) на общую сумму 539 000 руб. с учетом НДС (20%);

– фактически понесенные затраты заказчика, связанные с выполнением за подрядчика работ по штабелированию древесины и складированию лесоматериалов на отведенных погрузочных площадках: в объеме 300,00 м3 по цене 200 руб. м3 с учетом НДС (20%) на общую сумму 60 000 руб. с учетом НДС (20%);

в 10-дневный срок согласно пункту 3.6 договора подряда потребовал устранить недостатки: уборка, очистка мест рубок и сбор порубочных остатков в волокна древесины в полном объеме.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Вязники-Лес» в арбитражный суд с иском о взыскании ущерба в сумме 1 625 792 руб. (из которых 1 445 600 руб. ущерб в результате лесосечных работ, 180 192 руб. переплата ответчику), 263 394 руб. 37 коп. процентов и 226 800 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя. Иск мотивирован некачественно выполненными лесосечными работами, следствием чего стало повреждение ликвидной древесины и невозможность ее дальнейшей реализации.

ООО «Стройвуд» предъявило встречный иск о взыскании долга по оплате фактически выполненных работ в сумме 947 948 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 14 799 руб. с их дальнейшим начислением, возмещении 80 000 руб. на оплату юридических услуг и 85 000 руб. за заключение независимого специалиста.

Отказывая в удовлетворении первоначальных исковых требований, суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам, установленным статьей 71 АПК РФ, руководствуясь статьями 487, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), исходил из того, что представленный ООО «Вязники-Лес» акт о выявленных недостатках лесосечных работ от 21.11.2022 не является надлежащим доказательством по делу, поскольку составлен в одностороннем порядке, заказчиком не доказано несение затрат на штабелирование, проведение уборки, дефекты древесины и не соответствие последней по качеству.

Поскольку требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами являются акцессорными (дополнительными) по отношению к основному обязательству, они оставлены без удовлетворения по причине отказа в иске по основному требованию. Более того, проценты на убытки не начисляются.

Удовлетворяя встречный иск о взыскании долга в сумме 947 948 руб., суд первой инстанции, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, исходил из того, что задолженность по акту от 07.11.2022 № 2 в размере 77 272 руб. и по акту от 18.11.2022 № 3 в размере 870 676 руб. подтверждается материалами дела, ответчиком по встречному иску доказательств ее оплаты не представлено.

Также в рамках встречного иска заявлено требование о взыскании процентов за пользование денежными средствами за период с 12.11.2022 по 06.02.2023 в размере 14 799 руб. 32 коп. за нарушение срока оплаты, предусмотренного пунктом 2.4.2 договора.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ установлено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором

Суд области проверил расчет процентов, представленный истцом по встречному иску, и пришел к правомерному выводу о том, что проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.11.2022 по 06.02.2023 подлежат взысканию с ООО «Вязники-Лес» в пользу ООО «Стройвуд» в заявленном размере.

Согласно пункту 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Поскольку на дату вынесения решения заказчик долг не оплатил, дальнейшее начисление процентов за пользование чужими денежными средствами с 07.02.2023 (допущенную в дате опечатку возможно исправить в порядке ст. 179 АПК РФ) по день фактической оплаты долга обоснованно присуждено судом первой инстанции.

Одновременно ООО «Стройвуд» просило взыскать расходы на досудебное исследование в размере 85 000 руб.

В силу пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дел» (далее – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1) расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети «Интернет»), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

Поскольку факт несения истцом по встречному иску судебных издержек на оплату досудебного исследования, их связь с делом истцом подтверждены, в том числе путем предоставления в материалы дела заключения специалиста, платежного поручения от 26.12.2022 № 567 на сумму 85 000 руб., данное требование правомерно удовлетворено судом области.

ООО «Стройвуд» также заявлено о возмещении понесенных судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 80 000 руб.

В обоснование заявленного требования представлен договор на оказание юридических услуг от 21.11.2022 № 21/11/22, платежные поручения от 22.11.2022 № 515 на сумму 81 000 руб. и от 13.03.2023 № 708 на сумму 30 000 руб.

Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 101, 106, 110, 112 АПК РФ, разъяснениями, изложенными в пунктах 1, 10 – 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1, принимая во внимание то, что заявленная к взысканию сумма расходов не носит явно неразумный (чрезмерный) характер, удовлетворил требование о возмещении истцу по встречному иску за счет ответчика расходов на оплату услуг представителя в заявленном размере.

Выводы суда первой инстанции являются правильными, основанными на нормах законодательства и обстоятельствах дела.

Доводы жалобы основаны на несогласии с результатом рассмотрения спора и направлены на переоценку выводов суда, в связи с чем отклоняются судом апелляционной инстанции.

Судом области правильно принято во внимание, что 19.07.2022 ООО «Ваш офис» заключен договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 257, площадью 11,1539 га, кадастровый номер 33:01:000000:204/199, с целью строительства и эксплуатации подъездной дороги, линии электропередач к участку недр местного значения «Калинино Север» месторождение «Калинино».

09.09.2022 между ООО «Ваш офис» и ООО «Вязники-Лес» заключен договор № 090922/ВОС-П на заготовку древесины в границах лесного участка расположенного на земельном участке с кадастровым номером 33:01:000000:204/199, со сроком производства работ с 12.09.2022 по 31.08.2023, объем лесосечных работ 1449 м3. По данному договору ООО «Вязники-Лес» является подрядчиком производства лесосечных работ. Стоимость лесосечных работ 100 000 руб.

13.10.2022 ООО «Ваш офис» и ООО «Вязники-Лес» заключен договор поставки товара № 131022/ВОС-ДС, предметом которого является покупка лесоматериалов в объеме 1449 м3. Стоимость товара составила 100 000 руб., срок оплаты до 31.08.2023. Срок поставки товара партиями в течение действия договора до 31.08.2023. Место отгрузки товара склад поставщика месторождение «Калинино» Владимирская область, Александровский район, Владимирской области.

19.07.2022 ООО «Ваш офис» заключен договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 257, площадью 11,1539 га, кадастровый номер 33:01:000000:204/199, с целью строительства и эксплуатации подъездной дороги, линии электропередач к участку недр местного значения «Калинино Север» месторождение «Калинино».

19.07.2022 ООО «Ваш офис» заключен договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 256, площадью 36,1030 га, кадастровый номер 33:01:000000:204/190, с целью выполнения работ по геологическому изучению недр и разработка месторождения полезных ископаемых, заготовка древесины, для разведки и добычи гравелистых песков на участке недр местного значения «Калинино Север» месторождение «Калинино».

14.10.2022 между ООО «Ваш офис» и ООО «Вязники-Лес» заключен договор № 141022/ВОС-П на заготовку древесины в границах лесного участка расположенного на земельном участке с кадастровым номером 33:01:000000:204/190, со сроком производства работ с 14.10.2022 по 11.10.2023, объем лесосечных работ 2344 м3. По данному договору ООО «Вязники-Лес» является подрядчиком производства лесосечных работ. Стоимость лесосечных работ 150 000 руб.

18.10.2022 ООО «Ваш офис» и ООО «Вязники-Лес» заключен договор поставки товара № 181022/ВОС-ДС, предметом которого является покупка лесоматериалов в объеме 2344 м3. Стоимость товара составила 150 000 руб., срок оплаты до 11.10.2023. Срок поставки товара партиями в течение действия договора до 17.10.2023. Место отгрузки товара склад поставщика месторождение «Калинино» Владимирская область, Александровский район, Владимирской области.

Таким образом, общий объем заготавливаемых и затем приобретаемых материалов по двум договорам составляет 3793 м3.

В материалы дела ООО «Стройвуд» представлено заключение специалиста № 26-12/22МЕ по исследованию цифровой информации, согласно которому, дата и время создания файла соответствуют дате файла, указанной в названии.

ООО «Вязники-Лес» представлены в материалы дела договор с ИП ФИО3 на поставку товара (лесоматериалов) № 1122/ИПД-ДС от 11.11.2022.

Согласно пункту 4.1 договора вывоз со склада поставщика силами покупателя, адрес: Владимирская область, Александровский район, м. о. Следневское (пункт 4.2 спецификации – приложение № 1).

Согласно универсальным передаточным документам от 30.11.2022 и 12.12.2022 получено ИП ФИО3 лесоматериалов: бревна березовые для распиловки и строгания 515 м3, балансы березовые 20 м3, дрова березовые 6,19 м3. Указанное также отражено в информации с личного кабинета ЛесЕГАИС.

По информации, предоставленной Рослесхозом – ЛесЕГАИС, за период с 03.11.2022 по 06.04.2023 ООО «Вязники-Лес» перемещено со склада в Александровском районе 1993 м3 различных лесоматериалов без разбивки на категории леса.

Следовательно, с учетом произведенной отгрузки в адрес ИП ФИО3 541,19 м3, объем вывезенной древесины составляет 2534,14 м3.

Согласно бухгалтерской документации ООО «Стройвуд» произвело лесосечных работ в интересах ООО «Вязники-Лес» в объеме 3304,255 м3. Общий объем дозаготовленной древесины силами ИП ФИО9 по договору от 10.11.2022 составил 300 м3. Общий объем заготовленной древесины составляет 3604,255 м3, при объеме подлежащей к заготовке древесины по основным договорам подряда, заключенным между ООО «Ваш офис» и ООО «Вязники Лес», 3793 м3.

При этом, ООО «Вязники-Лес» не представлено доказательств в рамках исполнения лесосечных работ по договорам, заключенным с ООО «Ваш офис», в части ненадлежащего качества лесоматериалов при сдаче работ. ООО «Ваш офис» претензий не предъявляло.

По доводу ООО «Вязники Лес» о поставке лесоматериалов в адрес ИП ФИО3 ненадлежащего качества суд области обоснованно исходил из того, что данным лицом древесина в адрес общества не возвращена и сведения относительно качества леса (документальные доказательства), акты выбраковки в материалы дела не представлены.

Таким образом, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают установленные судом первой инстанции обстоятельства и не влияют на существо принятого судебного акта, поэтому не являются основанием для его отмены.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на апеллянта.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.10.2024 по делу № А54-11037/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Судьи                                                                                                                                                                           

 Н.В. Егураева

 Л.А. Капустина

 В.А. Устинов