АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2023 года

Дело № А33-33307/2022

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 25 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Гарантстрой» (ИНН 2456011958, ОГРН 1072456000638) г. Назарово

к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Ужурская районная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Ужур

о взыскании задолженности, процентов,

в судебном заседании присутствуют:

от истца (онлайн): ФИО1, представитель по доверенности № 15/09-22СГ-1 от 15.09.2022 (5 лет), личность удостоверена паспортом, (до перерыва)

при ведении протокола судебного заседания секретарем 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Гарантстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Ужурская районная больница» (далее – ответчик) о взыскании: 

- по договору № 22/2020 от 22.06.2020 - 380 273 руб. задолженности, проценты за пользование чужими денежными средствами, согласно ст. 395 ГК РФ, по Договору № 22/2020 от 22.06.2020 за период с 24.07.2020 по 25.07.2023 в размере 85 458 руб. 57 коп.;

- по договору № 14/2020 от 02.06.2020 - 206 288 руб. 85 коп. задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, согласно ст. 395 ГК РФ, по Договору № 14/2020 от  02.06.2020 за период с 17.07.2020 по 18.07.2022 г. в размере                 46 228 руб. 70 коп.;

- по договору № 1/4/2020 от 11.03.2020 - 341 602 руб. задолженности, проценты за пользование чужими денежными средствами, согласно ст. 395 ГК РФ, по Договору № 1/4/2020 от 11.03.2020 за период с 24.04.2020 по 25.04.2023 г. в размере 74 748 руб.               53 коп.;

- по договору № 1/2/2020 от 10.02.2020 - 329 757 руб. 00 коп. задолженности, проценты за пользование чужими денежными средствами, согласно ст. 395 ГК РФ, по Договору № 1/2/2020 от 10.02.2020 за период с 25.03.2020 по 04.10.2022 в размере                    71 731 руб. 96 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением суда от 26.12.2022 возбуждено производство по делу.

Определением суда от 08.08.2023 ходатайство краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская районная больница» о назначении судебной строительной технической  экспертизы удовлетворено. Назначена судебная строительная техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено экспертам ООО «СибСтройЭксперт» - ФИО2, ФИО3.

Определением суда от 31.08.2023 удовлетворено ходатайство ООО «СибСтройЭксперт», к производству судебной экспертизы привлечен эксперт ФИО4. 

30.10.2023 в материалы дела поступило экспертное заключение №2579 от 27.10.2023.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

1) 22.06.2020 между КГБУЗ «Ужурская РБ» (далее – «Заказчик») и ООО «ГарантСтрой» (далее – «Подрядчик») был заключен Договор № 22/2020.

Согласно пункту 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по строительству здания автогаража краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская РБ», расположенного по адресу: 662255 Красноярский край, г. Ужур, ул. Профсоюзов, д. 3, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), сдать результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ в установленном настоящим договором порядке и своевременно их оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчику.

В соответствии с унктом 1.3. Договора срок выполнения работ: начало работ «22» июня 2020 г., окончание работ – «12» июля 2020.

В силу пункта 3.1. Договора валюта настоящего договора – Российский рубль. Стоимость Договора составляет: 380 273 рубля 00 копеек, без учета НДС».

Согласно пункту 3.3 договора оплата осуществляется после сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по настоящему Договору согласно техническому заданию и сметной документации, со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры в соответствии со СНиП и ГОСТ, СанПиН в течение 10 рабочих дней.

Согласно пункту 5.1 Договора № 22/2020 от 22.06.2020 г. за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно КС-2 и КС-3 от 12.07.2020 работы по Договору № 22/2020 на сумму                 380 273,00 рублей исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Работы приняты, и отчетная документация подписана в двустороннем порядке.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.07.2020 по 25.07.2023 определен истцом и составляет 85 458 руб. 57 коп.;.

2) 02.06.2020 между КГБУЗ «Ужурская РБ» (далее – «Заказчик») и ООО «ГарантСтрой» (далее – «Подрядчик») был заключен Договор № 14/2020.

Согласно пункту 1.1. в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по текущему ремонту входной площадки здания краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская РБ», расположенного по адресу: 662255 

<

...>, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), сдать результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ в установленном настоящим договором порядке и своевременно их оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчику.

В соответствии с пунктом 1.3. Договора срок выполнения работ: начало работ «02» июня 2020 г., окончание работ – «03» июля 2020.

В силу пункта 3.1. Договора «Валюта настоящего договора – Российский рубль. Стоимость Договора составляет: 219 690 рублей 00 копеек, без учета НДС».

Согласно пункту 3.3 договора оплата осуществляется после сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по настоящему оговору согласно техническому заданию и сметной документации, со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры в соответствии со СНиП и ГОСТ, СанПиН в течение 10 рабочих дней

Согласно пункту 5.1 Договора № 14/2020 от 02.06.2020 г. за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно КС-2 и КС-3 от 03.07.2020 г. работы по Договору № 14/2020 на сумму              206 288 руб. 85 коп. исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Работы приняты, и отчетная документация подписана в двустороннем порядке.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.07.2020 г. по 18.07.2022 г. определен истцом и составляет 46 228 рублей 70 коп.

3) 11.03.2020 г. между КГБУЗ «Ужурская РБ» (далее – «Заказчик») и ООО «ГарантСтрой» (далее – «Подрядчик») был заключен Договор 1/4/2020.

Согласно пункту 1.1. в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по текущему ремонту здания краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская РБ» расположенного по адресу: 662255, 

<

...>, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), сдать результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ в установленном настоящим договором порядке и своевременно их оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчику.

В соответствии с пунктом 1.3. Договора срок выполнения работ: начало работ «11» марта 2020 г., окончание работ – «10» апреля 2020 г.

В силу п. 3.1. Договора валюта настоящего договора – Российский рубль. Стоимость Договора составляет: 341 602  рублей 00 копеек, без учета НДС.

Согласно пункту 3.3 договора рплата осуществляется после сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по настоящему Договору согласно техническому заданию и сметной документации, со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры в соответствии со СНиП и ГОСТ, СанПиН в течение 10 рабочих дней.

Согласно пункту 5.1 Договора № 1/4/2020 от 11.03.2020 г. за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно КС-2 и КС-3 от 10.04.2020 г. работы по Договору № 1/4/2020 на сумму               341 602,00 рублей исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Работы приняты, и отчетная документация подписана в двустороннем порядке.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.04.2020 г. по 25.04.2023 г. составляет 74 748 рублей 53 коп.

4) 10.02.2020 между КГБУЗ «Ужурская РБ» (далее – «Заказчик») и ООО «ГарантСтрой» (далее – «Подрядчик») был заключен Договор № 1/2/2020.

Согласно п. 1.1. в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по текущему ремонту здания краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская РБ» расположенного по адресу: 662255, 

<

...>, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), сдать результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ в установленном настоящим договором порядке и своевременно их оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчику.

В соответствии с п. 1.3. Договора срок выполнения работ: начало работ «10» февраля 2020 г., окончание работ – «10» марта 2020 г.

В силу пункта 3.1. Договора «Валюта настоящего договора – Российский рубль. Стоимость Договора составляет: 329 757 руб. 00 коп.  без учета НДС».

Согласно пункту 3.3. договора оплата осуществляется после сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по настоящему Договору согласно техническому заданию и сметной документации, со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры в соответствии со СНиП и ГОСТ, СанПиН в течение 10 рабочих дней.

Согласно пункту5.1 Договора № 1/2/2020 от 10.02.2020 г. за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно КС-2 и КС-3 от 10.03.2020 г. работы по Договору № 1/2/2020 на сумму                 329 757 руб.  исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Работы приняты, и отчетная документация подписана в двустороннем порядке.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.03.2020 г. по 25.03.2023 г. составляет 71 731, 96 рублей.

30.12.2021 г. и 31.01.2022 г. в адрес Ответчика были направлены претензии с просьбой произвести расчет по вышеуказанным договорам. До настоящего времени требования Истца не удовлетворены.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд с настоящим иском.

В материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому ответчик указывает: 

- 01.06.022 старшим следователем следственного отдела по Ужурскому району главного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия майором юстиции ФИО5 вынесено Постановление №12202040042000023 о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч.2 ст. 140 УПК РФ, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ.

Согласно акту проверки исполнения договоров КГБУЗ «Ужурская РБ» от 13.04.2022 установлено, что ООО «ГарантСтрой» фактически не были выполнены строительные и ремонтные работы на общую сумму 2 059 469,9 руб., что привлекло причинение материального ущерба КГБУЗ «Ужурская РБ» на указанную сумму.

Определением суда от 08.08.2023 ходатайство краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская районная больница» о назначении судебной строительной технической  экспертизы удовлетворено. Назначена судебная строительная техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено экспертам ООО «СибСтройЭксперт» - ФИО2, ФИО3.

Определением суда от 31.08.2023 удовлетворено ходатайство ООО «СибСтройЭксперт», к производству судебной экспертизы привлечен эксперт ФИО4. 

30.10.2023 в материалы дела поступило экспертное заключение №2579 от 27.10.2023.

Истцом исковые требования уточнены с учетом результатов судебной экспертизы.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сложившиеся между сторонами отношения по договорам регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с частью 1 статьи 740  Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (часть 1 статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Кодекса, согласно которой если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Как следует из материалов настоящего дела между КГБУЗ «Ужурская РБ» (далее – «Заказчик») и ООО «ГарантСтрой» (далее – «Подрядчик») заключены договоры: 

1) Договор № 22/2020 от 22.06.2020

Согласно п. 1.1. в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по строительству здания автогаража краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская РБ», расположенного по адресу: 662255 Красноярский край, г. Ужур, ул. Профсоюзов, д. 3, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), сдать результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ в установленном настоящим договором порядке и своевременно их оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчику.

Согласно КС-2 и КС-3 от 12.07.2020 г. работы по Договору № 22/2020 на сумму                    380 273,00 рублей исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Работы приняты, и отчетная документация подписана в двустороннем порядке

2) Договор № 14/2020 от 02.06.2020

Согласно п. 1.1. в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по текущему ремонту входной площадки здания краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская РБ», расположенного по адресу: 662255 

<

...>, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), сдать результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ в установленном настоящим договором порядке и своевременно их оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчику.

Согласно КС-2 и КС-3 от 03.07.2020 работы по Договору № 14/2020 на сумму                     219 690,00 рублей исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Работы приняты, и отчетная документация подписана в двустороннем порядке

3) Договор 1/4/2020 от 11.03.2020

Согласно п. 1.1. в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по текущему ремонту здания краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская РБ» расположенного по адресу: 662255, 

<

...>, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), сдать результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ в установленном настоящим договором порядке и своевременно их оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчику.

Согласно КС-2 и КС-3 от 10.04.2020 работы по Договору № 1/4/2020 на сумму 341 602,00 рублей исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Работы приняты, и отчетная документация подписана в двустороннем порядке.

4) Договор № 1/2/2020 от 10.02.2020

Согласно п. 1.1. в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по текущему ремонту здания краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская РБ» расположенного по адресу: 662255, 

<

...>, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), сдать результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ в установленном настоящим договором порядке и своевременно их оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчику.

Согласно КС-2 и КС-3 от 10.03.2020 работы по Договору № 1/2/2020 на сумму 348 064,00 рублей исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Работы приняты, и отчетная документация подписана в двустороннем порядке.

Таким образом, из материалов дела следует, что работы в рамках заключенных между сторонам договоров истцом надлежащим образом выполнены.

Ответчиком оплата работ не осуществлена, что следует из материалов настоящего дела и ответчиком надлежащим образом не оспорено.

Вместе с тем, ответчик со ссылкой на факт возбуждения уголовного дела указывает, что ООО «ГарантСтрой» фактически не были выполнены строительные и ремонтные работы на общую сумму 2 059 469 руб. 9 коп.

Определением суда от 08.08.2023 ходатайство краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская районная больница» о назначении судебной строительной технической  экспертизы удовлетворено. Назначена судебная строительная техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено экспертам ООО «СибСтройЭксперт» - ФИО2, ФИО3.

Определением суда от 31.08.2023 удовлетворено ходатайство ООО «СибСтройЭксперт», к производству судебной экспертизы привлечен эксперт ФИО4. 

30.10.2023 в материалы дела поступило экспертное заключение №2579 от 27.10.2023.

Истцом исковые требования уточнены с учетом результатов судебной экспертизы, по результатам экспертного исследования экспертами сделаны следующие выводы:

Вопрос №1 Определить объем, стоимость, качество фактически выполненных ООО «ГарантСтрой» работ по договорам №22/2020 от 22.06.2020, №(4/2020 от 02.06.2020, №1/4/2020 от 11.03.2020, №1/2/2020 от 10.02.2020.

Ответ №1 По результатам проведенной строительно-технической судебной экспертизы эксперты пришли к следующим выводам определены объем, стоимость, а также качество фактически выполненных ООО «ГарантСтрой» работ по договорам:

Работы по Договору отраженные в КС-2 № 22/2020 от 22.06.2020 r. - выполнены в полном объеме, качество выполненных работ соответствует нормативно-технической документации, а также Договору. Стоимость качественно выполненных работ с учетом фактического объема составляет – 380 273,00 руб.

Работы по Договору отраженные в КС-2 № 1/1/2020 от 10.02.2020 r. - выполнены в полном объеме, качество выполненных работ соответствует нормативно-технической документации. а также Договору. Стоимость качественно выполненных работ с учетом фактического объема составляет – 329 757,00 руб.

Работы по Договору отраженные в КС-2 № 1/4/2020 от 11.03.2020 r. - выполнены в полном объеме, качество выполненных работ соответствует нормативно-технической документации. а также Договору. Стоимость качественно выполненных работ с учетом фактического объема составляет – 341 602,00 руб.

Работы по Договору отраженные в КС-2 № 14/2020 от 02.06.2020 r. - выполнены не в полном объеме, качество фактически выполненных работ соответствует нормативно-технической документации. а также Договору. Стоимость качественно выполненных работ с учетом фактического объема составляет - 206 288,85 руб.

Экспертное заключение соответствует требованиям, предъявляемым к доказательствам по делу, требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. У суда не имеется оснований полагать, что выводы экспертов сделаны на основании непригодных методик экспертизы или содержат фактические ошибки или неточности.

Выводы экспертов сделаны с использованием специальных познаний, основаны на исследовании представленной документации. Перед проведением экспертизы эксперты были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Из экспертного заключения следует, что работы фактически выполнены суммарно на 1 257 920 руб. 85 коп.

Ответчиком возражений относительно результатов экспертизы не заявлено, доказательств в опровержение выводов экспертов не представлено.

Равным образом ответчиком не доказана оплата выполненных работ.

Истцом исковые требования в части задолженностей по договорам уточнены до сумм, указанных в экспертном заключении.

На основании изложенного, Арбитражным судом удовлетворяются требования истца о взыскании долга по четырем договорам суммарно на 1 257 920 руб. 85 коп.

Также истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Судом проверен расчет истца, признан арифметически неверным, составленным без учета положений Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц. указанных в пункте 2 данного Постановления).

На основании пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1. абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Правила о моратории, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного Постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Таким образом, в период действия указанного моратория установленные решением суда по делу проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты долга не подлежат начислению, указанные обстоятельства подлежат учету при расчете суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в процессе исполнения судебного акта (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2022 г. N 05АП-2484/22 по делу N А51-732/2022).

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 вступает в силу со дня его официального опубликования (01.04.2022) и действует в течение шести месяцев.

С учетом существа заявленных истцом требований, а также принимая во внимание ссылки ответчика на действие моратория введённого Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", расчет процентов составляет: 

1) Договор № 22/2020 от 22.06.2020 сумма долга - 380 273,00 руб.

- с 24.07.2020 по 26.07.2020 (3 дн.): 380 273 x 3 x 4,50% / 366 = 140,27 руб.

- с 27.07.2020 по 31.12.2020 (158 дн.): 380 273 x 158 x 4,25% / 366 = 6 976,87 руб.

- с 01.01.2021 по 21.03.2021 (80 дн.): 380 273 x 80 x 4,25% / 365 = 3 542,27 руб.

- с 22.03.2021 по 25.04.2021 (35 дн.): 380 273 x 35 x 4,50% / 365 = 1 640,90 руб.

- с 26.04.2021 по 14.06.2021 (50 дн.): 380 273 x 50 x 5% / 365 = 2 604,61 руб.

- с 15.06.2021 по 25.07.2021 (41 дн.): 380 273 x 41 x 5,50% / 365 = 2 349,36 руб.

- с 26.07.2021 по 12.09.2021 (49 дн.): 380 273 x 49 x 6,50% / 365 = 3 318,27 руб.

- с 13.09.2021 по 24.10.2021 (42 дн.): 380 273 x 42 x 6,75% / 365 = 2 953,63 руб.

- с 25.10.2021 по 19.12.2021 (56 дн.): 380 273 x 56 x 7,50% / 365 = 4 375,74 руб.

- с 20.12.2021 по 13.02.2022 (56 дн.): 380 273 x 56 x 8,50% / 365 = 4 959,18 руб.

- с 14.02.2022 по 27.02.2022 (14 дн.): 380 273 x 14 x 9,50% / 365 = 1 385,65 руб.

- с 28.02.2022 по 31.03.2022 (32 дн.): 380 273 x 32 x 20% / 365 = 6 667,80 руб.

- с 02.10.2022 по 23.07.2023 (295 дн.): 380 273 x 295 x 7,50% / 365 = 23 050,79 руб.

- с 24.07.2023 по 25.07.2023 (2 дн.): 380 273 x 2 x 8,50% / 365 = 177,11 руб.

Всего на сумму: 64 142 руб. 45 коп.

2) Договор № 14/2020 от 02.06.2020 сумма долга - 206 288,85 руб.

- с 17.07.2020 по 26.07.2020 (10 дн.): 206 288,85 x 10 x 4,50% / 366 = 253,63 руб.

- с 27.07.2020 по 31.12.2020 (158 дн.): 206 288,85 x 158 x 4,25% / 366 = 3 784,78 руб.

- с 01.01.2021 по 21.03.2021 (80 дн.): 206 288,85 x 80 x 4,25% / 365 = 1 921,60 руб.

- с 22.03.2021 по 25.04.2021 (35 дн.): 206 288,85 x 35 x 4,50% / 365 = 890,15 руб.

- с 26.04.2021 по 14.06.2021 (50 дн.): 206 288,85 x 50 x 5% / 365 = 1 412,94 руб.

- с 15.06.2021 по 25.07.2021 (41 дн.): 206 288,85 x 41 x 5,50% / 365 = 1 274,47 руб.

- с 26.07.2021 по 12.09.2021 (49 дн.): 206 288,85 x 49 x 6,50% / 365 = 1 800,08 руб.

- с 13.09.2021 по 24.10.2021 (42 дн.): 206 288,85 x 42 x 6,75% / 365 = 1 602,27 руб.

- с 25.10.2021 по 19.12.2021 (56 дн.): 206 288,85 x 56 x 7,50% / 365 = 2 373,74 руб.

- с 20.12.2021 по 13.02.2022 (56 дн.): 206 288,85 x 56 x 8,50% / 365 = 2 690,23 руб.

- с 14.02.2022 по 27.02.2022 (14 дн.): 206 288,85 x 14 x 9,50% / 365 = 751,68 руб.

- с 28.02.2022 по 31.03.2022 (32 дн.): 206 288,85 x 32 x 20% / 365 = 3 617,12 руб.

- с 02.10.2022 по 18.07.2023 (290 дн.): 206 288,85 x 290 x 7,50% / 365 = 12 292,56 руб.

Всего: 34 665 руб. 25 коп.

3) Договор 1/4/2020 от 11.03.2020 сумма долга -341 602,00 руб.

- с 24.04.2020 по 26.04.2020 (3 дн.): 341 602 x 3 x 6% / 366 = 168 руб.

- с 27.04.2020 по 21.06.2020 (56 дн.): 341 602 x 56 x 5,50% / 366 = 2 874,68 руб.

- с 22.06.2020 по 26.07.2020 (35 дн.): 341 602 x 35 x 4,50% / 366 = 1 470,01 руб.

- с 27.07.2020 по 31.12.2020 (158 дн.): 341 602 x 158 x 4,25% / 366 = 6 267,37 руб.

- с 01.01.2021 по 21.03.2021 (80 дн.): 341 602 x 80 x 4,25% / 365 = 3 182,05 руб.

- с 22.03.2021 по 25.04.2021 (35 дн.): 341 602 x 35 x 4,50% / 365 = 1 474,04 руб.

- с 26.04.2021 по 14.06.2021 (50 дн.): 341 602 x 50 x 5% / 365 = 2 339,74 руб.

- с 15.06.2021 по 25.07.2021 (41 дн.): 341 602 x 41 x 5,50% / 365 = 2 110,45 руб.

- с 26.07.2021 по 12.09.2021 (49 дн.): 341 602 x 49 x 6,50% / 365 = 2 980,83 руб.

- с 13.09.2021 по 24.10.2021 (42 дн.): 341 602 x 42 x 6,75% / 365 = 2 653,26 руб.

- с 25.10.2021 по 19.12.2021 (56 дн.): 341 602 x 56 x 7,50% / 365 = 3 930,76 руб.

- с 20.12.2021 по 13.02.2022 (56 дн.): 341 602 x 56 x 8,50% / 365 = 4 454,86 руб.

- с 14.02.2022 по 27.02.2022 (14 дн.): 341 602 x 14 x 9,50% / 365 = 1 244,74 руб.

- с 28.02.2022 по 31.03.2022 (32 дн.): 341 602 x 32 x 20% / 365 = 5 989,73 руб.

- с 02.10.2022 по 25.04.2023 (206 дн.): 341 602 x 206 x 7,50% / 365 = 14 459,59 руб.

Всего: 55 600 руб. 12 коп.

4) Договор № 1/2/2020 от 10.02.2020 долг - 329 757 руб.

- с 24.03.2020 по 26.04.2020 (34 дн.): 329 757 x 34 x 6% / 366 = 1 837,99 руб.

- с 27.04.2020 по 21.06.2020 (56 дн.): 329 757 x 56 x 5,50% / 366 = 2 775 руб.

- с 22.06.2020 по 26.07.2020 (35 дн.): 329 757 x 35 x 4,50% / 366 = 1 419,04 руб.

- с 27.07.2020 по 31.12.2020 (158 дн.): 329 757 x 158 x 4,25% / 366 = 6 050,05 руб.

- с 01.01.2021 по 21.03.2021 (80 дн.): 329 757 x 80 x 4,25% / 365 = 3 071,71 руб.

- с 22.03.2021 по 25.04.2021 (35 дн.): 329 757 x 35 x 4,50% / 365 = 1 422,92 руб.

- с 26.04.2021 по 14.06.2021 (50 дн.): 329 757 x 50 x 5% / 365 = 2 258,61 руб.

- с 15.06.2021 по 25.07.2021 (41 дн.): 329 757 x 41 x 5,50% / 365 = 2 037,27 руб.

- с 26.07.2021 по 12.09.2021 (49 дн.): 329 757 x 49 x 6,50% / 365 = 2 877,47 руб.

- с 13.09.2021 по 24.10.2021 (42 дн.): 329 757 x 42 x 6,75% / 365 = 2 561,26 руб.

- с 25.10.2021 по 19.12.2021 (56 дн.): 329 757 x 56 x 7,50% / 365 = 3 794,46 руб.

- с 20.12.2021 по 13.02.2022 (56 дн.): 329 757 x 56 x 8,50% / 365 = 4 300,39 руб.

- с 14.02.2022 по 27.02.2022 (14 дн.): 329 757 x 14 x 9,50% / 365 = 1 201,58 руб.

- с 28.02.2022 по 31.03.2022 (32 дн.): 329 757 x 32 x 20% / 365 = 5 782,04 руб.

- с 02.10.2022 по 25.03.2023 (175 дн.): 329 757 x 175 x 7,50% / 365 = 11 857,70 руб.

Всего: 53 247 руб. 49 коп.

Всего по 4 договорам: 207 655 руб. 31 коп. (53 247 руб. 49 коп. + 55 600 руб. 12 коп. + 34 665 руб. 25 коп. + 64 142 руб. 45 коп.)

На основании изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользования чужими денежными средствами удовлетворяются судом частично на сумму 207 655 руб. 31 коп., в удовлетворении остальной части указанного требования Арбитражный суд отказывает.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учетом уточнения исковых требований государственная пошлина по настоящему иску составляет 28 361 руб.

Исковые требования удовлетворены частично (95,40%), с учетом изложенного, на ответчику подлежат отнесению расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 27 056 руб.

Также истцом в доход федерального бюджета излишне уплачена государственная пошлина, которая подлежит возвращению истцу из федерального бюджета в размере 39 878 руб.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ужурская районная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Ужур в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гарантстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Назарово 1 257 920 руб. 85 коп. основного долга, 207 655 руб. 31 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами за периоды с 24.03.2020 по 31.03.2022 и 02.10.2022 по 25.07.2023, а также 27 056 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Гарантстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Назарово из федерального бюджета 39 878 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежным поручениям от 27.09.2022 № 179, от 27.09.2022 № 180.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

С.А. Красовская