14/2023-28608(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А43-15820/2022 

г. Нижний Новгород «02» марта 2023 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Бодровой Натальи Владимировны (шифр дела 14-284), 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Домоуправляющая компания «ЖБС-5», город  Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ответчику: общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «ЖБС-Проект», город Москва (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

третье лицо, - не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, -  акционерное общество «Теплоэнерго» (603086 

<

...>),  об обязании произвести действия по устранению выявленных недостатков (дефектов) общего  имущества собственников помещений многоквартирного дома,  

при участии в судебном заседании представителей сторон. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЖБС- Проект», город Москва (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) произвести действия по  устранению выявленных недостатков (дефектов) общего имущества собственников помещений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:  

 №№ пп 

Наименование 

Ед. 

изм.  

Объем 

Сроки выполнения  

Раздел 1. Ремонт подъезда МКД 

 

1 

Ремонт трещины  

(расшивка трещины, заполнение  трещины цементно-песчаным  

раствором, оклеивание трещины  сеткой серпинкой, шпатлевка,  

огрунтовка, окраска в соответствии с  колером на 1 эт. лестн. марша)  

М.п.  

2,7 п.м 

В течение сорока пяти  календарных дней с даты  вступления решения по  настоящему делу в законную  силу  

2. 

Ремонт трещин на 8,11,12  эт. (расшивка трещин, заполнение  

трещин цементно-песчаным раствором, шпатлевка, огрунтовка, окраска  стен в соответствии с колером)  

М.п.  

7,7п.м 

 

3. 

Ремонт штукатурного слоя на  

8,11,12эт.( отбивка отслаивающейся  штукатурки, огрунтовка, восстановление штукатурного слоя, огрунтовка,  шпатлевка, огрунтовка, окраска стен в  

соответствии с колером) 

М2 

0,7 м2 

 

Раздел 2. Замена трубопроводов внутридомовой 

инженерной системы горячего водоснабжения МКД  

 

Сроки выполнения 

1 

Произвести замену трубопроводов внутридомовой  

инженерной системы горячего водоснабжения дома №  20, по улице Коммуны, города Нижнего Новгорода, а  

именно заменить стальные водогазопроводные  оцинкованные трубы внутридомовой инженерной  

системы горячего водоснабжения (в том числе, верхний  и нижний розлив ГВС, полотенцесушители по  

квартирам № 35, 42, 104 указанного дома), на  трубопроводы выполненные из коррозийно-стойких  

материалов (в т.ч. из полимерных материалов). При  этом, изменение материала трубопроводов должно быть  в соответствии с п. 11.2 действующего СП  

30.13330.2020 на основании технико-экономического и  гидравлического расчетов, коррозийной агрессивности  транспортируемой воды, а также условий обеспечения  надежности, долговечности работы трубопроводов и  

требований к качеству воды, также срок службы  системы горячего водоснабжения при температуре воды  

75С и нормативном давлении должен составлять не  менее 25 лет.  

 

В течение трех месяцев с  даты вступления решения по  настоящему делу в законную  силу  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «ЖБС-Проект», город Москва (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Домоуправляющая компания «ЖБС-5», город Нижний  Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000 рублей - судебных расходов по оплате  государственной пошлины, 187 000 рублей - расходов на оплату судебной экспертизы.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению  взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, при условии,  что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

В полном объеме судебный акт будет изготовлен в течение пяти рабочих дней. 

Судья Н.В. Бодрова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 26.01.2022 8:53:42

Кому выдана Бодрова Наталья Владимировна