АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж 

«19» сентября 2019г. Дело № А14-13553/2019  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации городского поселения город Лиски Лискинского  муниципального района Воронежской области, г. Лиски (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ИнжСтройПроект», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об устранении недостатков 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «ИнжСтройПроект», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  течение месяца с момента вступления решения в законную силу устранить  недостатки выполненной работы на объекте «благоустройство территории  жилого дома № 8 по ул. Титова в г. Лиски»: установить заглушки на болтах в  местах крепления; произвести покраску поверхностей изделий; заменить  расслоившиеся элементы из фанеры; установить на детский игровой  комплекс крышу; устранить ржавчину на каркасе силового тренажера;  металлическое ограждение спортивной площадки дополнить  отсутствующими элементами (металлические прутья), имеющиеся очистить  от ржавчины и укрепить; установить спинку на скамейки; укрепить или  произвести замену поребрика в местах отставания от  бетонного основания.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ИнжСтройПроект», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 6 000руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд течение месяца со дня его принятия через Арбитражный  суд Воронежской области.  

Судья О.И. Сидорова