Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ульяновск                                                                          Дело №А72-11746/2021

«24» января 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2022 года. Полный текст решения изготовлен 24 января  2022 года.

Арбитражный суд Ульяновской  области в составе судьи                              Арзамаскиной Н.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Акционерного общества «Ульяновская сетевая компания», г.Ульяновск  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «НовоГрад», Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 415 822 руб. 84 коп.

при участии:

от истца – ФИО2, доверенность от 10.12.2021г., диплом

от ответчика – ФИО3,  доверенность от 07.12.2021г., диплом

установил:

Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «НовоГрад» о взыскании 658 699 руб. 71 коп., составляющих: 311 380 руб. 60 коп. – основной долг по договору  №467 от 26.10.2020г., 146 219 руб. 14 коп. -неустойка за просрочку платежа за период с 11.11.2020г. по 03.08.2021г., 201 099 руб. 97 коп. - неустойка за нарушение сроков  выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 02.03.2021г. по 03.08.2021г., а также взыскании неустойки с 04.08.2021г. по день фактического исполнения обязательств.

Дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст.228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 13.10.2021г. удовлетворено ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, а также в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство истца об уменьшении исковых требований до 397 658 руб. 97 коп., составляющих: 156 339 руб. 01 коп. – неустойка за просрочку платежа по договору  №467 от 26.10.2020г. за период с 11.11.2020г. по 16.08.2021г., 241 319 руб. 96 коп. - неустойка за нарушение сроков  выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору №467 от 26.10.2020г. за период с 02.03.2021г. по 03.09.2021г. и с 04.09.2021г. по день фактического исполнения обязательства.

Протокольным определением от 13.12.2021г. в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство истца об увеличении исковых требований до 415 822 руб. 84 коп., составляющих: 156 339 руб. 01 коп. – неустойка за просрочку платежа за период с 11.11.2020г. по 16.08.2021г., 259 483 руб. 83 коп. - неустойка за нарушение сроков  выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору №467 от 26.10.2020г. за период с 02.03.2021г. по 17.09.2021г.

В судебном заседании представитель истца настаивает на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика требования истца в заявленной сумме не признает, просит применить к заявленным требованиям ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом, арифметический расчет исковых требований не оспаривает.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,  выслушав представителей истца и ответчика, суд считает, что исковые требования подлежат  частичному удовлетворению. 

Как усматривается из материалов дела, 26.10.2020 между истцом (Сетевая организация) и ответчиком (Заявитель) оформлен договор №467 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя  ЛЭП-10кВ с ТП-400кВА 10/0,4кВ и ТП-250кВА 10/0,4кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения микрорайона малоэтажной застройки, который будет располагаться по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, кадастровый номер 73:11:040701:1376 (п.2 договора).

В соответствии с п.11 Приложения к договору №467 от 26.10.2020г.  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (Технические условия для присоединения к электрическим сетям) Заявитель обязался выполнить следующие работы:

- строительство ЛЭП-10кВ от точки присоединения до проектируемых ТП через разъединитель;

- строительство трансформаторных подстанций с силовыми трансформаторами на расчетную мощность, предусмотреть защиту от перенапряжений (ОПН) и токов КЗ по 10 кВ и 0,4 кВ расчетных номиналов;

- строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемых ТП 10/0,4кВ до энергопринимающих  устройств объектов малоэтажной застройки;

- при необходимости, для особо ответственного оборудования, предусмотреть независимый источник питания;

- технические решения по реализации вышеперечисленных мероприятий определить проектом, разработанным с применением новейших технологий, отвечающих требованиям НТД;

- оценить соответствие показателей качества электрической энергии установленным ГОСТ 32144-2013 нормам в ходе проектирования и при присоединении нового электрооборудования. При выявлении факторов, ухудшающих качество электроэнергии, предусмотреть мероприятия, устраняющие отрицательные явления;

- перед присоединением произвести необходимые наладочные и профилактические испытания оборудования и защит. Документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний предоставить в сетевую организацию.

Согласно п.1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно п.10, п.11 вышеуказанного договора размер платы за технологическое присоединение составляет 518 967 руб. 66 коп., в т.ч. НДС 20% в сумме 86 494 руб. 61 коп.;

внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по I этапу (очереди) составляет 4 месяца со дня заключения  договора; по   2 этапу (очереди) один год со дня заключения договора.

Ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг, а также выполнению мероприятий по технологическому присоединению были исполнены ненадлежащим образом – услуги оплачены и мероприятия по технологическому присоединению  выполнены с просрочкой, в связи с чем, истец просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку платежа за период с 11.11.2020г. по 16.08.2021г. в размере 156 339 руб. 01 коп. и неустойку за нарушение сроков  выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 02.03.2021г. по 17.09.2021г. в размере 259 483 руб. 83 коп. 

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п.17 договора  сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, а также срок внесения всех видов платежей, предусмотренных п. 11 договора (включая авансовые), обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. 

По расчету истца сумма неустойки за просрочку платежа за период с 11.11.2020г. по 16.08.2021г. составляет 156 339 руб. 01 коп.,  сумма неустойки за нарушение сроков  выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 02.03.2021г. по 17.09.2021г. составляет 259 483 руб. 83 коп. 

Ответчик, не оспорив арифметический расчет истца, заявил о снижении размера взыскиваемой неустойки в соответствии со ст. 333  Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пункту 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанному критерию отнесена к компетенции суда и производится им по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из своего внутреннего убеждения.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, сложившихся между  сторонами правоотношений, суд находит правомерным размер неустойки снизить ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства (размер неустойки  - 0,25% в день составляет 91,25% годовых), исковые требования  в части взыскания неустойки удовлетворить частично в сумме 62 535 руб. 61 коп. – неустойка за просрочку платежа за период с 11.11.2020г. по 16.08.2021г. и 103 793 руб. 53 коп. - неустойка за нарушение сроков  выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 02.03.2021г. по 17.09.2021г., исходя из размера неустойки – 0,1% за каждый день просрочки. 

Указанная сумма неустойки в достаточной  степени компенсирует потери истца, является справедливой, достаточной и соразмерной.  Неустойка в размере  0,1 % за каждый день просрочки широко применяется в предпринимательских  отношениях на территории Российской Федерации,  соответствует принципам разумности и добросовестности. 

Изложенное не противоречит правоприменительной практике (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020г. по делу                   №А72-14202/2019, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.04.2021г. по делу №А07-7202/2020).

Таким образом, исковые требования удовлетворяются судом частично в общей сумме  - 166 329 руб. 14 коп.,  в остальной части исковые требования следует оставить без удовлетворения. 

Поскольку сумма основного долга была оплачена ответчиком после обращения истца с настоящим исковым заявлением в суд, учитывая положения ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также п.9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011г. №81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» госпошлина в размере 17 544 руб. 00 коп. возлагается на ответчика (16 174 руб. 00 коп.  подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, 1 370 руб. 00 коп. – в доход федерального бюджета). 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд

                                                              Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НовоГрад» в пользу Акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» 166 329 руб. 14 коп.  – неустойка и 16 174 руб. 00 коп. – в возмещение расходов по госпошлине.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НовоГрад» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 1 370 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст. 257-259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Судья                                                                                                    Н.П.Арзамаскина