РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

по делу А33-10766/2024 

 01 августа 2024 года Красноярск  

18 июля 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. Обязать общество с ограниченной ответственностью СК «Альфа-Строй» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 03.02.2020)  

в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 01.06.2021 № 0319300011321000007,  устранить недостатки, зафиксированные  

1/ в акте комиссионного осмотра объекта от 14.05.2024 (участок ул. Горького): 

- произвести заделку трещин поперечных – 225 м2 (на протяжении всего участка дороги  через каждые 40 метров);  

- произвести заделку выбоин по всей площади асфальтобетонного покрытия (1 500 м2); 

- устранить выкрашивание по полосе наката 6 440 м2. (на протяжении всего участка дороги);  

- устранить колейность - 50 м.п. (участок Горького 16-18) (h-3,5см).  - произвести заделку отверстий от вырубок – 4 шт. (Горького 16, 67).  2/ в акте комиссионного осмотра объекта от 17.05.2024 (участок ул. Белорусская):  

- произвести заделку выбоин и устранить выкрашивание по полосе наката на протяжении всего участка дороги – 374 м2.  

- произвести заделку трещин на протяжении всего участка дороги 430 м.  - произвести заделку отверстий от вырубки – 1 шт. (участок Белорусская 27).  

- выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия – 13 м2. (участок Белорусская 27).  

- выполнить ремонт искусственной неровности 1 шт. (перекресток Белорусская- Толстого).  

В случае неисполнения настоящего решения в установленный решением срок взыскать с  общество с ограниченной ответственностью СК «Альфа-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 03.02.2020) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление имущественным комплексом» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, Красноярский край, г. Железногорск, дата регистрации 03.05.2007) судебную  неустойку в размере 5 000,00 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения решения суда, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока исполнения решения, и до его фактического исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Альфа-Строй»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  «Управление имущественным комплексом» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  6 000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.С. Щёлокова