1020/2023-124025(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-4739/2023

г. Чебоксары

28 сентября 2023 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Владимировой О.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Волна", ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, Россия 428003, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, б-р  Президентский д. 33, помещ. 7  

к обществу с ограниченной ответственностью "Техноинвестстрой", ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 428018, г. Чебоксары, Чувашская  Республика - Чувашия, ул. К. Иванова д. 17, пом. 1  

об обязании устранить недостатки, при участии: от истца ФИО2 по доверенности от 09.01.2023 (сроком на 1 год), 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Техноинвестстрой" в  течение одного месяца со дня вступления решения суда по настоящему делу в  законную силу устранить недостатки выполненных работ, допущенных при  строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...>:  

1. Произвести по всем этажам теплоизоляцию металлической трубы  ливневого стока, устранить скапливание конденсата, устранить протечки по  этажам.  

2. Устранить на котельной, на выходной трубе из газового котла течь  конденсата, устранить коррозию на металлическом полу от протечки.  

3. Устранить трещины на выходной газовой трубе и наплывы от сварки. 

4. Устранить трещины в отмостке котельной, устранить разрывы  

гидроизоляции, биокоррозию по периметру. 

5. Устранить на кровле застаивание воды по периметру кровли.  6. Устранить трещины на штукатурке парапетов.  

7. Выполнить отливы по периметру парапетов, устранить попадание воды на  

штукатурку. 

8. Устранить трещины на штукатурке вентиляционных труб, устранить  

некачественную установку обшивных листов вентиляционных каналов на кровле. 

9. Устранить высолы на кирпичной кладке, на внешнем фасаде, из-за  

некачественных отливов. 

10.Прокрасить защитной краской от коррозии соединительные элементы  

ограждений. 

11.Устранить некачественно выполненную разуклонку кровли.  

12.Устранить разрывы, трещины, замятия, пузыри гидроизоляции на кровле.  13.Устранить разрывы на оцинкованных отливах, некачественную стыковку  

на парапетах. 

14.Устранить следы подтеков вентиляционных труб газового котла.  

15.Устранить при выходе на кровлю, на откосах трещины, следы от  

повышенной влажности, устранить плохое утепление. Устранить на выходе на  

кровлю трещины, разрушения штукатурного слоя. Тех этаж: 

16.Устранить трещины стяжки по периметру и в теле стяжки.  17.Выполнить надлежащим образом гидроизоляцию, выполнить заход  

гидроизоляции на стены. 18.Устранить протечки в швах плит перекрытия, высолы. 

19.Устранить высолы на кирпичной кладке внутри тех этажа.  Этажи:  

20. Устранить трещины на стыках штукатурки. 21. Устранить трещины между стыками конструкции лифтовой шахты и кирпичной кладки. 

22. Устранить трещины на плитке в лифтовой зоне.  23. Устранить трещины на стыках перекрытия.  

24. Установить накладки на перила по всем этажам.  25. Устранить трещины на штукатурке стен.  

26. Устранить трещины в штукатурке в отверстиях для прохода труб  ливневой канализации.  

27. Прокрасить швеллера на балконе МОП защитной краской.  28. Устранить высолы на блоке кирпичной кладки на фасаде.  Вход в здание:  

29. Устранить на пилястре разрушение кирпича. 

30. Устранить трещину в плите перекрытия балкона 3 этажа.  31. Устранить трещины в штукатурке по периметру первого этажа.  

32. Устранить биокоррозию по отмостке здания. Подвал: 

33. Устранить пустоты под плитой при входе в подвал, устранить трещины  

между бортиками, устранить проникновение через бортики воды в подвальное  

помещение, произвести гидроизоляцию, должный отвод воды в сток. 

34. Произвести правильно организованный отвод ливневого стока в  

коллекторы канализации. Устранить застаивание воды в подвале. 

35. Выполнить приямки для отстаивания воды для последующей откачки в  

подвальном помещении. 36. Устранить повсеместные трещины в стяжке. 37. Устранить коррозию на соединениях металлических труб. 

38. Устранить высокое давление на манометре на вводе, установить  

регулятор давления на вводе. 39. Устранить разрушение краски на трубе ввода водоснабжения. 40. Устранить многочисленные свищи на соединениях труб водоснабжения. 41. Устранить высолы на фасадах из-за некачественых отливов на кровле. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техноинвестстрой"  

в пользу общества с ограниченной ответственностью "Волна" 6 000 (Шесть тысяч)  

руб. расходов по государственной пошлине. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  

суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  

кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  

Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  

арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  

арбитражного суда. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  

Чувашии. 

Судья О.Е. Владимирова