АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

05 апреля 2018 года

Дело № А33-26883/2017

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 03 апреля 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 05 апреля 2018 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 23.12.2008)

к акционерному обществу "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации Уран-графитовых ядерных реакторов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Северск, дата регистрации 24.09.2010) 

о взыскании пени,

в присутствии представителя истца: ФИО1, по доверенности от 09.08.2017,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2, 

установил:

акционерное общество "Красноярский машиностроительный завод" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в соответствии с положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к акционерному обществу "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации Уран-графитовых ядерных реакторов" о взыскании 820 567,95 руб. пени по контракту №2.150.1184 от 10.11.2015. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 24.10.2017 возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства (сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/), для участия в судебное заседание явку представителей не обеспечил, известил суд о возможности рас-смотрения дела в отсутствие его представителей. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей ответчика.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала.

В материалы дела от ответчика поступило заявление о признании исковых требований.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод" (заказчик) и акционерным обществом "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации Уран-графитовых ядерных реакторов" (генподрядчик) 10.11.2015 заключен контракт 2.150.1184.

В соответствии с пунктом 1.1 контракта генподрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение литейного и заготовительного производства» Корпус 20. Цех крупногабаритной листовой штамповки № 10 в соответствии с Техническим заданием заказчика (приложение № 1 к контракту), планом-графиком на соответствующий год (приложение № 2 к контракту) в установленный контрактом срок, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Цена контракта установлена по результатам закупки. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия контракта. Общая стоимость работ составляет 818 027 000,00 руб., в том числе НДС (18%) 124 783 779,66 руб. (пункт 3.1 контракта).

В силу пункта 3.2 контракта распределение финансирования с 2015 года по 2017 года в пределах, доведенных до заказчика, лимитов бюджетных средств:

-в 2015 году - 342 661 090,37 руб., в том числе НДС 52 270 335,82 руб.,

-в 2016 году - 104 699 449,73 руб., в том числе НДС 15 971 102,50 руб.,

-в 2017 году - 370 666 459,90 руб., в том числе НДС 56 542 341,34 руб.

На основании пункта 4.6 контракта оплату за выполненные строительно-монтажные работы заказчик производит в течение 15-ти дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и выставления счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 168,169 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом условий оплаты, предусмотренных пунктом 4.9 и выполнения работ надлежащим образом, с соответствующим качеством и в срок, согласованный с заказчиком.

Работы, предусмотренные контрактом, выполняются генподрядчиком в следующие            сроки: начало работ - со дня заключения контракта. Выполнение работ по этапам: 1 этап 2015 год - срок выполнения работ 31.12.2015; 2 этап 2016 год - срок выполнения работ 31.12.2016; 3 этап 2017 год - срок выполнения работ 25.11.2017. Окончание всего объема           работ по объекту - не позднее 25 ноября 2017 года (пункт 5.1 контракта).

Согласно пункту 15.1 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 15.5 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П =: (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта: В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле Cцб х ДП, где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0.02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

В связи с нарушением генподрядчиком сроков выполнения работ заказчиком начислена неустойка в сумме 820 567,95 руб. 

Претензиями от 09.03.2017 № 127/44, от 13.06.2017 № 127/44-2, от 16.08.2017 № 127/112 заказчик просил генподрядчика оплатить неустойку.

Претензии оставлены без удовлетворения.

Сумма неустойки генподрядчиком не оплачена, что послужило основанием для обращения заказчика с настоящим иском в Арбитражный суд Красноярского края.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из материалов дела следует, что между акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод" (заказчик) и акционерным обществом "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации Уран-графитовых ядерных реакторов" (генподрядчик) 10.11.2015 заключен контракта 2.150.1184 на выполнение работ  по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение литейного и заготовительного производства» Корпус 20. Цех крупногабаритной листовой штамповки № 10

Правоотношения сторон регулируется положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В пункте 5.1 контракта 2.150.1184  сторонами согласованы строки выполнения работ, в том числе промежуточные сроки.

Согласно пункту 15.1 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (пункт 15.5 контракта,

Истец в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ, установленных в плане-графике исполнения контракта (приложение № 2 к контракту), начислил неустойку в сумме 820 567,95 руб. (подробный расчет имеется в материалах дела).

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Ответчик иск признал в заявлении от 20.03.2018 № 339/696, приобщенном к материалам дела 22.03.2018.

Признание иска принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, требование истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 090,00 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца; государственная пошлина в сумме 1 321,00 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации Уран-графитовых ядерных реакторов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Северск, дата регистрации 24.09.2010) в пользу акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 23.12.2008) 820 567,95 руб. неустойки, 18 090,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с акционерного общества "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации Уран-графитовых ядерных реакторов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Северск, дата регистрации 24.09.2010) в доход федерального бюджета 1 321,00 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щёлокова