1 2111271_7159241  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-28299/2023

г. Уфа

12 марта 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р. Ф., при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

 общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное  

предприятие «УфаНефтеПроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Администрации городского округа город Уфа РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) третье лицо – МЗИО РБ об обязании изменить условия договора о развитии застроенной территории 

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 представитель по доверенности № 3 от 08.08. 2023 г., от ответчика - ФИО3, представитель по доверенности от 24.03.2024. 

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Администрацию городского округа город Уфа Республики Башкортостан  изменить условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами  Ленина, Кировоградской, Цюрупы, бульваром Ибрагимова в Советском районе г. Уфы №  39-РТ от 13.08.2013 г. путем заключения с ООО «НПП «УфаНефтеПроект»  дополнительного соглашения в пятидневный срок с момента вступления решения суда в  законную силу:  

Изложить пункт 3.1.9 договора в следующей редакции: 

«Приступить к строительно-монтажным работам на застроенной территории, в  отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным  

проектом планировки и проектом межевания застроенной территории в течении 3 (трех)  лет с момента заключения настоящего дополнительного соглашения».  

Изложить пункт 3.1.19 договора в следующей редакции:  

«Осуществить строительство застроенной территории, указанной в п.1.1,  настоящего договора в течении 5 лет, с момента заключения настоящего дополнительного  соглашения, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной  территории.  

Изложить пункт 3.1.20 договора в следующей редакции:  

«Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной,  социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения  застроенной территории, а также передать, указанные объекты, в муниципальную  собственность в течение одного месяца со дня получения разрешения на ввод в  эксплуатацию таких объектов, но в любом случае не позднее 5 лет с момента заключения  настоящего дополнительного соглашения. Строительство и реконструкция таких объектов  производиться в соответствии с проектом планировки и застроенной территории,  архитектурно-строительной документацией и техническими условиями на подключение к  сетям выдаваемыми держателями сетей».  

Взыскать с Администрации городского округа город Уфа Республики  Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие  «УфаНефтеПроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. сумму расходов  по оплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Р.Ф. Ганеев