ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-31920/2021

г. Москва                                                                                             Дело № А40-247539/20

«22» июня 2021 г.             

Резолютивная часть постановления объявлена «22» июня 2021 г.

Постановление изготовлено в полном объеме «22» июня 2021 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи В.И. Тетюка

Судей: Е.Е. Кузнецовой, Е.В. Бодровой

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «СтройЭнергоМонтаж»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 апреля 2021 года по делу № А40-247539/20

по иску АО «Управляющая компания «Динамо»

к ООО «ДиПиЭлТи Инжиниринг»

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – дов. от 28.04.2021

от ответчика: ФИО3 – дов. от 14.04.2021

УСТАНОВИЛ:

АО «УК «Динамо» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО «ДиПиЭлТи Инжиниринг» в пользу истца неотработанного аванса по договору №ДП-12-03/18 от 24.12.2018 г. в размере 201.565.027,68 рублей, неустойки в размере 605.390.175,78 рублей.

Решением суда от 07.04.2021г. взысканы с Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» в пользу Акционерного общества «Управляющая компания «ДИНАМО» задолженность согласно договору №ДП-12-03/18 от 24.12.2018 г. в размере 201.565.027 руб. 68 коп., неустойка в размере 14.070.590 руб. 40 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 200.000 руб.

В остальной части иска отказано. 

ООО «СтройЭнергоМонтаж» (прежнее наименование ООО «ДиПиЭлТи Инжиниринг»), не согласившись с указанным решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой просило отменить его.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда стороны заявили ходатайство об утверждении Мирового соглашения.

В Мировом соглашения стороны согласовали его условия, решили вопрос о распределении судебных расходов.

Учитывая, что данное Мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, апелляционный суд считает возможным утвердить Мировое соглашение.

Руководствуясь ст.ст. 110, 138, 139, 140, 141, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить Мировое соглашение, по условиям которого:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (предыдущее наименование ООО «ДиПиЭлТи-Инжиниринг») ИНН 

<

***>», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице Генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, и

Акционерное общество «Управляющая компания «ДИНАМО» ИНН 

<

***>, именуемое в дальнейшем «Истец», в лице представителя ФИО2, действующего на основании доверенности № 1741 от 28.04.2021, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Мировое соглашение по делу № А40-247539/20-12-1559 в порядке главы 15 АПК РФ о нижеследующем:

1. Истец признаёт, что Ответчик выполнил и сдал Истцу, а Истец принял без замечаний по объёму, виду, качеству и стоимости работы по Договору подряда № ДП-12-03/18 от 24.12.2018 (далее - Договор) и Дополнительному соглашению № 1 от 06.02.2019 к Договору на общую сумму 201 745 908 (двести один миллион семьсот сорок пять тысяч девятьсот восемь) 36 копеек, в том числе НДС в размере 33 624 318 (тридцать три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи триста восемнадцать) рублей 06 копеек, указанные в:

• Промежуточных актах о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 30.04.2019, № 2 от 31.05.2019, № 3 от 30.06.2019, № 4 от 31.08.2019 к Договору и Промежуточных справках стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 30.04.2019, № 2 от 31.05.2019, № 3 от 30.06.2019, № 4 от 31.08.2019 к Договору;

• Промежуточных актах о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.05.2019, № 2 от 30.06.2019, № 3 от 30.06.2019, № 4 от 31.07.2019, № 5 от 31.07.2019, № 6 от 31.08.2019, КС-2 № 7 от 31.08.2019 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору; и Промежуточных справках стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 31.05.2019, № 2 от 30.06.2019, № 3 от 31.07.2019,№ 4 от 31.08.2019 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору.

В подтверждение обстоятельств сдачи работ по Договору Ответчиком и их приёмки Истцом Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом подписывают акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справку стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на общую сумму 201 745 908 (двести один миллион семьсот сорок пять тысяч девятьсот восемь) 36 копеек, в том числе НДС в размере 33 624 318 (тридцать три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи триста восемнадцать) рублей 06 копеек.

2. Истец признаёт, что Ответчик выполнил и сдал Истцу, а Истец принял без замечаний по объёму, качеству и стоимости работы по Дополнительному соглашению № 1 от 06.02.2019 к Договору на общую сумму 4 579 080 (четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, указанные в Акте от 28.05.2019 сдачи-приёмки выполненных работ «1 Этап» к Дополнительному соглашению № 1 к Договору, Акте от 28.05.2019 сдачи-приёмки выполненных работ «2 Этап» к Дополнительному соглашению № 1 к Договору.

3. С учётом пункта 1 и пункта 2 настоящего Мирового соглашения Истец в полном объеме отказывается от своих требований к Ответчику о взыскании задолженности (в т.ч. неотработанный аванс) по Договору подряда № ДП-12-03/18 от 24.12.2018 в размере 201 565 027 (двести один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч двадцать семь) рублей 68 копеек.

4. Ответчик признаёт долг перед Истцом по уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек.

5. Ответчик обязуется уплатить Истцу неустойку в указанном в пункте 4 настоящего мирового соглашения размере в следующем порядке:

5.1. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - до 31.07.2021 включительно;

5.2. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - до 31.08.2021 включительно;

5.3. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - до 30.09.2021 включительно;

5.4. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - до 31.10.2021 включительно;

5.5. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - до 30.11.2021 включительно;

5.6. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - до 31.12.2021 включительно;

5.7. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - до 31.01.2022 включительно.

6. С учётом пункта 4 настоящего Мирового соглашения Истец отказывается от своих требований к Ответчику о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № ДП-12-03/18 от 24.12.2018 в оставшейся части в размере 598 390 175 (пятьсот девяносто восемь миллионов триста девяносто тысяч сто семьдесят пять) рублей 78 копеек.

7. Ответчик обязуется компенсировать расходы Истца по уплате государственной пошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 30.06.2021 включительно.

8. Иные расходы, возникшие в связи с рассмотрением дела № А40-247539/20-12-1559, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

9. Уплата денежных средств по настоящему Мировому соглашению производится Ответчиком путем перечисления по следующим реквизитам Истца:

р/с 40702810300060000917 

р/с 

<

***> 

в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК 044525187 

к/с 30101810700000000187

10. В случае неисполнения Ответчиком своих обязательств, предусмотренных пунктами 5, 7 настоящего Мирового соглашения, Истец вправе потребовать, а Ответчик обязан уплатить неустойку на сумму просроченных платежей в размере 0,01% за каждый календарный день такой просрочки по день фактической уплаты указанных денежных средств.

11. Датой исполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных настоящим Мировым соглашением, является дата поступления денежных средств на счет Истца.

12. С момента утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом настоящего Мирового соглашения все взаимные претензии Сторон друг к другу, связанные с исполнением Договора считаются урегулированными.

13. С момента выполнения Сторонами условий настоящего Мирового соглашения Договор считается исполненным в полном объеме и обязательства Сторон по Договору прекращаются.

14. Стороны подтверждают (заверение об обстоятельствах), что мировое соглашение не признаётся для них крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью.

15. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

16. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр передается Арбитражному суду для приобщения к материалам дела № А40-247539/20-12-1559, по одному экземпляру для Истца и Ответчика.

17. Руководствуясь ст. ст. 138 - 141 АПК РФ и п. 2 ст. 150 АПК РФ, Стороны ходатайствуют перед Девятым арбитражным апелляционным судом об утверждении настоящего Мирового соглашения и прекращении производства по делу № А40-247539/20-12-1559.

18. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.

19.  Подписи Сторон настоящего Мирового соглашения:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 апреля 2021 года по делу № А40-247539/20 отменить.

Производство по делу № А40-247539/20 прекратить.

Возвратить АО «Управляющая компания «Динамо» из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 100 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:           В.И. Тетюк

Судьи:           Е.Е. Кузнецова

           Е.В. Бодрова

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.