Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-132531/2019

06 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОКАВТОМАТИКА" (680007, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ГРОССМАНН РУС" (191186, город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 40, лит. А, помещение 8-Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца: не явился (извещен)

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОКАВТОМАТИКА" (далее – Предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ГРОССМАНН РУС" (далее – Общество) о взыскании 901 150,67 руб. задолженности по договору подряда от 20.11.2017 № GRUS17-191-007 (далее – Договор), 40 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Предприятием (субподрядчиком) и Обществом (генподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (работы), а генподрядчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, в срок и на условиях, определенных Договором.

По п. 2.3.3. Договора генподрядчик обязан принять работы субподрядчика и подписать соответствующий акт приема-передачи выполненных работ или направить письменный мотивированный отказ.

Согласно п. 2.3.4. Договора генподрядчик обязан оплатить работы субподрядчика в порядке, в срок и в размере, установленном заявкой, Договором и приложениями к нему. 

В силу пункта 3.1. Договора стоимость конкретных работ определяется сторонами в соответствующей заявке.

В соответствии с пунктом 3.2. Договора генподрядчик оплачивает субподрядчику аванс в размере 30% стоимости работ.

В пункте 3.3. Договора определено, что оплата за выполненные работы осуществляется генподрядчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика с пропорциональным зачетом аванса в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ.

Согласно п. 3.4. Договора генподрядчик оплачивает работы на основании счета, выставленного субподрядчиком, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет субподрядчика. 

По п. 3.6. договора субподрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, формирует и отправляет генподрядчику акт приема-передачи оказанных услуг за календарный месяц по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и счет-фактуру. Генподрядчик рассматривает предоставленный акт в течение 5 рабочих дней и либо принимает работы субподрядчика и подписывает акт не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, либо предоставляет письменный мотивированный отказ в тот же срок. В дальнейшем подписание акта приема-передачи происходит в кратчайшие сроки по согласованию сторон. 

Согласно п. 3.8. Договора датой выполнения работ считается дата подписания сторонами документов по форме КС-2 и КС-3.

В силу п. 4.2. договора в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты работ субподрядчик имеет право требовать уплаты неустойки в форме пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от размера неуплаченной суммы.

Сторонами заключено дополнительное соглашение от 25.05.2018 № 1 к Договору, по п. 1.2 которого субподрядчик оплачивает генподрядчику услуги генподряда в размере 9,5% от стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением, в размере 117 439,05 руб. 

Согласно заявке № 2 на выполнение работ по Договору (приложение № 9 к Договору) стороны предусмотрели выполнение работ на сумму 1 746 865,54 руб.; срок выполнения: 29.06.2018.

Субподрядчик выполнил работы по Договору согласно актам о приемке выполненных работ от 20.03.2019 № 1 на сумму 244 207,20 руб., от 20.03.2019 № 2 на сумму 31 284 руб., от 20.03.2019 № 3 на сумму 1 297 592,40 руб., справкам о стоимости выполненных работ и затрат от 20.03.2019 № 1 на сумму 1 774 583,44 руб., подписанным Предприятием в одностороннем порядке. 

Платежными поручениями от 02.08.2018 № 793 на сумму 373 432,77 руб. и от 03.07.2018 № 5445 на сумму 500 000 руб. генподрядчик перечислил оплату работ на сумму 873 432,77 руб. 

Предприятие направило Обществу претензию с требованием оплаты работ на сумму 901 150,67 руб., приложив к претензии акты формы КС-2 и справки формы КС-3.

Отказ Общества удовлетворить названную претензию послужил основанием для обращения Предприятия в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Выполнение Предприятием работ на сумму 901 150,67 руб. подтверждается представленными в материалы дела актами и справкой, которые направлены ответчику, и согласно сведениям с сайта Почты России получены ответчиком 29.10.2019 (номер почтового идентификатора 68000710371708).

Ответчик в суд отзыв на исковое заявление и доказательств оплаты, а также иные документы не представил.

Требование о взыскании 901 150,67 руб. задолженности подлежит удовлетворению.

Предприятие заявило требование о взыскании 40 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе расходы на оплату услуг представителей, оказывающих юридическую помощь (статья 106 АПК РФ).

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны. 

В соответствии с частью 2 статьи 110 АПК РФ судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно положениям этой статьи возмещению подлежат только фактически понесенные судебные расходы. Суммы, выплаченные заявителем за оказанные ему юридические услуги во исполнение принятого обязательства без подтверждения соответствующими документами факта их передачи по правилам статьи 110 АПК РФ не взыскиваются.

В подтверждение заявленного требования истцом представлен договор на оказание консультационных (юридических) услуг и представление интересов в арбитражном суде от 25.11.2019.

Доказательств оплаты юридических услуг по указанному договору в материалы дела не представлено, в связи с чем заявление о возмещении расходов на оплату услуг представителя не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГРОССМАНН РУС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОКАВТОМАТИКА» 901150,67 руб. задолженности и 21023 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

 

Судья                                                                                                     Т.А. Косенко