Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-63275/2023

08 сентября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  25 августа 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  08 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (адрес:  Россия 197227, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ ГАККЕЛЕВСКАЯ Д. 21, ЛИТ. А, ОГРН 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "НЯГАНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС" (адрес:  Россия 192012, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны Д. 271, лит. А., пом. 8-Н., ч.п. 47, оф. 616, ОГРН 

<

***>);

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО2 представитель по доверенности от 09.02.2022;

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (далее – Общество "Россети Ленэнерго") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "НЯГАНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС" (далее – Общество "НЯГАНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС") о взыскании 3 097 977,68 руб. штрафа.

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просит взыскать 2 879 277,92 руб. штрафа.

Ответчик в установленном порядке извещен о слушании дела, не явился. В соответствии с п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие его представителя.

В отсутствие возражений сторон и в соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд завершил слушание в предварительном судебном заседании, и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующие обстоятельства.

Общества "Россети Ленэнерго" и «НЯГАНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС» заключили ряд договоров подряда, по которым ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств. 

В соответствии с заявкой от 02.12.2021 № 21-19715 к рамочному договору подряда от 19.04.2021 № 21-5867 и Календарным планом Подрядчик был обязан завершить комплекс работ не позднее 28.02.2022, работы выполнены не были.

В соответствии с заявкой от 08.04.2022 № 22-2851 к рамочному договору подряда от 19.04.2021 № 21-5867 и Календарным планом Подрядчик был обязан завершить комплекс работ не позднее 01.07.2022, однако, работы выполнены не были.

Пунктом 8.1.1 договоров установлено, что за нарушение сроков выполнения работ в том числе по Заявкам, указанных в Календарном плане (в том числе работ по этапам) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, не более 50% от стоимости работ.

Пунктом 8.1.2 Договоров предусмотрено, что в случае превышения сроков выполнения работ (в том числе по этапу) свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократного превышения сроков выполнения работ, то в дополнение к пункту 8.1.1 Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

При превышении сроков выполнения работ свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, дополнительно к санкциям, предусмотренным пунктами 8.1.1., 8.1.2. Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штраф в размере 5 % от стоимости работ (пункт 8.1.3 Договоров).

Общий размер штрафных санкций по заявке от 02.12.2021 № 21-19715 к рамочному договору подряда от 19.04.2021 № 21-5867 составляет 498 389,28 руб.

Общий размер штрафных санкций по заявке от 08.04.2022 № 22-2851 к рамочному договору подряда от 19.04.2021 № 21-5867 составляет 1 712 908,37 руб.

В соответствии с пунктом 2.2 Договора подряда от 14.01.2022 № 21-23160 и Календарным планом Подрядчик был обязан завершить комплекс работ по приведенному договору не позднее 28.02.2022, однако, работы по договору до не выполнены. 

В разделе 8 договора подряда от 14.01.2022 № 21-23160 предусматривается ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

Так, пунктом 8.1.1 договора подряда от 14.01.2022 № 21-23160 установлено, что за нарушение срока начала и/или окончания работ, в том числе по этапам, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 3.1 договора подряда от 14.01.2022 № 21-23160 цена договора составляет 2 335 595,34 руб.

общий размер штрафных санкций по договору подряда от 14.01.2022 № 21-23160 составляет 667 980,27 руб.

Общий размер штрафных санкций составляет 2 879 277,92 руб.

Общество "Россети Ленэнерго" в претензии от 27.04.2023 потребовало погасить имеющуюся у Общества «НЯГАНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС» задолженность.

Поскольку претензия была оставлена Обществом «НЯГАНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС» без ответа, Общество "Россети Ленэнерго" обратилось в суд с настоящим иском.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно статье 702 ГК РФ (по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Факт невыполнения ответчиком работ по Договору в установленные сроки подтверждается представленными истцом и исследованными судом доказательствами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НЯГАНЬЭЛЕКТРОСЕРВИС» в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» 2 879 277,92 руб. штрафа, а также 37 396,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить публичному акционерному обществу «Россети Ленэнерго» из федерального бюджета 1094,00 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сурков А. А.