Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-2700/2017

24 июля 2017 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 17.07.2017

Решение изготовлено в полном объеме 24.07.2017

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Пименовой В.С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Нерюнгринская центральная районная больница" (ИНН 1434016164, ОГРН 1021401005933) к обществу с ограниченной ответственностью "Бэксэк" (ИНН 1435030806, ОГРН 1021401071010) о взыскании 515 608,50 рублей, расходов по уплате государственной пошлины,

представители:

от истца: не явились, извещены,

от ответчика: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Нерюнгринская центральная районная больница" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Бэксэк" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 515 608,50 рублей, расходов по уплате государственной пошлины.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

О времени и месте судебного заседания ответчик извещен 29.06.2017 согласно почтовому уведомлению №67700012206067.

11.07.2017 через систему подачи документов «Мой арбитр» от истца поступили с сопроводительным письмом от 11.07.2017 №01-08/4490 копии счетов-фактур.

Ходатайством от 11.07.2017 №01-08/4458 истец просит суд приобщить к материалам копии документов.

Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 17.07.2017 12 час. 45 мин. Извещение о перерыве размещено на официальном сайте суда в сети «Интернет». После перерыва судебное заседание продолжено в назначенное время без участи представителей лиц, участвующих в деле. 

14.07.2017 от истца поступили копии актов КС-2, справок КС-3 к государственному контракту от 24.12.2013, копии актов приема-передачи ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил рассмотреть дело без участия представителей лиц, участвующих в деле.

Судом установлены обстоятельства дела.

24.12.2013 между ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (Заказчик) и ООО «Бэксэк» (Подрядчик) заключен Договор №0116200007913005162_88444 на выполнение работ по: «Капитальному ремонту акушерского отделения ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ (1 этап)», в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт акушерского отделения ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ (1 этап)» на сумму 62 000 000 руб. и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Результат работ – выполнение работ в соответствии с техническим заданием (Приложение №2), сметной документацией, (далее – технической документацией) в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора цена договора составляет 61 690 000 руб.

В силу пункта 2.2. Договора в цену договора включена стоимость всех затрат Подрядчиком необходимых для выполнения работ, в том числе:

- стоимость всех работ, указанных в локальных сметных расчетах; - стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для завершения работ в полном объеме по настоящему Договору; 

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание и прочее;

- стоимость изготовления исполнительной документации, 

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком; 

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент заключения и исполнения Договора;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации Объекта (в том числе коммунальные платежи в период ремонтных, пуско-наладочных и ремонтных работ, обслуживание, техническая, пожарная безопасность, соблюдение экологических,  санитарно-эпидемиологических норм, охрану объекта и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Объекта; 

- стоимость подключения (врезки) к существующим инженерным коммуникациям; 

- стоимость работ по ревизии оборудования; 

- непредвиденные расходы, которые учитываются отдельной строкой в сметной документации и принимаются к оплате после составления актов освидетельствования непредвиденных работ (расходов), составления и утверждения сметы на непредвиденные расходы в установленном действующим законодательством порядке.

подрядчик принял на себя обязательство по выполнению работ по текущему ремонту операционного блока по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Больничный комплекс, лечебный корпус, блок «А» согласно ведомости объема работ (Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение №2), календарному плану (Приложение №3), а заказчик обязался принять работу и оплатить.

В соответствии с пунктом 2.3. Договора расчет, за выполненные Подрядчиком работы, Заказчик производит по факту выполненных работ, в течение 60 рабочих дней после подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2, по факту выполненных работ за отчетный период), составленного на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, с нарастающими данными за выполненные работы), предоставления счетов, счетов - фактуры Подрядчиком Заказчику, подписанных Подрядчиком и Заказчиком и выплаты Подрядчиком неустойки, определенной условиями договора, в случае начисления таковой. 

Моментом завершения работ в целом считать дату' подписания комиссией Заказчика акта приемки законченного объекта.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения договора, окончание выполнения работ – до 30 сентября 2014 года.

Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2014, в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств, а по гарантийным обязательствам до истечения таковых (пункт 11.1 Договора).

К выполнению работ ответчик приступил 12.11.2014, а завершил выполнение работ – 30.09.2015, согласно актам формы КС-2 и справкам формы КС-3.

Считая, что сумма затрат по возмещению коммунальных платежей в период с 15.01.2014 по 30.09.2015 составляет – 515 608,5 рублей, истец обратился в суд с настоящим иском.

До обращения в суд истцом в адрес ответчика направлена претензия №0108/7076 от 09.12.2016 об оплате задолженности по коммунальным услугам в размере 515 608,50 руб.

Согласно положениям главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и уплатить обусловленную цену, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе - немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пунктов 1, 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Согласно пункту 2 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

По общему правилу, изложенному в пункте 6 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации, если цена является твердой, стороны не вправе требовать ее изменения, даже если при заключении договора исключалась возможность предусмотреть весь объем работ или необходимых расходов.

Пунктом 2.2. Договора стороны установили, что в цену договора включена стоимость всех затрат Подрядчиком необходимых для выполнения работ, в том числе: стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации Объекта (в том числе коммунальные платежи в период ремонтных, пуско-наладочных и ремонтных работ, обслуживание, техническая, пожарная безопасность, соблюдение экологических,  санитарно-эпидемиологических норм, охрану объекта и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Объекта; 

Из материалов дела следует, в частности из акта передачи объекта Подрядчику, что объект передан Подрядчику 15.01.2014, а работы Подрядчиком завершены 30.09.2015 согласно акту приема оконченных работ формы КС-2 от 30.10.2015 №22.

Таким образом, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации Объекта (в том числе коммунальные платежи в период ремонтных, пуско-наладочных и ремонтных работ, обслуживание, техническая, пожарная безопасность, соблюдение экологических,  санитарно-эпидемиологических норм, охрану объекта и др.) за период с 15.01.2014 по 30.09.2015.

В обоснование затрат по коммунальным платежам истцом представлены: копия государственного контракта №1245/61 холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год с ОАО «Нерюнгринский городской водоканал», копия договора №8/1/09312/3015/1283 на поставку тепловой энергии (мощности) и (или) горячей воды на нужды бюджетного/автономного учреждения от 01.01.2014, копия государственного контракта №03015 на энергоснабжения с ОАО АК «Якутскэнерго» от 01.01.2014, копия договора №8/1/09312/3015/52 на поставку тепловой энергии  (мощности), теплоносителя и (или) горячей воды на нужды бюджетного/автономного учреждения от 11.02.2015, копия государственного контракта №61/53 холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год с ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» от 24.12.2014, копия государственного контракта №3015/51 на энергоснабжение с ОАО АК «Якутскэнерго» от 11.02.2015, счета-фактуры, выставленные поставщиками.

Истцом приведен следующий расчет: 

- теплоэнергия с 15.01.2014 по 30.04.2014 года - 1 043 549,61 рублей, общая площадь здания составляет 12 574,12 м2, площадь ремонтируемого блока - 2 124,9 м2, пропорционально сумма затрат по теплоэнергии составит 176 349.4 рублей;

- система ГВС, ХВС с 15.01.2014 по 11.11.2014 с учетом диаметра трубы 15 мм, и по факту одной раковины в соответствии с нормативом водопотребления составляет ГВС - 60,4 м3, ХВС - 70,03 м3, и соответственно с учетом тарифа 

ХВС с 15.01.2014 по 11.11.2014 - 70,03 * 54,398 = 3 809,76 рублей;

ГВС с 15.01.2014 по 11.11.2014 - 60,4 м3 * 153,4 = 9 265,36 рублей; 

стоки с 15.01.2014 по 11.11.2014 - 60,4+70,03 = 130,43 * 58,7286 = 7 659,97 рублей;

- Электроэнергия с 15.01.2014 по 11.11.2014 5 900 квт * 6.3012 = 37 177,1 рублей.

Всего сумма затрат по возмещению коммунальных платежей в период с 15.01.2014 по 11.11.2014 составляет - 176 349,4 +3 809,76 +9 265,36 + 7 659,97 +37 177,1 = 234 261,59 рублей. 

Теплоэнергия с 15 января по  апрель 2015 года - 1 300 859,61 рублей, общая площадь здания составляет 12 574,12 м2, площадь ремонтируемого блока - 2 124,9 м2, пропорционально сумма затрат по теплоэнергии составит 216 809 ,90 рублей. 

Система ГВС, ХВС с 12 ноября 2014 по 30 сентября 2015 года с учетом диаметра трубы 15 мм, и по факту одной раковины в соответствии с нормативом водопотребления составляет ГВС - 60,4 м3, ХВС - 70,03 м3, и соответственно с учетом тарифа ХВС с 12 ноября 2014 по 30 сентября 2015 года - 70,03 * 65,93 = 4617,07 рублей. 

ГВС с 12 ноября 2014 по 30 сентября 2015 года с- 60,4 м3 * 180,94 = 10928,77 рублей. 

Стоки с 12 ноября 2014 по 30 сентября 2015 года - 60.4+70,03 = 130,43 * 71,94 = 9383,1 13 рублей. 

Электроэнергия с 12 ноября 2014 г. по 30 сентября 2015 года 5 900 квт * 6,71322 = 39608 рублей. 

Итого за период с 15.01.2014 по 30.09.2015 размер затрат составил 515 608,50 рублей.

Расчет судом проверен и признан правильным. Ответчиком сумма не оспорена, контррасчет не представлен.

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца и взыскании с ответчика задолженности в размере 515 608,50 руб.

При обращении в суд с иском истцом уплачена государственная пошлина в размере 13 312 руб. по платежному поручению №2675 от 21.04.2017.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины возмещаются ответчиком в сумме 13 312 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бэксэк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Нерюнгринская центральная районная больница" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 515 608,50 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 312 руб., всего 528 920,50 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

                                  В.С.Терских