АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-37240/2022

02 июля 2024 года

г. Челябинск

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Михайлова К.В. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновой А.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 727 837 руб. 44 коп., об обязании  устранить недостатки,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, акционерного общества проектный институт  гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков  «Магнитогорскгражданпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 150, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой» (ИНН  

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства» (ИНН 

<

***>) штраф в размере 727 837 руб. 44 коп.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой» (ИНН  

<

***>) в срок не позднее 30.09.2024 устранить недостатки выполненных работ по  муниципальному контракту № 08/15 от 06.02.2015 путем выполнения следующих работ на  объекте «г. Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа 1. Детский сад-ясли № 31»,  расположенном по адресу: 

<

...>:  

- устранить разнонаправленные, криволинейные, поверхностные волосяные трещины  на поверхности стен и потолка в следующих поименнованных внутренних помещениях  объекта:  

помещение 

Объемы работ по помещениям, площадь м2 

стены 

потолок 

Кабинет заведующего  

49,62 

Административный кабинет  

40,26 

Коридор между 1 и 2 этажами  

48,79 

Коридор между 2 и 3 этажами  

46,68 

Группа «Непоседы» З этаж  

159 1 

Группа «Светлячки»  

10,9 

Группа «Колобок»  

77 

Группа «Почемучки»  

55,5 

4,3 

Группа «Звездочки»  

43,98 

Группа «Любознайки»  

109,16 

Группа «Веселый улей»  

43,98 

Группа «Сказка»  

159,1 

Группа «Неваляшки»  

44,6 

Группа «Затейники»  

110 79 

Медицинский блок  

113,16 

- устранить горизонтальные, прямолинейные трещины на поверхности потолка в  месте стыка стен и перекрытия; вертикальные, прямолинейные, сквозные трещины на  поверхности стен в месте стыка наружных ограждающих стеновых панелей и внутренних  стен; вертикальные, прямолинейные трещины на поверхности внутренних стен;  горизонтальные, прямолинейные, сквозные трещины на поверхности балки следующих  поименнованных внутренних помещениях, а также по фасаду объекта:  

Наименование помещений  

Объемы работ по помещениям, площадь м2 

стены 

потолок 

Кабинет заведующего  

49,62 

18,15 

Административный кабинет  

40,26 

13,54 

Кабинет методистов 3 этаж  

48,65 

17,27 

Игротека 

80,13 

55,93 

Физкультурный зал  

119,72 

111,3 

Коридор между 1 и 2 этажами  

8,67 

Коридор между 2 и 3 этажами  

17,416 

Группа «Непоседы» 3 этаж  

213,38 

138,49 

Группа «Светлячки»  

213,38 

138,49 

Группа «Колобок»  

213,38 

138,49 

Группа «Почемучки»  

213,38 

138,49 

Группа «Звездочки»  

213 38 

138,49 

Группа «Любознайки»  

213,38 

138,49 

Группа «Веселый улей»  

213,38 

138,49 

Группа «Сказка»  

168 78 

138,49 

Группа «Неваляшки»  

180,3 

138,49 

Группа «Затейники»  

256,81 

155,72 

Группа «Затейники»  

256,81 

155,72 

медицинский блок  

42,12 

- устранить отслоения штукатурного слоя и краски на наружных стенах в углах плит  

перекрытий (на парапете и фасаде здания) в объеме 1 827,81 м2. 

В случае неисполнения вступившего в законную силу решения суда по настоящему  делу в срок, указанный для исполнения решения суда, взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Трест Магнитострой» (ИНН 

<

***>) в пользу муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>)  судебную неустойку в размере 7 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда до  момента фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 23 557 руб.  00 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья К.В. Михайлов