Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-12337/18-91-83

г. Москва

29 марта  2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 19.02.2018 г.

Полный текст решения изготовлен 29.03.2018.

 

Арбитражный суд в составе судьи Шудашовой Я.Е.

при ведении протокола помощником судьи Байкуловым О.Р.

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО" (422546, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, д/р 16.05.2003)

к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (109651, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, д/р 27.04.2012)

о взыскании 4 574 374 ,85 руб. задолженности 622 910,83 руб. договорной неустойки

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 доверенность № 263/154/17 от 25.12.2017

от ответчика – ФИО2 доверенность № 87 от 27.06.2017 г.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен АО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО" к ОАО "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" о взыскании 4 574 374 ,85 руб. задолженности 622 910,83 руб. договорной неустойки

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Ответчик в судебное заседание явился, отзыв не представил, иск по существу не оспорил.

 Как усматривается из материалов дела между АО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО" и ОАО "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР"  заключен Договор № 16/0071М от 29.07.2016

По условиям заключенных Договора № 16/0071М от 29.07.2016 Истец обязуется изготовить и поставить, а Ответчик оплатить и принять продукцию, в количестве, ассортименте, в сроки и по ценам, согласно приложенным Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Так, 29.07.2016 г. стороны согласовали и подписали Спецификацию № 1 к Договору на изготовление модельной оснастки

Общая стоимость продукции по Спецификации №1 составила 737 398,89 руб. 

Срок изготовления продукции в соответствии с п.5 Спецификации № 1 составляет 2 месяца после 100% предоплаты.

Условия оплаты п. 4 Спецификации №1 - 100 % предоплата на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета и подписания Спецификации №1. Спецификация согласована и подписана с учетом протокола урегулирования разногласий 16 ноября 2016г.

13 декабря 2016г. Истцом был выставлен счет № 877 по оплате 737 398, 89 руб. за изготовление продукции в размере в адрес Покупателя. Следовательно, оплата должна быть произведена в срок до 27 декабря 2016г. Оплаты в адрес Истца не поступало.

Таким образом, Ответчик свои обязательства по Договору не исполнил, тогда, как Истец изготовил и поставил продукцию на основании подписанного с двух сторон Акта № 5349/м сдачи-приемки выполненных работ от 19 апреля 2017г.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в частности, путем взыскания неустойки.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом, Ответчиком допущена просрочка по оплате за выполненные работы, в связи, с чем Ответчик несет ответственность, предусмотренную п. 5.3 Договора:

Согласно п. 5.3 Договора Ответчик обязан уплатить Истцу неустойку (пеню) за задержку оплаты за продукцию по настоящему договору в размере 0,04% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора»

Количество дней просрочки поставки составило 358 дней с 27 декабря 2016 г. по 20 декабря 2017г.

Согласно Спецификации № 1 сумма просроченного платежа составила - 737 398,89 руб. (с НДС) Договорная неустойка - 0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 10% от стоимости Договора т.е. не более 73 739, 89 руб.

Таким образом, размер неустойки по Спецификации №1 составляет 73 739,65 руб. 

Кроме того, Сторонами 29.07.2016г подписана Спецификация № 2 к Договору на изготовление и поставку отливок с предварительной механической обработкой. С учетом подписанного Дополнительного соглашения № 1 общая стоимость продукции составляет 2 593 487,98 руб.

Согласно п.7 Спецификации № 2 срок изготовления продукции после изготовления модельной оснастки и получения 50% предоплаты составляет 4-5 месяцев. 

Согласно п. 9 Спецификации № 2  срок поставки составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента 100% оплаты и уведомления Истцом Ответчика о готовности продукции к отгрузке.

Условия оплаты по Спецификации №2 - «50% предоплата на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета и подписания Спецификации №2. Окончательный расчет за продукцию производится в течение 10 (Десяти) банковских дней после получения уведомления о готовности продукции к отгрузке и получения счета.»

13 декабря 2016г. Истцом был выставлен счет № 878 в адрес Ответчика, таким образом, оплата должна быть произведена в срок до 27 декабря 2016г. Оплаты в адрес Истца не поступало

Таким образом, Ответчик свои обязательства по Договору не исполнил, тогда, как Истец изготовил и поставил продукцию, о чем свидетельствует наличие подписанной Ответчиком Товарной накладной № 5347 от 19.04.2017г.

Согласно п. 5.3 Договора Ответчик обязан уплатить Истцу неустойку (пеню) за задержку оплаты за продукцию по настоящему договору в размере 0,04% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора»

Количество дней просрочки поставки составило 358 дней  с 27 декабря 2016 г. по 20 декабря 2017г. 

Согласно Спецификации № 2 сумма просроченного платежа составила- 2 593 487,98 руб. Договорная неустойка - 0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 10% от стоимости  Договора  т.е.  не  более  333 088,70 руб. (общая  стоимость  договора  = Спецификация №1 + Спецификация № 2), что в сумме составляет - 737 398,89 руб. + 2 593 487,98 руб. = 3 330 886, 87 руб.

Таким образом, размер неустойки по Спецификации № 2 составляет 333 088,70 руб.

Так же Сторонами 29.07.2016 г. была подписана Спецификация № 3 к Договору на поставку продукцию общей стоимостью 2 593 487,98 руб.

Согласно п.7 Спецификации № 3 срок изготовления продукции после изготовления модельной оснастки и получения 50% предоплаты составляет 4-5 месяцев. 

Условия оплаты в соответствии с п. 4 Спецификации №3 - «50% предоплата на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета и подписания Спецификации №3. Окончательный расчет за продукцию производится в течение 10 (Десяти) банковских дней после получения уведомления о готовности продукции к отгрузке и получения счета.»

18 января 2017г. Истцом был выставлен счет № 25 в адрес Ответчика, таким образом, оплата должна быть произведена в срок до 01 февраля 2017г. Оплата в адрес Истца не поступила. 

Таким образом, Ответчик свои обязательства по Договору не исполнил, тогда, как Истец изготовил и поставил продукцию, о чем свидетельствует наличие подписанной Ответчиком Товарной накладной № 5348 от 19.04.2017г.

10.05.2017г. платежным поручением ответчик оплатил часть суммы долга в размере 1 000 000 руб. 

Таким образом, сумма долга составляет - 1 593 487,98 руб.

Согласно п. 5.3 Договора Ответчик обязан уплатить Истцу неустойку (пеню) за задержку оплаты за продукцию по настоящему договору в размере 0,04% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора»

Сумма аванса по Спецификации № 3 составила - 1 296 743,99 руб.

Количество дней просрочки поставки составило 97 дней с 02 февраля 2017 г. по 10 мая 2017г. (10.05.17г.- оплата 1 000 000 руб.)

Договорная неустойка - «0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 10% от стоимости Договора» т.е. не более 592 437,49 общая стоимость договора составляет 5 924 374,85 руб.

Сумма аванса, за вычетом оплаченной части - 296 743,99 руб.

Количество дней просрочки поставки  составила 29 дней с 10 мая 2017 г. по 07 июня 2017г. (07.06.17г. - оплата 350 000,00 руб.)

Общий размер неустойки по авансу составил - 53 755,93 руб.

Неустойка за просрочку окончательного платежа по Спецификации № 3:

Сумма окончательного платежа по Спецификации № 3 - 1 296 743,99 руб. (с НДС) Количество дней просрочки поставки с 02 февраля 2017 г. по 07.06.2017г. составило 125 дней, (частичная оплата 07.06.17г. 350 000,00 руб. из них 296 743,99 руб. в счет погашения аванса, остальные 53 256,01 руб. в счет погашения окончательного платежа)

Договорная неустойка - «0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 10% от стоимости Договора» т.е. не более 592 437,49 (общая стоимость договора Спецификация №1 + Спецификация № 2 + Спецификация № 3), что в сумме составляет -737 398,89 руб. + 2 593 487,98 руб. + 2 593 487,98 руб. = 5 924 374,85 руб.

1 296 743,99 х 125 х 0,04% = 64 837,20 руб.

Сумма окончательного платежа по Спецификации № 3, за вычетом частичной оплаты - 1 243 487,98 руб. (с НДС)

Количество дней просрочки поставки составило 196 дней с 07.06.2017 по 20.12.2017г. 

Договорная неустойка - «0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 10% от стоимости Договора» т.е. не более 592 437,49 общая стоимость договора составляет - 5 924 374,85 руб.

1 243 487,98 х 196 х 0,04% = 97 489,40 руб.

Общий размер неустойки по окончательному платежу - 162 326,60 руб.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Истцом в адрес ответчика была направлена Претензия № 261/6682-исх. о погашении задолженности по вышеуказанному Договору, и требованием уплатить неустойку. Ответа не поступило.

Кроме того, Ответчику неоднократно направлялись письма об оплате по Договору -№ 272/087 от 15.02.2017г., № 272/133 от 15.03.2017г., № 272/207 от 13.04.2017. № 272/241 от 27.04.2017г., 272/273 от 18.05.2017г., № 272/529 от 12.10.2017г. - оплаты не поступило. 

Ответчик иск не оспорил.

В силу положений ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иные доказательства, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку Ответчиком, доказательств оплаты поставленной Истцом продукции в сумме 4 574 374,85 руб., ответчиком не представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Таким образом, суд приходит  к выводу о наличии у ответчика задолженности в размере 4 574 374,85 руб.

Учитывая изложенное, суд считает, что иск подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины подлежат распределению в порядке статей 110, 112 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307,309,310 ГК РФ, ст.ст. 101-103,110,167-171 АПК РФ, суд                 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (109651, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, д/р 27.04.2012) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО" (422546, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, д/р 16.05.2003) задолженность по оплате за поставленную продукцию в размере 4 574 374 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи триста семьдесят четыре) руб. 85 коп.; договорную неустойку за просрочку оплаты в размере 622 910 (Шестьсот двадцать две тысячи девятьсот десять) руб. 83 коп.; неустойку по день фактической уплаты денежных средств; расходы по оплате государственной пошлины в размере 48 986 (Сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. 40 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Шудашова Я.Е.