АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинск пеого, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А19-21621/2019

г. Иркутск

16 декабря 2019 г.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙКОМИНВЕСТ» в трехмесячный срок со дня вступления решения в законную  силу устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки объектов долевого  строительства в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Братск,  жилой район Энергетик, ул. Гиндина, д.28, а именно:  

 № п/п 

 № кв. 

(помещение,  территория)  

Необходимые мероприятия:  

1 

Квартира № 6  

Обязать повторно покрасить стены в ванной комнате. 

Обязать заделать щель под плинтусом на кухне. 

Обязать заделать трещину на кухне за отопительным радиатором.  

2 

Квартира № 9  

Обязать отрегулировать механизм открывания окна в большой  комнате.  

3 

Квартира № 11  

Устранить промерзание окна, выполнить регулировку механизма  открывания окна на кухне.  

4 

Квартира № 12  

Обязать устранить продувание с балконного порога в зале  методом утепления и регулировки механизма открывания  балконной двери.  

5 

Квартира № 13  

Обязать отрегулировать все оконные механизмы в квартире, устранить продувание методом утепления оконных проемов.  

6 

Квартира № 53  

Обязать отрегулировать все оконные механизмы в квартире» устранить продувание методом утепления оконных проемов.  

7 

Квартира № 77  

Обязать отрегулировать все оконные механизмы в квартире» устранить продувание методом утепления оконных проемов.  

Устранить протечки канализации в санузле. 

8 

Квартира № 81  

Обязать повторно покрасить стены в санузле. 

Обязать устранить острые углы на балконе (окна, порог, 

подоконник) в зале. 

Обязать устранить острые наплывы на сварке балкона в зале.  

Обязать закрепить надлежащим образом профлист на балконе в зале.  

9 

Квартира № 83  

Обязать устранить следы протечек на потолке в большой и маленькой комнате, произвести заштукатуривание потолка, в местах затекания переклеить новые обои.  

10 

Квартира № 86  

Обязать устранить следы протечек на стене и потолке в ванной комнате, произвести заштукатуривание потолка.  

11 

Квартира № 87  

Обязать подклеить обои на стене над окном в большой комнате. 

Обязать устранить следы затопления в кухне на потолке,  произвести заштукатуривание потолка.  

Обязать произвести зачистку. окраску на стенах в ванной комнате, устранить следы затопления на но юлке, произвести заштукатуривание потолка.  

12 

Квартира № 88  

Обязать устранить следы затопления в кухне на потолке»  произвести заштукатуривание потолка.  

Обязать произвести зачистку, окраску на стенах в ванной комнате, устранить следы затопления на потолке, произвести заштукатуриваине потолка  

Обязать устранить затекание воды в районе окна в большой  комнате, в местах затекания переклеить новые обои.  

13 

Внутренняя  

отделка ванных 

комнат всех  

квартир МВД  

Осуществить отделку стен ванных комнат всех квартир МКД  керамической плиткой в соответствии с проектной документацией  и техническим заданием к муниципальным контрактам  (Техническое задание (пункт № 4), раздел № 1 Проектной  документации (Пояснительная записка, лист № 6 пункт 16))  

14 

Подъезд  

В районе двери выхода на кровлю от порожка вниз по стене  устранить затекание воды, произвести зачистку, побелить стену в  местах затекания воды.  

Обязать повторно покрасить стены в подъезде.  

15 

Фасад  

Произвести закрепление металлических листов обшивки фасада в  связи с условиями, предусмотренными проектной документацией.  Произвести монтаж и закрепление оторванных ветром  металлических листов обшивки фасада в связи с условиями,  предусмотренными проектной документацией.  

16 

Кровля  

Произвести закрепление металлических листов обшивки на кровле  в соответствии с условиями, предусмотренными проектной  документацией.  

17 

Придомовая 

территория  

МКД 

Демонтировать отмостку, выполнить подсыпку грунта с  уплотнением, выполнить новое устройство отмостки в связи с  условиями, предусмотренными проектной документацией.  

Произвести демонтаж дефектного покрытия тротуара и  автомобильного проезда. Осуществить устройство нового  дорожного покрытия тротуара и автомобильного проезда в связи с  условиями, предусмотренными проектной документацией.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СТРОЙКОМИНВЕСТ» в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 1 800 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

Судья Н.А. Курц