АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

07 апреля 2025 года

Дело № А33-978/2025

Красноярск

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26.03.2025.

Мотивированное решение составлено 07.04.2025.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Винокуровой М.Ю., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

об обязании осуществить действия, взыскании неустойки,

без вызова лиц, участвующих в деле,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярска дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго»  (далее – ответчик) с требованиями:

- обязать открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в лице структурного подразделения Красноярской дирекции по энергообеспечению филиала Трансэнерго в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 г., осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объектов расположенных (которые будут располагаться) по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, к.н.: 24:04:0507001, в точке присоединения:

- наименование энергопринимающих устройств заявителя – РЩ-0,4 кВ.

- наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – электроустановки, расположенные по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, кадастровый квартал 24:04:0507001.

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15 кВт.

- категория надёжности: третья.

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2022 г.

- точка присоединения: линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, сооружаемая от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А.

- основной источник питания: комплектная трансформаторная подстанция КТП № 6А (центр питания – тяговая подстанция Камарчага).

- резервный источник питания отсутствует.

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

включая мероприятия согласно Техническим условиям:

- замену в комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А силового трансформатора 27,5/0,4 кВ мощностью 25 кВА на трансформатор расчетной мощности;

- реконструкцию участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС»;

- строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» до границы участка заявителя;

- монтаж прибора учета электроэнергии и присоединение от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, указанной в п. 10.3;

- организацию учёта электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующих требования к учету электроэнергии;

- тип, параметры оборудования, протяженность и сечение линий электропередачи определить при проектировании;

- обеспечение возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

- в случае необходимости отступления от технических условий, в том числе в ходе проектирования, такие отступления подлежат внесению в данные технические условия.

- взыскать судебную неустойку в размере по 10 000 руб. за каждый день просрочки в случае несвоевременного исполнения судебного акта по истечении календарного месяца со дня вступления в законную силу по день фактического исполнения;

- взыскать с Ответчика неустойку по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 г. за период с 16.03.2023 по 25.12.2024 в размере 198 906,25 руб., а с 26.12.2024 по день фактического исполнения обязательства из расчета 305,54 рублей за каждый день просрочки.

Определением от 23.01.2025 исковое заявление оставлено судом без движения.

В арбитражный суд от истца поступили документы, устраняющие обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Определением от 30.01.2025 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

25.03.2025 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу о частичном удовлетворении исковых требований.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

31.03.2025 в Арбитражный суд Красноярского края от ответчика поступило ходатайство об изготовлении мотивированного решения.

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 АПК РФ.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей  8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Из материалов дела следует, что основанием для обращения в суд послужило неисполнение ОАО «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» обязательств по технологическому присоединению в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022, а именно: электроустановки, расположенные по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, к.н.: 24:04:0507001.

Следовательно, отношения сторон регулируются ГК РФ, Федеральным законом № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроснабжении», а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила № 861).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003  «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил № 861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу пункта 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).

Пунктом 7 Правил № 861 предусмотрена процедура технологического присоединения, включающая в себя подачу заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие существенные условия:

- срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В пункте 14 Правил № 861 содержатся требования к оформлению заявки на технологическое присоединение, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с пунктом 15 Правил № 861 в адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13, 14 Правил, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, а также уведомляет о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII настоящих Правил.

Из материалов дела следует, что между ООО «Инфраструктурные решения» (заявитель) и ОАО «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» (сетевая организация) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022, согласно пункту 1.1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – Технологическое присоединение) – РЩ-0,4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор). Сетевая организация и Заявитель являются сторонами Договора (далее – Стороны).

Согласно пункту 1.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов Заявителя, расположенных (которые будут располагаться) по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, к.н.: 24:04:0507001.

Согласно пункту 1.3 договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – Технические условия), являющихся неотъемлемой частью Договора и приведены в приложении.

Срок действия Технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения Договора.

Согласно пункту 1.4 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения Договора.

Согласно пункту 2.1.1 сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в Технических условиях.

Согласно пункту 2.2.1 заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанной в Технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в Технических условиях.

Согласно пункту 3.1 размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29 декабря 2021 г. № 99-э (с изм. от 4 февраля 2022 г. № 5-э, от 25 февраля 2022 г. № 9-э, от 10 июня 2022 г. № 23-э, от 15 июля 2022 г. № 26-э, 4 августа 2022 г. № 40-э, от 25 августа 2022 г. № 41-э) и составляет 122 215 (Сто двадцать две тысячи двести пятнадцать) рублей 82 копейки, в том числе НДС (20%) – 20 369 (Двадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 30 копеек.

Согласно пункту 3.2 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

- платеж 15 % (18 332,37 руб.) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Сетевой организацией счета на оплату. Если для Заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О государственном оборонном заказе», – в течение 15 рабочих дней со дня выставления Сетевой организацией счета на оплату;

- платеж 30 % (36 664,75 руб.) в течение 20 (двадцати) дней со дня размещения личном кабинете Заявителя счета;

- платеж 35 % (42 775,54 руб.) в течение 40 (сорока) дней со дня размещения личном кабинете Заявителя счета;

- платеж 20 % (24 443,16 руб.) в течение 10 (десяти) дней со дня со дня размещения в личном кабинете Заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 3.3 датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации.

Согласно пункту 5.4 сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения Технических условий Заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить понесенные другой Стороной Договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Согласно пункту 5.5 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Техническим условиям, указано следующее:

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя – РЩ-0,4 кВ.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – электроустановки, расположенные по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, кадастровый квартал 24:04:0507001.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15 кВт.

4. Категория надёжности: третья.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2022 г.

7. Точка присоединения: линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, сооружаемая от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А.

8. Основной источник питания: комплектная трансформаторная подстанция КТП № 6А (центр питания – тяговая подстанция Камарчага).

9. Резервный источник питания отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. замену в комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А силового трансформатора 27,5/0,4 кВ мощностью 25 кВА на трансформатор расчетной мощности;

10.2. реконструкцию участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС»;

10.3. строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» до границы участка заявителя;

10.4. монтаж прибора учета электроэнергии и присоединение от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, указанной в п. 10.3;

10.5. организацию учёта электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующих требования к учету электроэнергии;

10.6. тип, параметры оборудования, протяженность и сечение линий электропередачи определить при проектировании;

10.7. обеспечение возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

10.8. в случае необходимости отступления от технических условий, в том числе в ходе проектирования, такие отступления подлежат внесению в данные технические условия.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. разработку проектной документации за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

11.2. монтаж ввода напряжением 0,4 кВ, энергопринимающих устройств в объёме, необходимом для электроснабжения объекта в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующими требованиями к устройству электроустановок;

11.3. фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности);

11.4. выполнение работ осуществляется в соответствии с инструкцией по безопасному осуществлению действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности, размещенной в личном кабинете заявителя.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет два года с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно платежному поручению от 14.09.2022 №1344 истец осуществил в пользу ответчика перевод денежных средств на сумму 122 215,85 руб. с указанием назначения платежа: «Оплата по счету № 49691-09-22/КРАС от 12.09.2022г. услуги по тех. присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «РЖД» по договору № 49691-09-22/КРАС. В том числе НДС 20%, 20369.31 руб.».

Истец обратился к ответчику с претензией от 19.11.2024 с требованием о выполнении мероприятий по технологическому присоединению и оплате неустойки. Ответчиком претензия оставлена без удовлетворения.

Как указывает истец, на дату подачи настоящего искового заявления ответчиком не осуществлены мероприятия по осуществлению технологического присоединения, что явилось основанием для обращения истца в суд.

18.03.2025 в материалы дела от ответчика поступил отзыв на иск, согласно которому ответчик возражает относительно предъявленных исковых требований. 

Как указывает ответчик, для подключения объекта Истца было заключено Частное техническое задание (ЧТЗ) № 2311-11-22/ПКЛ/КРАС от 03.11.2022 г. к договору от 26 июня 2019 г. № 3498586 заключенному между ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» и ОАО РЖД на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), включая поставку оборудования. Далее объект технологического присоединения был включен в инвестиционный проект ОАО «РЖД» со сроками исполнения: ноябрь 2022 г. - апрель 2023 г.

Согласно графика производства работ (Приложение № 2 к Частному техническому заданию № 2311-11-22/ПКЛ/КРАС от 03.11.2022 г.) до конца февраля 2023 года ООО «Энергопромсбыт» должны были выполнить проектно-изыскательские работы.

Согласно письму от ООО «Энергопромсбыт» № 8174и-УОС/ЭПС от 09.11.2023года проектно-изыскательские работы были выполнены только в ноябре 2022 года.

Таким образом, нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению связано исключительно с бездействием ООО «Энергопромсбыт» и не зависело от воли ОАО «РЖД».

Оценив представленные в дело доказательства, суд приходит к выводу о том, что ответчиком не опровергнут факт невыполнения ответчиком в установленный срок мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022.

Таким образом, невыполнение условий договора в установленный срок нарушает права истца, как стороны, не получившей исполнение по данному договору. 

При этом ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие принятие необходимых и достаточных мер по соблюдению законодательства, либо свидетельствующие о наличии препятствий по исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 и Правил № 861. 

Ссылка ответчика на невозможность выполнения технических условий по договору № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 в связи с бездействием третьих лиц не принимается судом.

Указанные ответчиком причины не могут считаться уважительными для невыполнения мероприятий, возложенных на сетевую организацию по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 и указанных в технических условиях, и не являются основанием для освобождения от выполнения взятых на себя обязательств, с учетом даты заключения указанного договора.

Необходимость выполнения требуемых мероприятий, их сроки и стоимость должны учитываться ответчиком при осуществлении своей деятельности как профессиональным участником рынка оказания услуг по осуществлению технологического присоединения. 

Срок выполнения мероприятий составляет 6 месяцев со дня заключения договора № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 (пункт 1.4); данный срок соответствует закону, сторонами не продлевался. Каких-либо препятствий по выполнению технических условий и договора истцом не осуществлялось; доказательства обратного не представлены.

Технические условия действовали с момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022, а также действуют в настоящее время, поэтому должны исполняться сторонами. 

При таких обстоятельствах обоснованным является требование истца об обязании в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 г., осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объектов расположенных (которые будут располагаться) по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, к.н.: 24:04:0507001, в точке присоединения: 

     - наименование энергопринимающих устройств заявителя – РЩ-0,4 кВ.

     - наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – электроустановки, расположенные по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, кадастровый квартал 24:04:0507001.

     - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15 кВт.

     - категория надёжности: третья.

     - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

     - год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2022 г.

     - точка присоединения: линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, сооружаемая от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А.

     - основной источник питания: комплектная трансформаторная подстанция КТП № 6А (центр питания – тяговая подстанция Камарчага).

     - резервный источник питания отсутствует.

     в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

     включая мероприятия согласно Техническим условиям:

     - замену в комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А силового трансформатора 27,5/0,4 кВ мощностью 25 кВА на трансформатор расчетной мощности;

     - реконструкцию участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС»;

     - строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» до границы участка заявителя;

     - монтаж прибора учета электроэнергии и присоединение от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, указанной в п. 10.3;

     - организацию учёта электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующих требования к учету электроэнергии;

     - тип, параметры оборудования, протяженность и сечение линий электропередачи определить при проектировании;

     - обеспечение возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

     - в случае необходимости отступления от технических условий, в том числе в ходе проектирования, такие отступления подлежат внесению в данные технические условия.

В данной части исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться пеней, которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о пени должно быть совершено в письменной форме. 

Согласно пункту 5.4 сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения Технических условий Заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить понесенные другой Стороной Договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Поскольку ответчик нарушил предусмотренный договором срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 г. за период с 16.03.2023 по 25.12.2024 в размере 198 906,25 руб., а с 26.12.2024 по день фактического исполнения обязательства из расчета 305,54 рублей за каждый день просрочки.

Расчет является верным, поскольку произведен истцом, исходя из размера пени, предусмотренного пунктом 5.4 договора № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022, периода просрочки.

Арифметическая правильность данного расчета пени не оспаривалась ответчиком при рассмотрении дела.

Ответчиком при рассмотрении дела ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ в отношении договорной неустойки не заявлено.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

Поскольку доказательства оплаты неустойки в сумме 198 906,25 руб. в материалы дела не представлены, требование истца о взыскании с ответчика неустойки в указанной сумме является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме. Также поскольку фактическое исполнение обязательств не исполнено ответчиком, также подлежит удовлетворению в полном объеме требование истца о взыскании с ответчика неустойки с 26.12.2024 по день фактического исполнения обязательства из расчета 305,54 руб. за каждый день просрочки.

При этом суд учитывает судебную практику в части возможности взыскания заявителем с сетевой организации неустойки за невыполнение мероприятий по технологическому присоединению, не ограничиваясь одним годом (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по делу № А33-23128/2023):

- согласно буквальному толкованию абзаца 3 подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения ограничение для взыскания неустойки за период не превышающий 1 год, установлено исключительно и только для случаев просрочки выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителем;

- на случай просрочки выполнения мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией такого ограничения не установлено;

- из иных положений Правил технологического присоединения не следует, что за нарушение обязательств по договорам сетевая организация, являющаяся сильной стороной в таких договорах и в отношениях по технологическому присоединению, и заявители должны нести равную ответственность;

- соответственно, примененное судами расширительное толкование положений абзаца 3 подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения в части распространения установленного данным пунктом ограничения периода взыскания неустойки на случаи нарушения обязательств по выполнению мероприятий технологическому присоединению сетевой организацией необоснованно;

- основания для ограничения периода начисления неустойки в соответствии с абзацем 3 подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения отсутствуют.

При присуждении ответчику пени по день фактического исполнения обязательств суд исходит из того, что положения статей 330, 395, 809 ГК РФ позволяют истцу требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства. 

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика судебной неустойки в размере по 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Статьей 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вступившие в законную силу судебные акты - решения, определения, постановления арбитражных судов обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влекут за собой ответственность, установленную данным Кодексом и другими федеральными законами.

Следовательно, действующее законодательство предусматривает обязательность исполнения судебных актов, что предполагает безусловное их исполнение. 

Согласно частям 1, 2 статьи 118 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. Принудительное исполнение судебного акта производится на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

При этом оплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Исходя из пункта 28 Постановления № 7 на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

По смыслу статей 308.3, 330 ГК РФ, судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

В пунктах 31, 32 Постановления № 7 разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. 

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ). 

Ответчиком при рассмотрении дела ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ в отношении судебной неустойки не заявлено.

Исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела, суд считает возможным снизить ее размер до 700 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 64 945 руб. платежным поручением от 13.01.2025 №15.

В связи с удовлетворением исковых требований (неимущественного требования и имущественного требования в части договорной неустойки) на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в сумме 64 945 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 г., осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объектов расположенных (которые будут располагаться) по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, к.н.: 24:04:0507001, в точке присоединения: 

     - наименование энергопринимающих устройств заявителя – РЩ-0,4 кВ.

     - наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – электроустановки, расположенные по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, кадастровый квартал 24:04:0507001.

     - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15 кВт.

     - категория надёжности: третья.

     - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

     - год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2022 г.

     - точка присоединения: линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, сооружаемая от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А.

     - основной источник питания: комплектная трансформаторная подстанция КТП № 6А (центр питания – тяговая подстанция Камарчага).

     - резервный источник питания отсутствует.

     в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

     включая мероприятия согласно Техническим условиям:

     - замену в комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А силового трансформатора 27,5/0,4 кВ мощностью 25 кВА на трансформатор расчетной мощности;

     - реконструкцию участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС»;

     - строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» до границы участка заявителя;

     - монтаж прибора учета электроэнергии и присоединение от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, указанной в п. 10.3;

     - организацию учёта электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующих требования к учету электроэнергии;

     - тип, параметры оборудования, протяженность и сечение линий электропередачи определить при проектировании;

     - обеспечение возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

     - в случае необходимости отступления от технических условий, в том числе в ходе проектирования, такие отступления подлежат внесению в данные технические условия.

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 906,25 руб. неустойки за период с 16.03.2023 по 25.12.2024, а также неустойку с 26.12.2024 по день фактического исполнения обязательств по договору технологического присоединения из расчёта 305,54 руб. за каждый день просрочки, а также 64 945 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В случае неисполнения решения суда в части неимущественного требования в полном объёме в течение календарного месяца с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, судебную неустойку в размере 700 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдаётся только по заявлению взыскателя.

Судья

М.Ю. Винокурова