АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

26 сентября 2024 года

 

Дело № А33-31568/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 16 сентября 2024 года.

В полном объёме решение изготовлено 26 сентября 2024 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бахрамовой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью СК «Стройинжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности и неустойки,

в присутствии:

от истца (посредством сервиса «Онлайн-заседания» информационной  системы «Картотека  арбитражных дел»): ФИО1, действующего на основании доверенности от 07.06.2024 №1,

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 01.01.2024,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гореловой Е.С., 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью СК «Стройинжиниринг» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда от 30.06.2022 №б/н в размере 10 029 430,06 руб., неустойки в размере 449 545 руб., исходя из установленной договором неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ по день фактического возраста суммы задолженности.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07.11.2023 возбуждено производство по делу.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

30.06.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью СК «Стройинжиринг» (субподрядчик) заключен договор строительного подряда.

В соответствии с пунктом 1.1 субподрядчик обязуется собственными силами, материалами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, графиком производства работ выполнить работы по благоустройству, согласно локально сметных расчетов (приложение №1), на объекте: «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1, 2 очереди)» 1 очередь, находящегося по адресу: ХМАО – Югра, 

<

...> а также иные работы, определенные в договоре не упомянутые, но необходимые для нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его целевым назначением: сдать результаты работ подрядчику, а подрядчик обязуется принять результат работ субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях договора.

На основании пункта 1.2 субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 договора, в объемах и по стоимости, согласно локальным сметным расчетам (приложение №1), составленных на основании утвержденной проектной-сметной документации.

В силу пункта 1.3 субподрядчик обязуется осуществлять работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, определяющий объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ по договору.

Согласно пункту 2.1 цена договора является твердой на весь срок исполнения договора и составляет 4 962 249,76 руб., в т.ч. НДС, согласно локальному сметному расчету (приложение № 1).

В соответствии с пунктом 3.1 начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) согласовываются сторонами и фиксируются в графике производства работ (приложение № 2) составленном по форме, указанной в приложении № 2.1 к договору.

Начальный срок выполнения работ: 01.07.2022

Конечный срок выполнения работ: 31.08.2022

Субподрядчик осуществляет разработку графика производства работ в соответствии с рабочей документацией и проектной документацией и условиями договора и обеспечивает его утверждение у подрядчика.

Датой заключения договора считается дата, расположенная в верхнем правом углу первой страницы договора.

В силу пункта 3.4 датой фактического завершения выполнения обязательств субподрядчика по договору будет являться дата подписания сторонами акта об определении итогового объема выполненных робот (приложение № 7), а в части исполнения субподрядчиком гарантийных обязательств – дата окончания гарантийного срока, указанного в пункте 12.1 договора. Стороны определили, что акт об определении итогового объема выполненных работ удостоверяет объем выполненных субподрядчиком обязательств перед подрядчиком по договору и служит основанием для возврата гарантийного удержания.

Работы по договору выполняются иждивением субподрядчика, то есть с использованием материалов, изделий, конструкций и оборудования, комплектацию которых обеспечивает субподрядчик. В таком случае, материалы должны приобретаться субподрядчиком у аккредитованного поставщика (пункт 4.1).

В случае письменного отказа аккредитованного поставщика от продажи материалов субподрядчику, последний самостоятельно приобретает необходимые для выполнения работ материалы по ценам, предварительно согласованным с подрядчиком. Предварительное согласование цен производится субподрядчиком с подрядчиком письменно не менее чем за 15 календарных дней до планируемой даты приобретения.

В соответствии с пунктом 8.1 субподрядчик письменно за 3 рабочих дня до начала приемки выполненных робот извещает подрядчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием подрядчиком, субподрядчиком и заказчиком объекта актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения заказчика и подрядчика, внесенного в журнал производства работ.

На основании пункта 8.2 отчетным периодом но настоящему договору является календарный месяц.

Последние акты за текущий год предоставляются не позднее 15 декабря текущего года.

Субподрядчик в срок до 28 числа текущего месяца составляет и представляет подрядчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), с приложением надлежащим образом оформленной исполнительной документации, в которую включаются выполненные субподрядчиком работы в отчетном периоде, а также реестр на приобретенное за отчетный период оборудование с указанием количества, наименования и стоимости этого оборудования, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством (постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1117), завизированные в соответствии с п. 8.3 договора.

Период, за который предъявляются акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), должен соответствовать периоду выполнения работ, отраженному в общем журнале работ.

Пунктом 8.3 предусмотрено, что субподрядчик ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, согласовывает и визирует в Службе технического надзора подрядчика и до 28 числа текущего месяца предоставляет в Производственно-техническую службу подрядчика для рассмотрения, согласования и визирования акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 экземплярах, в которые включаются работы, выполненные субподрядчиком в предыдущем отчетном периоде. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2) в 3 экземплярах и счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством (постановление Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.).

В случае использования давальческих материалов одновременно с формами КС-2 и КС-3 субподрядчиком предоставляется отчет об использовании давальческих материалов (по форме М-15) в двух экземплярах.

Согласно пункту 8.4 подрядчик в течение 3 календарных дней с даты получения актов по формам КС-2, КС-3 от субподрядчика обязан принять выполненные работы и подписать со своей стороны акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ с замечаниями для согласования с субподрядчиком сроков их устранения.

В случае если подрядчиком не направлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ по окончании срока, отведенного на приемку (3 календарных дня), в адрес субподрядчика, в акте о приемке выполненных работ делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной (субподрядчиком) с правом на обжалование в судебном порядке.

Пунктом 8.5 предусмотрено, что подрядчик вправе отказаться от приемки выполненных субподрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут выть устранены субподрядчиком или подрядчиком. Причины отказа излагаются подрядчиком в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Под несоответствиями понимаемся неудовлетворительное качество выполненных работ, вызванное (в том числе, но не ограничиваясь): использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, по качеству уступающим указанным в проектной и рабочей документации; отступлениями в технологии выполнения работ от требований нормативных актов в области проектирования и строительства; а также иные дефекты, недоделки, упущения, нарушения, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения субподрядчиком принятых на себя обязательств.

Оплата работ, фактически выполненных субподрядчиком по договору, осуществляется ежемесячно, в течение 45 дней, следующих за датой получения подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчет производится по договорной цене, установленной в разделе 2 настоящего договора. При отсутствии возможности оплатить выполненные работы в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта по причине не поступления денежных средств на предъявленные в отчетном периоде работы с лицевого счета заказчика, оплата выполненных работ субподрядчику производится подрядчиком в течение 5 банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика с лицевого счета заказчика (пункт 10.1).

На основании пункта 13.3 в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях исполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.

Истцом в одностороннем порядке подписаны акты приемки выполненных работ от 01.06.2023 № 1 на сумму 4 200 660,82 руб., от 02.06.2023 № 2 на сумму 7 461 603,32 руб., от 03.06.2023  № 3 на сумму 1 616 259,66 руб., от 04.06.2023 № 4 на сумму 107 398,40 руб., от 05.07.2023  №5 на сумму 1 050 744,12 руб., а также справки о стоимости выполненных работ и затрат от 01.06.2023 № 1 на сумму 4 200 660,82 руб., от 02.06.2023 № 2 на сумму 7 461 603,32 руб., от 03.06.2023  № 3 на сумму 1 616 259,66 руб., от 04.06.2023 № 4 на сумму 107 398,40 руб., от 05.07.2023  №5 на сумму 1 050 744,12 руб.

Письмом от 05.07.2023 № 270/1 истец просил ответчика подписать акты приемки выполненных работ № 1 от 01.06.2023, № 2 от 02.06.2023, № 3 от 03.06.2023, № 4 от 04.06.2023, справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.06.2023, № 2 от 02.06.2023, № 3 от 03.06.2023, № 4 от 04.06.2023. Письмо получено обществом «Монолитстрой» согласно штампу 07.07.2023.

Письмом от 05.09.2023 № 333 истец просил ответчика подписать акты приемки выполненных работ № 1 от 01.06.2023, № 2 от 02.06.2023, № 3 от 03.06.2023, № 4 от 04.06.2023, № 5 от 05.07.2023, справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.06.2023, № 2 от 02.06.2023, № 3 от 03.06.2023, № 4 от 04.06.2023, № 5 от 05.07.2023. Письмо получено обществом «Монолитстрой» согласно штампу 06.09.2023.

Платежными поручениями № 757 от 05.08.2022 на сумму 2 481 124,88 руб., № 1773 от 29.08.2022 на сумму 1 500 000 руб., № 9112 от 14.10.2022 на сумму 400 000 руб. ответчиком частично оплачена задолженность на общую сумму 4 381 124,88 руб.

Как следует из искового заявления, субподрядчиком оказаны транспортные услуга на общую сумму 26 112,00 руб., что подтверждается универсальными передаточными документами № 237 от 01.02.2023, № 285 от 02.02.2023, № 291 от 03.02.2023, а также актами № 22 от 31.07.2022, № 23 от 31.08.2022, № 26 от 30.09.2022, подписанными сторонами без возражений.

Истец указал, что задолженность подрядчика перед субподрядчиком составляет 10 478 975,06 руб. за работы, выполненные согласно договору.

Истец также числит за ответчиком неустойку за несвоевременную оплату по договору в размере 449 545,00 руб.

В связи с неоплатой стоимости выполненных работ в установленном договором размере истец обратился к ответчику с претензией, оставленной последним без удовлетворения, что послужило основания для обращения в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с частью 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Предметом настоящего спора является требование о взыскании задолженности по оплате выполненных работ.

Факт выполнения работ по договору подтверждается подписанным истцом в одностороннем порядке актами сдачи-приемки выполненных работ от 01.06.2023 № 1 на сумму 4 200 660,82 руб., от 02.06.2023 № 2 на сумму 7 461 603,32 руб., от 03.06.2023  № 3 на сумму 1 616 259,66 руб., от 04.06.2023 № 4 на сумму 107 398,40 руб., от 05.07.2023  №5 на сумму 1 050 744,12 руб., а также справки о стоимости выполненных работ и затрат от 01.06.2023 № 1 на сумму 4 200 660,82 руб., от 02.06.2023 № 2 на сумму 7 461 603,32 руб., от 03.06.2023  № 3 на сумму 1 616 259,66 руб., от 04.06.2023 № 4 на сумму 107 398,40 руб., от 05.07.2023  №5 на сумму 1 050 744,12 руб. Материалами дела подтверждено, что акты сдачи-приемки выполненных работ получены ответчиком нарочно 07.07.2023, 06.09.2023.

При этом мотивированных возражений относительно объема и стоимости выполненных истцом работ ответчик не заявил.

Также в материалы дела представлен акт приемки выполненных работ № 1 от 10.02.2023, согласно которому истец сдал, а уполномоченный представитель ответчика принял работы по договору № б/н от 30.06.2022 на сумму 14 817 604,58 руб. Акт приемки выполненных работ подписан представителем общества «Монолитстрой».

Между тем, каких-либо доказательств, подтверждающих факт наличия недостатков (дефектов) в выполненных субподрядчиком работах (актов, фиксирующих дефекты, требований об устранении недостатков и т.п.) в материалы дела не представлено.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указал, что спорные работы выполнялись собственными силами. В подтверждение выполнения работ обществом «Монолитстрой», ответчиком в материалы дела представлена разделительная ведомость на выполнение работ на объекте: «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1, 2 очереди). 1 очередь. г. Нижневартовск, в районе озера Комсомольское».

С учетом заявленных ответчиком возражений судом неоднократно предлагалось истцу представить первичную документацию в подтверждение факта выполнения работ. Таких доказательств представлено не было.

Оценив представленную ответчиком разделительную ведомость, суд признал ее не подтверждающую факт выполнения спорных работ в рамках заключенного договора, так как невозможно соотнести с работами выполняемыми по договору от 30.06.2022.

Поскольку ответчик не представил доказательств, опровергающих факт выполнения работ истцом, не подтвердил выполнение работ с недостатками, суд приходит к выводу о том, что работы по договору выполнены и подлежат оплате.

Платежными поручениями № 757 от 05.08.2022 на сумму 2 481 124,88 руб., № 1773 от 29.08.2022 на сумму 1 500 000 руб., № 9112 от 14.10.2022 на сумму 400 000 руб. ответчиком частично оплачена задолженность на общую сумму 4 381 124,88 руб.

Как следует из искового заявления, субподрядчиком оказаны транспортные услуга на общую сумму 26 112,00 руб., что подтверждается универсальными передаточными документами № 237 от 01.02.2023, № 285 от 02.02.2023, № 291 от 03.02.2023, а также актами № 22 от 31.07.2022, № 23 от 31.08.2022, № 26 от 30.09.2022, подписанными сторонами без возражений.

Таким образом, ответчик произвел расчет с истцом частично, сумма долга составила 10 029 430,06 руб.

В связи с тем, что факт выполнения субподрядчиком работ подтверждается материалами дела, в частности представленными истцом и подписанными ответчиком отчетами об использовании давальческих материалов, в отсутствие доказательств направления ответчиком в адрес истца мотивированного отказа от приемки выполненных работ на основании статей 723, 753 ГК РФ, а также доказательств ненадлежащего выполнения работ либо несоответствие работ условиям договора ответчиком, суд признал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере 10 029 430,06 руб.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 499 545,00 руб., а также неустойку по день фактической оплаты долга.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Неустойка является текущей санкцией, начисляемой периодически с момента, когда платеж должен был быть совершен, и до момента, когда он был фактически произведен (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.02.1996 № 8244/95). Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом - исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

На основании пункта 13.3 в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях исполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.

Проверив расчет неустойки, суд признал его неверным ввиду неправильного определения периода просрочки.

Согласно пункту 8.4 подрядчик в течение 3 календарных дней с даты получения актов по формам КС-2, КС-3 от субподрядчика обязан принять выполненные работы и подписать со своей стороны акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ с замечаниями для согласования с субподрядчиком сроков их устранения.

На основании пункта 10.1 оплата работ, фактически выполненных субподрядчиком по договору, осуществляется ежемесячно, в течение 45 дней, следующих за датой получения подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Таким образом, расчет неустойки следует производить с даты получения ответчиком актов выполненных работ + 3 календарных дней + 45 календарных дней, то есть с 25.08.2023 и с 26.10.2023.

Согласно расчету суда размер неустойки за период с 25.08.2023 по 16.09.2024 (дата вынесения решения) составляет 2 375 785,91 руб., исходя из расчета:

задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

8 978 685,32

25.08.2023

Новая задолженность на 8 978 685,32 руб.

8 978 685,32

25.08.2023

17.09.2023

24

12

8 978 685,32 ? 24 ? 1/300 ? 12%

86 195,38 р.

8 978 685,32

18.09.2023

19.09.2023

2

13

8 978 685,32 ? 2 ? 1/300 ? 13%

7 781,53 р.

Сумма основного долга: 8 978 685,32 руб.

Сумма неустойки: 93 976,91 руб.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

8 978 685,32

20.09.2023

Новая задолженность на 8 978 685,32 руб.

8 978 685,32

20.09.2023

25.10.2023

36

19

8 978 685,32 ? 36 ? 1/300 ? 19%

204 714,03 р.

Сумма основного долга: 8 978 685,32 руб.

Сумма неустойки: 204 714,03 руб.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

10 029 430,06

26.10.2023

Новая задолженность на 10 029 430,06 руб.

10 029 430,06

26.10.2023

16.09.2024

327

19

10 029 430,06 ? 327 ? 1/300 ? 19%

2 077 094,97 р.

Сумма основного долга: 10 029 430,06 руб.

Сумма неустойки: 2 077 094,97 руб.

Поскольку факт нарушения ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ подтвержден материалами дела, на основании пункта 1 статьи 329, пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации требование истца о взыскании с ответчика неустойки подлежит удовлетворению частично на сумму 2 375 785,91 руб., а также неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму в размере 10 029 430,06 руб. по день фактической оплаты долга.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в суд с иском истец уплатил государственную пошлину в размере 75 395,00 руб. согласно платежному поручению от 13.10.2023 № 3681.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего дела составляет 85 026 руб.

Исходя из указанного, с учетом частичного удовлетворения исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 73 291,48 руб. В части недоплаченной государственной пошлины в размере 9 631 руб.  с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 9 362,30 руб. государственной пошлины, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию 268,70 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью СК «Стройинжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 10 029 430,06 руб. основного долга, 2 375 785,91 руб. неустойки, начисленной на дату принятия настоящего решения, а также неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму в размере 10 029 430,06 руб. по день фактической оплаты долга, 73 291,48 судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 9 362,30 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Стройинжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 268,70 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

О.А. Бахрамова