АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ул. Железнодорожная, д. 14, 

<

...> 

Тел. 

<

***> Факс 

<

***> E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г. Ульяновск 

27.10.2025 Дело № А72-6273/2025  

Резолютивная часть решения объявлена 14.10.2025. Решение изготовлено в полном объеме 27.10.2025.  

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Тронькиной О.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания до и после перерыва секретарем  

судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Акционерного общества «Ульяновскнефтепродукт» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>), г. Ульяновск 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«Феникс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 420088, Республика Татарстан, г. Казань о взыскании 910 352 руб. 65 коп., 

при участии в судебном заседании: 

от истца – до и после перерыва – ФИО2, паспорт, доверенность, диплом;  

от иных лиц, участвующих в деле – явка представителей не обеспечена, извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом в соответствии с положениями статьи 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: http://ulyanovsk.arbitr.ru;  

установил:

28.05.2025, посредством системы web-сервис «Мой арбитр», в Арбитражный суд Ульяновской области поступило исковое заявление Акционерного общества «Ульяновскнефтепродукт» к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Феникс» о взыскании задолженности в размере 910 352 руб. 65 коп., из которых: 270 462,90 руб. – неустойка в порядке пп.2.1., 2.2 Приложения № 7 к Договорам №№ 3850824/0411Д, 3850824/0425Д, 71 098,87 руб. – неустойки в порядке п.2.3 приложения № 7 к Договорам №№ 3850824/0411Д, 3850824/0425Д, 568 790,88 руб. – неустойки в порядке п.2.19 Приложения № 7 к Договорам №№ 3850824/0411Д, 3850824/0425Д, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 50 518 руб. 00 коп.  

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 04.06.2025 исковое заявление принято к производству; возбуждено производство по делу в порядке упрощенного производства.  

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 28.07.2025 суд определил рассмотреть дело по общим правилам искового производства; назначено предварительное судебное заседание.  

30.07.2025, посредством системы web-сервис «Мой арбитр», в суд от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, во исполнение определения суда от 28.07.2025.  

Определением от 25.08.2025 на основании части 1 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд признал возможным завершить подготовку дела в данном предварительном судебном заседании и определил назначить рассмотрение дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции на 30.09.2025.  

До судебного заседания в рамках рассмотрения искового заявления от лиц, участвующих в деле, какие-либо документы не поступали.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал; дополнительных пояснений не имеет; ответил на вопросы суда.  

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 07.10.2025 до 11 час. 30 мин. (местное время, МСК + 1 час), о чем вынесено протокольное определение.  

Сведения о месте и времени продолжения судебного заседания размещены на официальном сайте Арбитражного суда Ульяновской области в сети Интернет по адресу: www.ulyanovsk.arbitr.ru.  

06.10.2025, посредством системы web-сервис «Мой арбитр», в суд от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с необходимостью предоставления времени для сбора доказательств и представления в суд, а именно, для запроса от контрагентов подтверждающих документов о найме техники и оплате платежных поручений, найме специалистов.  

После перерыва судебное заседание продолжено 07.10.2025.  

Суд исследовал представленные документы и приобщил их к материалам дела в порядке статей 65, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал; дополнительных пояснений не имеет; возражал против отложения судебного заседания.  

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания ввиду отсутствия процессуальной необходимости.  

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 14.10.2025 до 13 час. 50 мин. (местное время, МСК + 1 час), о чем вынесено протокольное определение.  

Сведения о месте и времени продолжения судебного заседания размещены на официальном сайте Арбитражного суда Ульяновской области в сети Интернет по адресу: www.ulyanovsk.arbitr.ru.  

После перерыва судебное заседание продолжено 14.10.2025.  

Во время перерыва в судебном заседании от лиц, участвующих в деле, какие-либо документы не поступали.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал; дополнительных пояснений не имеет; ответил на вопросы суда.  

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.  

При данных обстоятельствах дело рассматривается в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст.156 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.  

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что исковые требования Акционерного общества «Ульяновскнефтепродукт» следует удовлетворить.  

При этом суд руководствовался следующим. 

14.08.2024 и 21.08.2024 между АО «Ульяновскнефтепродукт» (далее – Общество, Заказчик) и ООО «СК «Феникс» (далее – Подрядчик) были заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ № 3850824/0411Д, № 3850824/0425Д (далее  

- Договоры), по условиям которых Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объектам: «Техническое перевооружение РВС-2000 № 43 на Ульяновской нефтебазе», «Техническое перевооружение РВС-2000 № 44 на Ульяновской нефтебазе» (далее - Объекты), соответственно, и передать Заказчику завершенные строительством объекты, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

Согласно п.3.1 договора № 3850824/0411Д от 14.08.2024, цена договора, не превысит 1 929 627 руб. 60 коп.  

Согласно п.3.1 договора № 3850824/0425Д от 21.08.2024, цена договора, не превысит 3 758 281 руб. 20 коп.  

Пунктом 5.1 договоров установлены календарные сроки выполнения работ по договорам: срок начала выполнения работ - с момента подписания, срок окончания выполнения работ – 31.10.2024.  

Работы, предусмотренные договорами по объектам, выполняются Подрядчиком согласно Графикам производства Работ (Приложение № 4) по законченным этапам и оперативному Графику производства Работ.  

При этом стороны договорились, что никакие обстоятельства не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ (п.5.2 Договоров).  

Стороны согласовали, что сроки выполнения Подрядчиком работ по Договору продлеваются путем оформления дополнительного соглашения (п. 5.3. Договоров).  

Вместе с тем, в период действия Договоров, указанные выше дополнительные соглашения между Заказчиком и Подрядчиком заключены не были.  

Пунктом 23.1. Договоров стороны предусмотрели, что конкретные нарушения и меры ответственности за конкретные нарушения согласованы сторонами в Приложении № 7.  

В силу п. 2.1., п. 2.2 Приложения № 7 в случае нарушения Подрядчиком срока окончания Работ (Этапа Работ) (срыв Графика выполнения Работ) по вине Подрядчика на срок до/свыше 30 дней, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 %, 0,1 %, соответственно, от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 20% за весь срок просрочки.  

Кроме того, согласно положениям п. 2.3 Приложения № 7 к договорам за нарушение подрядчиком срока сдачи объекта в целом предусмотрены штрафные санкции в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 20 % за весь срок просрочки.  

Пунктом 2.19 приложения № 7 к Договорам установлено, что в случае отказа заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 26.5 - подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от цены договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 717 ГК РФ.  

В соответствии с п.26.5 Договоров Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случае если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению Дефектов (ст. 715 ГК РФ).  

Поскольку работы Подрядчиком в установленные сроки выполнены не были, то Заказчик был вынужден расторгнуть Договоры в одностороннем порядке.  

На основании п. 26.5 Договоров и ст. 715 ГК РФ истец направил соответствующее уведомление исх. № 1437 от 25.11.2024 в адрес Подрядчика.  

В соответствии со статьей 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.  

Согласно статье 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.  

В части 2 статьи 715 ГК РФ установлено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Ответчик о дате, времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом, однако, заявленные исковые требования не оспорил.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

В соответствии с расчетом истца неустойка в соответствии с п.п.2.1., 2.2. Приложения № 7 к Договорам за период с 31.08.2024 (срок окончания работ по договорам) по 25.11.2024 (дата расторжения договоров) составляет 270 462 руб. 90 коп., из которых:  

- 78 490,94 руб. по договору № 3850824/0411Д от 14.08.2024 (сроки выполнения указанных в расчете этапов работ закреплены сторонами в приложении № 4 к договору «График производства работ»);  

- 191 971,96 руб. по договору № 3850824/0425Д от 21.08.2024 (сроки выполнения указанных в расчете этапов работ закреплены сторонами в приложении № 4 к договору «График производства работ»);  

Согласно расчета истца неустойка в порядке п.2.3. Приложения № 7 за период с 01.11.2024 по 25.11.2024 включительно составляет 71 098,87 руб., из которых:  

- 24 120,35 руб. по договору № 3850824/0411Д от 14.08.2024 - 46 978,52 руб. по договору № 3850824/0425Д от 21.08.2024.  

Согласно расчета истца в связи с расторжением договоров в одностороннем порядке на основании Уведомлением исх. № 1437 от 25.11.2024 неустойка в порядке п.2.9. Приложения № 7 составляет 568 790,88 руб., из которых:  

- 192 962,76 руб. по договору № 3850824/0411Д от 14.08.2024 (1 929 627,60× 10%); - 375 828,12 руб. по договору № 3850824/0425Д от 21.08.2024 (3 758 281,20× 10%);. Таким образом, общий размер неустойки по двум договорам составляет 910 352 руб. 65 коп., из которых: - 270 462,90 руб. - неустойка в порядке пп.2.1., 2.2 Приложения № 7 к договорам; 

- 71 098,87 руб. – неустойки в порядке п.2.3 Приложения № 7 к договорам; - 568 790,88 руб. – неустойки в порядке п.2.19 Приложения № 7 к договорам.  

Судом расчеты неустойки, представленные истцом, проверены. 

Ответчиком арифметический расчет неустойки истца не оспорен, контррасчет не представлен.  

Учитывая изложенное, исковые требования Акционерного общества «Ульяновскнефтепродукт» следует удовлетворить.  

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ по иску следует возложить на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176-177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

РЕШИЛ:

Ходатайство ответчика об отложении судебного заседания оставить без удовлетворения.  

Исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Феникс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Ульяновскнефтепродукт» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

910 352 руб. 65 коп., из которых: 

270 462,90 руб. – неустойка в порядке пп.2.1., 2.2 Приложения № 7 к Договорам №№ 3850824/0411Д, 3850824/0425Д,  

71 098,87 руб. – неустойки в порядке п.2.3 приложения № 7 к Договорам №№ 3850824/0411Д, 3850824/0425Д,  

 568 790,88 руб. – неустойки в порядке п.2.19 Приложения № 7 к Договорам №№ 3850824/0411Д, 3850824/0425Д,  

а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 518 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его принятия.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст. ст. 257-259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья О.Ю. Тронькина  

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи