АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-8312/2023 

от 20 мая 2024 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования товарищества собственников жилья "Мечта-1" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить частично. 

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение тридцати календарных дней  со дня вступления решения суда по делу № А05-8312/2023 в законную силу устранить  недостатки работ, выполненных на объекте по адресу: 

<

...>  по договорам подряда № 8 от 23.06.2020 и № 8 от 12.06.2021, указанные в таблице № 3  раздела 4 экспертного заключения ИП ФИО2 № 15-23-ЭЗ, а именно:  

1. Парапет по оси "5", вблизи оси "6" - дефект водоизоляционного ковра  (отсутствует соединение по шву). Для устранения дефекта выполнить ремонт (замену)  участка покрытия.  

2. Вблизи выхода на кровлю № 1 - дефект водоизоляционного ковра (отсутствует  соединение слоев). Для устранения дефекта выполнить ремонт (замену) участка покрытия.  

3. Водоизоляционный ковер вблизи ВШ-2 - дефект соединения, ширина вытекания  битумной массы из шва более 25 мм. Для устранения дефекта выполнить ремонт (замену)  участка покрытия.  

4. Водоизоляционный ковер вблизи ВШ-2 - дефект водоизоляционного ковра  (отсутствует соединение слоев). Для устранения дефекта выполнить ремонт (замену)  участка покрытия.  

 5. Вент.шахта № 7 (ВШ-7) - отсутствует прижимная рейка (хомут) с защитой  герметиком. Для устранения дефекта выполнить монтаж прижимной рейки (хомута) с  защитой герметиком.  

6. Парапет по оси "5" в осях "3"-"4" - дефект водоизоляционного ковра (отсутствует  соединение слоев, неравномерная ширина вытекания битумной массы). Для устранения  дефекта выполнить ремонт (замену) участка покрытия.  

7. Парапет по осям "2" и "А" - дефект водоизоляционного ковра (отсутствует  соединение слоев). Для устранения дефекта выполнить ремонт (замену) участка покрытия.  

8. Вент.шахта № 19 (ВШ-19) - отсутствует прижимная рейка (хомут) с защитой  герметиком. Для устранения дефекта выполнить монтаж прижимной рейки (хомута) с  защитой герметиком.  

9. Вент.шахта № 15 (ВШ15) - заведение дополнительного водоизоляционного ковра  на вертикальную поверхность менее чем на 300 мм, отсутствует прижимная рейка с  защитой герметиком. Для устранения дефекта выполнить заведение дополнительного  водоизоляционного ковра на вертикальную поверхность не менее чем на 300 мм.;  выполнить монтаж прижимной рейки с защитой герметиком.  

10. Вент.шахты №№ 16, 17 (ВШ 16,17) - отсутствует прижимная рейка (хомут) с  защитой герметиком. Для устранения дефекта выполнить монтаж прижимной рейки  (хомута) с защитой герметиком.  

11. Вет.шахта № 19 (ВШ19) - заведение дополнительного водоизоляционного ковра  на вертикальную поверхность менее чем на 300 мм, отсутствует прижимная рейка с  защитой герметиком. Для устранения дефекта выполнить заведение дополнительного  водоизоляционного ковра на вертикальную поверхность не менее чем на 300 мм;  выполнить монтаж прижимной рейки с защитой герметиком.  

12. Заменить водоприемную воронку - 1 шт. 

На случай неисполнения индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) решения  суда по делу № А05-8312/2023 в части обязательства по устранению недостатков в  выполненных работах взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу товарищества  собственников жилья "Мечта-1" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) денежную  сумму (судебную неустойку) за каждый день неисполнения решения суда в следующем  размере: со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока устранения  недостатков - в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда;  

затем по истечении трех месяцев со дня, следующего за днем окончания установленного  судом срока устранения недостатков - в размере 2 000 руб. 00 коп. за каждый  

день неисполнения решения суда; затем по истечении двенадцати месяцев со дня,  следующего за днем окончания установленного судом срока устранения недостатков -  

в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда по дату  исполнения.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу товарищества собственников  жилья "Мечта-1" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 6 359 руб. 81 коп.  неосновательного обогащения, 35 000 руб. 00 коп. убытков, 7 531 руб. 00 коп.  

в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с товарищества собственников жилья "Мечта-1" (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) 35 495 руб. 00 коп. в  возмещение расходов по оплате судебной экспертизы.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

 Судья Н.В. Бутусова.