АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 53819/2024-3-396

г. Москва

02 мая 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б.,  

с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (111123, ГОРОД МОСКВА,  НОВОГИРЕЕВСКАЯ УЛИЦА, 3А, ОГРН: 1027700046615, Дата присвоения ОГРН:  12.08.2002, ИНН: 7720024671) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ" (109004,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ,  ПЕСТОВСКИЙ ПЕР., Д. 16, СТР. 1, ОГРН: 5107746048878, Дата присвоения ОГРН:  22.12.2010, ИНН: 7718831276) об обязании с учетом принятых судом уточнений  исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ,  

В судебное заседание явились: От истца: Ревинская М. А., по дов. от 25.01.2024 г. 

От ответчика: Зебницкий М.Д., по дов. от 30.11.2023 г., диплом,  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«Гарант» безвозмездно устранить недостатки изыскательских работ, выполненных по  

договорам № 24/12/21-1 от 24.12.2021, № 24/12/21-2 от 24.12.2021, обнаруженные в  

течение гарантийного срока, а именно: ФКУЗ "Элистинская противочумная станция" 

-изыскания в техническом отчете (3-ИГИ) не советствуют согласованной  

посадке здания; 

-раздел архитектурно-градостроительные решения не соответствует  

согласованной посадке здания; 

-архитектурно-градостроительное решение объекта не соответствует параметрам  

актуального задания на проектирование. ФКУЗ "Алтайская противочумная станция" 

-не представлены технические условия на технологическое присоединение к  

сетям ресурсоснабжающих организаций; 

-изыскания в техническом отчете не советует согласованной посадке и  

габаритам здания; 

-неверно указана посадка здания в эскизном проекте 24-12-2-1-1 -2022-ПП на  стр. 177,178,179.  

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" 

-отсутствует сведение о нагрузках на инженерные сети, необходимые для  получения технических условий на технологическое присоединение к сетям;  

-отсутствуют схемы разверток фасадов по основным улицам; 

- отсутствует инструментальное обследование здания, находящегося в  непосредственной близости к проектируемому объекту.  

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"  

-комплектность ИРД не соответствует требованиям ст. 45-51  Градостроительного кодекса РФ;  

-частично отсутствуют сведения об инженерных нагрузках необходимых для  инженерного обеспечения проектируемого здания;  

-отсутствуют сведения о проведении археологических полевых работ на  земельном участке;  

-отсутствует заключение историко-культурной экспертизы. ФБУЗ "Центр  гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"  

-в альбомах инженерных изысканий предполагаемое место размещения здания  лабораторного корпуса не соответствует согласованной с ФБУЗ посадкой здания  (проектируемый лабораторный корпус должен располагаться на участке с кадастровым  номером 24:50:0500175:34, а не «на месте действующего лабораторного корпуса»);  

-в отчетах по инженерным изысканиям размещение здание указано не верно  (отчет по инженерно-геодезическим изысканиям - стр. 7, 37,40; инженерно-метеорологическим изысканиям - стр.51,52; инженерно-геологическим изысканиям -  стр.41, 42).  

ФКУЗ "Хабаровская противочумная станция" 

-в представленной документации отсутствуют наименование и печать  организации, даты, подписи и должности исполнителей;  

- программе работ по ИГДИ неверно указан объем работ табл.4-1 (4Га, при  факте 3,42Га);  

-отсутствует приложения к техническому отчету шифр 1-02/2022/ИГДИ; 

-в программе работ по ИГИ (3 лист, 21 сверху строка) указана информация, не  относящаяся к объекту строительства («на объекте проектируется строительство двух  многоквартирных домов с автомобильной стоянкой»);  

-в техническом отчете по ИГИ шифр 1-02/2022/ИГИ (6 лист, 21 сверху строка)  указана информация, не относящаяся к объекту строительства («на объекте  проектируется строительство двух многоквартирных домов с автомобильной  стоянкой»);  

-в техническом отчете по ИГИ шифр 1-02/2022/ИГИ отсутствуют заявленные в  программе работ акт бурения скважин и акт о ликвидации выработок, а также  отсутствуют фотоматериалы подтверждающие выполнения работ по бурению скважин  (приложение А. п. 13-2).  

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" 

-архитектурно-градостроительные решения не имеют отношения к объекту  «Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для  оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций, г.  Пермь».  

-предложенный ситуационный план не соответствует габаритам объекта,  который представляет собой 3-х этажное здание размером 59,95 метров, и не может  разместиться в границах земельного участка.  

-исходно-разрешительная документация на момент передачи является  устаревшей и непригодной для проектирования объекта  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ "ГАРАНТ" (109004, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, ПЕСТОВСКИЙ ПЕР., Д. 16, СТР. 1,  ОГРН: 5107746048878, Дата присвоения ОГРН: 22.12.2010, ИНН: 7718831276) в пользу  ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (111123, ГОРОД МОСКВА,  НОВОГИРЕЕВСКАЯ УЛИЦА, 3А, ОГРН: 1027700046615, Дата присвоения ОГРН:  12.08.2002, ИНН: 7720024671) расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть  тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

 Судья А. А. Федоточкин