Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-72491/20

28 июля 2021 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску ООО  "ИНСИСТЕМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ- ХОЛДИНГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании договора  незаключенным, взыскании неосновательного обогащения, судебных расходов, по  встречному иску о признании договора незаключенным, взыскании неосновательного  обогащения, судебных расходов, по встречному иску о признании Договора № 1Г/31-07-20  от 31.07.2020 фактически заключенным в предложенной заявителем редакции, взыскании  задолженности в размере 6 511 473,17 руб., процентов за период с 26.11.202 г. по  11.12.2020г. в размере 52091,79 руб., расходов по уплате государственной пошлины,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.  Встречные требования удовлетворить. 

Признать заключенным Договор № 1Г/31-07-20 от 31.07.2020г. между ООО  "ИНСИСТЕМ" как Заказчиком и ООО "ЭНЕРГОТЕХИОНТАЖ-ХОЛДИНГ" как  подрядчиком фактически заключенным в следующей редакции:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в объеме, указанном в  Ведомости объемов работ (Приложения № 1) в установленный договором срок, своими  силами выполнить работы по монтажу оборудования и трубопроводов (далее - Работы) в  рамках выполнения ремонтных работ на объекте: котельная № 6/3: в/г № I; Архангельская  обл.: арх. Новая Земля: п. Белушья Губа: в/ч 77510 (далее - Объект).  

1.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что имеет право выполнять все виды работ.  необходимых для исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору.  

2. СУММА ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ РАБОТ  

2.1.Сумма Договора определяется Сметным расчетом (Приложение № 2). и составляет  8 239 473 рубля 17 копеек (Восемь миллионов двести тридцать девять тысяч четыреста  семьдесят три рубля 17 копеек), НДС 20% 1373245 рублей 53 копейки.  

2.2. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению  Сторон при возникновении работ, не предусмотренных настоящим договором.  

2.3. В Сумму Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых  для выполнения Работ по Договору, в том числе:  

2.3.1. стоимость всех Работ согласно условиям Договора: 2.3.2. стоимость всех Работ согласно Ведомости объема работ; 

2.3.3. затраты, связанные с обеспечением выполнения работ Объекта рабочими:  заработная плата, командировочные расходы, страхование;  

2.3.4. накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все  налоги. действующие на момент заключения Договора:  

2.3.5. все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения  Подрядчиком всех обязательств по Договору.  

2.4 Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора  и не подлежит изменению в ходе выполнения Договора, за исключением случаев.  предусмотренных законодательством Российской Федерации, что оформляется Сторонами  Дополнительным соглашением к Договору.  

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения  объемов и качества Работ и иных условий Договора.  

2.6. При исполнении Договора по соглашению сторон допускается изменение  предусмотренного Договором объема и (или) видов выполняемых Работ. При этом  допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской  Федерации цены Договора не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после  подписания договора авансовый платеж в размере I 728 000 рублей 00 копеек (Один миллион  семьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). 11ДС 20% 288000 рублей 00 копеек.  

3.2. После завершения всех работ согласно Ведомости объемов работ (Приложения   № 1) в течении 3 (трех) рабочих дней Подрядчик направляет заказчику Акт выполненных  работ.  

3.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных  документов проверяет их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1  (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки  выполненных Работ с перечнем необходимых к устранению недостатков, замечаний и сроков  их устранения. Если в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированный отказ не направлен  Подрядчику, то работы считаются принятыми.  

3.4. Доведение результата Работ до соответствия требованиям, установленным  Договором, в том числе до надлежащего качества, не освобождает Подрядчика от  ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по выполнению Работ в сроки.  предусмотренные Договором.  

3.5. Для проверки соответствия качества результата выполняемых Подрядчиком  Работ требованиям, установленным Договором. Заказчик проводит экспертизу результата  выполняемых Работ собственными силами, в том числе путем создания приемочной  комиссии, или с привлечением независимых экспертов. В случае привлечения Заказчиком  независимых экспертов к проверке соответствия качества результата  

выполняемых Подрядчиком Работ требованиям, установленным Договором, такая проверка  осуществляется в течение времени, необходимого для проведения проверки результата Работ  в объеме требований, предусмотренных Договором, но не более 10 (десяти) дней с момента  предъявления результата Работ к приемке Заказчику. Результаты экспертизы оформляются  заключением о соответствии (не соответствии) результата Работ по качеству требованиям.  установленным Договором, с подробным описанием выявленных недостатков. Заключение  оформляется в 3 (трех) экземплярах: I (один) экземпляр остается у эксперта, а остальные в  

течение 5 (пяти) дней после завершения экспертизы направляются Заказчику и 11одрядчику.  с приложением копий материалов проверки.  

3.6. Заказчик Отказывается от подписания акта о приемке выполненных работ в  случае. если содержащиеся в акте о приемке выполненных работ состав работ и их  стоимость не соответствуют Договору.  

3.7. Расчеты осуществляются в безналичном порядке путем перечисления  соответствующих сумм на расчетный счет Подрядчика.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Подрядчика: 

4.1.1.Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме  и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, сдать Заказчику  все работы вместе с документацией, необходимой и достаточной для эксплуатации.  

4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в  соответствии с проектной документацией, действующими нормами. ГОСТами, СНИПами.  техническими условиями и пожеланиями Заказчика.  

4.1.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке  необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, рациональному  использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.  

4.1.4.Нести ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика общепринятых  норм поведения, правил техники безопасности, специальных внутренних правил и  ограничений.  

4.1.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору  субподрядчиков, при этом обязан нести ответственность перед Заказчиком за деяния  (действия/бездействия), качество и иное надлежащее исполнение обязательств по Договору  субподрядчиками, в случае их привлечения.  

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с  нарушением договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком.  

4.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него  указаний приостановить работы при обнаружении:  

- невозможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его  указаний о способе исполнения работы;  

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов  выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.  

4.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и  оборудования, используемых для проведения работ и/или материальных ценностей  Заказчика поврежденных или утраченных в результате деяний Подрядчика.  

4.1.8 При полном завершении работ в пятидневный срок известить об этом Заказчика.  

4.1.9. Для осуществления доступа к месту проведения работ, своевременно  предоставлять Заказчику необходимые и достаточные сведения.  

4.1.10. Вывезти в 10-ти дневный срок со дня завершения предусмотренных  Договором Работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или  

его субподрядчикам строительное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь,  строительные материалы. изделия, конструкции и другое имущество.  

4.2. Права и обязанности Заказчика: 

4.2.1. Заказчик обязан предоставить доступ к месту проведения работ с соблюдением  установленного на территории Заказчика пропускного режима.  

4.2.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику площадки для выполнения работ  свободную от коммуникаций, мусора, прочих предметов и сооружений, мешающих  выполнению монтажных работ.  

4.2.3. Заказчик обязан обеспечить доставку с материка на объекты и обратно и  проживание рабочих и специалистов Подрядчика.  

4.3.4. По запросу Подрядчика предоставить ему дополнительные сведения и  

информацию. необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.2.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке.  

предусмотренном настоящим Договором. 

4.2.6. Заказчик обязуется предоставить точки подключения к электроэнергии и  

водопроводу в границах площадки проведения работ. 

4.2.7. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы,  

выполняемой Подрядчиком. не вмешиваясь в его деятельность.  

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Порядок и сроки выполнения работ определены согласно Графиков выполнения  

работ (11риложсния № 4 и № 5) 

5.2 Подрядчик выполняет весь комплекс работ в течение 100 (ста) календарных дней  

от даты перечисления аванса согласно п. 3.1. настоящего договора. 

5.3. При просрочке платежей Заказчиком срок выполнения работ увеличивается на  

количество дней просрочки. 

5.4. Подрядчик имеет право досрочно выполнить свои обязательства по Договору, а  

Заказчик оплатить выполненные работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

6.1. Подрядчик гарантирует: 

6.4.1. возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного  срока;  

6.4.2. бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и  налаженных Подрядчиком. при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок:  

6.4.3. высокое качество всех Работ и нормальное функционирование смонтированного  и налаженного Подрядчиком оборудования:  

6.4.4. достижение Объектом указанных в Ведомостях объемов работ показателей и  возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет  ответственность за отступления от них:  

6.4.5. своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов выполненных  Подрядчиком работ, выявленных в период гарантийного срока.  

6.5.Гарантийный срок начинается с момента подписания акта о приемке выполненных  работ и устанавливается на выполненные Работы сроком на 2 (два) года.  

6.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ).  имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения  Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком  составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов  и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти)  календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на  период устранения дефектов.  

6.7. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные  дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух)  календарных дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах  направить своего представителя.  

6.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта  Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.  привлекаемой за счет Подрядчика при условии, если дефекты, указанные в рекламационном  акте возникли по его вине.  

6.9. Если Подрядчик не устраняет дефекты, возникшие по его вине в сроки,  определяемые рекламационным актом. Заказчик имеет право устранить дефекты и  недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Если Подрядчик не выполнит надлежащим образом свои обязательства в  сроки. предусмотренные настоящим Договором, он обязуется уплатить Заказчику пени в  размере 0,05 (пять сотых процента) % от суммы невыполненных работ за каждый день  просрочки, но не более 5 % от суммы не выполненных работ.  

7.2. В случае просрочки Заказчиком платежа по п.3.3. настоящего договора, он  выплачивает Подрядчику пени в размере 0.05 % от суммы просроченного платежа за каждый  день просрочки, но не более 5 % от суммы платежа.  

7.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязанностей по  настоящему Договору.  

7.4. Стороны пришли к соглашению, что к денежным обязательствам по настоящему  Договору законные проценты, установленные п. 1 ст. 317.1. Гражданского Кодекса РФ. не  применяются.  

7.5. Начисление пени Сторонами осуществляется на основании выставленной  виновной стороне письменной претензии, которая должна быть рассмотрена ею не позднее 5  рабочих дней с момента ее получения.  

7.6. В случае разрушения Объекта вследствие некачественного выполнения работ.  Подрядчик обязуется возместить Заказчику все понесенные убытки.  

7.7. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств,  установленных Договором.  

8. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное  неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться  следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение  и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также имеющие обязательную  силу хотя бы для одной из сторон постановления или распоряжения правительства  (правительственных органов), возникшие после заключения Договора.  

8.2. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 90 дней, любая  из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив для  этого соответствующее письменное уведомление другой Стороне.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до  полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.  

9.2. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться  от исполнения Договора, предварительно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих  дней. При одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику  только фактически и надлежаще выполненные Подрядчиком Работы, выполнение которых  предусмотрено Договором. Подрядчик обязуется прекратить выполнение Работ с момента  получения уведомления об отказе от исполнения Договора.  

9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения  договора без соблюдения срока, указанного в п. 9.2. Договора, если:  

- Подрядчиком два раза в течение срока исполнения Договора нарушены требования  по качеству выполнения работ (в выполненных работах обнаружены недостатки):  

- в случае возбуждения процедуры реорганизации и (или) ликвидации Подрядчика, а  также в случае предъявления в арбитражный суд заявления о признании Подрядчика  несостоятельным (банкротом).  

9.4. При досрочном прекращении Договора по любым основаниям Подрядчик  обязан:  

- в течение 3 (трех) календарных дней передать Заказчику по акту результат  незавершенных Работ, а также всю документацию, связанную с выполнением Работ.  

- в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Заказчику в полном объеме  предоставленный аванс за вычетом неоплаченной стоимости фактически и надлежаще  выполненных Подрядчиком Работ, по подписанным Сторонами Актам сдачи-приемки  выполненных работ.  

- в течение 5 (пяти) рабочих дней передать Заказчику материал, полученный  Подрядчиком для производства Работ и не использованный на дату прекращения Договора.  

9.5. В случае прекращения Договора по причине ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательств по Договору или по инициативе Подрядчика, не связанной с  нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется в течение 5  (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего требования Заказчиком  компенсировать все убытки Заказчика, вызванные таким прекращением.  

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ  ИНФОРМАЦИИ  

10.4. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему  договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических  знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут  рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не  вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.  

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1 Расторжение Договора допускается исключительно: I 1.1.1. по соглашению Сторон; 

I 1.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством;  

11.1.3. в случае принятия стороной решения об одностороннем отказе от исполнения  Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации  для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:  

11.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не  позднее чем в течение 3 (грех) рабочих дней с даты принятия указанного решения  направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу  Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной  связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и  доставки. обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком  подтверждения его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований  настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем  отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата  получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо  дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу,  указанному в Договоре.  

11.3. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не  позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется  Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,  указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо  по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки.  обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком  подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего  пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от  исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения  Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.  

11.4. Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в  силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты  надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения  Договора.  

11.5 При расторжении Договора до завершения работ Подрядчик возвращает  Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления  соответствующего требования незавершенный строительством Объект и представляет  Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по  Договору, а также освобождает строительную площадку.  

11.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по  нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели  место до расторжения Договора.  

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

12.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его  изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые  договоренности, при необходимости, оформляются в виде не противоречащих  законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных  Сторонами и скрепленных печатями.  

12.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по  Договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.  

12.3. До передачи спора на разрешение суда стороны примут меры к его  урегулированию в претензионном порядке.  

12.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица  Заказчика (Подрядчика) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны  узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих  обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на  претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала  претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с  уведомлением.  

12.5. В претензии должны быть указаны следующие данные:  - основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии:  

- предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по  каждому отдельному виду требования (факту нарушения);  

- подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее; - список прилагаемых документов; 

- реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления  денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);  

- дата составления претензии. 

12.6. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих  обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.  

12.7. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором  или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается  заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок  15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.  

12.8. При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии,  оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она  считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с  нарушением порядка. установленного Договором, не прерывает течения срока,  установленного для ее предъявления.  

12.9. Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой  получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров - 30 (тридцать)  календарных дней с момента получения претензии Стороной.  

12.10. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде (по месту  исполнения контракта) при обязательном соблюдении претензионного порядка,  установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения  претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Договором  срок.  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. По завершении Гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений  Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению  друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны подтверждают факт выполнения  всех своих (взаимных) обязательств по Договору.  

13.2. Стороны договорились о том. что документы, переданные по факсу  (электронной почте), являются достоверными и признаются имеющими юридическую силу  до момента получения Сторонами подлинников таких документов. Полученное по факсу  сообщение признается достоверно исходящим от передающей Стороны, если сообщение  содержит отметку факсимильного аппарата Стороны-отправителя с его наименованием и  номером телефона и подтверждается рапортом факсимильного аппарата Стороны- отправителя. содержащим сведения о приеме сообщения Стороной-получателем. Документы  направляются по номеру факса (адресу электронной почты), указанному в разделе Договора  «Адреса и банковские реквизиты Сторон».  

13.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще  способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих  взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.  

13.4. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме и направляется  заказным письмом Заказчику по его адресу, указанному в разделе «Адреса и банковские  реквизиты сторон».  

13.5. В случае изменения у одной из Сторон юридическою и (или) почтового адреса,  банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с  момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.  Изменение банковских реквизитов Подрядчика оформляется дополнительным соглашением  к Договору.  

13.6. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями.  Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

13.7. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.  Содержание приложений применяется в части, не противоречащей условиям Договора.  

13.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  1 (первый) экземпляр - для Заказчика. 2 (второй) экземпляр - для Подрядчика.  

13.9. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за  исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по  Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния  или присоединения.  

13.10. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение  касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением  Договора.  

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 

Приложение № 1 Ведомость объемов работ на котельной № 6/3: в/г № 1;  Архангельская обл.: арх. Новая Земля: п. Белушья Губа; в/ч 77510  

Приложение № 2. Сметный расчет. 

Ведомость объемов выполненных работ и сметный расчет в соответствии с  приложенной редакцией Договора № 1 Г/31-07-20 от 31.07.2020 г.  

15. АДРЕСА, ПОДПИСИ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ООО «ИНСИСТЕМ» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, КПП  772401001 ПОДРЯДЧИК:  

ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ -ХОЛДИНГ» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, КПП 502701001 

Взыскать с ООО "ИНСИСТЕМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-ХОЛДИНГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  задолженность в размере 6 511 473 руб. 17 коп., проценты за период с 26.11.2020г. по  11.12.2020г в размере 52 091 руб. 79 коп., расходы по уплате государственной пошлины в  размере 61 818 руб.  

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции  обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова