АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-12106/2017

09 августа 2018 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения оглашена  02.08.2018

Полный текст решения изготовлен  09.08.2018

Арбитражный суд Республики Крым  в составе судьи  Гайворонского В.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Крымэталонстрой»

к Государственному казенному учреждению Республики Крым «Управление капитального ремонта многоквартирных домов»

о взыскании денежных средств по государственному контракту

при участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности б/н от 09.01.2018;

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности №08-11 от 25.07.2018;

Обстоятельства дела: Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства по государственному контракту в размере 346 563,25 руб.

Исковые требования истцом обосновываются не исполнением ответчиком своих обязательств по договору, выразившихся в неоплате проведенных дополнительных работ по капитальному ремонту кровли.

Ответчик предоставил отзыв на исковое заявление, где указал, что дополнительные работы по договору не были согласованы и тем самым осуществление оплаты является невозможным.

В судебном заседании, которое состоялось 26.07.2018, объявлен перерыв по 02.08.2018.

Рассмотрев материалы дела суд, -

                                                      УСТАНОВИЛ:

Между ГКУ РК «Управление капремонта МКД» (заказчик по контракту) и ООО «Крымэталонстрой» (подрядчик по контракту) был заключен Контракт № Ф.2016.210578 от 17.08.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома (далее - Контракт). 

Согласно пункту 1.1 Контракта подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов, расположенных по адресу: 

<

...>,  в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием, планом-графиком выполнения работ и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью Контракта. 

Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, своими силами и средствами, из своих расходных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, в том числе с привлечением субподрядных организаций, на условиях настоящего Контракта (пункт 1.2 Контракта). 

В соответствии с пунктом 1.3 Контракта, подписывая настоящий Контракт, подрядчик подтверждает, что: 

- подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ; 

- подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены государственного контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информации. 

Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет 1 192 492,21 рублей, в т.ч. НДС 18 % - 181 905,59 руб. (пункт 2.1 Контракта). 

Срок начала работ: с даты подписания Контракта. Срок окончания работ: не позднее 01.11.2016 (пункт 3.2 Контракта). 

В соответствии п. 1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить Работу согласно Раздела 3 Контракта.

Согласно п. 1.6.1. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и Охраны Окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ. 

Согласно п. 1.6.2. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены государственного контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информации. 

В соответствии п. 2.4. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. 

Допускается увеличение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на 10% или уменьшение предусмотренного контрактом количества объема работ не более чем на 10%. При этом допускается изменение с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10%. 

Согласно п. 3.1. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 30-ти дней с даты подписания обеими сторонами справки о стоимости выполненных Работ и затрат (формы № КС-3) и актов о приемке выполненных Работ (формы № КС-2), а так же предоставления Подрядчиком в службу Заказчика акта ввода в эксплуатацию, счета и счета-фактуры, журнала производства работ по форме КС-6, соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов на русском языке, удостоверяющих качество используемых материалов за исключением случая, указанного в пункте 2.4 настоящего Контракта. 

Согласно п. 3.2 Аванс по Контракту не предусмотрен. 

Согласно п. 3.3. Цена настоящего контракта не может быть увеличена, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. 

В соответствии с п. 6.1 Подрядчик обязан: 

п. 6.1.1. Выполнить Работы в соответствии с техническим заданием, Графиком, сметной документацией, являющимися неотъемлемыми частями Контракта. 

п. 6.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить Работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы; 

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

п. 6.1.7. Своевременно предоставлять информацию о сложностях, возникающих при исполнении Контракта

В соответствии п. 15.1 Обмен информацией и документацией между Сторонами, включая обмен письмами, претензиями, решение технических вопросов и т.д., должен осуществляться на русском языке.

В соответствии п. 15.2 Все изменения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям. 

Согласно пункта 1 статьи 743 ГК РФ Подрядчик обязан осуществлять строительные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем и содержание работ, и со сметой, определяющей цену работ. 

Согласно пункта 3 статьи 743 ГК РФ, в случае обнаружения в ходе строительства необходимости осуществления дополнительных работ, не учтенных в технической документации, проведение которых требует увеличения сметы, подрядчик обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в установленный срок подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

Согласно пункта 4 статьи 743 ГК РФ, в силу прямого предписания закона, подрядчик, не выполнивший указанные выше обязанности по уведомлению заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, влекущих увеличение сметы, и, соответственно, по приостановке работ в случае неполучения ответа, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Согласно платежных поручений ответчик перечислил истцу платежи за выполнение работ по капитальному ремонты крыш многоквартирных домов в размере: платежное поручение № 268487 от 28.12.2016  – 1 192 492,21 руб., что составляет полную цену Контракта.

Ссылка истца на подписанный ответчиком акт приемки работ не может быть принята во внимание поскольку такой акт не является дополнительным соглашением об увеличении стоимости работ и не может изменить цену государственного контракта.

Кроме этого истцом не представлено доказательств полномочий лица подписавшего акт на изменение цены контракта.

Также необходимо отметить, что работы в указанном акте приемки действительно выполнены на сумму превышающую контракт, однако при изложенных обстоятельствах это не порождает обязанности ответчика по оплате суммы превышающую цену контракта.

При изложенных обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения иска.

          Основания для возмещения судебных расходов согласно ст. 110 АПК РФ отсутствуют. 

          На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                            В.И. Гайворонский