АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Черкесск                                                                                                  Дело №А25-3085/2021

пр. Ленина, 9                                                

                                                    Резолютивная часть решения оглашена 25 января 2022 года

    Решение в полном объёме изготовлено 27 января 2022 года

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Тебуевой З.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарём с/з ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Распределительная сетевая компания" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Армэнергопром" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании убытков, при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, доверенность от 23.11.2021 №1048,

от ответчика – отсутствует, надлежаще извещен, 

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Распределительная сетевая компания" (далее-истец, общество) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Армэнергопром" (далее - ответчик) о взыскании денежных средств в размере 312 776 рублей, затраченных истцом для устранения аварии на объектах электросетевого хозяйства, произошедших по причине некачественно произведенных ответчиком подрядных работ  (л.д.10-14, т.1). 

Истец обосновывает свои требования ссылкой на то, что в рамках договоров подряда от 18.09.2018 №6/2018 и от 18.09.2018 №7/2018 ответчиком проведены работы по капитальному ремонту окраски опор уличного освещения и работы по реконструкции, модернизации и капитальному строительству объектов основных средств согласно приложению к договору, указанные работы истцом оплачены и приняты, между тем 27.07.2019 и 11.10.2019 на объектах электросетевого хозяйства – подстанциях «Южная» и «Северная» произошли аварийные ситуации в виде отключения высоковольтных фидеров, причиной которых явилось повреждение соединительной муфты из-за нарушения технологии её монтажа и низкого качества смонтированного материала. По мнению истца, аварийные ситуации в обоих случаях явились следствием некачественно выполненных ответчиком подрядных работ, которые не могли быть выявлены при приемке работ по договору, поскольку носили скрытый характер и могли проявиться только в процессе последующей эксплуатации.   

Ответчик в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему заявленные требования не признал, отметив, что в рамках исполнения заключенных с истцом договоров подряда с 2016 по 2018г.г. им были проведены своим иждивением работы по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и капитальному строительству объектов основных средств истца на общую сумму 340 559 661, 08 рублей, принятые им без замечаний, а также между этими же сторонами были заключены договоры поставки, по условиям которых ответчик поставил истцу товары в тот же период на сумму 29 491 622, 22 рублей. Истцом, в свою очередь, осуществлены подрядные работы для ответчика на сумму 8 870 736, 26 рублей по договору субподряда от 09.01.2017 №4/17 с учетом дополнительного соглашения о зачете взаимных требований от 27.01.2017, а также осуществлена оплата в размере 254 390 371, 08 рублей и в результате взаимозачетов погашена сумма в размере 111 790 175, 96 рублей. Кроме того были осуществлены взаимозачеты обоюдно внутри договоров на общую сумму 23 782 670, 90 рублей и возвращено истцу на расчетный счет 

<

***> рублей. 

По мнению ответчика, заявленные требования не подтверждают причинно-следственной связи и наличия вины ответчика в возникновении аварийной ситуации по акту от 27.07.2019 №19 и по акту от 11.10.2019 №28, к тому же в период с 2016 по 2018г.г. по всем договорам подряда и поставок первичная документация подписана истцом без замечаний, работы и товары приняты им без разногласий, задолженность между сторонами отсутствует в результате проведенных взаимозачетов и оплат (л.д.1-3, т.3; л.д.1-4, т.21).

В судебном заседании 20.01.2022 представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 25.01.2022 до 15-40, после перерыва представители сторон в судебное заседание не явились, от истца и ответчика поступили ходатайства о возможности рассмотрения дела в отсутствие их представителей.  

Суд, исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, приходит к выводу о том, что в удовлетворении иска надлежит отказать по следующим основаниям.

Из обстоятельств дела следует, что 27.07.2019 в 08-00 возникла аварийная ситуация на подстанции Южная - от масляного трансформатора закрытого отключился высоковольтный фидер -115, после осмотра и определения места повреждения данный участок выведен из схемы, Ф-115 введен в работу. Согласно акту расследования причин аварии в сетях АО «Распределительная сетевая компания» от 27.07.2019 №19, составленного комиссионно сотрудниками общества, повреждение на КЛ 10 кВ от ТП-134 до ТП-152 произошло из-за нарушения технологии процесса монтажа соединительной муфты и некачественно смонтированного материала (л.д.127, т.2).

Кроме того, согласно акту расследования причин аварии в сетях АО «Распределительная сетевая компания» от 11.10.2019 №28, составленного также комиссионно сотрудниками общества, возникла аварийная ситуация на подстанции Северная – от ТО отключился высоковольтный фидер - 604 по причине повреждения на соединительной муфте из-за нарушения технологии её монтажа, после осмотра и определения места повреждения, поврежденный участок выведен из схемы и Ф-604 введен в работу (л.д.131, т.2).

Обществом проведены мероприятия по восстановлению поврежденного оборудования, на что затрачены собственные средства в сумме 304 691 рублей для ликвидации аварии 27.07.2019 и 8 085 рублей для ликвидации аварии 11.10.2019, в подтверждение чего представлены акты о приемке выполненных работ от 23.10.2019 и справки о стоимости материалов от 17.11.2021 (л.д.128-130, 132-134, т.2).  

Претензиями от 25.10.2019 №975 и №978 истец обратился к ответчику с требованием о возмещении понесенных расходов по ликвидации результатов аварий в общей сумме 312 776 рублей со ссылкой на то обстоятельство, что ответчиком по договору подряда от 19.09.2018 №7/2018 проводились работы на объектах электросетевого хозяйства истца и учитывая отсутствие фактов неправильной эксплуатации обществом поврежденных объектов и вмешательства в его работу третьих лиц, причиной аварии могли являться некачественно произведенные ответчиком работы по капитальному ремонту (л.д.142-145, т.2).  

В связи с неисполнением указанных требований, истец повторно обратился к ответчику с претензией от 05.10.2021 №901, в которой  потребовал в течение 30 дней перечислить затраченную на устранение двух аварий денежную сумму в размере 312 776 рублей (л.д..146-148, т.2). 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском к ответчику.

Согласно статье 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из приведенных норм следует, что для применения ответственности лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения стороной обязательств по договору, наличие и размер убытков, причинную связь между понесенными убытками и ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору. Отсутствие одного из элементов данного состава правонарушения влечет отказ в применении к должнику указанного вида ответственности.

Причинно-следственная связь между нарушением права и причинением убытков должна быть прямой. Единственной причиной, повлекшей неблагоприятные последствия для истца в виде убытков, являются исключительно действия (бездействия) ответчика и отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, повлекшие наступление указанных неблагоприятных последствий.

Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются положениями Гражданского кодекса РФ о договоре подряда (статья 702).

Согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса РФ установлено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Из пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса РФ следует, что стороны вправе предусмотреть в договоре подряда последствия выполнения подрядчиком работы с недостатками, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо для обычного использования. Когда право заказчика устранять недостатки в результатах работ предусмотрено в договоре подряда (статья 397 Гражданского кодекса РФ), заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения своих расходов на устранение этих недостатков.

Если договором подряда предусмотрен гарантийный срок, то результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 722 Гражданского кодекса РФ).

Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство придает отношениям сторон по договору подряда длящийся характер. Презюмируется, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств.

Между тем, в договоре подряда от 18.09.2018 №7/2018 отсутствуют условия, регулирующие гарантийные обязательства подрядчика, кроме того, что в разделе 4 договора «Ответственность сторон» предусмотрено, что в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы заказчик вправе исправить недоделки за счет подрядчика в пределах 7% общей сметной стоимости работ, в т.ч. силами самого подрядчика (пункт 4.1.2).

Все работы по указанному договору сданы ответчиком истцу актами формы КС-2 от 29.12.2018, на что указывает истец в реестре актов о приемке выполненных работ (49шт) на сумму 30 706 800 рублей (л.д.70, 79-150, т.1; л.д.1-124, т.2). 

Судом установлено, что все акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 от 29.12.2018 подписаны истцом без замечаний. 

Указывая в исковом заявлении на недостатки выполненных работ, явившиеся причиной возникновения двух аварий 27.07.2019 и 11.10.2019, истец отмечает, что указанные недостатки не могли быть выявлены при приемке работ по договору, поскольку носили скрытый характер и могли проявиться в процессе последующей эксплуатации. 

Однако истцом не представлено доказательств, свидетельствующих какие конкретно работы в рамках договора подряда от 18.09.2018 №7/2018 были проведены ответчиком на участках электросетевого хозяйства, где впоследствии произошли аварии, поскольку ни из договора подряда, ни из 49-ти актов о приемке выполненных работ невозможно установить связь между проведенными работами и причинами произошедших аварий, кроме всего при возникновении аварий и установления их причин, ответчик истцом не был уведомлен для составления комиссионного акта.

Исследовав представленное истцом экспертное заключение строительно-технической экспертизы по объектам акционерного общества «РСК» по капитальному ремонту, реконструкции и замене оборудования согласно реестра за 2017-2019г.г., подготовленное 25.10.2021 независимым экспертом ФИО3, суд считает, что указанным заключением не подтверждается причинная связь между понесенными убытками и ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору  (л.д.7-153, т.19; л.д.1-181, т.2).

Так, на разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

- соответствуют ли сведения о примененных строительных материалах, объеме, стоимости, наименовании работ, указанные в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 подрядной организацией ООО «Армэнергопром» при осуществлении работ по объектам АО «РСК» по капитальному ремонту, реконструкции и замене оборудования по объектам?

- возможно ли установить дату выполнения строительно-монтажных работ, указанных в актах о приемке выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции и замене оборудования по объектам на объектах АО «РСК»?

Из содержания заключения следует, что экспертиза была проведена по 105-ти актам КС-2 о приемке выполненных работ по договорам подряда от 03.04.2017 №09/17, от  23.06.2017 №10/17, от 30.06.2017 №11/17, от 30.06.2017 №12/17, от 07.07.2017 №13/17, от 25.07.2017 №14/17, от 05.10.2017 №18/17, от 04.12.2017 №19/17, от 04.12.2017 №20/17, от 18.09.2018 №7/18.

По всем представленным актам о приемке выполненных работ формы КС-2 экспертом указано на соответствие объемов, видов и стоимости работ сметным расчетам, относительно точной даты выполнения работ эксперт на вопрос не ответил со ссылкой на то, что кабель проложен под землей в траншее, при вскрытии которой установить дату прокладки кабеля невозможно. Экспертом также отмечено, что в представленных сметах не включены соединительные и концевые муфты, которые обязательно применялись на капитальных ремонтах и реконструкциях кабельных линий и указаны в схемах, приложенных к актам освидетельствования скрытых работ. 

Учитывая вышеприведенные обстоятельства, суд считает обоснованными возражения ответчика о том, что представленное истцом экспертное заключение не может служить доказательством возникновения у истца убытков по вине ответчика.  

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истцом не представлено доказательств, подтверждающих ненадлежащее выполнение работ ответчиком по договору подряда, равно как и доказательств того, что причиной аварий явились именно некачественно выполненные работы  ответчиком.

На основании изложенного, проанализировав представленные в материалы дела документы, суд приходит к выводу о недоказанности истцом элементов деликтной ответственности и отсутствия оснований для взыскания убытков в заявленной сумме.

Оценивая также доводы ответчика относительно надлежащего исполнения обязательств по подрядным работам, проведенным на объектах электросетевого хозяйства истца, судом установлены следующие обстоятельства. 

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключены договоры подряда от 01.10.2016 №05/16, от 01.10.2016 №10/16/1, от 01.10.2016 №10/16/2, от 01.10.2016 №10/16/3, от 01.10.2016 №12/16, от 09.01.2017 №1/17, от 09.01.2017 №2/17, от 09.01.2017 №3/17, от 03.04.2017 №5/17, от 03.04.2017 №6/17, от 03.04.2017 №7/17, от 03.04.2017 №8/17, от 03.04.2017 №9/17, от 23.06.2017 №10/17, от 30.06.2017 №11/17, от 30.06.2017 №12/17, от 07.07.2017 №13/17, от 25.07.2017 №14/17, от 27.07.2017 №15/17, от 01.09.2017 №16/17, от 01.09.2017 №17/17, от 05.10.2017 №18/17, от 04.12.2017 №19/17, от 04.12.2017 №20/17, от 08.02.2018 №1/18, от 04.04.2018 №2/18, от 20.04.2018 №3/18, от 20.04.2018 №4/18, от 18.09.2018 №6/18, от 18.09.2018 №7/18 (л.д.32-34, 73-75, 105-107, т.3; л.д.1-3, 25-27, 70-72, 91-93, 116-118, т.4; л.д.1-3, 63-66, т.5; л.д.1-3, 44-45, 52-55, т.6; л.д.1-3, 134-136, т.7; л.д.1-3, 32-34, т.8; л.д.1-4, 109-111, 140-142, т.9; л.д.1-4, т.10; л.д.1-4, т.11; л.д.1-5, т.12; л.д.1-6, т.13; л.д.1-4, т.15; л.д.1-4, т.16; л.д.1-3, 43-44, 51-55, т.17).  

По условиям указанных договоров подрядчик обязуется по заданию заказчика в течение срока действия договора произвести работы по реконструкции, модернизации и капитальному строительству объектов основных средств своим иждивением согласно перечня (приложение №1 к договору) и сдать ему результат, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его в соответствии с условиями договора (пункт 1.1 договоров) 

Согласно пунктам 2.3 договоров подрядчик обязуется произвести подрядные работы в соответствии с ними до 31.12.2017 и до 31.12.2018 соответственно. 

Пунктами 3.1 договоров определена стоимость подрядных работ по каждому договору соответственно.

В силу п.3.2 договоров заказчик обязуется полностью произвести оплату за фактически выполненный подрядчиком объем работ до конца срока действия договоров. 

Судом установлено исполнение обязательств заказчиком и подрядчиком по каждому договору в полном объеме:

- по договору подряда от 01.10.2016 №05/16 стоимость работ составила 12 446 000 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.12.2016 (л.д.35-69, т.3):

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 109 ТП 169 - пст Южная 

3 702 284,22

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 101 ТП 64 - ТП 20

975 501,28

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 103 пст Южная - А опора

1 759 203,00

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 113 пст Южная - КТП 305

2 206 883,20

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 109 ТП 10 - ТП 215

428 436,76

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 109 ТП 169 - ТП 174

346 962,48

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 108 А - опора - ТП 27

198 208,14

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 115 пст Южная - ТП 151

712 899,36

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 122 ТП 270- ТП 242

549 774,98

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 122 ТП 251 - ТП 242

333 181,26

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 125 ТП 165 А-ТП 67

1 232 665,76

Платежными поручениями от 05.12.2016 №2378 на сумму 600 000 рублей, от 22.12.2016 №2515 на сумму 3 286 000 рублей, а также актом взаимозачета от 31.03.2017 №74 на 8 560 000, 44 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.70-72, т.3);

- по договору подряда от 01.10.2016 №10/16/1 стоимость работ составила 19 261 573 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.10.2016 (л.д.109-165, т.3):

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 101 ТП 92 - ТП 64

833 730,18

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 114 пст Южная - РП 2

902 239,80

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 107 ТП 98 - ТП

967 299,10

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 321 РП 3 - ТП 229

535 600,82

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 603 пст Северная - ТП 42

620 369,66

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 115 ТП 141 - ТП 26

803 587,08

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 109 ТП 26 - ТП 10

813 610,00

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 102 пст Южная - лоток 

699 015,48

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 313 РП 3 - ТП 202

681 520,80

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 262 ТП 188 - ТП 216

1 391 571,64

Реконструкция 2КЛ 10 кВ Ф 261 ТП 172- ТП 137

1 219 795,50

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 137 пст Северная - ТТП7

623 467,16

Реконструкция КЛ 6кВ Ф 629 ТП 187 - А-образная

1 697 206,98

Реконструкция КЛ 10 кВ Ф 101 ТП 28-  ТП 98

2 068 624,96

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 638 пст Северная - ТП 196

1 071 275,98

Реконструкция 2КЛ 6 кВ Ф 602 п Северная - ФТП 

506 476,00

Реконструкция пст Холодмаш -замена КРУ  10 кВ 

3 826 181,86

Оплата заказчиком выполненных работ на сумму 13 817 170, 18 рублей подтверждается платежными поручениями №710 от11.04.2017 на 1 000 000 рублей,  №810 от 27.04.2017 на 700 000 рублей,  №826 от 28.04.2017 на 1 000 000 рублей, №1050 от 05.06.2017 на 1 087 000 рублей, №1084 от 08.06.2017 на 2 175 000 рублей, №1175 от 20.06.2017 на 1 200 000 рублей, №1173 от 20.06.2017 на 4 000 000 рублей, №1176 от 20.06.2017 на 1 980 200 рублей, №1229 от 28.06.2017 на 674 970,18 рублей (л.д.168-178, т.3).   

Актами взаимозачета от 11.04.2017 и от 19.04.2017 суммы, оплаченные платежными поручениями от 19.04.2017 №773 на 800 000 рублей и от 25.04.2017 №792 на 1 000 000 рублей с назначением платежа «по договору от 17.10.2016 б/н» отнесены на погашение задолженности по договору от 01.10.2016 №10/16/1 (л.д.50-51, т.21).

Кроме того, подписанными сторонами актами взаимозачета от 31.03.2017 №37 и №74 осуществлен взаимозачет соответственно на сумму 310 735, 82 рублей (часть задолженности ответчика перед истцом по договору от 09.10.2017 №4/17) и сумму 3333667 рублей (предоплата по договору от 17.10.2016 б/н в связи с расторжением договора зачтена в счет оплаты по договору подряда от 01.10.2016 №10/16/1), в связи с чем заказчиком полностью приняты и оплачены работы по договору от 01.10.2016 №10/16/1  (л.д.166-167, т.3; л.д.278, т.12);

- по договору подряда от 01.10.2016 №10/16/2 стоимость работ составила 6 883 711 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.11.2016 (л.д.5-21, т.4):

Реконструкция КЛ 6 кВ Ф 625 ТП 222 - ТП 196

561 931,34

Реконструкция КЛ 6 кВ Ф 629 пст Северная - ТП 45

561 931,34

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 631 пст Северная - А опора

979 259,58

Реконструкция КЛ 6 кВ Ф 621 пст Северная - РП 8

2 073 203,22

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 613 пст Северная - РП 1

2 707 386,10

Оплата осуществлена заказчиком в полном объеме платежными поручениями от 28.06.2017 №1230 на сумму 4 325 029,82 рублей, от 29.06.2017 №1235 на сумму 435 000 рублей, от 07.07.2017 №1316 на сумму 2 123 681,76 рублей (л.д.22-24, т.4);

- по договору подряда от 01.10.2016 №10/16/3 стоимость работ составила 4 886 555 рублей), которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.12.2016 (л.д.29-67, т.4):

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 313 ТП 145 - ТП 295

425 656,68

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 312 РП 3 - ТТП 4

206 477,58

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 166 ТП 18 - ТП 254

458 507,88

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 625 ТП 222 - ТП 214

293 195,78

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 322 ТП 262 - ТП 295

384 916,00

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 614 ТП 94 - ТП 260

255 836,98

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 320 РП 3 - ТП 66

484 325,10

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 314 РП 3 - А опора ул.Октябрьская

499 138,00

Капремонт КЛ 6 кВ Ф 670 ТП 241 - ТП 105

334 847,42

Капремонт КЛ 6 кВ Ф 670 ТП 249 - ТП 241

294 148,04

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 109 ТП 26 - ТП 35

348 879,98

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 115 ТП 152 - ТП 171

369 466,26

Капремонт КЛ 6 кВ ф 603 ТП 135 - ТП 213

531 159,30

Платежными поручениями от 05.07.2017 №1282 на сумму 4 700 000 рублей и от 07.07.2017 №1315 на сумму 186 555 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.68-69, т.4);

- по договору подряда от 01.10.2016 №12/16 стоимость работ составила 5 493 039, 24 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.12.2016 (л.д.77-100, т.3):

Реконструкция КЛ 6 кВ Ф 605 ТП 5 - ТП 1

645 566,20

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 112 пст Южная - лоток

1 101 912,32

Реконструкция 2КЛ 6 кВ Ф Ф 601 пст Северная - РУ 0,6 з-да НВА

1 237 261,86

Реконструкция 2КЛ 6 кВ Ф 603 ТП 214 - А-опора

558 076,28

Реконструкция КЛ 6 кВ Ф 604 ТП 51 - ТП 116

331 033,66

Реконструкция КЛ 6 кВ Ф 604 ТП 51- ТП 257

311 771,34

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 605 пст Северная - ТП 1

1 307 417,57

Платежными поручениями от 28.12.2016 №2578 на 2 660 000 рублей, от 11.01.2017 №19 на 268 408 рублей, от 07.07.2017 №1317 на 389 763,24 рублей, от 12.07.2017 №1383 на 2 174 867,99 рублей заказчиком оплачены в полном объеме указанные работы (л.д.101-104, т.3);

- по договору подряда от 09.01.2017 №1/17 стоимость работ составила 3 461 783,64 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.01.2017 (л.д.74-89, т.4):

Реконструкция КЛ 10 кВ ф  313 РП  3 - ТП  202 

685 110,36

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 314 РП  3 - А опора ул Октябрьская

502 630,44

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 319 РП 3 - ТП  161

2 052 306,74

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 320 РП 3 - ТП  66

221 736,10

Платежным поручением от 12.07.2017 №1384 на сумму 3 461 783, 64 рублей заказчиком оплачены в полном объеме указанные работы (л.д.90, т.4);

- по договору подряда от 09.01.2017 №2/17 стоимость работ составила 5 362 868,18 рублей,  которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 28.02.2017 (л.д.95-114, т.4):

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 621 пст Северная-РП 8

2 078 206,02

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 631 пст Северная - А опора

986 107,12

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 632 пст Северная  - РП 199 очистные сооружения

1 328 503,00

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 263 ТП 217- ТП 21

378 778,82

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 264 503 ТП 58  - ТП 138

591 273,22

Платежным поручением от 12.07.2017 №1385 на сумму 5 362 868,18 рублей заказчиком оплачены в полном объеме указанные работы (л.д.115, т.4);

- по договору подряда от 09.01.2017 №3/17 стоимость работ составила 6 178 130,18 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.03.2017, (л.д.119-155, т.4): 

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 161 ТП 37-ТП  13

523 767,78

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 161 ТП 37-ТП 254

523 767,78

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 629 ТП 187 - А опора ул Западная

345 705,78

Реконструкция КЛ 6 кВ ф  603 ТП 42 - ТП 168

739 043,44

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 624 пст Северная -РП 8

980 859,66

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 604 ТП 51 ТП  2

329 828,88

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 604 ТП 51 - ТП 257

313 950,80

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 609 пст Северная  - РП 8

2 078 206,02

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 607 пст Северная - ТП 42

343 000,04

Платежным поручением от 12.07.2017 №1386 на сумму 6 178 130,18 рублей заказчиком оплачены в полном объеме указанные работы (л.д.156, т.4);

- по договору подряда от 03.04.2017 №5/17 стоимость работ составила 10 140 827, 32 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 28.04.2017 (л.д.4-57, т.5):

Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ ТП  235 - Космонавтов, 19а

263 757,14

Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ  ТП 208 - Космонавтов, 11

373 701,28

Реконструкция 6КЛ  0,4 кВ  ТП 208 - Октябрьская, 330

715 823,40

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 122 пст Южная - ТП 235

425 919,82

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 115 ТП 134 - ТП 152

297 938,20

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 118 пст Южная - РП 3

470 975,12

Реконструкция КЛ 10  кВ ф 125 ТП 165 - ТП 268

958 071,50

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 125 ТП 165 А-ТП  67

1 863 776,96

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 125 п ст Южная - ТП 67

2 718 115,84

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 603 пст Северная - ТП 42

623 192,22

Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ  ТП 168 - Октябрьская, 5

440 628,52

Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 265 - Космонавтов, 40

419 620,98

Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 265 - Космонавтов, 86 

569 306,34

Платежными поручениями от 25.07.2017 №1468 на сумму 7 000 000 рублей, от 01.11.2017 №2302 на сумму 903 993, 30 рублей, от 01.11.2017 №2303 на сумму 400 000 рублей, от 02.11.2017 №2317 на сумму 1 500 000 рублей, от 08.11.2017 №2345 на сумму 336 834, 12 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.58-62, т.5);

- по договору подряда от 03.04.2017 №6/17 стоимость работ составила 13 361 006, 70 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.05.2017 (л.д.67-191, т.5):

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 605 ТП 147-ТП 1

183 041,60

Реконструкция КЛ 6 кВ ф  167  ТП 234  - ТП 258

192 277,46

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 167 РП - 1 - ТП 258

175 928,56

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 166 ТП 205 - ТП  249

742 728,58

Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф  162 РП  1 - ТП 15

114 146,12

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 607 ТП 42-А-опора

558 423,20

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 605 ТП 109- ТП 30

87 609,10

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 605 ТП 61- ТП 110

1 764 203,84

Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 122 - Калантаевского 17

474 358,82

Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 5 - ФИО4, 22

244 066,48

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 12 - опора № 6

98 465,10

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 12- Первомайская, 41

52 355,42

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 630 ТП 233 - РП 1

272 262,58

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 629  ТП 166  -ТП 93

176 721,52

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 629 ТП 94- РП 7

255 790,96

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 629 ТП 45 - ТП 94

141 241,28

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 626 ТП 41 - ТП 196

467 766,16

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 625 ТП  222 - ТП 214

494 638,30

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 620 А опора-муфта

130 426,58

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 614 ТП 45 - ТП 232

88 272,26

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 612 ТП 126- ТП 213

783 714,70

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 614 п ст Северная - ТП 45

858 029,92

Реконструкция 2 КЛ 6 кВ ф 161 ТП 13- ТП 3

194 041,56

Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф 616 пст Северная - ФТП РТИ

678 396,20

Реконструкция 3КЛ 6 кВ ф 617 пст Северная - ЦРП РТИ

678 574,34

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 633 пст Северная - насосная РТИ

450 200,68

Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф602 п ст Северная - ФТП РТИ

507 906,22

Реконструкция 3КЛ  6 кВ ф 615 п ст Северная - ЦРП РТИ

694 219,96

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 638 РП 6 - ТП 196

1 165 450,60

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 638 ТП 86 - ТП 196

238 074,44

Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф 638 ТП 196 - ТП 2

397 674,16

 

Платежными поручениями на общую сумму 13 361 006,70 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.192-201, т.5):

п/п  от 22.08.2017 №1644

465 000

п/п  от 22.08.2017 №1643

2 800 000

п/п  от 06.09.2017 №1758

900 000

п/п  от 08.09.2017 №1783

1 000 000

п/п  от 03.10.2017 №2017

1 200 000

п/п  от 05.10.2017 №2046

1 500 000

п/п  от 06.10.2017 №2054

1 000 000

п/п  от 24.10.2017 №2224

900 000

п/п от 30.10.2017 №2283

500 000

п/п  от 01.11.2017 №2301

3 096 006,70

- по договору подряда от 03.04.2017 №7/17 стоимость работ составила 15 280 416,16 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.06.2017 (л.д.4-29, т.6; л.д.6-44, т.21):

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 263 ТП  22 -ТП 6

170 442,74

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 263 ТП 56 - ТП 47

284 069,66

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 507 РП  5 - ТП 47

2 048 362,00

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 605 пст Северная - ТП 1

1 401 406,94

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 623 пст Северная  - РУ 6 кВ НВА

2 484 249,28

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 114 пст Южная - РП 2

4 111 175,46

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 173 ТП 186 - ТП 109

293 148,58

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 261 ТП 173 - ТТП 5

1 800 995,06

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 261 ТП 172 - ТП 24

377 766,38

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 262 ТП 188 - ТП 153

503 738,46

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 263 РП 2 - ТП  62

487 620,84

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 168  РП - 1 - ТП 14

38 779,52

Реконструкция КЛ 6 Кв ф 172 РП - 1 - ТП 228

283 168,40

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 173 РП-1-ТП 61

418 923,60

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 173 ТП61- ТП60

317 943,92

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 173 ТП60- ТП 186

258 625,32

 

Платежными поручениями на общую сумму 15 280 416,16 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.30-43, т.6):

п/п  от 08.11.2017 №2346

1 043 165,88

п/п  от 09.11.2017 №2348

820 000

п/п  от 10.11.2017 №2388

570 000

п/п  от 13.11.2017 №2395

420 000

п/п от 14.11.2017 №2407

1 000 000

п/п  от 15.11.2017 №2415

30 000

п/п  от 15.11.2017 №2416

2 000 000

п/п  от 16.11.2017 №2449

1 350 000

п/п  от 16.11.2017 №2453

2 900 000

п/п  от 17.11.2017 №2455

700 000

п/п  от 17.11.2017 №2456

493 000

п/п  от 17.11.2017 №2458

3 000 000

п/п от 22.11.2017 №2493

954 250,20

п/п  от 26.02.2018 №302

0,08

 

- по договору подряда от 03.04.2017 №8/17 стоимость работ по капитальному ремонту окраски опор уличного освещения составила 1 380 024,16 рублей, которые подрядчиком выполнены в полном объеме и приняты заказчиком, что подтверждается актом  выполненных работ КС-2 и справкой о стоимости работ КС-3 от 31.05.2017, оплачены заказчиком платежными поручениями от 22.11.2017 №2496 на сумму 192 414, 59 рублей и от 23.11.2017 №2502 на сумму 1 187 609, 57 рублей (л.д.46-51, т.6);

- по договору подряда от 03.04.2017 №9/17 стоимость работ составила 2 878 060 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.07.2017 (л.д.56-157, т.6):

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 106 - баня № 3

84 596,56

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 11 - музей

37 194,78

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 11 - Первомайская, 20а

38 547,06

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 11 - узел связи

123 956,64

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 12 - Пушкинская, 81

131 300,96

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 125 - пр. Ленина, 154

87 185,48

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 125 - общежитие колледжа

39 011,98

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 125 - котельная, № 13

235 540,98

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 126 - ул. Октябрьская, 27а

91 025,20

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 126 - ул. Октябрьская, 13

74 109,90

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 130 - ул. Красноармейская, 59

89 399,16

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 217 - ул. Пушкинская, 140

84 849,08

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 217 - ул. Пушкинская, 81

88 011,48

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 235 - Космонавтов, 19

186 996,96

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 235 - ЦТП

132 004,24

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 132 - детский сад № 29

98 492,24

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 132 - детский сад № 30 (МОСУ)

162 408,12

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 132 - ул. Фабричная, 112

52 013,22

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 132 - пр. Ленина, 85

114 916,66

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ул. Доватора, 78

559 407,32

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ул. Доватора, 80

109 383,64

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ул. ФИО7, 59

62 404,30

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ул. Доватора, 76 - ул. Доватора, 80

70 658,40

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ул. Доватора, 76

106 000,58

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 135 - ул. Зеленая, 1

18 645,06

Платежным поручением от 22.11.2017 №2495 на сумму 456 612, 99 рублей и соглашением о зачете взаимных требований от 30.09.2017 на сумму 2 421 447, 01 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.158-159, т.6);

- по договору подряда от 23.06.2017 №10/17 стоимость работ составила 3 900 903 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.08.2017 (л.д.4-132, т.7; л.д.45-47, т.21):

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 132-муфта пр Ленина, 79, УО

296 708,64

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 132- детский сад, УО

50 858

Капремонт 2 КЛ 0,4 кВ РП1- медучилище

169 609,66

Капремонт КЛ 0,4 кВ РП2-пр. Ленина, 73

87 773,12

Капремонт КЛ 0,4 кВ РП3-ул. Космонавтов, 30

143 004,20

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ  РП 6 - Зеленая, 46а

44 860,06

Капремонт КЛ 0,4 кВ РП 7 - ФИО5, 22а

106 356,94

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ  ТП 1 -ФИО4, 109

66 266,44

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 6 - парк Юность, УО

275 201,96

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ  Интернациональная,8 - Интернациональная, 9

70 705,60

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ  ТП 136 - ФИО5, 34

94 235,98

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ  ТП 14 -пр. Ленина , 15 ЖСК Чайка

74 607,86

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 14 - пр. Ленина, 36

44 327,88

Капремонт КЛ 0,4 кВ Красноармейска, 52 - Красная, 18

32 357,96

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул. Космонавтов, 10

57 466,00

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул. Космонавтов, 12

46 794,08

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул. Космонавтов, 20

89 139,56

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул. Космонавтов, 14

168 823,78

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 135 - Партизанская, 91а

42 408,02

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул. Космонавтов, 14 - Космонавтов, 12

69 605,84

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул. Космонавтов, 14 - Космонавтов, 9

46 068,38

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул. Космонавтов, 20 - Космонавтов, 18

50 571,26

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул. ФИО7, 86

45 092,52

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 145 - Октябрьская, 370

156 437,32

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 147 - ул. ФИО5, 36а

76 623,30

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ФИО5, 34 - ФИО6, 29

55 955,60

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 173 - Ленина, 68

169 009,04

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 174 - ул. Ставропольская, 119

152 502,02

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 175 - детская поликлиника

235 540,98

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 184 - пр. Ленина, 67

160 441,06

Капремонт КЛ 10 кВ ф 101 ТП 152 - ТП 149

427 374,76

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 ТП 229 -ТП 144

294 175,18

Соглашением о зачете взаимных требований от 30.09.2017 на сумму 3 900 903 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.133, т.7);

- по договору подряда от 30.06.2017 №11/17 стоимость работ составила 17 366 075, 25 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.07.2017 (л.д.137-169, т.7):

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 221 Холодмаш - РП 5

4 406 199,06

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 165 Холодмаш – ТП 36

693 719,54

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 311 РП 3 -ТП 268

5 139 395,60

Замена трансформатора на 630 кВА ТП

3 617 877,64

Замена трансформатора на 400 кВА ТП 88

482 274,26

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 863 ТП 155 - А опора

101 250,04

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 863 ТП 82 - А опора

74 454,52

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 261 ТП 173 - ТТП 5

2 850 904,49

Платежными поручениями на общую сумму 17 366 075, 25 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.170-179, т.7):

п/п  от 05.12.2017 №2593

1 600 000

п/п  от 06.12.2017 №2610

2 000 000

п/п  от 07.12.2017 №2629

1 169 000

п/п от 08.12.2017 №2638

1 200 000

п/п  от 26.12.2017 №2795

3 300 000

п/п  от 04.12.2017 №2587

2 000 000

п/п  от 04.12.2017 №2575

2 200 000

п/п  от 07.12.2017 №2630

1 331 000

п/п  от 06.12.2017 №2609

363 990,53

п/п  от 12.01.2018 №44

2 202 084,72

- по договору подряда от 30.06.2017 №12/17 стоимость работ составила 14 266 889, 96 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.08.2017 (л.д.4-25, т.8):

Реконструкция КЛ 10 кВ ф  265 ТП 24 -ТТП 5

2 220 740,78

Реконструкция КЛ 10 кВ ф  103 пст Южная -А опора

2 040 904,40

Реконструкция КЛ 10 кВ ф  109 пст Южная - ТП 169

3 348 692,50

Реконструкция КЛ 10 кВ ф  115 ТП 171 - ТП 144

2 314 194,76

Реконструкция КЛ 10 кВ ф  165 ТП 55 - ТП 215

4 342 357,52

Платежными поручениями на общую сумму 14 266 889, 96 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.26-31, т.8):

п/п от 12.01.2018 №45

797 915,18

п/п от 12.01.2018 №57

2 100 000

п/п от 15.01.2018 №59

<

***>

п/п от 15.01.2018 №58

1 600 000

п/п от 15.01.2018 №69

3 000 000

п/п от 18.01.2018 №86

1 768 974,78

- по договору подряда от 07.07.2017 №13/17 стоимость работ составила 16 029 617, 32 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 28.09.2017 (л.д.35-61, т.8):

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 507 РП  5 - ТП 47

2 574 734,04

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 112 лоток - РП 177

2 242 829,54

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 114 пст Южная - РП 2

5 904 496,98

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 138 пст Северная - ТТП7

1 307 199,28

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 137 пст Северная - ТТП7

1 158 385,94

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 604 ТП 2 -ТП 52

2 841 971,54

Платежными поручениями на общую сумму 16 029 617, 32 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы, при этом сумма в размере 100 000 рублей по платежному поручению от 05.02.2018 №172 на сумму 2 338 592, 10 рублей отнесена на погашение части долга по договору от 27.07.2017 №15/17 (л.д.62-68, т.8; л.д. 52, т.21):

п/п от 18.01.2018 №87

1 931 025,22

п/п от 22.01.2018 №97

3 900 000

п/п от 23.01.2018 №104

4 000 000

п/п от 01.02.2018 №151

1 260 000

п/п от 01.02.2018 №157

1 400 000

п/п от 02.02.2018 №158

1 300 000

п/п от 05.02.2018 №172

2 238 592,10

- по договору подряда от 12.07.2017 №12/07 стоимость работ составила 11 322 350 рублей, оплаченных ответчиком авансом платежными поручениями от 12.07.2017 №1382 на сумму 9 822 350, 01 рублей и от 19.07.2017 №1423 на 1 500 000 рублей, однако в связи с тем, что к выполнению работ подрядчик не приступил, денежные средства в размере 

<

***> рублей возвращены подрядчиком платежным поручением от 20.07.2017 №288, оставшаяся часть денежных средств в размере 6 322 350, 01 рублей погашена в результате зачета взаимных требований по соглашению сторон от 30.09.2017 (л.д.71-74, т.8);

- по договору подряда от 25.07.2017 №14/17 стоимость работ составила 12 128 503, 80 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 28.09.2017 (л.д.79-196, т.8):

Капремонт КЛ6 кВ ф 604 ТП 51 - ТП 116

355 749,95

Капремонт КЛ 10 кВ ф 101 ТП 64 - ТП 28

520 266,72

Капремонт КЛ 10 кВ ф 107 ТП 64 - А опора

453 413,94

Капремонт КЛ 10 кВ ф 109 ТП 169 -ТП 174

446 617,59

Капремонт КЛ 10 кВ ф 110 ТП 144 - ТП 208

388 144,48

Капремонт КЛ6 кВ ф 623 ТП пст Северная -РУ з-да

598 735,89

Капремонт КЛ6 кВ ф 863  А опора - ТП 206

57 742,52

Капремонт КЛ6 кВ ф 866 РП 8-муфта 1

90 316,70

Капремонт КЛ 10 кВ ф 101 ТП 28 - ТП 27

317 620,60

Капремонт КЛ 10 кВ ф 324 РП 3 - ТП 235

447 208,20

Капремонт КЛ 10 кВ ф 107 ТП 218 - А опора

245 942,68

Капремонт КЛ6 кВ ф 661 ТП 74 - ТП 114

447 208,20

Капремонт КЛ6 кВ ф 670 КТП 413 - КТП 241

371 875,82

Капремонт КЛ6 кВ ф 605 ТП 110 - КТП 393

460 674,36

Капремонт КЛ6 кВ ф 603 ТП 214 - А опора

596 707,12

Капремонт КЛ6 кВ ф 863 ТП 191 - А опора

142 523,31

Капремонт КЛ6 кВ ф 863 ТП 158 - КТП 159

206 688,33

Капремонт КЛ6 кВ ф 862 РП 8 -муфта 1

775 081,61

Капремонт 2КЛ 6 кВ ф 662 РП 6 - ТП 74

314 655,30

Капремонт КЛ 10 кВ ф 503 ТП 62 - ТП 80

449 835,53

Капремонт КЛ 10 кВ ф 507 ТП 47 - ТП 6

811 210,32

Капремонт КЛ6 кВ ф 612 ТП 85 - ТП 126

663 063,24

Капремонт КЛ6 кВ ф 614 ТП 147 - ТП 260

451 194,24

Капремонт 2КЛ 6 кВ ф 616 пст Северная - з-д НВА

347 625,64

Капремонт КЛ6 кВ ф 625 ТП 168 - ТП 85

227 166,52

Капремонт КЛ 10 кВ ф 262 ТП 188 - ТП 153

609 127,80

Капремонт КЛ 10 кВ ф 262 РП 2 - ТП 188

121 178,92

Капремонт КЛ6 кВ ф 670 ТП 4 - А опора

99 977,86

Капремонт КЛ6 кВ ф 666 Северная - ТП 196

1 110 950,41

Платежными поручениями на общую сумму 12 128 503,80 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.197-203, т.8):

п/п  от 05.02.2018 №173

661 407,90

п/п от 06.02.2018 №174

1 500 000

п/п от 08.02.2018 №202

6 000 000

п/п  от 19.02.2018 №283

1 120 000

п/п  от 22.02.2018 №299

1 120 000

п/п  от 26.02.2018 №302

600 000, 08

п/п от 22.02.2018 №301

1 127 095,90

 

- по договору подряда от 27.07.2017 №15/17 стоимость работ составила 13 475 600 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.11.2017 (л.д.5-98, т.9):

Капремонт КЛ 6 кВ ф 626 ТП 41 - ТП 196

496 027,16

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 1 - ул. ФИО4, 93а блок секция № 2

132 870,36

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 1 - ул. ФИО4, 93а блок секция № 3

169 122,32

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 106 - баня № 3 - горгаз

101 293,56

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ул. Доватора, 72 - ул. Доватора, 74

62 633,22

Капремонт КЛ 10  кВ ф 101 ТП 29 - ТП 268

339 266,52

Капремонт КЛ 10  кВ ф 101 ТП 92 - ТП 64

367 538,14

Капремонт КЛ 10  кВ ф 109 ТП 10 - ТП 215

388 741,56

Капремонт КЛ 10  кВ ф 109 ТП 250 - ТП 110

734 992,50

Капремонт 2 КЛ 10  кВ ф 173 ТП 186 - ТП 109

607 495,86

Капремонт  КЛ 10  кВ ф 261 ТП 172 - ТП 137

1 375 371,42

Капремонт  КЛ 10  кВ ф 102 лоток - РП 177

1 322 977,06

Капремонт  КЛ 10  кВ ф 102 пст Южная  - лоток

551 207,50

Капремонт  КЛ 6  кВ ф 101 ТП 92 - ТП 103

496 848,44

Капремонт  КЛ 10  кВ ф 101 ТП 92 - ТП 149

390 668,50

Капремонт  КЛ 10  кВ ф 104 пст Южная - А опора

992 330,44

Капремонт  КЛ 10  кВ ф 109 ТП 215 - ТП 100

287 344,16

Капремонт  КЛ 10  кВ ф 110 ТП 139 - ТП 144

236 984,12

Капремонт  КЛ 10  кВ ф 112 пст Южная - лоток

594 740,06

Капремонт  КЛ 6  кВ ф 667 РП 6 - ТП 257

794 547,10

Капремонт  КЛ 6  кВ ф 661 РП  6 - ТП 74

244 841,74

Капремонт  КЛ 10 кВ ф 265 РП 2 - ТП 184

272 445,48

Капремонт  2КЛ 6 кВ ф 632 пст Северная - РП 199

2 515 312,78

Платежными поручениями на общую сумму 13 475 600 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы, в том числе сумма в размере 100 000 рублей по платежному поручению от 05.02.2018 №172 из общей суммы 2 338 592, 10 рублей с назначением платежа «оплата по договору №13/17 от 07.07.2017» отнесена актом взаимозачета от 05.02.2018 на погашение части задолженности по договору подряда от 27.07.2017 №15/17 (л.д.99-108, т.9; л.д.52, т.21):

п/п  от 05.02.2018 №172 

100 000,00

п/п от 28.02.2018 №356

25 000,00

п/п  от 01.03.2018 №367

1 000 000,00

п/п  от 02.03.2018 №373

4 000 000,00

п/п  от 05.03.2018 №381

1 560 000,00

п/п  от 06.03.2018 №383

2 230 000,00

п/п от 20.03.2018 №538

1 500 000,00

п/п  от 21.03.2018 №548

900 000,00

п/п от 21.03.2018 №547

1 500 000,00

п/п  от 23.03.2018 №589

660 600,00

 

- по договору подряда от 01.09.2017 №16/17 стоимость работ составила 12 885 600 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 29.12.2017 (л.д.113-133, т.9):

Реконструкция 4 КЛ 0,4 кВ ТП 282 - ул. Космонавтов, 40а

130 727,02

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 169 ТП 221 - муфта

538 179,12

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 169 ТП 118 - А опора

496 882,66

Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф 611 РП  199 - пст Северная

5 815 360,24

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 613 Северная - РП1

5 904 450,96

Платежными поручениями на общую сумму 12 885 600 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.134-139, т.9):

п/п  от 12.01.2018 №44 

0,10

п/п от 23.03.2018 №591

2 674 400

п/п  от 28.03.2018 №622

2 230 000

п/п  от 30.03.2018 №647

4 000 000

п/п от 05.04.2018 №705

1 281 199,90

п/п от 05.04.2018 №702

2 700 000

 

- по договору подряда от 01.09.2017 №17/17 стоимость работ составила 9 327 900 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 29.12.2017 (л.д.143-178, т.9):

Замена трансформаторного масла

1 240 589,46

Капремонт КЛ 10 кВ ф 262 ТП 188 - ТП  216

372 345,46

Капремонт КЛ 6 кВ ф 666 Северная - ТП 196

1 125 269,24

Капремонт КЛ 6 кВ ф 169  ТП 113 - ТП 33

466 482,32

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 94 - ул. Крайняя 84а, общежитие

103 697,22

Капремонт КЛ 10 кВ ф 166 ТП 205 - ТП 249

956 782,94

Капремонт КЛ 10 кВ ф 165  КТП 36 - ТП 55

3 159 204,56

Капремонт КЛ 6 кВ ф 667 РП  6 -ТП 254

1 512 688,02

Капремонт КЛ 6 кВ ф 866 КТП 287 - ТП 82

390 840,78

Платежными поручениями на общую сумму 9 327 900 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.179-188, т.9):

п/п  от 05.04.2018 №706

718 800,10

п/п  от 06.04.2018 №724

500 000,00

п/п от 06.04.2018 №722

2 100 000,00

п/п  от 09.04.2018 №732

1 260 000,00

п/п  от 10.04.2018 №749

940 000,00

п/п  от 10.04.2018 №750

960 000,00

п/п  от 11.04.2018 №759

325 000,00

п/п  от 18.04.2018 №820

60 000,00

п/п  от 18.04.2018 №819

1 500 000,00

п/п  от 23.04.2018 №839

964 099,90

 

- по договору подряда от 05.10.2017 №18/17 стоимость работ составила 16 880 000 рублей, работы подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору на сумму 16 635 210 рублей и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 28.02.2018 (л.д.5-167, т.10):

Капремонт КЛ 6 кВ ф 629 РП 7 -А опора

27 941,62

Капремонт КЛ 6 кВ ф 503 ТП 47 - ТП 21

484 172,88

Капремонт КЛ 6 кВ ф 503 ТП 38 - ТП 12

214 186,52

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 ТП 229 - ТП 151

242 115,94

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 ТП 236 - ТП 229

318 539,82

Капремонт КЛ 10 кВ ф 322 ТП 261 - ТП 267

492 762,10

Капремонт КЛ 10 кВ ф 322 ТП 265 - ТП 262

343 732,82

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 РП 3 - ТП 229

607 630,38

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 ТП 237 - ТП 46

273 444,94

Капремонт КЛ 6 кВ ф 626 ТП 198 - ТП 231

142 776,46

Капремонт КЛ 6 кВ ф 614 ТП 94 - ТП 147

276 691,12

Капремонт КЛ 6 кВ ф 609 пст Северная - РП 8

918 912,02

Капремонт КЛ 6 кВ ф 612 ТП 126 - ТП 74

245 863,62

Капремонт КЛ 6 кВ ф 614 ТП 45 - ТП 94

279 690,68

Капремонт КЛ 6 кВ ф 605 ТП 5 - ТП 78

308 725,76

Капремонт КЛ 6 кВ ф 604 ТП 86 - ТП 136

138 876,56

Капремонт КЛ 6 кВ ф 603 ТП 52 - ТП 135

507 251,32

Капремонт КЛ 6 кВ ф 604 пст Северная - ТП 86

826 409,46

Капремонт КЛ 6 кВ ф 604 ТП 116 - ТП 228

576 408,76

Капремонт КЛ 6 кВ ф 667 РП 6 - ТП  254

1 561 630,88

Капремонт КЛ 6 кВ ф 630 пст Северная - ТП 233

2 415 522,54

Капремонт КЛ 6 кВ ф 629 ТП 187 - А опора

1 409 349,52

Капремонт КЛ 6 кВ ф 625 пст Северная - ТП 168

637 056,04

Капремонт КЛ 6 кВ ф 605 ТП 1 - ТП 5

581 848,56

Капремонт КЛ 6 кВ ф 603 ТП 42 - ТП 168

955 610,02

Капремонт КЛ 6 кВ ф 863  ТП 155 - А опора

111 625,64

Капремонт КЛ 6 кВ ф 661 КТП 23 - ТП 213

109 330,54

Капремонт КЛ 6 кВ ф 626 ТП 198 - ТП 41

135 093,48

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 100 - опора пер Вольный

79 769,18

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 1 - ул ФИО4, 93 а, блоксекция № 3

152 497,30

Капремонт КЛ 0,4 кВ 

<

...> а

105 042,42

Капремонт КЛ 0,4 кВ 

<

...>

152 971,66

Капремонт КЛ 10 кВ ф 866 муфта 1 - КТП 287

173 719,60

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ 

<

...>

124 251,64

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 286 - ул. Космонавтов, 82

66 806,88

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 295 - ул. Космонавтов, 61

73 531,70

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 30 - ул. Международная, 176

97 849,14

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 3 - опора ул. Кавказская

229 833,32

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 110 - гостиница Нарт

115 924,68

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 1 - ул ФИО4, 93 а, блоксекция № 2

119 812,48

Платежными поручениями на общую сумму 16 635 210 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.168-177, т.10):

п/п  от 23.04.2018 №840

1 260 900,10

п/п  от 24.04.2018 №875

1 115 000,00

п/п от 25.04.2018 №884

1 700 000,00

п/п  от 26.04.2018 №893

2 000 000,00

п/п  от 08.05.2018 №928

3 100 000,00

п/п  от 11.05.2018 №946

200 000,00

п/п  от 11.05.2018 №945

2 260 000,00

п/п  от 15.05.2018 №977

1 115 000,00

п/п  от 18.05.2018 №990

2 425 000,00

п/п  от 22.05.2018 №1025

1 459 309,90

 

- по договору подряда от 04.12.2017 №19/17 стоимость работ составила 9 240 400 рублей, работы подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору на сумму 9 146 416 рублей и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.03.2018 (л.д.5-125, т.11):

Капремонт КЛ 10 кВ ф 101 ТП 177 - ТП 83

543 949,06

Капремонт КЛ 10 кВ ф 101 ТП 152 - ТП 149

415 229,02

Капремонт КЛ 0,4 кВ 

<

...>

57 993,46

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ РП 1 - медколледж - ул. Красная, 18

158 042,12

Капремонт КЛ 10 кВ ф 122 ТП 235 - ТП 251

171 856,38

Капремонт КЛ 10 кВ ф 122 ТП 251- ТП 145

235 467,82

Капремонт КЛ 10 кВ ф 125 ТП 125- ТТП 2

259 489,08

Капремонт КЛ 6 кВ ф 135 пст Северная - ТТП 3

105 461,32

Капремонт КЛ 6 кВ ф 136 пст Северная - ТТП 3

115 042,92

Капремонт КЛ 10 кВ ф 109 ТП 169 - ТП 100

253 172,54

Капремонт КЛ 10 кВ ф 109 ТП 169 - ТП 174

429 639,18

Капремонт КЛ 10 кВ ф 109 ТП 26 - ТП 10

886 163,48

Капремонт КЛ 10 кВ ф 109 ТП 26 - ТП 35

379 761,76

Капремонт КЛ 10 кВ ф 110 ТП 144- ТП 208

386 147,00

Капремонт КЛ 10 кВ ф 110 пст Южная - ТП 240

372 403,28

Капремонт КЛ 10 кВ ф 110 КТП 240 - ТП 208

572 877,02

Капремонт КЛ 10 кВ ф 112 ТП 69 - А опора

187 366,30

Капремонт КЛ 10 кВ ф 112 БКТП 83 - А опора

129 602,94

Капремонт КЛ 10 кВ ф 112 ТП 101 - КТП 283

455 712,46

Капремонт КЛ 10 кВ ф 112 ТП 177 - БКТП 83

380 323,44

Капремонт КЛ 10 кВ ф 112 ТП 69 - КТП 48

216 173,64

Капремонт КЛ 10 кВ ф 113 КТП 275 - КТП 305

232 444,66

Капремонт КЛ 10 кВ ф 113 пст Южная - КТП 305

985 574,94

Капремонт КЛ 10 кВ ф 115 ТП 115 - ТП 134

188 245,40

Капремонт КЛ 10 кВ ф 115 ТП 171 - ТП 224

174 711,98

Капремонт КЛ 10 кВ ф 115 ТП 224 - ТП 223

229 157,18

Капремонт КЛ 10 кВ ф 116 пст Южная - РП 3

177 228,92

Капремонт КЛ 10 кВ ф 116 РП 2 - опора пер Одесский

246 401,70

Капремонт КЛ 10 кВ ф 116 РП 3 - опора ул. Лагерная

200 777,00

Платежными поручениями на общую сумму 9 146 416 рублей заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы, при этом из суммы 1 400 000 рублей по платежному поручению от 06.06.2018 №1186 на оплату работ по настоящему договору отнесена сумма в размере 860 725,80 рублей, а денежные средства в размере 539 274, 20 рублей отнесены на погашение задолженности по договору подряда от 04.12.2017 №20/17 по акту взаимозачета от 07.06.2018 (л.д.126-139, т.11; л.д.53, т.21):

п/п  от 22.05.2018 №1026

540 690,10

п/п  от 23.05.2018 №1035

200 000,00

п/п  от 24.05.2018 №1051

15 000,00

п/п  от 24.05.2018 №1049

200 000,00

п/п  от 25.05.2018 №1058

20 000,00

п/п  от  25.05.2018 №1057

210 000,00

п/п  от 24.05.2018 №1052

1 500 000,00

п/п  от 30.05.2018 №1088

200 000,00

п/п  от 30.05.2018 №1123

4 000 000,00

п/п  от 31.05.2018 №1146

1 000 000,00

п/п  от 05.06.2018 №1175

200 000,00

п/п  от 07.06.2018 №1195

200 000,00

п/п  от 06.06.2018 №1186 

860 725,80

акт взаимозачета от 30.09.2018 №54

0,10

 

- по договору подряда от 04.12.2017 №20/17 стоимость работ составила 25 581 000 рублей, работы подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору на сумму 25 247 513, 84 рублей и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.03.2018 (л.д.6-277, т.12):

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 161 ТП 14 - ТП 18

118 035,40

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 162 РП  1 - КТП 15

261 676,80

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 165 КТП  36 - ТП  55

1 288 962,38

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 165  ТП  55 - ТП 215

1 822 880,52

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 165  пст Холодмаш - ТП 36

687 451,48

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 167  ТП 234  - ТП 258

310 948,88

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 167  ТП 233 -РП 1

286 430,84

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 168  ТП 18 -  ТП 254

582 337,08

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 169  ТП 113 - ТП 33

455 712,46

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 169  ТП 221 - муфта

515 567,96

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 172 РП  1 -ТП  228

295 064,90

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 173 РП 1 - ТП 61

458 294,30

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 122 ТП 270 - ТП 271

151 365,68

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 122 ТП 208 - ТП 242

223 969,90

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 122 ТП 251 - ТП 242

257 805,22

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 122 ТП 271 - ТП 139

216 222,02

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 122 ТП 242 - ТП 270

475 719,36

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 125 РП 3 - ТП 67

2 029 896,18

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 320 ТП 204  - ТП 64

126 589,22

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 161 ТП 19 - ТП 37

594 004,92

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 161 ТП 19 - ТП 18

268 294,24

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 166 Холодмаш - ТП 289

447 114,98

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 161 ТП 19 - ТП  16

447 114,98

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 161 РП 1 - ТП 19

402 387,08

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 125 ТП 165 - ТП 31

151 530,88

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 125 ТП 216 - ТТП 2

131 079,12

Реконструкция КЛ 0,4 кВ 

<

...>

60 011,26

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 110 КТП 240 - ТП 256

333 418,44

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 115 ТП 141 - ТП 26

859 301,96

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 137 пст Северная - ТТП 7

373 294,18

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 138 пст Северная - ТТП 7

522 092,18

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 269 ТП 201 - ТП 40

225 107,42

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 269 ТП 132 - ТП 27

193 711,16

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 269 РП 2 - ТП 132

268 294,24

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 269 ТП 132 - ТП 40

309 919,92

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 265 ТП 24 - ТП 186

327 884,24

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 265 ТП 24 - ТП 130

350 136,68

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 264 ТП 58 - ТП 170

276 186,08

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 264 ТП 217 - ТП 21

357 719,36

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 264 ТП 189 - ТП 170

310 675,12

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 269 ТП 40 - ТП 137

193 615,78

Реконструкция КЛ 0,4 кВ 

<

...>

74 390,74

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 319 ТП 261 - БКТП 83

328 526,16

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 317 РП 3 - ТП 144

506 668,40

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 167 ТП 233 - ТП 234

178 849,06

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 312 РП 3 - ТТП 4

218 432,16

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 269 ТП 87 - ТП 40

157 539,44

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 269 ТП 201 - ТП 87

269 533,24

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 264 ТП 58 - ТП 189

335 761,92

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 263 ТП 62 - ТП 217

177 086,14

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 263 ТП 12 - ТП 22

283 308,56

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 263 ТП 21 - ТП 16

224 841,92

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 261 ТП 30 - ТП 109

238 474,46

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 261 ТП 172 - ТП 173

268 294,24

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 169 ТП 129 - А опора

327 884,24

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 166 ТП 15 - ТП 254

566 403,54

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 166 ТП 245 - ТП 108

172 992,72

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 166 ТП 253 - ТП 33

155 712,80

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 166 ТП 254 - ТП 205

536 538,92

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 313 ТП 202 - ТП 145

178 849,06

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 169 А - опора - А опора

238 474,46

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 261 РП 2 - ТП  173

327 884,24

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 169 пст Холодмаш - ТП 221

387 547,40

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 173 ТП 25 - ТП 186

214 647,90

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 174 пст Холодмаш - А опора

410 588,08

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 165 ТП 55 - ТП 96

223 725,64

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 264 ТП 122 - ТП 80

276 733,60

Платежными поручениями от 06.06.2018 №1186 на сумму 539 274,20 рублей, от 08.06.2018 №1212 на сумму 138 176,26 рублей, от 08.06.2018 №1211 на сумму 1 561 823,74 рублей, от 08.06.2018 №1210 на сумму 14 400 000 рублей, а также договором уступки права требования от 30.03.2020, в том числе, по договору от 04.12.2017 №20/17 на сумму 8 608 239, 64 рублей, заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы, при этом денежные средства в размере 539 274, 20 рублей по платежному поручению от 06.06.2018 №1186 на сумму 1 400 000 рублей с назначением платежа «частичная оплата по договору подряда от 04.12.2017 №19/17» отнесены на погашение задолженности по договору подряда от 04.12.2017 №20/17 по акту взаимозачета от 07.06.2018  (л.д.279-284, т.12; л.д.53, т.21);

- по договору подряда от 08.02.2018 №1/2018 стоимость работ составила 15 480 000  рублей, работы подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору на сумму 15 416 256, 32 рублей и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.04.2018 (л.д.7-153, т.13; л.д.1-168, т.14):

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 12 - УВД Пушкинская, 79

56 758,00

Капремонт КЛ 10 кВ ф 322 ТП 267 - ТП 67

740 393,36

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 12 - ул Пушкинская, 41 магазин

49 294,50

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 12 - ул Ворошилова, 8

34 135,04

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 12 - ул Ворошилова, 18

83 826,02

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 1 - ул Тихая, 64

49 771,22

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 1 - ул ФИО4, 109

79 532,00

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ РП 6 - Октябрьская, 52а

45 857,16

Капремонт КЛ 0,4 кВ РП 3 - Космонавтов, 30

40 691,12

Капремонт 4КЛ 0,4 кВ РП 3 - Лагерная, 52

75 229,72

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 135 - ул К Маркса, 42

68 344,42

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ул ФИО7, 57

37 762,36

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ул Доватора, 78

584 682,92

Капремонт КЛ 10 кВ ф 315 ТП 282 - ТП 265

123 568,42

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 132 - пр Ленина, 87

41 920,68

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 132 - детский сад № 30 (МОСУ)

166 684,44

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 132 - пр Ленина, 79 (перемычка)

57 525,00

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 13 - ТП 37

57 410,54

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 12 - ТП 38

149 317,20

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 12 - ул Пушкинская, 72, Первомайская, 41

62 027,88

Капремонт 4КЛ 0,4 кВ ТП 145 - Октябрьская, 354 - 117

65 504,16

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 144 - Космонавтов, 14

186 560,36

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ФИО7, 84

56 258,86

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 144 - ул Космонавтов, 10, общежитие № 4

127 992,24

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 14 - детский сад № 3

28 992,60

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 136 - ул ФИО5,32.72 кв ж дом

47 243,66

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 136 - ул ФИО5,34

86 696,96

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 135 - ул Зеленая, 1

61 360,00

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 135 - ул Партизанская 91 а - Интернациональная 10

47 661,38

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 9 - ТОО Аркос

213 696,82

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 9 - база ИЧП Факел

272 885,62

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 93 - РП 0,4 кВ ж д  ул Международная, 8 б

80 625,86

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 151 - ул ФИО7, 53 б

85 430,82

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 151 - ул ФИО7, 53 а

72 488,58

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 15 - ул. Красноармейская, 48 - Красноармейская, 46

64 712,38

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 15 - ул. Красноармейская, 46

90 834,04

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 15 - ул. Кавказская, 22а

31 338,44

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 15 - ул. Кавказская, 22а - Кавказская, 26

34 726,22

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 28 - ул Советская, 189

237 230,74

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 5 - ул ФИО4, 22

239 424,36

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 270 - ул Октябрьская, 309 б

114 251,14

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 6 - опора ул. Революционная

107 949,94

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 63 - сош № 4

108 201,28

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 62 - ул Красноармейская, 85

129 825,96

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 62 - пер Одесский, 13

378 750,50

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 74 - ул Интернациональная, 9

135 848,68

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 78 - детсад № 22

338 956,18

Капремонт 2КЛ 0,4 кВ ТП 83 - ул Кочубея, 172

205 761,32

Капремонт КЛ 10 кВ ф 115 ТП 171 - ТП 144

978 776,96

Капремонт КЛ 10 кВ ф 113 ТП 295 - КТП 275

188 869,62

Капремонт КЛ 10 кВ ф 112 лоток - РП 177

760 567,82

Капремонт КЛ 10 кВ ф 108 РП 2 - ТП 27

429 639,18

Капремонт КЛ 10 кВ ф 107 ТП 66 - ТП 64

601 502,64

Капремонт КЛ 10 кВ ф 107 РП 3 - ТП 66

429 639,18

Капремонт КЛ 10 кВ ф 103 в в опора № 9 - опора № 12

123 201,44

Капремонт КЛ 10 кВ ф 106 пст Южная -ТТП 1

764 537,34

Капремонт КЛ 10 кВ ф 103 ТТП 1 - ТП 164

265 863,44

Капремонт КЛ 10 кВ ф 102 ТП 177 - ТП 83

131 107,44

Капремонт КЛ 10 кВ ф 173 ТП 14 - ТП 234

197 464,74

Капремонт КЛ 10 кВ ф 261 ТП 30 - ТП 172

166 125,12

Капремонт КЛ 10 кВ ф 262 ТП 153 - ТП 130

94 602,96

Капремонт КЛ 10 кВ ф 262 ТП 188- ТП 216

721 780,04

Капремонт КЛ 10 кВ ф 263 ТП 12 - муфта 1

82 273,14

Капремонт КЛ 10 кВ ф 263 ТП 21 - ТП 12

189 183,50

Капремонт КЛ 10 кВ ф 263 ТП 21 - ТП 16

151 785,76

Капремонт КЛ 10 кВ ф 263 ТП 22 - ТП 47

166 125,12

Капремонт КЛ 10 кВ ф 264 РП 2 - ТП 184

196 996,28

Капремонт 2КЛ 10 кВ ф 173 РТП 186 - ТП 109

555 770,56

Капремонт КЛ 10 кВ ф 166 РП 1 -ТП 15

131 762,34

Капремонт КЛ 10 кВ ф 165 ТП 96 - ТП 107

103 647,66

Капремонт КЛ 10 кВ ф 165 ТП 250 - А опора

118 035,40

Капремонт КЛ 10 кВ ф 164 РП 1 - ТП 14

85 935,86

Капремонт КЛ 10 кВ ф 161 ТП 3 - ТП 4

172 094,74

Капремонт КЛ 10 кВ ф 161 ТП 14 - ТП 18

177 000,00

Капремонт КЛ 10 кВ ф 115 ТП 171 - ТП 139

516 517,86

Капремонт КЛ 10 кВ ф 115 пст Южная - ТП 151

577 235,94

Капремонт КЛ 10 кВ Ф 263 ТП 12 - муфта 2

82 273,14

Договором уступки права требования от 30.03.2020, заключенным между заказчиком (цедент) и подрядчиком (цессионарий), предметом которого является, в том числе, договор подряда от 08.02.2018 №1/2018 на сумму 15 416 256,32 рублей, заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.169-170, т.14);

- по договору подряда от 04.04.2018 №2/2018 стоимость работ составила 10 416 000  рублей, работы подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору на сумму 10 307 300 рублей и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 31.05.2018 (л.д.5-113, т.15):

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 ТП 229 - ТП 144

301 672,90

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 ТП 224 - ТП 46

278 952,00

Капремонт КЛ 10 кВ ф 320 ТП 66 - ТП 204

172 379,12

Капремонт КЛ 10 кВ ф 319 ТП 261 - ТП 286

186 900,20

Капремонт КЛ 10 кВ ф 319 ТП 161 - ТП 286

207 638,70

Капремонт КЛ 10 кВ ф 319 РП 3 - ТП 161

1 147 659,74

Капремонт КЛ 10 кВ ф 314 РП 3 - А опора

583 297,60

Капремонт КЛ 10 кВ ф 311 РП 3 - ТП 268

872 123,84

Капремонт КЛ 10 кВ ф 264 ТП 12 - ТП 38

169 627,36

Капремонт КЛ 10 кВ ф 322 ТП 267 - ТП 283

243 927,24

Капремонт КЛ 10 кВ ф 502 ТП 107 - А опора ул Панченко

271 962,86

Капремонт КЛ 10 кВ ф 324 РП 3 - ТП 235

448 707,98

Капремонт КЛ 10 кВ ф 322 РП 3 - ТП 265

548 442,76

Капремонт КЛ 10 кВ ф 322 ТП 265 - ТП 261

164 525,04

Капремонт КЛ 10 кВ ф 322 ТП 262 - ТП 202

286 907,56

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 ТП 237 - ТП 171

315 595,72

Капремонт КЛ 10 кВ ф 321 ТП 236 - ТП 237

286 907,56

Капремонт КЛ 6 кВ ф 603 ТП 135 - ТП 213

518 644,22

Капремонт КЛ 6 кВ ф 605 ТП 110 - ТП 147

461 131,02

Капремонт КЛ 6 кВ ф 605 ТП 110 - ТП 17

244 326,08

Капремонт КЛ 6 кВ ф 605 ТП 1 - ТП 257

601 444,82

Капремонт КЛ 6 кВ ф 604 ТП 51 - ТП 2

476 511,14

Капремонт КЛ 6 кВ ф 604 ТП 116 - БКТП 53

230 577,90

Капремонт КЛ 6 кВ ф 603 ТП 43 - ТП 42

253 592,62

Капремонт КЛ 6 кВ ф 603 ТП 214 - ТП 52

224 342,78

Капремонт 2КЛ 6 кВ ф 603 ТП 214 - А опора

552 124,36

Капремонт 2КЛ 6 кВ ф 604 ТП 53 - ТП 205

257 376,88

Договором уступки права требования от 30.03.2020, заключенным между заказчиком (цедент) и подрядчиком (цессионарий), предметом которого является, в том числе, договор подряда от 04.04.2018 №2/2018 на сумму 10 307 300 рублей, заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.114-115, т.15);

- по договору подряда от 20.04.2018 №3/2018 стоимость работ составила 16  518 000 рублей, работы подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору на сумму 16 498 680 рублей и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 30.06.2018 (л.д.5-150, т.16):

Реконструкция КЛ 0,4 кВ 

<

...>

101 920,14

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП  106 - АО КЧ газ

63 402,58

Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП 7 - ул К ФИО6, 18

26 295,12

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 605 ТП 5 - ТП 78

448 707,98

Реконструкция КЛ  6 кВ ф 612 пст Северная - ТП 85

922 221,92

Реконструкция КЛ  6 кВ ф 614 пст Северная - ТП 45

370 910,58

Реконструкция КЛ  6 кВ ф 614 ТП 94 - ТП 260

304 333,80

Реконструкция КЛ  6 кВ ф 866 КТП 287 - ТП 82

301 169,04

Реконструкция КЛ  6 кВ ф 670 КТП 413 - КТП 241

364 824,14

Реконструкция КЛ  6 кВ ф 670 ТП 4 - ТП 6

209 399,26

Реконструкция КЛ  6 кВ ф 625 ТП 222 - ТП 196

603 326,92

Реконструкция КЛ  6 кВ ф 626 пст Северная  - ТП 198

535 943,02

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 173 ТП 60 - ТП 186

257 324,96

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 173 ТП 60 - ТП 61

284 925,16

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 263 РП  2 -ТП 62

337 441,06

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 221 пст Холодмаш - РП 5

1 292 450,46

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 264 ТП 38 - ТП 122 

395 764,92

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 264 ТП 57 - ТП 189

147 390,26

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 264 ТП 62 - ТП 217

215 012,52

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 265 ТП 175 - ТП 24

113 250,74

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 112 ТП 101 - КТП 102

62 425,54

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 110 ТП 256 - ТП 144

152 113,80

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 109 пст Южная - ТП 169

3 254 363,30

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 107 ТП 63 - ТП 154

142 028,34

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 106 пст Южная - вв опора ул. Красноармейская

178 654,36

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 106 пст Южная - ТТП 1

698 387,72

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 101 ТП 64 - ТП 28

323 062,76

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 101 ТП 29 - ТП 268

269 218,18

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 108 ТП 216 - ТТП 2

178 654,36

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 261 ТП 172 - ТП 137

1 127 939,58

Реконструкция КЛ  10 кВ ф 122 РП 3 - ТП 235

596 177,30

Реконструкция 2КЛ  10 кВ ф 161 ТП 37 - ТП 254

558 125,84

Реконструкция 2КЛ  0,4 кВ РП 6 - ул К Маркса, 112

117 280,20

Реконструкция 2КЛ  6 кВ ф 616 пст Северная - РТИ

372 382,04

Реконструкция 3КЛ  6 кВ ф 615 пст Северная - завод

771 460,40

Реконструкция 3КЛ  6 кВ ф 617 пст Северная - завод

400 391,70

Договором уступки права требования от 30.03.2020, заключенным между заказчиком (цедент) и подрядчиком (цессионарий), предметом которого является, в том числе, договор подряда от 20.04.2018 №3/2018 на сумму 16 498 680 рублей, заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.151-152, т.16);

- по договору подряда от 20.04.2018 №4/2018 стоимость работ составила 5 312 000 рублей, работы подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору на сумму 5 286 400 рублей и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 29.06.2018 (л.д.4-40, т.17):

Капремонт 4КЛ 0,4 кВ ТП 208 - Октябрьская, 330

414 692,12

Капремонт КЛ 0,4 кВ РП 6 - ул К Маркса, 101

147 042,16

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 198 - медсанчасть

900 292,80

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 202 - Космонавтов, 35

168 632,62

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 21 - Советская, 73-74

260 835,46

Капремонт КЛ 0,4 кВ ТП 213 - Партизанская, 111

93 369,86

Капремонт КЛ 10 кВ ф 269 ТП 87 - ТП 29

196 480,62

Капремонт КЛ 10 кВ ф 507 РП 5- ТП 47

1 249 183,40

Капремонт КЛ 10 кВ ф 601 пст Северная  - завод НВА

1 855 870,96

Договором уступки права требования от 30.03.2020, заключенным между заказчиком (цедент) и подрядчиком (цессионарий), предметом которого является, в том числе, договор подряда от 20.04.2018 №4/2018 на сумму 5 286 400 рублей, заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.41-42, т.17);

- по договору подряда от 18.09.2018 №6/2018 стоимость работ по капитальному ремонту окраски опор уличного освещения составила 4 920 000 рублей, работы подрядчиком выполнены и приняты заказчиком, что подтверждается актом выполненных работ от 29.12.2018 и оплачены заказчиком в порядке уступки права требования по договору цессии от 30.03.2020, предметом которого является, в том числе договор подряда от 18.09.2018 №6/2018 на сумму 4 920 000 рублей  (л.д.45-50, т.17);

- по договору подряда от 18.09.2018 №7/2018 стоимость работ составила 30 706 800 рублей, которые подрядчиком выполнены в объеме согласно приложению №1 к договору и приняты заказчиком, что подтверждается актами выполненных работ от 29.12.2018 (л.д.56-153, т.17; л.д.1-100, т.18):

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 603 РП 6 - ТП 214

162 737,34

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 503 ТП 21(2) - ТП 12(2)

196 045,20

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 161 РП 1 - ТП 19

610 949,72

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 104 пст Южная - А опора

1 193 729,30

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 311 РП 3 - ТП 268

1 642 726,38

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 603 пст Северная - ТП 42

1 338 278,12

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 624 пст Северная  - РП 8

1 299 503,32

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 109 пст Южная -ТП 169

1 506 809,10

Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф 611 РП 199 - пст Северная

2 962 203,56

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 612 ТП 126 - ТП 213

557 939,40

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 605 ТП 136 - ТП 147

237 921,04

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 605 КТП 61 - ТП 110

937 786,12

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 604 ТП 51 - ТП 257

353 118,54

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 604 ТП 51 - ТП 116

401 825,40

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 604 ТП 2 - ТП 52

937 910,02

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 107 ТП 218 - А опора

262 348,22

Реконструкция КЛ 10 кВ пст Южная - кабельный лоток

540 061,22

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 626 ТП  41 - ТП 196

333 934,10

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 614 ТП  147 - ТП 260

311 142,40

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 613 пст Северная - РП 1

3 169 065,82

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 612 ТП 85 - ТП 126

424 979,36

Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ ТП 134 - ФИО7, 59а

74 021,40

Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ ТП 133 - котельная № 1, РП 3

88 298,22

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 115 ТП 152 - КТП 424 (вставка)

194 517,10

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 115 ТП 134 - ТП 152

383 528,32

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 112 пст Южная - лоток

619 495,28

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 107 ТП 64 - А опора

471 270,76

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 107 ТП 63 - ТП 98

261 960,00

Реконструкция КЛ 0,4 кВ 

<

...>

36 175,26

Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ 

<

...>

108 849,10

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 638 РП 6 - ТП 196

1 076 594,24

Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф 632 пст Северная - РП 199

1 568 827,70

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 661 ТП 74 - ТП 114

602 696,80

Реконструкция КЛ 6 кВ ф 638 пст Северная - ТП 196

1 506 746,72

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 138 - ул Калантаевского, 37

52 121,78

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 135 - ул Интернациональная, 6 - Партизанская, 91а

58 650,72

Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ ТП 132 - пр Ленина, 85

111 047,44

Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ ТП 132 - детский сад № 29

123 369,00

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 12 - опора № 6

72 960,58

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 106 - баня № 3 - горгаз

82 100,86

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 106 - баня № 3 

72 962,94

Реконструкция КЛ 0,4 кВ 

<

...>

40 953,08

Реконструкция КЛ 0,4 кВ 

<

...>

371 256,32

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 125 ТП 165 - ТП 268

547 563,66

Реконструкция 2КЛ 10 кВ ф 161 ТП 37 - ТП 13

569 477,44

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 265 РП 2 - ТП 184

221 028,16

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 322 ТП 262 - ТП 295

442 901,20

Реконструкция КЛ 10 кВ ф 503 ТП 217 - ТП 21

594 793,16

Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф 602 пст Северная - завод РТИ

971 619,08

Договором уступки права требования от 30.03.2020, заключенным между заказчиком (цедент) и подрядчиком (цессионарий), предметом которого является, в том числе, договор подряда от 18.09.2018 №7/2018 на сумму 30 706 800 рублей, заказчик в полном объеме погасил задолженность за выполненные работы (л.д.101-102, т.18).

Оценивая проведенные сторонами взаимозачеты, судом установлено, что между сторонами был заключен также договор субподряда от 09.01.2017 №4/17, согласно которому истец (субподрядчик) обязуется выполнить по заданию ответчика (подрядчик) с использованием своих материалов и оборудования, своими силами следующие работы: демонтажные работы, общестроительные работы ниже отметки 0.000, общестроительные работы выше отметки 0.000, строительно-монтажные работы несущих и ограждающих конструкций, электромонтажные работы на объекте: здание торгового центра по ул. Ленина, 387в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики (л.д.147-150, т.18).

Согласно п. 2.1 договора субподряда стоимость выполняемых субподрядчиком работ определена сметным расчетом и составила 31 017 158 рублей, сроки выполнения работ – 12 месяцев с момента подписания настоящего договора (пункт 3.1).

Согласно дополнительному соглашению от 27.01.2017 к договору субподряда от 09.01.2017 №4/17, стороны договорились, что субподрядчик выполнит свои обязательства по договору субподряда в счет взаимных расчетов по договорам подряда от 01.10.2016 №05/16, от 01.10.2016 №10/16/1, от 01.10.2016 №10/16/2, от 01.10.2016 №10/16/3, от 01.10.2016 №12/16, стоимость работ по которым составила в общей сумме 42 424 879, 25 рублей (л.д.151, т.18).  

Работы выполнены субподрядчиком на сумму 8 870 736, 26 рублей, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 31.01.2017 и от 28.02.2017 (л.д.152-159, т.18).

Согласно акту взаимозачета от 31.03.2017 №74, примененного при расчетах по договорам подряда от 01.10.2016 №05/16 и от 01.10.2016 №10/16/1, стороны пришли к соглашению, что задолженность истца перед ответчиком по договору от 01.10.2016 №05/16 составляет 8 560 000, 44 рублей, по договору от 01.10.2016 - 19 261 573 рублей, при этом задолженность ответчика перед истцом по договору субподряда от 09.01.2017 №4/17 – 8 870 736,26 рублей, в результате взаимозачета погашается сумма задолженности по договору субподряда от 09.01.2017 №4/17 в размере 8 870 736, 26 рублей (по договору от 01.10.2016 №05/16 - 8 560 000, 44 рублей, по договору от 01.10.2016 №10/16/1 - 310 735, 82 рублей) (л.д.160, т.18).

Как указано в статье 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Правилами статьи 753 Гражданского кодекса РФ установлено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (их полномочными представителями).

Работы по всем вышеуказанным договорам подряда приняты заказчиком без замечаний, обстоятельств, ставящих под сомнение подлинность данных актов, в ходе рассмотрения настоящего дела не установлено. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ обязательства прекращаются полностью или частично по основаниям, предусмотренным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны (статья 410 Гражданского кодекса РФ).

Заказчик оплатил выполненные работы на общую сумму в размере 340 559 661, 08  рублей, о чем свидетельствуют перечисленные выше платежные документы, акты взаимозачета, договоры цессии, в связи с чем суд приходит к выводу, что представленный ответчиком расчет подтверждается (л.д.5, т.3).

Как следует из материалов дела и установлено судом, между истцом и ответчиком также были заключены договоры поставки от 07.10.2016, от 17.10.2016, от 25.05.2017 №25/05, от 30.06.2017 №30/06, от 25.08.2017 №25/08, от 03.09.2018 №5/2018 на поставку строительных материалов, электроматериалов и оборудования на общую сумму 29 491 622, 22 рублей (л.д.103-104, 108-110, 115-116, 125-126, 132-134, 141-142, т.18).

По условиям договора поставки от 07.10.2016, заключенного между ООО «Армэнергопром» (заказчик) и АО «РСК» (поставщик), поставщик обязуется поставить товар на сумму 3 443 527 рублей; платежным поручением от 07.10.2016 №34 заказчик произвел предоплату на сумму 3 443 527 рублей, между тем платежными поручениями от 17.10.2016 №2013 на сумму 2 000 000 рублей и от 17.10.2016 №2014 на сумму 1 443 527 рублей поставщиком возвращены денежные средства (л.д.105-107, т.18).

Согласно договору поставки от 17.10.2016 ООО «Армэнергопром» (поставщик) обязуется передать в обусловленный срок АО «РСК» (заказчик) товар на сумму 3 333 667 рублей; платежными поручениями от 17.10.2016 №2015 на 696 763 рублей и от 09.11.2016 №2169 на 2 636 904 рублей заказчиком оплачена сумма в размере 3 333 667 рублей, однако соглашением от 31.03.2017 договор от 17.10.2016 расторгнут и предоплата в сумме 3 333 667 рублей зачтена в счет оплаты по договору подряда от 01.10.2016 №10/16/1, что следует из акта взаимозачета от 31.03.2017 №37 (л.д.111-114, т.18).

По договору поставки от 25.05.2017 №25/05 покупатель (АО «РСК») обязался оплатить поставленный поставщиком (ООО «Армэнергопром») товар на сумму 496 722, 22 рублей согласно спецификации к договору; товар на указанную сумму поставлен по товарной накладной от 25.05.2017 №156 и оплачен платежными поручениями от 22.11.2017 №2494 на 496 722, 22 рублей, от 23.11.2017 №2504 на 812 390, 43 рублей, от 24.11.2017 №2513 на 1 000 000 рублей, в результате чего переплата в сумме 1 812 390, 43 рублей отнесена актом взаимозачета от 30.11.2017 №40 на погашение задолженности по договору от 30.06.2017 №30/06 (л.д.117-124, т.18).

В соответствии с договором поставки от 30.06.2017 №30/06 ООО «Армэнергопром» (поставщик) поставило АО «РСК» (покупатель) товар на сумму 3 248 400 рублей согласно спецификации к договору на основании товарной накладной от 30.06.2017 №158, который оплачен платежным поручением от 06.12.2017 №2608 на 1 436 009, 57 рублей, актами взаимозачета от 30.11.2017 №40 и от 30.09.2018 №54 на сумму 1 812 390, 43 рублей (л.д.127-131, т.18).

По договору поставки от 25.08.2017 №25/08, заключенного между АО «РСК» (заказчик) и ООО «Армэнергопром» (поставщик), поставщик поставил товар на указанную сумму на основании товарной накладной от 25.09.2017 №230; заказчик произвел оплату платежными поручениями от 26.02.2018 №303 на сумму 550 000 рублей, от 27.02.2018 №321 на суму 4 000 000 рублей, от 27.02.2018 №331 на сумму 450 000 рублей и от 28.02.2018 №355 на сумму 700 000 рублей (л.д.135-140, т.18).

Согласно договору поставки от 03.09.2018 №5/2018 ООО «Армэнергопром» (поставщик) обязуется поставить АО «РСК» (покупатель) товар согласно спецификации на сумму 20 046 500 рублей; товар поставлен на основании товарной накладной от 30.09.2018 №97; оплачен покупателем посредством уступки права требования по договору цессии от 30.03.2020 (л.д.143-146, т.18).

В силу статьи 506 Гражданского кодекса РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя; покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки (пункт 1 статьи 509, пункт 1 статьи 513 Гражданского кодекса РФ).

Из положений пункта 5 статьи 454, пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса РФ следует, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

По смыслу пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки, иным соглашением сторон.

Судом установлено, что обязательства по договорам поставки исполнены сторонами в полном объеме.  

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что взаимные обязательства сторон по договорам подряда и договорам поставок на общую сумму 398 833 954, 20 рублей исполнены, работы и товары приняты и оплачены без разногласий и замечаний, в связи с чем довод истца о некачественно выполненных ответчиком подрядных работах, повлекших впоследствии возникновение у него убытков, не соответствуют установленным обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.  

Таким образом, истцом не доказано наличие причинной связи между действиями ответчика и указанными истцом последствиями, в связи с чем отсутствуют основания, предусмотренные ст.ст.15, 393 Гражданского кодекса РФ, для возложения на ответчика ответственности в виде взыскания убытков.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов в виде уплаченной истцом при подаче иска в федеральный бюджет государственной пошлины в размере 9 256 рублей,  суд, руководствуясь ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ относит ее на истца в связи с отказом в удовлетворении иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.110, 112, 167–171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина 9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская улица, дом 4, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                        З.Х. Тебуева