Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-88162/23

03 сентября 2025 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Шиляева А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Герасимовой К.А., рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО "ДорСтройСистем" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании штрафных санкций, убытков, неустойки по договору субподряда, встречному иску ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" к ООО "ДорСтройСистем" о признании работ выполненными, взыскании задолженности и неустойки, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «КАШИРСКИЙ МПК», ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МПК», ООО «РТ ИНВЕСТ СТРОЙ»,  

при участии в судебном заседании: от ООО "ДорСтройСистем" – ФИО1, по дов. № ДСС-1-1/2025 от 08.07.2025; 

от ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" – ФИО2, по дов. № 05/25 от 05.05.2025, от третьих лиц – не явились, извещены.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ДорСтройСистем" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по договору № КШМПК-2-110332 от 11.03.2022: неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 32 721 826,26 руб. за период с 01.10.2022 по 16.05.2023 и с 01.07.2023 по 31.07.2023, задолженность по компенсации расходов на электроэнергию в размере 106 444,75 руб., штраф за непредставление банковской гарантии в размере 6 472 465,93 руб., штраф за непредоставление документации, предусмотренной п. 6.1.1. договора, в размере 500 000 руб.; по договору № СПМПК-2-201021 от 20.10.2021: неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 24 600 986,99 руб. за период с 09.01.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 28.05.2023 и с 21.06.2023 по 01.08.2023; задолженность по компенсации расходов на электроэнергию в размере 26 945,36 руб., штраф за непредставление банковской гарантии на новый срок в размере 3 000 000,00 руб., штраф за непредоставление документации, предусмотренной п. 6.1.1. договора, в размере 500 000,00 руб., штраф по предписания  

строительного контроля за нарушения ОТ, ЭППБ в размере 500 000,00 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 199 784,16 руб. Всего взыскать 68 928 453,44 руб.  

В остальной части требований отказать. 2. Встречный иск оставить без удовлетворения. 

Взыскать с ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.В. Шиляев