АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А84-4889/2023

27 июля 2023 г.

г. Севастополь

 

  Резолютивная часть решения оглашена 20 июля 2023 года.

        Решение изготовлено в полном объеме 27 июля 2023 года.

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Консорциум строительных компаний», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь,

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Карбон"», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь

о взыскании,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум строительных компаний» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Карбон"» (далее – компания) о взыскании 1 300 000 рублей долга по контракту от 14.02.2022 № 2/2022-О, 133 900 рублей неустойки и неустойку по день фактической оплаты долга.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства,  отзыв на иск не представил, ходатайств не заявлял.

Суд, изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.

Как видно из материалов дела, общество (заказчик) и компания (подрядчик) заключили контракт от 14.02.2022 № 2/2022-О на проведение работ.

Согласно п. 1.1 Контракта Подрядчик, действуя по заданию Генподрядчика обязуется осуществить подготовку проектно-сметную документации, в соответствии с указанными разделами в Техническом задании и сопроводить заказчика на этапе прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Строительство объекта капитального строительства: «Детский сад на 60 мест в г. Севастополе, с. Орловка», на земельном участке с кадастровым номером 91:04:035001:534, площадью 10 000 кв. м, в соответствии с Техническим заданием на проектирование

Стоимость всех работ по Контракту (цена контракта) составляет 2 600 000  рублей (п.2.1. Контракта).

Согласно п. 2.2. Цена Контракта и стоимость его отдельных этапов, порядок, сроки и размеры оплаты определены в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №2).

Заказчик осуществил авансирование в размере 1 300 000 руб.

Между сторонами были подписаны Акты сдачи-приемки выполненных работ от 19.12.2022 г. № 40 и от 22.03.2022 г. № 7 на общую сумму 2 600 000 руб.

Факт наличия и размер задолженности подтверждены Актами сдачи-приеіЦки выполненных работ от 19.12.2022 г. № 40 и от 22.03.2022 г. № 7, и актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2022 по 27.02.2023, подписанный законном представителем ООО «СК «Карбон».

В претензии от 07.04.2023  № 10\123-262\04 общество потребовало погасить задолженность.

В ответе от 19.04.2023 исх. № 91 компания признала долг в размере 1 300 000 руб., однако оплату не произвела.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Ответчик  факт образования, наличие и размер задолженности не оспорил, доказательств погашения или отсутствия задолженности не представил.

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Карбон"», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Консорциум строительных компаний», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь, 1 300 000 рублей долга по контракту от 14.02.2022 № 2/2022-О, 133 900 рублей неустойки, неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга, начиная с 26.04.2023; 27 339 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья

А.Ю. Смоляков