Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-2284/2020

г.Липецк

11 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 2020 года.  

Решение в полном объеме изготовлено 11 сентября 2020 года.     

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Канаевой А.В.,                    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леликовой О.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>)

к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес юридического лица: 

<

...>; адрес филиала: г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, д.33)

о взыскании 21 755 948 руб. 16 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность от 17.03.2020,

от ответчика – ФИО2, доверенность № Д-ЛП/39 от 30.04.2020,

УСТАНОВИЛ:

Общество ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» о взыскании 21 755 948 руб. 16 коп., в том числе 1 968 000 руб. основного долга по договору № 4648009968 от 14.06.2019, 5 548 800 руб. основного долга по договору № 4648009992 от 04.07.2019, 2 951 528 руб. 40 коп. основного долга по договору № 4648010022 от 10.08.2019, 1 545 166 руб. 80 коп. основного долга по договору № 4648010023 от 10.08.2019, 2 945 109 руб. 60 коп. основного долга по договору № 4648010029 от 22.08.2019, 771 410 руб. 40 коп. основного долга по договору № 4648010043 от 05.09.2019, 2 365 740 руб. 96 коп. основного долга по договору № 4648010067 от 21.09.2019, 2 556 880 руб. 80 коп. основного долга по договору № 4648010083 от 28.09.2019 и 1 103 311 руб. 20 коп. основного долга по договору № 4648010104 от 21.10.2019.

Определением арбитражного суда от 16.04.2020 исковое заявление принято к производству.

В настоящем судебном заседании истец поддержал требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении и дополнительных пояснениях, поддержал ранее поданное заявление об отказе от иска в части требования о взыскании основного долга по договору № 4648010043 от 05.09.2019 в размере                   771 410 руб. 10 коп.

Ответчик иск не признал, ссылаясь на доводы, указанные в отзыве, просил отложить судебное разбирательство с целью урегулирования спора мирным путем.

Истец на указанное ходатайство ответчика возразил.

В соответствии с частью 2 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора.

Учитывая, что истец заявил о невозможности урегулирования спора мирным путем, ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства по указанному основанию удовлетворению не подлежит.

Определением от 11.09.2020 (резолютивная часть оглашена 18.08.2020) арбитражный суд принял отказ истца от иска в части требования о взыскании основного долга по договору № 4648010043 от 05.09.2019 в размере 771 410 руб. 40 коп. и прекратил производство по делу в указанной части.

Арбитражный суд, выслушав истца и ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, установил следующее.   

Как видно из материалов дела, между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (подрядчик) подписан договор на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов № 4648009968 от 14.06.2019 (далее – договор-1), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ заказчику: 

- проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием (приложение № 7 к договору) и исходными данными заказчика;

- ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4кВ, расположенных в Елецком, Долгоруковском, Липецком, Грязинском, Данковском, Задонском, Лев-Толстовском, Тербунском районах по договорам ТП (лот 548) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), 

а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 3.1 договора-1 стоимость работ определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии № 0161-ЛП-19 от 04.06.2019 и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение №1 к договору), и составляет 5 790 981 руб. 00 коп., кроме того НДС (20%) – 1 158 196 руб. 20 коп. 

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 6 949 177 руб. 20 коп. (пункт 3.2 договора-1).

В соответствии с пунктом 4.1 договора-1 оплата работ осуществляется в следующем порядке: безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, либо иным способом по согласованию сторон (пункт 4.2 договора-1).

В пункте 5.1 договора-1 стороны согласовали сроки выполнения работ: в течение 52 календарных дней с момента заключения договора:

- начало работ – 14 июня 2019 года;

- завершение работ – 05 августа 2019 года.

Истец выполнил работы по договору-1 на сумму 3 404 498 руб. 40 коп. и передал их результат ответчику по актам о приемке выполненных работ. 

Ответчик частично оплатил стоимость выполненных работ в сумме 1 436 498 руб. 40 коп.

Из материалов дела следует, что неоплаченными остались работы, переданные ответчику по актам о приемке выполненных работ:

- № СКП52/1 на сумму 935 178 руб.; 

- № СКП52/2 на сумму 365 884 руб. 80 коп.; 

- № СКП52/3 на сумму 513 121 руб. 20 коп.; 

- № СКП52/4 на сумму 21 610 руб. 80 коп.; 

- № СКП52/5 на сумму 132 205 руб. 20 коп.

Всего на общую сумму 1 968 000 руб. (т.3, л.д.96-108).

Кроме того, между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (подрядчик) подписан договор на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов № 4648009992 от 04.07.2019 (далее – договор-2), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ заказчику: 

- проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием (приложение № 7 к договору) и исходными данными заказчика;

- ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4кВ, расположенных в Грязинском, Данковском, Липецком, Усманском районах по договорам ТП (лот 561) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго»), 

а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 3.1 договора-2 стоимость работ определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии № 0179-ЛП-19 от 24.06.2019 и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение №1 к договору), и составляет 6 078 286 руб. 00 коп., кроме того НДС (20%) – 1 215 657 руб. 20 коп. 

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 7 293 943 руб. 20 коп. (пункт 3.2 договора-2).

В соответствии с пунктом 4.1 договора-2 оплата работ осуществляется в следующем порядке: безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре, либо иным способом по согласованию сторон (пункт 4.2 договора-2).

В пункте 5.1 договора-2 стороны согласовали сроки выполнения работ: в течение 52 календарных дней с момента заключения договора:

- начало работ – 04 июля 2019 года;

- завершение работ – 24 августа 2019 года.

Истец выполнил работы по договору-2 и передал их результат ответчику согласно следующим документам:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП48 на сумму                  870 000 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП48/1 на сумму 10 940 руб.                 40 коп.;  

- акт о приемке выполненных работ № СКП48/2 на сумму 52 706 руб.              40 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП48/3 на сумму 721 654 руб.                80 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП48/4 на сумму 7 975 руб. 20 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП48/5 на сумму 9 744 руб.;

- акт сдачи-приемки выполненной работы № СКП48/6 на сумму 66 979 руб. 20 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП49 от 23.09.2019 на сумму 1 296 000 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП49/1 на сумму 576 181 руб.             20 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП49/2 на сумму 92 562 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП49/3 на сумму 479 358 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП49/4 на сумму 33 081 руб.               60 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП49/5 на сумму 15 970 руб.                    80 коп.;

- акт сдачи-приемки выполненной работы № СКП49/6 на сумму 98 846 руб.            40 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП53 от 23.09.2019 на сумму 723 600 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП53/1 на сумму 109 465 руб.                   20 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП53/2 на сумму 35 034 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП53/3 на сумму 513 343 руб.                  20 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП53/4 на сумму 10 358 руб.           40 коп.;

- акт сдачи-приемки выполненной работы № СКП53/5 на сумму 55 399 руб. 20 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП55 от 23.09.2019 на сумму 2 659 200 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП55/1 на сумму 2 148 915 руб.               60 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП55/2 на сумму 77 048 руб.                    40 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП55/3 на сумму 175 362 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП55/4 на сумму 7 708 руб. 80 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП55/5 на сумму 4 076 руб. 40 коп.;

- акт сдачи-приемки выполненной работы № СКП55/6 на сумму 246 088 руб. 80 коп.

Всего на общую сумму 5 548 800 руб. (т.1, л.д.80-125).

Из материалов дела видно, что между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (подрядчик) также подписан договор на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов № 4648010022 от 10.08.2019 (далее – договор-3), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ заказчику: 

- проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием (приложение № 7 к договору) и исходными данными заказчика;

- ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 0,4кВ, расположенных в Елецком районе по договорам ТП (лот 557) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), 

а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 3.1 договора-3 стоимость работ определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии № 0170-ЛП-19 от 31.07.2019 и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение №1 к договору), и составляет 2 459 607 руб. 00 коп., кроме того НДС (20%) – 491 921 руб. 40 коп. 

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 2 951 528 руб. 40 коп. (пункт 3.2 договора-3).

В соответствии с пунктом 4.1 договора-3 оплата работ осуществляется в следующем порядке: безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре, либо иным способом по согласованию сторон (пункт 4.2 договора-3).

В пункте 5.1 договора-3 стороны согласовали сроки выполнения работ: в течение 52 календарных дней с момента заключения договора:

- начало работ – 10 августа 2019 года;

- завершение работ – 30 сентября 2019 года.

Истец выполнил работы по договору-3 и передал их результат ответчику согласно следующим документам:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП50 от 23.09.2019 на сумму 2 951 528 руб. 40 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП50/1 на сумму 2 702 118 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП50/2 на сумму 146 547 руб.                   60 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП50/3 на сумму 21 394 руб. 80 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП50/4 на сумму 3 741 руб. 60 коп.;

- акт сдачи-приемки выполненной работы № СКП50/5 на сумму 77 726 руб. 40 коп.

Всего на общую сумму 2 951 528 руб. 40 коп. (т.1, л.д.148-154).

Кроме того, между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (подрядчик) подписан договор на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов № 4648010023 от 10.08.2019 (далее – договор-4), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ заказчику: 

- СМР, ПНР с поставкой оборудования и материалов на объекте 0,4-10кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»: «Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома (ООО «Интер Девелопмент»), расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый номер участка 48:19:0000000:4144 (ТЗ№6238301) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), 

а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 3.1 договора-4 стоимость работ определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии № 0212-ЛП-19 от 31.07.2019 и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение №1 к договору), и составляет 1 287 639 руб. 64 коп., кроме НДС (20%) – 257 527 руб. 93 коп. 

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 1 545 167 руб. 57 коп. (пункт 3.2 договора-4).

В соответствии с пунктом 4.1 договора-4 оплата работ осуществляется в следующем порядке: безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре, либо иным способом по согласованию сторон (пункт 4.2 договора).

В пункте 5.1 договора-4 стороны согласовали сроки выполнения работ: в течение 51 календарного дня с момента заключения договора:

- начало работ – 10 августа 2019 года;

- завершение работ – 29 сентября 2019 года.

Истец выполнил работы по договору-4 на общую сумму 1 545 166 руб.                   80 коп. (т.2, л.д.20-27) и передал их результат ответчику согласно следующим документам:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП54 от 23.09.209 на сумму 1 545 166 руб. 80 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП54/1 на сумму 297 259 руб. 20 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП54/2 на сумму 1 156 360 руб.             80 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП54/3 на сумму 88 447 руб.                     20 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП54/4 на сумму 3 099 руб. 60 коп.

Из материалов дела видно, что между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (подрядчик) также подписан договор на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов № 4648010029 от 22.08.2019 (далее – договор-5), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ заказчику: 

- СМР, ПНР с поставкой оборудования и материалов на объекте 0,4-10кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»: «Переустройство участка ВЛ-10кВ, КТП № 696, участка ВЛ-0,4кВ в с.Преображеновка, Добровского района, Липецкой области» (19-011) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), 

а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 3.1 договора-5 стоимость работ определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии № 0191-ЛП-19 от 12.08.2019 и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение №1 к договору), и составляет 2 750 867 руб. 69 коп., кроме НДС (20%) – 550 173 руб. 54 коп. 

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 3 301 041 руб. 23 коп. (пункт 3.2 договора-5).

В соответствии с пунктом 4.1 договора-5 оплата работ осуществляется в следующем порядке: безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре, либо иным способом по согласованию сторон (пункт 4.2 договора-5).

В пункте 5.1 договора-5 стороны согласовали сроки выполнения работ: в течение 8-ми (восьми) недель с момента заключения договора;

- начало работ – 22 августа 2019 года;

- завершение работ – 16 октября 2019 года.

Истец выполнил работы по договору-5 и передал их результат ответчику согласно следующим документам:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП40 от 23.09.2019 на сумму 2 945 109 руб. 60 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП40/1 на сумму 825 307 руб. 20 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП40/2 на сумму 242 994 руб.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП40/3 на сумму 1 422 130 руб. 80 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП40/4 на сумму 388 152 руб.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП40/5 на сумму 37 320 руб.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП40/6 на сумму 29 205 руб. 60 коп.

Всего на общую сумму 2 945 109 руб. 60 коп. (т.2, л.д.47-63).

Как следует из материалов дела, между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (подрядчик) подписан договор на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов № 4648010067 от 21.09.2019 (далее – договор-6), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ заказчику: 

- СМР, ПНР с поставкой оборудования и материалов на объектах 0,4-10кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»: «Переустройство ВЛ-10кВ 

<

...> отделение, кадастровый № 48:11:0000000:6915», «Переустройство распределительной сети 10кВ, расположенной в Липецкой области, Становлянский район, д.Липовка», «Переустройство КЛ-6кВ «Птицефабрика левая/правая» при пересечении с автомобильной дорогой Р-205 «Липецк-Данков» на участке, попадающем в зону строительства объекта в районе ул.Опытная Лебедянского шоссе, ул.В.Музыки в г.Липецке», «Переустройство участка 2*КЛ-6кВ, попадающих в зону строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул.Опытная Лебедянского шоссе, ул.В.Музыки в г.Липецке 1 этап» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), 

а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 3.1 договора-6 стоимость работ определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии № 0254-ЛП-19 от 11.09.2019 и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение №1 к договору), и составляет 5 296 175 руб. 37 коп., кроме НДС (20%) – 1 059 235 руб. 07 коп. 

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 6 355 410 руб. 44 коп. (пункт 3.2 договора-6).

В соответствии с пунктом 4.1 договора-6 оплата работ осуществляется в следующем порядке: безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре, либо иным способом по согласованию сторон (пункт 4.2 договора-6).

В пункте 5.1 договора-6 стороны согласовали сроки выполнения работ: в течение 8-ми (восьми) недель с момента заключения договора;

- начало работ – 21 сентября 2019 года;

- завершение работ – 15 ноября 2019 года.

Истец выполнил работы по договору-6 и передал их результат ответчику согласно следующим документам:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП61 от 30.09.2019 на сумму 1 565 299 руб. 20 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП61/1 на сумму 1 500 052 руб.              80 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП61/2 на сумму 50 868 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП61/3 на сумму 14 378 руб.                    40 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП62 от 25.10.2019 на сумму 2 256 129 руб. 60 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП62/1 на сумму 734 586 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП62/2 на сумму 1 490 875 руб.               20 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП62/3 на сумму 22 784 руб. 40 коп;

- акт о приемке выполненных работ № СКП62/4 на сумму 7 884 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП62 от 02.12.2019 и акт приема-передачи на сумму 14 750 руб. 88 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП61/1 от 02.12.2019 и акт приема-передачи на сумму 24 644 руб. 40 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП59/1 от 02.12.2019 и акт приема-передачи на сумму 62 786 руб. 88 коп.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП60 от 02.12.2019 и акт приема-передачи на сумму 7 429 руб. 20 коп. 

Всего на общую сумму 4 677 670 руб. 56 коп. (т.2, л.д.130-141, т.3, л.д.109-116).

Ответчик частично оплатил стоимость выполненных работ в сумме 2 311 929 руб. 60 коп.

Кроме того, между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (подрядчик) подписан договор на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов № 4648010083 от 28.09.2019 (далее – договор-7), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ заказчику: 

- проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием (приложение №7 к договору) и исходными данными заказчика;

- ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10кВ, ТП 10/0,4кВ, ЛЭП 0,4кВ, расположенных в Лебедянском районе по договору ТП (лот 565) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), 

а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 3.1 договора-7 стоимость работ определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии № 0228-ЛП-19 от 18.09.2019 и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение №1 к договору), и составляет 3 250 000 руб. 00 коп., кроме НДС (20%) – 650 000 руб. 00 коп. 

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 3 900 000 руб. 00 коп. (пункт 3.2 договора-7).

В соответствии с пунктом 4.1 договора-7 оплата работ осуществляется в следующем порядке: безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре, либо иным способом по согласованию сторон (пункт 4.2 договора-7).

В пункте 5.1 договора-7 стороны согласовали сроки выполнения работ: в течение 52 календарных дней с момента заключения договора:

- начало работ – 28 сентября 2019 года;

- завершение работ – 18 ноября 2019 года.

Истец выполнил работы по договору-7 на общую сумму 2 556 880 руб.                80 коп. (т.3, л.д.17-24) и передал их результат ответчику согласно следующим документам:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП63 от 09.12.2019 на сумму 2 556 880 руб. 80 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП63/1 на сумму 488 341 руб. 20 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП63/2 на сумму 36 736 руб.            80 коп.; 

- акт о приемке выполненных работ № СКП63/3 на сумму 1 932 429 руб.                 60 коп.; 

- акт сдачи-приемки выполненной работы № СКП63/7 на сумму 99 373 руб. 20 коп.

Из материалов дела видно, что между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (подрядчик) также подписан договор на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов № 4648010104 от 21.10.2019 (далее – договор-8), согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ заказчику: 

- СМР, ПНР по объекту: «Переустройство ВЛ-10кВ № 12 «Комплекс Боринский» ПС-35/10кВ «Борино» от опоры №53 до опоры №62, ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №270 в с.Боринское от опоры №1 до опоры №11, ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП №270) от опоры №1 до опоры №11» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго», 

а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 3.1 договора-8 стоимость работ определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии № 0285-ЛП-19-2 от 11.10.2019 и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение №1 к договору), и составляет 2 900 000 руб. 00 коп., кроме НДС (20%) – 580 000 руб. 00 коп. 

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 3 480 000 руб. 00 коп. (пункт 3.2 договора-8).

В соответствии с пунктом 4.1 договора-8 оплата работ осуществляется в следующем порядке: безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре, либо иным способом по согласованию сторон (пункт 4.2 договора-8).

В пункте 5.1 договора-8 стороны согласовали сроки выполнения работ: в течение 8-ми (восьми) недель с момента заключения договора;

- начало работ – 21 октября 2019 года;

- завершение работ – 15 декабря 2019 года.

Истец выполнил работы по договору-8 на общую сумму 1 103 311 руб.            20 коп. (т.3, л.д.44-49) и передал их результат ответчику согласно следующим документам:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № СКП66 от 13.12.2019 на сумму 1 103 311 руб. 20 коп.;

- акт о приемке выполненных работ № СКП66/1 от 13.12.2019 на сумму 144 682 руб. 80 коп.;

 - акт о приемке выполненных работ № СКП66/3 от 13.12.2019 на сумму 958 628 руб. 40 коп.

26.02.2020 истец вручил ответчику претензии №№ 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 от 25.02.2020, в которых указал на наличие задолженности по договорам и предложил оплатить ее.

Неоплата ответчиком стоимости выполненных работ в полном объеме послужила основанием для обращения истца в суд.

Проанализировав условия заключенных между сторонами договоров, суд приходит к выводу, что по своей правовой природе они являются договорами строительного подряда, и взаимоотношения сторон должны регулироваться нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Материалами дела подтверждается факт выполнения истцом работ по договорам на общую сумму 24 732 965 руб. 76 коп., из них по договору-1 на сумму 3 404 498 руб. 40 коп., по договору-2 – 5 548 800 руб., по договору-3 – 2 951 528 руб. 40 коп., по договору-4 – 1 545 166 руб. 80 коп., по договору-5 – 2 945 109 руб. 60 коп., по договору-6 – 4 677 670 руб. 56 коп., по договору-7 – 2 556 880 руб.                80 коп., по договору-8 – 1 103 311 руб. 20 коп.

Акты и справки подписаны ответчиком без замечаний.

Ответчик частично оплатил стоимость выполненных работ в сумме 3 748 428 руб., из них по договору-1 – 1 436 498 руб. 40 коп., по договору-6 – 2 311 929 руб. 60 коп.

Задолженность составляет 20 984 537 руб. 76 коп. (24 732 965 руб. 76 коп. – 3 748 428 руб.), из них по договору-1 – 1 968 000 руб., по договору-2 – 5 548 800 руб., по договору-3 – 2 951 528 руб. 40 коп., по договору-4 – 1 545 166 руб. 80 коп., по договору-5 – 2 945 109 руб. 60 коп., по договору-6 – 2 365 740 руб. 96 коп., по договору-7 – 2 556 880 руб. 80 коп., по договору-8 – 1 103 311 руб. 20 коп.

Указанные размеры задолженности по каждому из договоров также подтверждаются актом сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020-01.03.2020, подписанным ответчиком без возражений.

В силу пунктов 12 и 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» наличие актов приемки работ, подписанных заказчиком, не лишает последнего права представить суду возражения по объему, стоимости работ и качеству их выполнения.

Согласно пункту 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

В ходе рассмотрения дела ответчик оспорил объем и качество выполненных истцом работ.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих, что объем и качество выполненных истцом работ не соответствуют условиям договоров, ответчиком не представлено, ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы не заявлено.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку ответчик доказательств, подтверждающих оплату стоимости выполненных работ в полном объеме, не представил, а также не представил доказательств освобождающих его от исполнения принятого на себя обязательства, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании задолженности в сумме 20 984 537 руб. 76 коп. является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.   

При обращении в суд истцу была предоставлена отсрочка в уплате государственной пошлины.

При цене иска 20 984 537 руб. 76 коп. размер государственной пошлины составляет 127 923 руб.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены в полном объеме, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 127 923 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес юридического лица: 

<

...>; адрес филиала: г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, д.33) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК Подгоренское» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) 20 984 537 руб. 76 коп., в том числе                  1 968 000 руб. основного долга по договору № 4648009968 от 14.06.2019, 5 548 800 руб. основного долга по договору № 4648009992 от 04.07.2019, 2 951 528 руб.                     40 коп. основного долга по договору № 4648010022 от 10.08.2019, 1 545 166 руб.        80 коп. основного долга по договору № 4648010023 от 10.08.2019, 2 945 109 руб.               60 коп. основного долга по договору № 4648010029 от 22.08.2019, 2 365 740 руб.    96 коп. основного долга по договору № 4648010067 от 21.09.2019, 2 556 880 руб.  80 коп. основного долга по договору № 4648010083 от 28.09.2019 и 1 103 311 руб. 20 коп. основного долга по договору № 4648010104 от 21.10.2019.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес юридического лица: 

<

...>; адрес филиала: г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, д.33) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 127 923 руб.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок со дня принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                             А.В.Канаева