АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

г. Барнаул                                                                         Дело № А03-10558/2022

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2022 года   

Решение изготовлено в полном объеме 26 октября 2022 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), место нахождения: 659308, 

<

...>) к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации города Бийска» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), место нахождения: 659300, 

<

...>) о взыскании 68 213 руб. 37 коп.,

при участии:

от истца: ФИО2 - представителя  по доверенности; 

от ответчика: не явился,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (далее – истец, подрядчик) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации города Бийска» (далее – ответчик, заказчик) о взыскании 68 213 руб. 37 коп. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту № 38 от 23.11.2020. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в судебное заседание явку своего представителя не обеспечил. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Дорожник» (подрядчик) и  муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации города Бийска» (заказчик) заключен муниципальный контракт № 38 от 23.11.2020 (далее – контракт), в соответствии с пунктом 1.1 которого подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными  силами, своевременно, по заданию заказчика выполнить работы качественно и в полном объеме в соответствии с Описанием объекта закупки - техническим заданием на выполнение работ по объекту «Ремонт дороги по ул. Каховская  (от пер. Шубенский до пер. Яровой) в г. Бийске», «Ремонт дороги по пер. Муромцевский (от ул. Владимира Короленко до ул. Иркутская) в г. Бийске», «Ремонт дороги по ул. Пригородная (от ул. Каховская до ул. Ефима Мамонтова) в  г. Бийске»  (приложение №1 к контракту, является его неотъемлемой частью) и проектной (сметной) документацией в сроки, указанные в контракте, графике выполнения работ по объекту «Ремонт дороги по ул. Каховская (от пер. Шубенский до пер. Яровой) в г. Бийске», «Ремонт дороги по пер. Муромцевский                                        (от ул. Владимира Короленко до ул. Иркутская) в г. Бийске», «Ремонт дороги по ул. Пригородная (от ул. Каховская до ул. Ефима Мамонтова) в г. Бийске» (приложение №2 к контракту, является его неотъемлемой частью) и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно пунктам 3.1, 3.2 контракта, цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта  составляет: 60 390 950 руб. 40 коп., в том числе НДС.

Оплата стоимости выполненных работ производится заказчиком в срок не более 30 дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

В силу пункта 5.1 контракта, работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются подрядчиком в следующие сроки:  начало выполнения работ - с момента заключения контракта; окончание выполнения работ - в соответствии с графиком выполнения работ до 20.08.2021. Работы выполняются в сроки, установленные графиком выполнения работ, приведенным в приложении № 2 к контракту.

Давая оценку спорным отношениям, суд установил, что между сторонами контракта возникли правоотношения, которые регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) – подряд, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Согласно статье 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

На основании пункта 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (часть 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 9.8, 9.9 контракта, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Ответчиком обязанность по оплате выполненных истцом работ была исполнена ненадлежащим образом, в связи с чем истцом была начислена неустойка в сумме 395 327 руб. 71 коп.

В свою очередь,  истцом также  было допущено нарушение условий контракта, в связи с чем ответчиком также была начислена неустойка в сумме 327 113 руб. 34 коп.

Соглашением  от 21.12.2021 о расторжении муниципального контракта № 38 от 23.11.2020 (далее - Соглашение) контракт расторгнут в связи с его фактическим исполнением.

Пунктами 4, 5 Соглашения  стороны подтвердили, что за период с 23.11.2020 по 20.08.2021 сумма фактически исполненных обязательств по контракту подрядчиком (стоимость фактически выполненных работ) составляет:  58 552 150 руб. 53 коп., в том числе НДС, с учетом удовлетворения взаимных требований заказчика и подрядчика о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту. Сумма принятых обязательств по контракту заказчиком (стоимость фактически выполненных работ и размер неустойки после взаимозачета) составляет: 58 620 366 руб. 90 коп., в том числе НДС. 

 В пунктах 6, 7 соглашения стороны согласовали, что сумма требований заказчика по ненадлежащему исполнению обязательств по контракту подрядчиком в части нарушения сроков выполнения работ составляет 327 113 руб. 34 коп. и зачитывается в оплату требований подрядчика по оплате неустойки, предъявленной заказчику. Сумма требований подрядчика по ненадлежащему исполнению обязательств по контракту заказчиком в части нарушения сроков оплаты выполненных работ составляет 395 329 руб. 71 коп. и частично погашается размером требований заказчика в сумме 327 113 рублей, предъявленной подрядчику.

Таким образом, часть начисленной истцом ответчику неустойки была погашена путем зачета встречных требований на сумму 327 113 руб. 34 коп., начисленная неустойка в сумме 68 216 руб. 37 коп. ответчиком оплачена не была.

Вместе с тем, истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 68 213 руб. 37 коп., которое поддержано представителем истца в судебном заседании.

Ответчик возражений по иску и доказательств оплаты  предъявленной ко взысканию неустойки в суд не представил.  

При изложенных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

решил:

взыскать с  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Бийска» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» 68 213 руб. 37 коп. неустойки и 2 729 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                    Е.А. Сосин