Арбитражный суд Республики Алтай  

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-2094/2022

город Горно-Алтайск

22 ноября 2023 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном  заседании, материалы дела по исковому заявлению Министерства экономического  развития Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И.Чаптынова,  д. 24, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) к Муниципальному унитарному предприятию  «Тепловодстрой Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Нагорная, д. 23, с.  Усть-Кокса, р-н. Усть-Коксинский, Республика Алтай),  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, ФИО2, ФИО3  

об обязании ответчика безвозмездно устранить выявленные недостатки жилых  помещений, расположенных по адресу: Республика Алтай, 

<

...> и привести в соответствие с условиями  государственных контрактов № 0177200000920002796 и № 0177200000920002798 в течение  30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

В судебном заседании участвуют представители: 

от истца – ФИО4 представитель по доверенности от 23.05.2023 сроком на  один год, диплом,  

от ответчика – ФИО5 директор (личность установлена), ФИО6  представитель по доверенности от 20.09.2023 сроком на 1 год, диплом,  

от третьих лиц – от администрации МО «Усть-Коксинский район» РА – ФИО7 представитель по доверенности от 01.06.2023 сроком на один год, диплом,  

от иных третьих лиц - не явились, уведомлены. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

исковые требования Министерства экономического развития Республики Алтай  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И.Чаптынова, д. 24, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай) к Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодстрой  Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Нагорная, д. 23, с. Усть-Кокса, р-н.  Усть-Коксинский, Республика Алтай) удовлетворить.  

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодстрой Сервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Нагорная, д. 23, с. Усть-Кокса, р-н. Усть- Коксинский, Республика Алтай) безвозмездно устранить выявленные недостатки жилого  дома и жилых помещений, расположенных по адресу: Республика Алтай Усть-  

<

...> и привести в соответствии с  условиями государственных контрактов № 0177200000920002796 и   № 0177200000920002798 в течение 30 дней с момента вступления решения суда в  законную силу, а именно:  

1. пер. Тихий, д. 6 - демонтаж поврежденных участков бетонной отмостки,  выполнение отсыпки вымытого грунта, выполнение работ, препятствующих вымыванию  грунта - организация водоотвода, монтаж новой отмостки;  

1.2. демонтаж существующего утеплителя, монтаж нового утеплителя. Плотность и  толщину утеплителя привести в соответствие со строительными нормами;  

1.3. демонтаж существующего навесного фасада, демонтаж утеплителя, замена  крепежных элементов навесного фасада, монтаж нового утеплителя и нового навесного  фасада. Плотность и толщину утеплителя, а так же систему нового навесного фасада  привести в соответствие со строительными нормами;  

1.4. монтаж водосточной системы с организацией водоотвода; 

2.1. пер. Тихий, д.6, кв. 1 - демонтаж конструкций полов, выполнить конструкции  пола в соответствии со строительными нормами;  

2.2. шпатлевание, покраска стен, очистка поврежденных плесенью участков стен  противогрибковыми составами;  

2.3. шпатлевание, покраска стен, герметизация и пароизоляция участков прохода  коммуникаций сквозь перекрытие, очистка поврежденных плесенью участков потолков  противогрибковыми составами;  

2.4. демонтаж имеющегося трубопровода, устройство нового специального  воздуховода (из оцинкованной стали), утепление воздуховода;  

2.5. демонтаж существующих фасонных элементов герметизации узлов прохода  труб сквозь кровлю, монтаж элементов заводского исполнения;  

2.6. демонтаж электропроводки открытого типа, монтаж повой электропроводки в  металлических трубах в соответствии с ПУЭ;  

2.7. разборка и сборка резьбовых соединений с применением резьбовых  герметиков;  

2.8. на выпуск дымовой трубы установить зонт для защиты от атмосферных  осадков;  

2.9. оконные блоки привести в соответствие с Техническим заданием (Приложение   № 1 к государственному контракту).  

3. пер. Тихий, д.6, кв.2 - демонтаж конструкций полов, выполнить конструкции  пола в соответствии со строительными нормами;  

3.1. шпатлевание, покраска стен; 

3.2.шпатлевание, покраска стен, герметизация и пароизоляция участков прохода  коммуникаций сквозь перекрытие, очистка поврежденных плесенью участков потолков  противогрибковыми составами;  

3.3. демонтаж имеющегося трубопровода, устройство нового специального  воздуховода (из оцинкованной стали), утепление воздуховода;  

3.4. демонтаж существующих фасонных элементов герметизации узлов прохода  труб сквозь кровлю, монтаж элементов заводского исполнения;  

3.5. демонтаж электропроводки открытого типа, монтаж повой электропроводки в  металлических трубах в соответствии с ПУЭ;  

3.6. разборка и сборка резьбовых соединений с применением резьбовых  герметикой;  

3.7. на выпуск дымовой трубы установить зонт для защиты от атмосферных  осадков;  

3.8. оконные блоки привести в соответствие с Техническим заданием (Приложение   № 1 к государственному контракту).  

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Тепловодстрой Сервис»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Нагорная, д. 23, с. Усть-Кокса, р-н. Усть- Коксинский, Республика Алтай) в пользу Министерства экономического развития  Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И.Чаптынова, д. 24, г.  Горно-Алтайск, Республика Алтай) судебные расходы на проведение экспертизы в сумме  190656 (сто девяносто тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей.  

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Тепловодстрой Сервис»  (ОГРН 1060404009600, ИНН 0406004870, ул. Нагорная, д. 23, с. Усть-Кокса, р-н. Усть- Коксинский, Республика Алтай) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Республики Алтай.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно было  предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в  форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной  подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его  размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса  «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.Ф. Кириченко